9/2021-54532(4) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-2092/2020

г. Чебоксары

20 мая 2021 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Юрусовой Н.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

товарищества собственников жилья "Парус", ИНН:2130214705  ОГРН:1192130011292, 428000, 

<

...>,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Старко", ИНН:2129014959  ОГРН:1022101270146, 428001, 

<

...>,  

третьи лица: Администрация города Чебоксары Чувашской Республики, г. Чебоксары, 

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Старко",  г.Чебоксары,  

общество с ограниченной ответственностью "Сити Сервис", г. Чебоксары.  об устранении строительных недостатков многоквартирного жилого дома,  при участии  

от истца - ФИО2 по доверенности от 05.06.2020 (т. 1 л.д. 40, 42), от ответчика – ФИО3 по доверенности от 13.06.2020 (т.1 л.д. 63-64), 

руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Старко" в  течение месяца с момента вступления решения в законную силу выполнить  следующие работы по устранению недостатков, допущенных при строительстве  жилого многоквартирного дома № 5 по улице Дзержинского города Чебоксары  

согласно заключению эксперта общества с ограниченной ответственностью "Юта"  от 05.04.2021 № 09-04/2021:  

Перечень и объем работ, подлежащих выполнению с целью устранения выявленных 

недостатков: 

п/п  

Наименование работ  

Ед.изм.  

количество 

Раздел 1. Полы паркинга на отм. -6,000; -3,000 

1 

Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий  

100 м2  

68,706  

2 

Обеспыливание поверхности 

м2 

6870,6  

3 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого  проникновения: за 1 раз полов  

100 м2  

68,706  

4 

Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких,  слабо-и не впитывающих влагу оснований  

кг 

707,7  

5 

Железнение цементных покрытий 

100 м2  

68,706  

Раздел 2. Внутренняя отделка коридоров, лестничных клеток, технических помещений 

6 

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по  штукатурке и сборным конструкциям: потолков,  

подготовленных под окраску 

100 м2  

23,3758  

7 

Окрашивание водоэмульсионными составами  поверхностей потолков, ранее окрашенных:  

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски  до 35%  

100 м2  

23,3758  

8 

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по  штукатурке и сборным конструкциям: стен,  

подготовленных под окраску 

100 м2  

79,103  

9 

Окрашивание водоэмульсионными составами  поверхностей стен, ранее окрашенных:  

водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски  до 35%  

100 м2  

79,103  

10  

Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД- БИО  

т 

6,866  

Раздел 3. Монтажные работы 

Система противопожарной автоматики 

11  

Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля  

шт 

1 

12  

Блок бесперебойного питания: ИВЭПР  

шт 

1 

13  

Извещатель ПС автоматический: дымовой,  фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в  

нормальном исполнении 

шт 

32 

14  

Извещатель пожарной дымовой оптико-аналоговый Рубеж ИП212-64 npoT.R3(IP40) 

10 шт  

3,2 

15  

Извещатель пожарный дымовой: ИП-212-79 "Аврора- ДА"  

10 шт  

3,2 

16  

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок  электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,  

сигнальная лампа) управления и сигнализации,  количество подключаемых концов: до 2  

шт 

6 

17  

извещатель пожарный ручной Рубеж ИПР 613-11  пpoт.R3  

шт 

6 

18  

Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с  электрическим или пневматическим приводом  

периметром: до 5600 мм 

шт 

5 

19  

Клапаны противопожарные универсальные с  электрическим приводом Belimo nfa с возвратной  

пружиной 

шт 

5 

20  

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2  

100 м  

1,7 

21  

Кабель пожарной сигнализации КПСнг-FRLS 1x2x0,5  

1000 м  

0,17 

Вентиляция 

22  

Шкаф управления и регулирования 

шкаф  

5 

23  

Шкаф контрольно-пусковой для систем пожаротушения  и дымоудаления, мощность управляемой нагрузки 4  

кВт, номинальный коммутируемый ток 10 А  

шт 

5 

Раздел 4. Пуско-наладочные работы 

АПС (Автоматическая пожарная сигнализация) и СОУЭ (Система оповещения и  управления эвакуацией людей), дымоудаления и пожаротушения  

24  

Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения 

шт 

1 

25  

Автоматизированная система управления II категории  технической сложности с количеством каналов (Кобщ):  

80 

система  

1 

26  

Автоматизированная система управления II категории  

технической сложности с количеством каналов (Кобщ):  за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке  02-01-002-09  

канал  

48 

Дымоудаления и пожаротушения 

27  

Автоматизированная система управления II категории  технической сложности с количеством канатов (Кобщ):  

40 

система  

1 

28  

Автоматизированная система управления II категории  технической сложности с количеством каналов (Кобщ):  

за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке  02-01-002-07  

канал  

30 

Вентиляция 

29  

Система дымоудаления при количестве обслуживаемых  этажей: до 25  

система  

8 

Определение мест повреждений на линиях 

30  

Автоматический локальный искатель повреждения на  линиях 500-750 кВ типа ЛИДА  

шт 

5 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Старко" в  доход федерального бюджета 6000 (Шесть тысяч) руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение месяца с  момента его принятия.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Юрусова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.07.2020 6:17:13

 Кому выдана Юрусова Нина Владимировна