33/2021-85905(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А47-17259/2020

г. Оренбург

22 июня 2021 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Вишняковой А.А., при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Бобковой К.А., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению  

некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно- коммунального хозяйства Оренбургской области», ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Оренбург  

к обществу с ограниченной ответственностью «Маруся Строй», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Оренбург 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

1. общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания жилищным фондом - Центральная», г.  Оренбург, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  

2. общество с ограниченной ответственностью «56  Альпинистов», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Оренбург  

об обязании устранить дефекты 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования некоммерческой организации «Фонд  модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской  области» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Маруся  Строй» в течение месяца с даты вступления решения суда в законную  силу безвозмездно устранить дефекты в рамках гарантийных  

обязательств по договору подряда № СМР-79/2019 от 26.04.2019 по  адресу: г.Оренбург, пр. Победы, д. 2А:  

- устранить неисправность крепления ограждений кровли  перилами – 49 м.п. (КС-2 от 23.12.2019г. позиция 60/65);  

- устранить неисправность крепления ходового настила - 4 шт.  (отсутствуют 4 ходовых доски) (КС-2 от 23.12.2019 позиции с 87/92  по 90/95);  

- устранить неисправность крепления водосточного желоба (с  креплением фальц) - 9 м.п.( КС-2 от 23.12.2019 позиции 56/61; с 91/96  по 97/102);  

-устранить неисправность устройства молниезащиты (требуется  вкопать контур заземления в глубину на 2 м.) (КС-2 от 23.12.2019г.  позиции с 98/103 по 100/105);  

- восстановить асфальтовое покрытие в местах устройства  молниезащиты (после того как контур заземления будет вкопан на 2м.)  (КС-2 от 23.12.2019г. позиции с 98/103 по 100/105);  

- устранить нарушение штукатурного слоя вентканалов ( КС-2 от  23.12.2019 позиция 71);  

-устранить неисправность окрасочного слоя вентканалов (КС-2 от  23.12.2019 позиция 74, КС-2 от 23.12.2019 (доп. работы) позиция   № 14/72-17/75);  

- устранить нарушения герметичности примыкания кровельного  покрытия вентиляционным шахтам (КС-2 от 23.12.2019 позиции с 51/56  по 56/61);  

- восстановить герметичность в местах крепления антенных мачт  (путем замены листов кровельного покрытия (фальцевых картин) в  местах крепления антенных мачт, демонтаж/ монтаж конька) (КС-2 от  23.12.2019 позиции с 51/56 по 56/61);  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Маруся  Строй» в пользу некоммерческой организации «Фонд модернизации  жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»  государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

Исполнительные лист выдать истцу в порядке статей 319, 320  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)  через Арбитражный суд Оренбургской области.  

 Судья А.А. Вишнякова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.06.2020 16:10:11

 Кому выдана Вишнякова Алла Александровна