﻿Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-117930/2020

28 ноября 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  23 ноября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  28 ноября 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

истец ООО "ИКР-ГРУПП" 

ответчик ООО "СТРОЙ СОФТ" 

третье лицо 1.ООО "АВТОПИТЕР.РУ"; 2.Газораспределительная организация "Петербурггаз"

о взыскании 

при участии

от истца адвокат Тарасова И.А. по доверенности №1 от 27.05.2021, Винников И.В. генеральный директор по решению №3 от 26.11.2019, адвокат Кочергин К.В. по доверенности №1 от 22.06.2021

от ответчика Шумилов М.В. представитель по доверенности от 25.12.2020

установил:

ООО "ИКР-ГРУПП" (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО "СТРОЙ СОФТ" (далее – Ответчик) с требованием об обязании передать исполнительную документацию по Договору № 3ГСН от 15 марта 2017 года, по условиям которого Ответчик обязался выполнить работы по монтажу внеплощадочных сетей газоснабжения административно-складского комплекса на объекте, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предпрятия Шушары, уч.739 центральный участок 2.

Ответчик против иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Суд установил следующее.

15.03.2017 г. между ООО «ИКР-групп» (далее по тексту – Истец) и ООО «Строй Софт» (далее по тексту Ответчик) был заключен Договор № 3ГСН от 15.03.2017г. (далее по тексту -  Договор), в соответствии с которым Ответчик принял на себя обязательства выполнить работы по монтажу внеплощадочных сетей газоснабжения Административно-складского комплекса на объекте, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия Шушары, уч.739 центральный участок 2 и сдать её результат Истцу. Также к заключенному Договору прилагалось Задание на выполнение работ по Договору, в котором Сторонами был оговорен перечень необходимых работ в рамках Договора (Приложение №1 к Договору) и локальная смета, утвержденная Сторонами (Приложение №2 к Договору). 

Согласно п. 2.4 Договора Истец принял на себя обязательство по уплате аванса в размере 70% от суммы Договора в течение пяти дней с момента подписания Договора. Денежные средства в размере 70% от суммы Договора, что составляет 3 183 228 (три миллиона сто восемьдесят три тысячи двести двадцать восемь) руб. 70 коп. были переведены на расчетный счет Ответчика, что подтверждается ПП №123 от 17.03.2017 г.

Остальная часть цены работы должна быть оплачена Истцом в течение пяти дней после подписания акта приемки выполненной работы.

Дополнительно, по запросу Ответчика (письмо исх. №423 от 25.10.2017 г.), Истцом была перечислена сумма в размере 501 012 рубль 95 копеек на составление Исполнительной документации, вышеуказанная сумма была переведена на расчетный счет Ответчика ПП № 702 от 31.10.2017 г.

Согласно п. 5.3 Ответчик принял на себя обязательство по передаче Истцу вместе с результатом работы по Договору документации, касающейся эксплуатации или иного использования результата работы.

Документация, касающаяся эксплуатации или иного использования результата работы, передача которой предусмотрена п. 5.3. Договора, до настоящего времени в надлежащем виде и в полном объеме в адрес Истца не передана, что подтверждается письмом Ответчика, направленном в адрес Истца (исх. №441 от 17.11.2017 г.).

В ООО «ИКР-Групп» посредством электронной почты, в копиях, от Ответчика переданы следующие документы:

1. Акт законченного строительства объекта ГСН;

2. Строительный паспорт газопровода СД ГСН с приложениями;

3. Акт приёма-передачи бетонного основания под ШРП;

4. Сообщение о начале строительства;

5. Приказ на ответственных по строительству;

6. Договор об оказании услуг по строительному контролю (техническому надзору);

7. Приказ на технический надзор (Трубецков А.О.);

8. Аттестация на технический надзор;

9. Приказ на авторский надзор (Софьин А.М.);

10. Аттестация на авторский надзор;

11. СРО ООО «СПЕЦМОНТАЖ»;

12. Аттестация сварки;

13. Свидетельство на манометр № 2729, № 51341;

14. Приказы ООО «СПЕЦМОНТАЖ»;

15. Аттестация специалистов ООО «СПЕЦМОНТАЖ»;

16. Договор с лабораторией ЗАО «СПБВЕРГАЗ»;

17. Аттестация лаборатории и специалистов ЗАО «СПБВЕРГАЗ»;

18. Договор с лабораторией ООО «Центр Контроля Качества»;

19. Аттестация лаборатории и специалистов ООО «Центр Контроля Качества»;

20. Протоколы пробно допускных стыков;

21. Журнал производства работ;

22. Журнал сварочных работ;

23. Акты на прокалку и проверку свойств электродов;

24. Акты, протоколы качества сварных стыков;

25. Акты освидетельствования скрытых работ;

26. Акт испытания газопровода перед ГНБ;

27. Акт продувки газопровода СД ГСН;

28. Акт продувки газопровода СД ГСН;

29. Акт испытания газопровода СД ГСН;

30. Акт испытания газопровода СД ГСН;

31. Акт испытания газопровода СД ГСН;

32. Акт испытания газопровода СД ГСН;

33. Исполнительная документация на проколы;

34. Отчет измерений и испытаний № 146/2017 от 04.10.2017 г.;

35. Акт входного контроля среднего давления ГСП;

36. Документы на ШРП мод. ИТГАЗ-А/149-2;

37. Декларация, экспертное заключение на задвижку клиновую полнопроходную с ПЭ патрубками AVK DN150;

38. Паспорт на плиту под задвижку 500x500x55;

39. Сертификат соответствия, паспорт на КШ-150с;

40. Декларация о соответствии на СИ-150с;

41. Паспорт на СИ-150с, зав. №1776008;

42. Письмо о включении в реестр оборудования ЗАО «МАЛЕН»;

43. Сертификат соответствия, паспорт на трубу ПЭ 100 ГАЗ SDR 1 1 о 160х 14,6х 1,1 ПРОТЕКТ;

44. Сертификат соответствия, паспорт на отвод 90° о160спигот;

45. Сертификат соответствия, паспорт на заглушку э.с. ПЭ э.с. о160;

46. Сертификат соответствия, паспорт. Цокольный газовый ввод ЦВ-1 ФТ 160/159 с футляром о273 (L=l,58 м);

47. Сертификат соответствия, паспорт на муфту ПЭ э.с. о 160;

48. Сертификат соответствия, паспорт на тройник ПЭ о 160 спигот;

49. Паспорт на песок;

50. Сертификат соответствия, паспорт. Лента сигнальная «ГАЗ»;

51. Сертификат качества на трубу о 159x4,5;

52. Сертификат качества на трубу ©89x3,5;

53. Сертификат качества на трубу о57хЗ,5;

54. Сертификат качества на трубу Ду25хЗ,2;

55. Сертификат качества на отвод 90 о89хЗ,5, отвод 90 о159x4,5;

56. Сертификат качества на переход К 159x4,5-57x3,0;

57. Паспорт качества на грунтовку ГФ-021;

58. Паспорт качества на эмаль ПФ-115;

59. Паспорт на ковер с бетонной подушкой;

60. Свидетельство, сертификат качества на электроды LB 52U о2,6;

61. Свидетельство, сертификат качества на электроды LB 52U оЗ,2;

62. Сертификат качества на полосу стальную 40x4;

63. Журнал авторского надзора;

64. Рабочий проект шифр 01/02-15-ГСН с нанесённым исполнением. 

Не переданы ни в копиях,  ни в оригиналах следующие документы:

1. Контрольно исполнительная съемка;

2. Акт о восстановлении благоустройства территории после прокладки газопровода;

3. Исполнительная съемка газопровода (в реестре значится под порядковым номером 64);

4. Журнал антикоррозионной защиты;

5. Акт разбивки трассы газопровода;

6. Исполнительная схема разбивки трассы газопровода;

7. Расположение сетей наружного газопровода в плане;

8. Продольный профиль газопровода;

9. Акт на монтаж кронштейнов наружного газопровода по фасаду здания;

10.           Акт на антикоррозионная обработка сварных швов крепления кронштейнов наружного газопровода;

11.           В актах скрытых работ отсутствует описание или наименование работ, на которые составлен Акт;

12.           Акт на подготовку поверхности надземного газопровода под покраску;

13.           Акт на грунтовку поверхности надземного газопровода на два раза;

14.           Акт на покраску поверхности надземного газопровода на два раза;

15.           Акт на устройство траншей под газопровод;

16.           Акт на устройство основания под трубу подземного газопровод;

17.           Акт на устройство защитного футляра газопровода;

18.           Акт на герметизацию защитного футляра газопровода;

19.           Акт на устройство защитного слоя подземного газопровода, укладка сигнальной ленты;

20.           Акт на обратную засыпку траншей подземного газопровода с послойным уплотнением;

21.           Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ) (приложение П СП 42-101-2003);

22.           Разрешение Горгаза на эксплуатацию газопровода;

23.           Строительный паспорт наружного газопровода;

24.           Строительный паспорт ГРП (приложение Т СП 42-101-2003);

25.           Паспорт на песок и ГПС для обратной засыпки котлованов.

Производство работ и основной состав исполнительной документации по проектированию, строительству и реконструкции газораспределительных систем регламентируется СП 62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы", СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". 

В силу п. 2.4. Договора, основанием для возникновения обязательства Истца по оплате выполненных работ является сдача результата работ Истцу и передача документации, касающаяся эксплуатации или иного использования результата работы.

Отсутствие вышеперечисленной документации не позволяет Истцу до настоящего времени передать результат работы Заказчику – ООО «АВТОПИТЕР.РУ», не позволяет поставить газовую трубу на гарантийное обслуживание, не позволяет произвести действия по регистрации прав на вновь созданный объекта в регистрирующем органе, что тем самым прямо нарушает права Истца. 

В соответствии с действующим законодательством РФ в адрес Ответчика Истцом «21» августа 2020 г. посредством курьерской службы доставки по известному Истцу адресу было направлено претензионное письмо-уведомление с требованием, в том числе передать оригиналы исполнительной документации в адрес ООО «ИКР-Групп».

Изготовление исполнительной документации оплачено Истцом, она является неотъемлемой частью акта приема-передачи оконченных работ и должна быть передана Истцу в соответствии с условиями договора и действующего законодательства РФ в оригиналах.

В отзыве на иск ответчик заявил, что о нарушении своего права на получение исполнительной документации истец узнал 17.11.2017, следовательно, срок исковой давности истек 17.11.2020. 

Однако, как правильно указывает истец, исковое заявление было направлено Почтой России в суд 16.10.2020, ввиду чего срок исковой давности не может считаться пропущенным.

В дополнительном отзыве ответчик сослался на отсутствие со стороны истца доказательств, что отсутствие указанной в иске исполнительной документации препятствует сдаче объекта заказчику, регистрации прав на объект и постановке его на гарантийное обслуживание. 

Ответчик указал, что им была подготовлена исполнительная документация, оригиналы которой переданы в Газораспределительную организацию «Петербурггаз», подтверждением чему служит введение газопровода в эксплуатацию. 

В связи с доводами ответчика суд удовлетворил ходатайство ответчика о привлечении заказчика объекта – ООО «Автопитер.ру» - и ООО «Петербурггаз» в качестве третьих лиц без самостоятельных требований. В общество «Петербурггаз» был направлен запрос, в ответе на который третье лицо сообщило, что пуск газа на объекте был произведен 28.11.2017; исполнительно-техническая документация в отношении объекта обществу не передавалась; договор технологического присоединения (и иные договоры) относительно объекта не заключались.

Таким образом, доводы ответчика о передаче исполнительной документации ООО «Петербурггаз» не нашли подтверждения.

Суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 5.3. договора Ответчик принял на себя обязательство по передаче в адрес Истца вместе с результатом работы по договору документацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ. По запросу Ответчика (письмо исх. №423 от 25 октября 2017 года) Истцом была перечислена сумма в размере 501 012 рублей 95 копеек на составление исполнительное документации.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Ответчик не представил сведения и доказательства, что требования истца в той или иной части не соответствуют действующему законодательству, перечень документации избыточен и включает необоснованно заявленные позиции. 

Факт не передачи исполнительной документации, за исключением направленных по электронной почте электронных копий части документов, ответчик не оспаривал. 

При таких обстоятельствах суд полагает иск подлежащим удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. 

Помимо изложенного, истец заявил требование о начислении судебной неустойки в случае неисполнения ответчиком настоящего решения.

В соответствии с п.1 ст.308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Истец просит взыскать с Ответчика неустойку за не передачу документов в сумме 10 000 рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения судебного акта. Суд полагает чрезмерной заявленную неустойку, уменьшает ее с указанием на начало периода просрочки. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Обязать Ответчика - общество с ограниченной ответственностью «Строй-Софт» (ИНН 7806344803) в течение 60 дней с момента вступления решения в законную силу передать Истцу - обществу с ограниченной ответственностью «ИКР-Групп» (ИНН 7820339259) надлежаще оформленные оригиналы исполнительной документации по построенному объекту – газопроводу, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия Шушары, уч.739 центральный участок 2, а именно:

1.                  Акт законченного строительства объекта ГСН;

2.                  Строительный паспорт газопровода СД ГСН с приложениями;

3.                  Акт приёма-передачи бетонного основания под ШРП;

4.                  Сообщение о начале строительства;

5.                  Приказ на ответственных по строительству;

6.                  Договор об оказании услуг по строительному контролю (техническому надзору);

7.                  Приказ на технический надзор (Трубецков А.О.);

8.                  Аттестация на технический надзор;

9.                  Приказ на авторский надзор (Софьин А.М.);

10.              Аттестация на авторский надзор;

11.              СРО ООО «СПЕЦМОНТАЖ»;

12.              Аттестация сварки;

13.              Свидетельство на манометр № 2729, № 51341;

14.              Приказы ООО «СПЕЦМОНТАЖ»;

15.              Аттестация специалистов ООО «СПЕЦМОНТАЖ»;

16.              Договор с лабораторией ЗАО «СПБВЕРГАЗ»;

17.              Аттестация лаборатории и специалистов ЗАО «СПБВЕРГАЗ»;

18.              Договор с лабораторией ООО «Центр Контроля Качества»;

19.              Аттестация лаборатории и специалистов ООО «Центр Контроля Качества»;

20.              Протоколы пробно допускных стыков;

21.              Журнал производства работ;

22.              Журнал сварочных работ;

23.              Акты на прокалку и проверку свойств электродов;

24.              Акты, протоколы качества сварных стыков;

25.              Акты освидетельствования скрытых работ;

26.              Акт испытания газопровода перед ГНБ;

27.              Акт продувки газопровода СД ГСН;

28.              Акт продувки газопровода СД ГСН;

29.              Акт испытания газопровода СД ГСН;

30.              Акт испытания газопровода СД ГСН;

31.              Акт испытания газопровода СД ГСН;

32.              Акт испытания газопровода СД ГСН;

33.              Исполнительная документация на проколы;

34.              Отчет измерений и испытаний № 146/2017 от 04.10.2017 г.;

35.              Акт входного контроля среднего давления ГСП;

36.              Документы на ШРП мод. ИТГАЗ-А/149-2;

37.              Декларация, экспертное заключение на задвижку клиновую полнопроходную с ПЭ патрубками AVK DN150;

38.              Паспорт на плиту под задвижку 500x500x55;

39.              Сертификат соответствия, паспорт на КШ-150с;

40.              Декларация о соответствии на СИ-150с;

41.              Паспорт на СИ-150с, зав. №1776008;

42.              Письмо о включении в реестр оборудования ЗАО «МАЛЕН»;

43.              Сертификат соответствия, паспорт на трубу ПЭ 100 ГАЗ SDR 1 1 о 160х 14,6х 1,1 ПРОТЕКТ;

44.              Сертификат соответствия, паспорт на отвод 90° о160спигот;

45.              Сертификат соответствия, паспорт на заглушку э.с. ПЭ э.с. о160;

46.              Сертификат соответствия, паспорт. Цокольный газовый ввод ЦВ-1 ФТ 160/159 с футляром о273 (L=l,58 м);

47.              Сертификат соответствия, паспорт на муфту ПЭ э.с. о 160;

48.              Сертификат соответствия, паспорт на тройник ПЭ о 160 спигот;

49.              Паспорт на песок;

50.              Сертификат соответствия, паспорт. Лента сигнальная «ГАЗ»;

51.              Сертификат качества на трубу о 159x4,5;

52.              Сертификат качества на трубу ©89x3,5;

53.              Сертификат качества на трубу о57хЗ,5;

54.              Сертификат качества на трубу Ду25хЗ,2;

55.              Сертификат качества на отвод 90 о89хЗ,5, отвод 90 о159x4,5;

56.              Сертификат качества на переход К 159x4,5-57x3,0;

57.              Паспорт качества на грунтовку ГФ-021;

58.              Паспорт качества на эмаль ПФ-115;

59.              Паспорт на ковер с бетонной подушкой;

60.              Свидетельство, сертификат качества на электроды LB 52U о2,6;

61.              Свидетельство, сертификат качества на электроды LB 52U оЗ,2;

62.              Сертификат качества на полосу стальную 40x4;

63.              Журнал авторского надзора;

64.              Рабочий проект шифр 01/02-15-ГСН с нанесённым исполнением;

65.              Контрольно исполнительная съемка;

66.              Акт о восстановлении благоустройства территории после прокладки газопровода;

67.              Исполнительная съемка газопровода (в реестре значится под порядковым номером 64);

68.              Журнал антикоррозионной защиты;

69.              Акт разбивки трассы газопровода;

70.              Исполнительная схема разбивки трассы газопровода;

71.              Расположение сетей наружного газопровода в плане;

72.              Продольный профиль газопровода;

73.              Акт на монтаж кронштейнов наружного газопровода по фасаду здания;

74.              Акт на антикоррозионную обработка сварных швов крепления кронштейнов наружного газопровода;

75.              В актах скрытых работ отсутствует описание или наименование работ, на которые составлен Акт;

76.              Акт на подготовку поверхности надземного газопровода под покраску;

77.              Акт на грунтовку поверхности надземного газопровода на два раза;

78.              Акт на покраску поверхности надземного газопровода на два раза;

79.              Акт на устройство траншей под газопровод;

80.              Акт на устройство основания под трубу подземного газопровод;

81.              Акт на устройство защитного футляра газопровода;

82.              Акт на герметизацию защитного футляра газопровода;

83.              Акт на устройство защитного слоя подземного газопровода, укладка сигнальной ленты;

84.              Акт на обратную засыпку траншей подземного газопровода с послойным уплотнением;

85.              Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ) (приложение П СП 42-101-2003);

86.              Разрешение уполномоченной организации на эксплуатацию газопровода;

87.              Строительный паспорт наружного газопровода;

88.              Строительный паспорт ГРП (приложение Т СП 42-101-2003);

89.              Паспорт на песок и ГПС для обратной засыпки котлованов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Софт» (ИНН 7806344803) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ИКР-Групп» (ИНН 7820339259) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей 00 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Софт» (ИНН 7806344803) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ИКР-Групп» (ИНН 7820339259) неустойку за не передачу вышеуказанных документов в сумме 2 000 рублей за каждый день просрочки с момента истечения срока, указанного в первом абзаце настоящей резолютивной части решения, до момента фактического исполнения судебного акта.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Виноградова Л.В.