РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело №А40-158237/2023-52-1295

26 октября 2023 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 27 сентября 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 26 октября 2023 года.

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

открытого акционерного общества «БАМСТРОЙПУТЬ» (119361, 

<

...>, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 19, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 

<

***>) 

к ответчику ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №12» (125212, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.08.2002, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 27 734 682,61 руб. по договорам от 08.05.2015 №1515187386882090942000000/32/2015-СП, от 08.05.2015 №1515187386872090942000000/31/2015-СП.

при участии:

от истца – ФИО2 (паспорт, диплом, дов. от 02.02.2022),

от ответчика – ФИО3 (паспорт, диплом, дов. от 04.09.2023).

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «БАМСТРОЙПУТЬ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №12» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 27 734 682,61 руб. по договорам от 08.05.2015 №1515187386882090942000000/32/2015-СП, №1515187386872090942000000/31/2015-СП.

Истец заявленные требования поддержал.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, согласно которому указывает, что конкурсный управляющий ФГУП «ГВСУ № 12» подтвердил, что сумма задолженности установлена ранее другим решением суда по делу №А40-107430/2017 на общую сумму 22 418 562, 33 руб. и признана текущей.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения истца и ответчика, оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении требований в полном объеме на основании нижеследующего.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2017 по делу № А40-107430/17-30-124 «Б» возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Ответчика.

После возбуждения производства по делу о банкротстве ФГУП «ГВСУ № 12», на стороне Ответчика образовались неисполненные денежные обязательства перед ОАО «Бамстройпуть» в размере 27 734 682,61 руб. (сумма долга по Договору № 1515187386882090942000000/32/2015-СП от 08.05.2015 в размере 22 418 562,33 руб. и по Договору № 1515187386872090942000000/31/2015-СП от 08.05.2015 в размере 5 316 120,28 руб.). 

Между ОАО «Бамстройпуть» и ФГУП «ГУ «Инстрой» заключен Договор субподряда № 32/2015-СП от 08.05.2015 на выполнение комплекса работ на Объекте.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 05.02.2019 в связи с переименованием и реорганизацией стороной Договора вместо ФГУП «ГУ «Инстрой» стало ФГУП «ГВСУ № 12».

 В соответствии с условиями заключенного договора, Ответчик произвел в адрес Истца платежи в общем размере 93 842 304 руб. 

В ходе исполнения Договора, между Сторонами подписаны акты свидетельствующие об исполнении Договора со стороны Истца на общую сумму 121 105 069,09 руб.

Между Сторонами также подписаны акты оказанных генподрядных услуг по Договору-1 на общую сумму 4 844 202,76 руб.

Таким образом задолженность Ответчика перед Истцом по оплате работ выполненных в рамках Договора-1 составила сумму в размере 22 418 562,33 руб. 

Между ОАО «Бамстройпуть» и ФГУП «ГУ «Инстрой» заключен Договор субподряда № 31/2015-СП от 08.05.2015 на выполнение комплекса работ на Объекте.

В связи с переименованием ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России» в ФГУП «ГВСУ № 13» (на основании приказа директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации от 31.03.2017 № 951) и присоединением последнего в результате проведенной реорганизации к ФГУП «ГВСУ № 12» (на основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 23.06.2017 № 396) - «Подрядчиком» по Договору стало ФГУП «ГВСУ №12».

В соответствии с условиями заключенного Договора-2, Ответчик произвел в адрес Истца платежи в общем размере 20 579 647,02 руб. 

В ходе исполнения Договора-2, между Сторонами подписаны акты свидетельствующие об исполнении Договора-2 со стороны Истца на общую сумму 26 974 757,60 руб.

Между Сторонами также подписаны акты оказанных генподрядных услуг по Договору-2 на общую сумму 1 078 990,30 руб.

Задолженность Ответчика перед Истцом по оплате работ выполненных в рамках Договора-2 составила сумму в размере 5 316 120,28 руб.

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с настоящим иском в суд.

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Истец в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ответчика обращался с заявлением о включении задолженности в размере 22 418 562,33 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Суд определением от 27.06.2023 (резолютивная часть 01.06.2023) прекратил производство по требованию ОАО «Бамстройпуть» о включении требования в реестр требований кредиторов должника ФГУП «ГВСУ № 12» в размере 27 734 682,61 руб., поскольку требование ОАО «Бамстройпуть» в сумме 27 734 682,61 руб., возникло после принятия заявления о признании должника банкротом, то есть после 13.07.2017, является текущим.

При определении порядка предъявления требований кредиторами по текущим платежам в процедуре конкурсного производства необходимо принимать во внимание следующее.

Поскольку требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов, а кредиторы по текущим платежам не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве (пункт 2 статьи 5 Закона о банкротстве), такие требования предъявляются и рассматриваются вне рамок дела о банкротстве. Защита прав кредиторов по текущим платежам осуществляется по общим правилам, установленным нормами арбитражного и гражданского процессуального законодательства.

На основании ст. 5 Закона о банкротстве и с учетом разъяснений, изложенных в п. 16 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» задолженность в сумме 27 734 682,61 руб. относятся к текущим платежам.

Так, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается, следовательно, требование истца о взыскании 27 734 682,61 руб. задолженности является обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном порядке.

В силу п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

При таких обстоятельствах, суд считает требования истца правомерными и подлежащими  удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФГУП «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №12» (ИНН: 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества «БАМСТРОЙПУТЬ» (ИНН: 

<

***>)   задолженность в размере 27 734 682,61 руб., госпошлину в размере 161 674 руб.

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

Р.Е. Галиева