АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-14170/2017

25 марта 2020 года

г. Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кеда Д.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании, дело по исковому заявлению Общества с  ограниченной ответственностью «Крым-Девелопмент» (улица Узловая, д.12, г.  Симферополь, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью «Интерстар-Ресурс-Сервис» (Дворцовое  шоссе, 34, г. Алупка, г. Ялта, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании задолженности 151 867,67 руб. за выполненные работы по  договорам подряда, и  

исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Интерстар- Ресурс-Сервис» к Обществу с ограниченной ответственностью «Крым-Девелопмент» о  взыскании неосновательного обогащения 279 867,95 руб.,  

при участии представителей: 

от ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис» – не явились, заявлено ходатайство о рассмотрении  дела в отсутствие представителя стороны  

от «Крым-Девелопмент» – не явились, заявлено ходатайство о рассмотрении дела в  отсутствие представителя стороны  

от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно требований  ООО «Интекс Девелопмент», ООО «СМУ-1» – не явились, заявлено ходатайство о  рассмотрении дела в отсутствие представителя  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

I) В удовлетворении исковых требований по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Крым-Девелопмент» к обществу с ограниченной  ответственностью «Интерстар-Ресурс-Сервис»:  

1) по договору № 5330-307П/16 от 26.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 14170/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1 (88) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1 (88) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  153 312,10 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 15 331,21 руб. – отказать.  

2) по договору № 5330-502П/16 от 10.10.2016 г. (до объединения дело А83- 14559/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(112) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справки № 1(112) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  138 149,66 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 13 814,96 руб. – отказать.  

3) по договору № 5430-329П/16 от 01.08.2016 г. (до объединения дело № А83- 14922/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания актов № 1(90), 1(125) о приемке выполненных работ  по форме КС-2 и справок № 1(90), 1(125) о стоимости выполненных работ и затрат по  форме КС-3 в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 87 394,97 руб. – отказать.  

4) по договору № 5330-328П/16 от 01.08.2016 г. (до объединения дело № А83- 16457/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(91) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1(91) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу – отказать.  

5) по договору № 154П-07/15 от 02.07.2015 г. (до объединения дело № А83- 16604/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания актов № 3(23), 5-23 о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справок № 3(23), 5-23 о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  819 458,90 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 81 945,89 руб. – отказать.  

6) по договору № 5430-243П/16 от 08.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 16800/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(79) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1(79) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу – отказать.  

7) по договору № 85П-05/15 от 21.05.2015 г. (до объединения дело № А83- 16822/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 2-6 о приемке выполненных работ по форме  КС-2, и справки № 2-6 о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение  одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размене  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 23 573,60 руб. – отказать.  

8) по договору № 5420-499П/16 от 10.10.2016 г. (до объединения № А83- 16982/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(110) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справки № 1(110) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  65 504,51 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 6 550,45 руб. – отказать.  

9) по договору № 1430-573П/16 от 28.10.2016 г. (до объединения дело № А83- 16983/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(116а) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справки № 1(116а) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размене  756 698,55 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 75 669,85 руб. – отказать.  

10) по договору № 5430-308П/16 от 26.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 16984/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(89) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1(89) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  255 145,28 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 25 514,52 руб. – отказать.  

11) по договору № 5420-244П/16 от 08.07.2016 г. (до объединения дело А83- 16985/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(81) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1(81) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  118 554,13 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 11 855,41 руб. – отказать.  

12) по договору № 5430-503П/16 от 10.10.2016 г. (до объединения дело № А83- 16986/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(108) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справки № 1(108) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  881 570,96 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 88 157,09 руб. – отказать.  

13) по договору № 15П-02/15 от 26.02.2015 г. (до объединения дело № А83- 17260/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(38) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1(38) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  159 058,76 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 15 905,87 руб. – отказать.  

14) по договору № 88П/16 от 13.05.2016 г. (до объединения дело № А83- 

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания актов № 1 (106), 1 (122) о приемке выполненных  работ по форме КС-2 и справок № 1 (106), 1 (122) о стоимости выполненных работ и  затрат по форме КС-3 в течение одного дня с момента вступления решения суда в  законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размене  647 191,99 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 64 719,19 руб. – отказать.  

15) по договору № 2400-626П/16 от 01.12.2016 г. (до объединения дело № А83- 17262/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1 (121) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справки № 1 (121) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о понуждении с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  58 220,16 руб.,  

- о понуждении с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 5 822,01 руб. – отказать.  

16) по договору № 337П-11/15 от 23.11.2015 г. (до объединения дело № А83- 17263/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1 (119) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справки № 1 (119) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  542 733,96 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 54 273,39 руб. – отказать.  

17) по договору № 5420-274П/16 от 14.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1 (82) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1 (82) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу – отказать.  

18) по договору № 88П-05/15 от 21.05.2015 г. (до объединения дело № А83- 18501/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания актов № 2-3, 4(3) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справок № 2-3, 4(3) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-  3 в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу – отказать.  

19) по договору № 36П-03/15 от 20.03.2015 г. (до объединения дело № А83- 18530/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1 (17) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1 (17) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу – отказать.  

20) по договору № 14П/16 от 23.03.20162015 г. (до объединения дело № А83- 14258/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1-62 о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1-62 о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение  одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  137 324,50 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 13 732,45 руб. – отказать.  

21) по договору № 5420-302П/16 от 25.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 14259/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(87) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1(87) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  64 266,80 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 6 426,68 руб. – отказать.  

22) по договору № 5440-303/16 от 25.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 14512/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(86) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1(86) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу – отказать.  

23) по договору № 5440-301П/16 от 25.07.2015 г. (до объединения дело № А83- 14513/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1 (85) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1 (85) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  70 113,14 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 7 011,31 руб. – отказать.  

24) по договору № 6185-330П/16 от 01.08.2016 г. (до объединения дело № А83- 14514/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания актов № 1(124), 2 (92), 1 (107) о приемке  выполненных работ по форме КС-2 и справок № 1(124), 2 (92), 1 (107) о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение одного дня с момента вступления  решения суда в законную силу – отказать.  

25) по договору № 5440-305П/16 от 26.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 14557/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1 (84) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1(84) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  80 872,35 руб.,  

- взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 8 087,23 руб. – отказать.  

26) по договору № 374П-12/15 от 23.12.2015 г. (до объединения дело № А83- 14558/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(49) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1(49) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере 9  688,81 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 968,88 руб. – отказать.  

27) по договору № 5330-242П/16 от 08.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 15315/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(76) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 1(76) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  134 910,15 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 13 491,01 руб. – отказать.  

28) по договору № 5700-507П/16 от 10.10.2016 г. (до объединения дело № А83- 18537/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(100) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справки № 1(100) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  138 061,43 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 13 806,14 руб. – отказать.  

29) по договору № 91П-05/15 от 21.05.2015 г. (до объединения дело № А83- 18922/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания актов № 1(9), 2(9) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справок № 1(9), 2(9) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-  3 в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере 1  118 865,81 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 111 886,58 руб. – отказать.  

30) по договору № 214П-07/15 от 08.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 18923/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания актов № 4 (18), 2 (25) о приемке выполненных работ  по форме КС-2 и справок № 4 (18), 2 (25) о стоимости выполненных работ и затрат по  форме КС-3 в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  426 100,18 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 42 610,01 руб. – отказать.  

31) по договору № 211П-07/15 от 01.08.2015 г. (до объединения дело № А83- 18926/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 18/30 о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 18/30 о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  113 168,91 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 11 316,89 руб. – отказать.  

32) по договору № 15П/16 от 29.03.2016 г. (до объединения дело № А83- 20119/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 6 (47) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 6 (47) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  17 287,88 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 1 728,78 руб. – отказать.  

33) по договору № 5420-306П/16 от 26.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 18494/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания актов № 1(83) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справок № 1(83) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу – отказать.  

34) в рамках дела № А83-18325/2017 по договору № 5330-429П/16 от 02.09.2016 г.  (до объединения):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить

 приемку результата работ путем подписания актов № 1(98) о приемке  выполненных работ по форме КС-2 и справок № 1(98) о стоимости выполненных работ и  затрат по форме КС-3 в течение одного дня с момента вступления решения суда в  законную силу – отказать.  

35) по договору № 37П-03/15 от 02.09.2016 г. (до объединения дело № А83- 18925/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 6(16) о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки № 6(16) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  477 406,67 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 47 740,66 руб. – отказать.  

36) по договору № 5440-498П/16 от 10.10.2016 г. (до объединения дело № А83- 18924/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания акта № 1(111) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справки № 1(111) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму задолженности за фактически выполненные работы в размере  73 140,00 руб.,  

- о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму договорной неустойки в размере 7 314,00 руб. – отказать.  

37) по договору № 5440-245П/16 от 08.07.2016 г. (до объединения дело № А83- 18491/2017):  

- о понуждении ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» осуществить приемку  результата работ путем подписания актов № 1(80) о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справок № 1(80) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в  течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу – отказать.  

38) о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму понесенных ООО «КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» убытков,  причиненных неисполнением ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» обязательств по  перечисленным договорам подряда в размере 21 013 750,95 руб. – отказать.  

39) о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ- ДЕВЕЛОПМЕНТ» сумму понесенных ООО «КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» судебных  расходов (судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом) по  оплате стоимости судебных экспертиз в размере 1 876 500,00 руб. – отказать.  

 40) о взыскании с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу ООО «КРЫМ-  ДЕВЕЛОПМЕНТ» государственной пошлины в размере 397 184,00 руб. – отказать.  

II) Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Интерстар-Ресурс-Сервис» к обществу с ограниченной ответственностью «Крым- 

Девелопмент», удовлетворить частично, взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Крым-Девелопмент»:  

1) неосновательное обогащение по Договору подряда № 6185-330П/16 от  01.08.2016 в размере 778 132,09 руб.  

2) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 6185-330П/16 от 01.08.2016 за период с 03.10.2016 по 25.09.2017  включительно в размере 802 866,74 руб.  

3) неосновательное обогащение по Дополнительному соглашению № 1 от  20.09.2016 к Договору подряда № 6185-330П/16 от 01.08.2016 в размере 46 382,65 руб.  

4) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Дополнительному соглашению № 1 от 20.09.2016 к Договору подряда № 6185-330П/16 от  01.08.2016 за период с 17.10.2016 по 25.09.2017 включительно в размере 22 793,76 руб.  

5) неосновательное обогащение по Дополнительному соглашению № 2 от  10.10.2016 к Договору подряда № 88П/16 от 13.05.2016 в размере 131 769 руб.  

6) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Дополнительному соглашению № 2 от 10.10.2016 к Договору подряда № 88П/16 от  13.05.2016 за период 20.11.2016 по 27.10.2017 включительно в размере 50 072,22 руб.  

7) неосновательное обогащение по Договору подряда № 154П-07/15 от 02.07.2015 в  размере 307 886,49 руб.  

8) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 154П-07/15 от 02.07.2015 за период с 01.04.2016 по 27.09.2017  включительно в размере 626 731,58 руб.  

9) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Дополнительному соглашению № 2 от 01.09.2015 к Договору подряда № 154П-07/15 от  02.07.2015 за период с 01.10.2015 по 25.12.2015 включительно в размере 3 528,18 руб.  

10) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Дополнительному соглашению № 3 от 01.10.2015 к Договору подряда № 154П-07/15 от  02.07.2015 за период с 01.12.2015 по 27.09.2017 включительно в размере 273 910,92 руб.  

11) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Дополнительному соглашению № 5 от 13.11.2015 к Договору подряда № 154П-07/15 от  02.07.2015 за период с 01.01.2016 по 27.09.2017 включительно в размере 118 531,98 руб.  

12) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Дополнительному соглашению № 6 от 25.03.2016 к Договору подряда № 154П-07/15 от  02.07.2015 за период с 06.05.2016 по 27.09.2017 включительно в размере 247 090,44 руб.  

13) неосновательное обогащение по Договору подряда № 214П-07/15 от 01.07.2015  в размере 655 967,73 руб.  

14) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 214П-07/15 от 01.07.2015 за период с 01.04.2016 по 26.10.2017  включительно в размере 2 464 111,24 руб.  

15) неосновательное обогащение по Дополнительному соглашению № 1 от  27.08.2015 к Договору подряда № 214П-07/15 от 01.07.2015 в размере 359 695 руб.  

16) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Дополнительному соглашению № 1 от 27.08.2015 к Договору подряда № 214П-07/15 от  01.07.2015 за период с 18.03.2016 по 26.10.2017 включительно в размере 423 001,32 руб.  

17) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Дополнительному соглашению № 2 от 03.08.2015 к Договору подряда № 214П-07/15 от  01.07.2015 за период с 12.09.2015 по 26.10.2017 включительно в размере 244 669,70 руб.  

18) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5700-507П/16 от  10.10.2016 в размере 279 867,96 руб.  

19) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5700-507П/16 от 10.10.2016 за период с 26.12.2016 по 10.10.2017  включительно в размере 161 763,68 руб.  

20) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5330-328П/16 от  01.08.2016 в размере 438 622,88 руб.  

21) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5330-328П/16 от 01.08.2016 за период с 24.09.2016 по 25.09.2017  включительно в размере 201 218,24 руб.  

22) неосновательное обогащение по Договору подряда № 91П-05/15 от 21.05.2015 в  размере 1 118 866,62 руб.  

23) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 91П-05/15 от 21.05.2015 за период с 01.04.2016 по 27.10.2017  включительно в размере 1 398 188,75 руб.  

24) неосновательное обогащение по Договору подряда № 36П-03/15 от 20.03.2015 в  размере 1 522 917,50 руб.  

25) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 36П-03/15 от 20.03.2015 за период с 01.04.2016 по 06.10.2017  включительно в размере 1 687 392,80 руб.  

26) неосновательное обогащение по Договору подряда № 211П-07/15 от 01.08.2015  в размере 113 169 руб.  

27) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 211П-07/15 от 01.08.2015 за период с 01.04.2016 по 27.10.2017  включительно в размере 130 144,35 руб.  

28) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 15П/16 от 29.03.2016 за период с 05.05.2016 по 28.09.2017  включительно в размере 63 377,63 руб.  

29) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5420-306П/16 от  26.07.2016 в размере 1 234 865,81 руб.  

30) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5420-306П/16 от 26.07.2016 за период с 23.09.2016 по 06.10.2017  включительно в размере 585 017,68 руб.  

31) неосновательное обогащение по Договору подряда № 37П-03/15 от 20.03.2015 в  размере 355 609,23 руб.  

32) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 37П-03/15 от 20.03.2015 за период с 01.04.2016 по 27.10.2017  включительно в размере 2 416 395,96 руб.  

33) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5440-245П/16 от  08.07.2016 в размере 799 744,57 руб.  

34) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5440-245П/16 от 08.07.2016 за период с 28.08.2016 по 06.10.2017  включительно в размере 462 709,36 руб.  

35) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 337П-11/15 от 23.11.2015 за период с 29.01.2016 по 18.07.2016, в  размере 276 001,63 руб.  

36) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5330-307П/16 от  26.07.2016 в размере 613 248,40 руб.  

37) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5330-307П/16 от 26.07.2016 за период с 01.10.2016 по 06.10.2017  включительно в размере 284 393,94 руб.  

38) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5430-329П/16 от  01.08.2016 в размере 1 310 241,74 руб.  

39) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5430-329П/16 от 01.08.2016 за период с 01.10.2016 по 06.10.2017  

40) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5430-243П/16 от  08.07.2016 в размере 948 981,81 руб.  

41) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5430-243П/16 от 08.07.2016 за период с 28.08.2016 по 27.09.2017  включительно в размере 469 746 руб.  

42) неосновательное обогащение по Договору подряда № 85П-05/15 от 21.05.2015 в  размере 1 500 000 руб.  

43) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 85П-05/15 от 21.05.2015 за период с 01.04.2016 по 27.09.2017  включительно в размере 1 552 629,60 руб.  

44) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5430-308П/16 в размере 1  020 581,08 руб.  

45) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5430-308П/16 от 26.07.2016 за период с 01.10.2016 по 06.10.2017  включительно в размере 473 294,48 руб.  

46) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5420-244П/16 в размере  323 444,15 руб.  

47) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5420-244П/16 от 08.07.2016 за период с 21.08.2016 по 27.10.2017  включительно в размере 280 102,64 руб.  

48) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5420-274П/16 от  14.07.2016 в размере 653 532,78 руб.  

49) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5420-274П/16 от 14.07.2016 за период с 21.08.2016 по 06.10.2017  включительно в размере 269 255,51 руб.  

50) неосновательное обогащение по Договору подряда № 14П/16 от 23.03.2016 в  размере 374 997,60 руб.  

51) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 14П/16 от 23.03.2016 за период с 14.04.2016 по 25.09.2017  включительно в размере 384 423,98 руб.  

52) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5420-302П/16 в размере  332 004,59 руб.  

53) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5420-302П/16 от 25.07.2016 за период с 01.10.2016 по 27.09.2017  

54) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5440-303П/16 от  25.07.2016 в размере 677 875,44 руб.  

55) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5440-303П/16 от 25.07.2016 за период с 24.09.2016 по 25.09.2017  включительно в размере 310 975,36 руб.  

56) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5440-301П/16 от  25.07.2016 в размере 243 966,74 руб.  

57) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5440-301П/16 от 25.07.2016 за период с 23.09.2016 по 25.09.2017  включительно в размере 112 224,70 руб.  

58) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5440-305П/16 от  26.07.2016 в размере 772 673,95 руб.  

59) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5440-305П/16 от 26.07.2016 за период с 23.09.2016 по 25.09.2017  включительно в размере 355 430,02 руб.  

60) неосновательное обогащение по Договору подряда № 374П-12/15 от 23.12.2015  в размере 359 710,14 руб.  

61) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 374П-12/15 от 23.12.2015 за период с 12.10.2016 по 25.09.2017  включительно в размере 128 920,23 руб.  

62) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5330-242П/16 от  08.07.2016 в размере 541 410,99 руб.  

63) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5330-242П/16 от 08.07.2016 за период с 03.08.2016 по 27.09.2017  включительно в размере 284 917,53 руб.  

64) неосновательное обогащение по Договору подряда № 5330-429П/16 от  02.09.2016 в размере 2 019 804,62 руб.  

65) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 5330-429П/16 от 02.09.2016 за период с 20.11.2016 по 06.10.2017  включительно в размере 926 224,69 руб.  

66) неосновательное обогащение по Договору подряда № 88П-05/15 от 21.05.2015 в  размере 2 218 784,26 руб.  

67) договорную неустойку за нарушение конечного срока выполнения Работ по  Договору подряда № 88П-05/15 от 21.05.2015 за период с 01.04.2016 по 10.10.2017  

68) в удовлетворении остальной части исковых требований, - отказать. 

 III) Всего взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Крым- Девелопмент» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интерстар-Ресурс- Сервис» 45 812 612,20 руб., а также расходы, связанные с оплатой государственной  пошлины в размере 199465,06 руб., судебные издержки по оплате стоимости судебных  экспертиз в размере 1058396,58 руб.  

IV) Возвратить из федерального бюджета излишне оплаченную государственную  пошлину обществу с ограниченной ответственностью «Интерстар-Ресурс-Сервис» в  размере 365654 руб.  

V) Возвратить из федерального бюджета излишне оплаченную государственную  пошлину обществу с ограниченной ответственностью «Крым-Девелопмент» в размере 218  025 руб.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение  двух месяцев со дня принятия (изготовления его в полном объеме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

 Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может  быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья А.Н. Гризодубова