Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«25» августа 2020 г.  Дело № А12-549/2020  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены Викторовны,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией  Александровной,  

при участии в судебном заседании: 

от администрации Рахинского сельского поселения – ФИО1, исполняющая  обязанности главы, решение от 21.11.2019,  

от индивидуального предпринимателя ФИО2 – ФИО3,  представитель по доверенности от 17.02.2020;  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  администрации Рахинского сельского поселения (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 311346008700015) о безвозмездном устранении недостатков работ  по договору на проведение ремонта асфальтобетонного покрытия, по встречному исковому  заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН  

<

***>, ОГРНИП 311346008700015) к администрации Рахинского сельского  поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании задолженности, неустойки, штрафа;  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

по первоначальному исковому заявлению обязать индивидуального предпринимателя  ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 311346008700015) в  течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу  за счет собственных денежных средств выполнить работы по устранению дефектов  выполненных работ по договорам на проведение ремонта асфальтобетонного однослойного  покрытия от 30.07.2019 № 11, от 12.08.2019 № 12, от 19.08.2019 № 13, от 26.08.2019 № 17, а  именно: срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом  холодного фрезерования ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5см. - 173,0 кв.м.;  продувка поверхности - 388,85 кв.м.; розлив вяжущих материалов - 0,272 т; устройство  покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых  типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/.куб. (марка II тип Б) - 388,85 кв.м.;  учитывать изменение толщины на каждые 0,5 см.  

По встречному исковому заявлению взыскать с администрации Рахинского сельского  поселения (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  311346008700015) задолженность по договору от 30.07.2019 № 11 на проведение ремонта  

асфальтобетонного однослойного покрытия в размере 160 159 рублей 30 копеек, по  договору от 12.08.2019 № 12 на проведение ремонта асфальтобетонного однослойного  покрытия в размере 165 046 рублей 70 копеек, по договору от 19.08.2019 № 13 на проведение  ремонта асфальтобетонного однослойного покрытия в размере 167 486 рублей 20 копеек, по  договору от 26.08.2019 № 17 на проведение ремонта асфальтобетонного однослойного  покрытия в размере 205 580 рублей 90 копеек, всего 698 273 рубля 10 копеек, неустойку за  просрочку оплаты за период с 17.09.2019 по 25.08.2020 в размере 34 029 рублей 18 копеек,  всего 732 302 рубля 28 копеек, а также 17 544 рубля 63 копейки в возмещение расходов по  уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части встречных исковых  требований отказать.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 311346008700015) в доход федерального бюджета 6 149  рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца  со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Волгоградской области.  

СУДЬЯ Е.В. Пономарева