Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-86687/23-96-623

31 августа 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 24.08.2023

Полный текст решения изготовлен  31.08.2023

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ИП ФИО2 ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 29.04.2021 к ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 129164, 

<

...>, Э 4 П XXVIII К 9 ОФ 407, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.07.2010, ИНН: 

<

***>, КПП: 771701001 о взыскании 2 359 904, 26 руб.

при участии: 

от истца: ФИО3 по дов. от 27.06.23г.; диплом; 

от ответчика: не явился, извещён,

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО2 (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании (с учётом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ):

- задолженности по договору строительного подряда в размере 2 145 367 два миллиона сто сорок пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 51 копеек;

- неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств в размере 214 536 (двести четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 75 коп.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика, надлежащим образом извещённый, в судебное заседание не явился. Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Частью 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

«26» ноября 2021 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (далее – Ответчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (далее – Истец) заключен договор строительного подряда № СУБ26/11/2021 (далее – Договор). 

«27» января 2022 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору, в соответствии с которым стороны пришли к соглашению о выполнении Подрядчиком дополнительных работ с использованием материалов Заказчика на Объекте Заказчика, общая стоимость которых составляет 2 745 367 (два миллиона семьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят семь) руб. 51 коп. 

В соответствии с п.3 дополнительного соглашения к Договору, дополнительные работы должны быть произведены Подрядчиком в срок с 27 января 2022 г. по 31 июля 2022 г. включительно. 

Согласно п. 7.3 Договора, сдача-приемка фактически выполненных работ осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 

30 июня 2022 г. обязательства по Договору Истцом (подрядчиком)  были исполнены надлежащим образом, в полном объеме. Результаты работ переданы Заказчику своевременно и в полном объеме, что подтверждается подписанными сторонами: 

1. Актом о приемке выполненных работ по форме № КС-2; 

2. Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

3. Актом о выполнении дополнительных работ по дополнительному соглашению к Договору за период с 01.02.2022 г. по 30.06.2022 г. от 30.06.2022 г.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Ответчика (Заказчика) не поступало. 

Согласно п. 2.6. Договора оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании полученного счета путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, полученных Заказчиком до 25 числа текущего месяца. 

В соответствии с п. 2.7 Договора, окончательный расчет производится после выполнения Подрядчиком всех работ по договору, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке предмета договора, с зачетом ранее перечисленных средств подрядчику и суммы средств финансовых гарантий, если они были предусмотрены в договоре подряда, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании полученного счета в течение 10 рабочих дней с момента подписания Акта о выполнении работ и начале гарантийного срока.

Вместе с тем, до настоящего времени выполненные работы Ответчиком оплачены не в полном объеме: из 2 745 367 (два миллиона семьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 51 копеек Ответчиком оплачено лишь 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. По состоянию на «11» апреля 2023 г. задолженность по оплате фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору составляет 2 145 367 (два миллиона сто сорок пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 51 копеек.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком. 

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

Кроме того, ответчик не воспользовался правом на отказ от договора на основании ст. 717 ГК РФ. 

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

В свою очередь иных доказательств, подтверждающих наличие недостатков в выполненных истцом работах, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Поскольку доказательств погашения спорной задолженности по оплате выполненных истцом работ в предусмотренный договором срок ответчиком не представлено, требования иска о взыскании 2 145 367 руб. 51 коп. основного долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств в размере 214 536 (двести четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 75 коп.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с пп. 9.4, 9.7 Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика за несвоевременную оплату выполненных работ уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате. Сумма, подлежащая оплате за несвоевременную оплату выполненных работ возмещается Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования (претензии) Подрядчика. 

Оплата штрафных санкций (в соответствии с п. 9.17 Договора) не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного обязательства, а также от возмещения реального ущерба, возникшего у стороны в связи с ненадлежащим выполнением виновной Стороной своих обязательств.

Истец просит взыскать 10% от суммы, подлежащей оплате.

Расчет неустойки судом проверен, произведён в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, требованиями действующего законодательства, ответчиком контррасчет не представлен. Учитывая установленные судом обстоятельства ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, требования истца в указанной части подлежат удовлетворению.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ИП ФИО2 (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 2 145 367 руб. 51 коп., неустойку в  размере 214 536 руб. 75 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 34 800 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                          П.С. Гутник