100230_2053504 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-3833/2020

13 октября 2020 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Г.И. Субач при ведении  протокола секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства сельского хозяйства и  продовольствия Республики Хакасия (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  акционерному обществу «Центр-Труд» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об  обязании исполнить гарантийные обязательства по контракту от 14.11.2016, взыскании  169 913 рублей 60 копеек, об обязании в случае неисполнения решения возместить расходы  истца по устранению выявленных недостатков.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 174, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: обязать акционерное общество «Центр-Труд» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в течение десяти дней с момента вступления настоящего решения в  законную силу безвозмездно устранить выявленные в течение гарантийного срока  недостатки работ по государственному контракту от 14.11.2016 на объекте - ветеринарный  участок, расположенный по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, а именно устранить:  

- коррозию на столбах и прожилинах заборного ограждения;  

- протекание крыши ветеринарного участка над входной дверью, в месте примыкания  потолочных плит к стенам в тамбуре;  

- перегоревшие светильники Армстронг (6 штук); - оконные наличники, оторвавшиеся от стен; - деформирование отмостки здания, 

предоставив в случае неисполнения ответчиком решения суда в указанный срок, согласно  части 3 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право  Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия осуществить  мероприятия по устранению выявленных недостатков c дальнейшим возложением на  акционерное общество «Центр-Труд» соответствующих расходов.  

2. Взыскать с акционерного общества «Центр-Труд» в пользу Министерства сельского  хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 169 913 (сто шестьдесят девять тысяч  девятьсот тринадцать) рублей 60 копеек штрафа.  

3. Взыскать с акционерного общества «Центр-Труд» в доход федерального бюджета  12 097 (двенадцать тысяч девяносто семь) рублей государственной пошлины по иску.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Жалоба подаётся  через Арбитражный суд Республики Хакасия.  

Судья Г.И. Субач