ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва                                                                                               А40-229648/22-113-1751

21 февраля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 20 февраля 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 21 февраля 2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи А.Г.Алексеева

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Вакуленко А.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» к ООО «Спец РСУ»,

об обязании и взыскании 3 293 030 рублей,

при участии:

от истца – Рахматуллина Н.Н. по доверенности от 2 декабря 2022 г.;

от ответчика – не явился, извещён;

У С Т А Н О В И Л :

Иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств в размере 2 190 000 рублей, перечисленных по договору от 22 сентября 2021 г.№ 226/3671-Д/0000548375 (далее – Договор), заключённому между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик), а также неустойки за просрочку исполнения обязательств, штрафа за неисполнение обязательств, кроме того, об обязании ответчика возвратить переданные ему документы.

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска.

Ответчик, извещённый о месте и времени судебного заседания надлежащим образом согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс), в судебное заседание не прибыл, отзыва на исковое заявление не представил, иск не оспорил.

Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, в порядке статей 122, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Договор заключён на выполнение работ по ремонту станочного парка.

Срок выполнения работ – до 15 декабря 2021 г.

Полный перечень, описание и иные требования к работам и результатам работ определены техническим заданием (приложение №1 к Договору) и локальным сметным расчетом (приложение №8 к Договору).

Согласно раздела 7 технического задания работы должны быть выполнены не позднее:

- горизонтально-расточной станок 2А622Ф2-1 (Инв. № 000550934): 15 декабря 2021 г.;

- станок ФП-37 (Инв. № 13727): 15 декабря 2021 г.;

- токарно-винторезный станок 16К20ФЗС32 (Инв. № 000550935): 30 октября 2021 г.

Согласно пунктам 2.1, 2.5 Договора его цена составляет 7 300 000 рублей.

Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

- аванс 30% от цены Договора в размере 2 190 000 рублей в течение 15-ти рабочих дней после заключения Договора, передачи заказчику счета на оплату и обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с разделом 15 Договора;

- оплата оставшейся части 70% от цены Договора в размере 5 110 000 рублей производится поэтапно исходя из стоимости выполненных работ, согласованной сторонами, в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания заказчиком акта сдачи-приёмки работ и результата работ по каждому этапу работ, на основании счета на оплату.

Согласно доводам истца, срок выполнения работ подрядчиком существенно нарушен, работы по Договору подрядчиком не выполнены.

Истец 25 января 2022 г. направил ответчика претензию № 226/2/2022-ПРЕТ о предупреждении последствиях нарушения исполнения договора с просьбой в кратчайшие сроки выполнить работы, направив в адрес заказчика график выполнения работ.

Ответчик на вышеуказанные требования ответил письмами 7 июля 2022 г. из содержания которых следует, что работы выполнены на сумму 4 338 288 рублей.

При этом, работы к приёмке предъявлены не были, акты сдачи-приёмки не подписаны, доказательств фактического выполнения работ не представлено.

Ответчиком не возвращена документация и электрические схемы, переданная с оборудованием по акту приёма-передач станков от 23 сентября 2021 г. № 226-62/81.

Истцом направлялись письма с напоминаниями о соблюдении графика, ввиду опасения невыполнения работ в срок (от 26 ноября 2021 г. № 226-10-17/5355, протокол от 12 ноября 2021 г. № 24).

Доказательств выполнения работ ответчиком в полном объёме не представлено, что свидетельствует о нарушении условий договора и об отсутствии с его стороны эквивалентного встречного исполнения на перечисленную сумму аванса.

В порядке пункта 14.4 Договора и  статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) истец 23 июня 2022 г. направил ответчику уведомление т 23 июня 2022 г. № 30/2022-ПРЕТ об отказе от Договора с 10 июля 2022 г. в котором также потребовал возврата предварительно уплаченных денежных средств и неустойки (РПО 80082373481927).

Указанное уведомление возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения 28 июля 2022 г.

Законом предусмотрен месячный срок хранения корреспонденции в течение которого адресат имеет возможность получить поступившую корреспонденция. Иное привело бы к ограничению прав сторон и их возможности получать юридически значимые сообщения.

Таким образом, нахождение уведомление в отделении почтовой связи является временем, необходимым для надлежащего уведомления ответчика. Поступление отправления в отделение почтовой связи ответчика не означает его доставку получателю. Получатель вправе получить свою корреспонденцию в течение всего срока её хранения. Корреспонденция хранится в организации почтовой связи в течение месячного срока в течение которого получатель может получить корреспонденцию.

Процессуальной фикцией о надлежащем уведомлении является истечение срока хранения поступившей корреспонденции и отправка её обратно отправителю.

Указанная позиция согласуется с положениями пункта 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25, согласно которому сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Соответственно, в порядке статей 165.1, 450.1 Гражданского кодекса Договор расторгнут 28 июля 2022 г., то есть с момента истечения срока на доставку ему корреспонденции.

Юридическое лицо несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 Гражданского кодекса), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Согласно ст. 165.1 Гражданского кодекса заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Как указано в пунктах 63-65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25, по смыслу пункта 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом.

При этом необходимо учитывать, что юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несёт риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 Гражданского кодекса). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

При рассмотрении требований истца о взыскании с ответчика предварительно перечисленных денежных средств суд пришёл к следующим выводам.

Согласно доводам истца, указанные денежные средства возвращены не были.

Перечисленная в качестве аванса сумма в спорном размере, по мнению истца, является неосновательным обогащением по смыслу статьи 1102 Гражданского кодекса, так как ответчик без законных (договорных оснований) удерживает сумму аванса.

Статьей 1102 Гражданского кодекса установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счет принятых сумм следует квалифицировать как неосновательное обогащение.

Таким образом, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца.

При этом правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» возможно истребование в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. Основания для удержания перечисленных истцом денежных средств в спорном размере отсутствуют.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (пункт 1 статьи 1107 Гражданского кодекса).

Таким образом, из смысла указанной правовой нормы следует, что для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт получения ответчиком имущества либо денежных средств без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований и его размер.

Согласно положениям статьи 1107 Гражданского кодекса на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (статья 431 Гражданского кодекса).

Согласно положениям пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно правовой позиции, сформированной в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 35, если к моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору комиссии, доверительного управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого договора и положениям закона, регулирующим соответствующие обязательства. При этом сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства (пункты 3 и 4 статьи 425 Гражданского кодекса).

Согласно правовой позиции, сформированной в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 35, разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453 Гражданского кодекса при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.).

При рассмотрении требований истца о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ суд пришёл к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу статьи 708 Гражданского кодекса подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

В соответствии с п.7.2 Договора в случае нарушения сроков выполнения работ, установленных в Договоре, подрядчик обязан оплатить пени заказчику в размере 2/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России и начисляется за каждый день просрочки на стоимость невыполненных в срок работ.

Истцом рассчитана неустойка за период с 16 декабря 2021 г. по 10 июля 2022 г.

Кроме того, согласно п.7.5 Договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, подрядчик обязан оплатить штраф в размере 2% от цены Договора.

Как указывает истец, что предусмотренные Договором работы не выполнены, заказчику результат работ не сдан, в соответствии с чем в соответствии с п.7.5 Договора истец рассчитал штраф в размере 146 000 рублей.

Суд не усматривает оснований для удовлетворения указанного требования о взыскании штрафа, так как обязательства не выполнены в том числе в связи с отказом самого истца от Договора. Негативные последствия для ответчика наступили в связи с просрочкой им выполнения работ, за которую взыскана неустойки. Иное приведёт к двойной мере ответственности.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса).

В соответствии со статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса судебные расходы относятся на сторон пропорционально удовлетворённых требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 11, 12, 307, 309, 310, 330, 331, 333 Гражданского кодекса, статьями 4, 9, 65, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса, суд

Р Е Ш И Л :

1.     Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специальное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 1187746377983) в пользу акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ОГРН 1157746176400):

сумму неосновательного обогащения в размере 2 190 000 (два миллиона сто девяносто тысяч) рублей;

неустойку в размере 957 030 (девятьсот пятьдесят семь тысяч тридцать) рублей;

расходы по уплате государственной пошлины в размере 37 715 (тридцать семь тысяч семьсот пятнадцать) рублей 28 копеек;

обязать общество с ограниченной ответственностью «Специальное ремонтно-строительное управление» (ОГРН 1187746377983) передать акционерному обществу «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ОГРН 1157746176400) следующие документы:

-    руководство по эксплуатации Часть 1 от станков горизонтально-расчётные 2А622-1, 2А620-1, 2А622Ф2-1, 2А620Ф2-1;

-    схемы электрические станка 2А622Ф2-1 в количестве 3 шт.;

-    схемы электрические станка ФП-37 в количестве 1 шт.;

-    руководство по эксплуатации 16К20ФЗ.РЭ в количестве 1 шт.;

-    Руководство по эксплуатации (электрооборудование) 16К20ФЗ.РЭ1, в количестве 1 шт;

-    схемы электрические станка 16К20ФЗС32 в количестве 1 шт.

2.     В удовлетворении остальной части иска отказать.

3.     Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                                   А.Г.Алексеев