Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-35802/19

19 июля 2019 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 17 июля 2019 г.

Полный текст решения изготовлен 19 июля 2019 г.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Коваля А.В.

при ведении протокола секретарем с/з ФИО1 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ПАО «МОЭСК» к СНТ «Заречье» о расторжении договора и взыскании расходов за выдачу технических условий,

В судебном заседании участвуют представители:  согласно протоколу 

установил:

Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.08.2015г. № 38-15-9298(911380), взыскании расходов за подготовку и выдачу Технических условий  в размере 3 289 руб. 84 коп.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы искового заявления в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание представителя не направил, в материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-124, 153, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте ВАС РФ http://kad.arbitr.ru/.

Рассмотрев материалы дела, исследовав в порядке ст. 71 АПК РФ имеющиеся доказательства, судом установлено следующее.

Между Публичным акционерным обществом «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») и СНТ «Заречье» заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 28.08.2015 № 38-15-302- 9298(911 380), далее - Договор, согласно п.п. 1, 2 которого сетевая организация (ПАО «МОЭСК») обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (земельных участков согласно плану застройки с 1 по 134, расположенных по адресу: Московская обл., Истринский р-н, с/п Лучинское, дер. Вельяминово, СНТ «Заречье», с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 400 кВт;

- категория надежности: III (Третья);

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0кВт.

В силу п. 5 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения Договора.

Истец в соответствии с п. 6 Договора обязан:

- выполнить возложенные на сетевую организацию мероприятия по технологическому присоединению, указанные в технических условиях (Приложение № 1 к Договору);

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем (Ответчиком) сетевой организации (Истца) о выполнении заявителем технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора;

- не позднее 20 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с соблюдением срока, установленного п. 5 Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Согласно п. 10 Технических условий № 38-15-202-9213(911380/102) от 20.08.2015, являющихся приложением 1 к Договору, и, соответственно, его неотъемлемой частью, которыми определен перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределены обязанности между Сторонами, ПАО «МОЭСК» осуществляет строительство ВЛ -10 кВ, 1 шт., ответвление от ВЛ-10 кВ фид. ФИО2 № 23 фид. 67а ПС № 475 до границ участка Заявителя. Протяженность ВЛ-10 кВ - 0,05 км, сечение провода 70 кв.мм. В месте отпайки установить ЛР-10 кВ.

В соответствии с п. 8 Договора заявитель обязан исполнить мероприятия по технологическому присоединению согласно ТУ, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных ТУ, уведомить сетевую организацию о выполнении ТУ.

В соответствии с п. 11 ТУ Ответчик обязан запроектировать и построить ТП- 10/0,4 кВ. Тип и количество определить проектом. В ТП-10/0,4 кВ смонтировать трансформаторы 10/0,4 кВ суммарной мощностью 400 кВА. Запитать новые ТП-10/0,4 кВ от точек присоединения путем строительства ЛЭП/ВЛ/КЛ-10 кВ. Точную длину трассы, марку и сечение провода/кабеля определить проектом.

Как указывает истец, до настоящего времени Ответчиком не исполнены мероприятия, предусмотренные п. 11 ТУ, последний не уведомил ПАО «МОЭСК» о выполнении ТУ.

Таким образом, с учетом срока, установленного п. 5 Договора, просрочка исполнения Ответчиком обязательств по Договору составляет более 2, 5 лет.

Согласно п. 1 Договора заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора. Плата за технологическое присоединение согласно п. 10 Договора определяется в соответствии с Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2014 № 186-Р и составляет 665 189 рублей 60 коп. (с учетом НДС).

Пунктом 11. Договора определен порядок внесения платы за технологическое присоединение, согласно которому Ответчик осуществляет плату в следующем порядке:

-первый платеж - 10 %, составляющий 66 518,96 руб., в течение 15 дней со дня заключения Договора;

-второй платеж - 30 %, составляющий 199 556,88 руб., в течение 60 дней со дня заключения Договора;

-третий платеж - 20 %, составляющий 133 037,92 руб., в течение 180 дней со дня заключения Договора.

По состоянию на 11.03.2019 Ответчиком осуществлен 1-й платеж в размере 66 518,96 руб. (с учетом НДС), второй и третий платежи в размере 332 594,80 руб. Ответчиком не произведены.

Неисполнение Ответчиком мероприятий, предусмотренных ТУ (просрочка составляет более 2,5 лет), а также невнесение платы за технологическое присоединение в предусмотренном в Договоре размере и порядке (просрочка по оплате 2-го и 3-го платежей составляет более 3 лет) является существенным нарушением условий Договора.

При этом срок действия ТУ, составляющий 2 года, истек 20.08.2017. Ответчик за продлением ТУ, как это предусмотрено п. 27 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения), к Истцу не обращался. Таким образом, в связи с нарушением Ответчиком сроков исполнения своих обязательств по Договору ТП, дальнейшее исполнение сторонами Договора стало невозможным.

В свою очередь, Истец лишился в полном объеме того, на что он вправе был рассчитывать при заключении Договора, а именно, платы за технологическое присоединение в размере 665 189 рублей 60 коп. (с учетом НДС).

ПАО «МОЭСК» разработало и выдало Ответчику Технические условия № 38- 15-202-9213(911380/102) от 20.08.2015, являющиеся приложением 1 к Договору, выполнив один из этапов технологического присоединения.

Плата за подготовку и выдачу ТУ установлена Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.12.2014 № 186-Р и составляет 147,90 руб. без НДС за 1 кВт.

Таким образом, исходя их объема максимальной мощности присоединяемых по Договору энергопринимающих устройств Ответчика (400 кВт) и указанной стоимости за единицу мощности, расходы по подготовке и выдаче ТУ к Договору с учетом НДС составляют 69 808,80 руб.: 147,90 руб. х 400 кВт + 18 % = 69 808,80 руб. Стоимость расходов сетевой организации за подготовку и выдачу технических условий определена законодательно, расходы по выполнению данного мероприятия включены в плату за технологическое присоединение. 

По расчету истца, сумма, подлежащая взысканию с Ответчика в связи с существенным нарушением обязательств по Договору, рассчитанная как разница между стоимостью за подготовку и выдачу ТУ (69 808,80 руб.) и суммой, оплаченной Ответчиком в . рамках Договора (66 518,96 руб.), составляет 3 289, 84 руб.: 69 808,80 руб. - 66 518,96 руб. = 3 289, 84 руб.

Как следует из положений ст.450 ГК РФ расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

Согласно п. 15 Договора договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно п. 2 ст.452 Г К РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

При этом норма п.2. ст.450 ГК РФ определяет, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 1 ст. 65, ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

В силу ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Суд признает допущенные ответчиком нарушения условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям существенными, которые влекут для истца такой ущерб, что истец в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении этого договора, в связи с чем суд признает обоснованным и правомерным заявленное истцом требование о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.08.2015г. № 38-15-9298(911380).

Поскольку ответчик договорные обязательства по подготовке и выдаче Технических условий не исполнил, доводы истца и представленные им документы не оспорил, требование истца о взыскании расходов (платы) за подготовку и выдачу Технических условий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.08.2015г. № 38-15-9298(911380) в размере 3 289 руб. 84 коп. признаётся судом обоснованным.  

Требование закона об обязательном урегулировании спора истцом было соблюдено.

Судебные расходы по госпошлине относятся на ответчика в порядке ст.110 АПК РФ.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 450, 452, 486, 487, 516, 702, 711, 720, 740, 742, 753  ГК   РФ, ст.ст.  101-103,110, 150, 167-171 АПК РФ, суд    

 

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.08.2015г. № 38-15-9298(911380), заключенный между ПАО «МОЭСК» и СНТ «Заречье».

Взыскать с СНТ «Заречье» в пользу ПАО «МОЭСК» расходы (плату) за подготовку и выдачу Технических условий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.08.2015г. № 38-15-9298(911380) в размере 3 289 руб. 84 коп.  и 8 000 руб. расходов на оплату госпошлины.

Решение  может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия

 

Судья                                                                                                          Коваль А.В.