АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443001, г. Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

06 февраля 2025 года Дело № А55-24648/2024  

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Агафонова В.В.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Батуриной Т.В. рассмотрев в судебном заседании 06 февраля 2025 года дело по иску  

некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"  

к обществу с ограниченной ответственностью "Волгарегионстрой-С" об обязании 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Волга" при участии в заседании  

от истца – не явился, извещен, от ответчика – не явился, извещен, 

от третьего лица – не явился, извещен  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Волгарегионстрой-С» (ИНН 

<

***>) в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства по договору № КРСАМ-0602 от 24.10.2016 в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, путем устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ в соответствии с дефектной ведомостью и локальным сметным расчетом, а именно:  

- смонтировать диффузионную подкровельную пленку с соблюдением требований НТД (сплошность покрытия):  

- смонтировать продухи по периметру в коньковой и карнизной части, площадью сечения от 1/300 до 1/500 горизонтальной проекции кровли;  

- вывести фановые трубы за плоскость чердачного помещения; - места примыканий на кровле смонтировать фальцевыми соединениями;  

- доукомплектовать коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю «гребенкой» по форме поперечного сечения профиля;  

- заменить водоотводящий желоб, выполненный из листовой стали с использованием фальцевых соединений.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгарегионстрой-С» (ИНН 

<

***>) в пользу Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" (ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / В.В. Агафонов