900109864_32983163 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ  РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ (в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-25116/22-89-132

г. Москва

09 августа 2022 г.

Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи О.А. Акименко 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Успуном Т.И.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТРОЙ"  (111020, МОСКВА ГОРОД, 2-Я СИНИЧКИНА УЛИЦА, ДОМ 9А, СТРОЕНИЕ 4, ЭТ 3  П I КО 4 ОФ А1Г, ОГРН: 1147746578561, Дата присвоения ОГРН: 23.05.2014, ИНН:  7722844510, КПП: 772201001)  

к ответчику ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (129090, ГОРОД МОСКВА, МИРА ПРОСПЕКТ, ДОМ 9,  СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1157700003230, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН:  7701090559, КПП: 770201001)  

о признании начисления и взыскания неустоек на основании претензий,  выставленных Ответчиком в адрес Истца № ФКР-ПИР-5185/21 от 20.10.2021г. в  размере 892 850,84 (Восемьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 84  копейки и № ФКР-ПИР-5478/21 от 26.10.2021г. в размере 346 062,72 (Триста сорок  шесть тысяч шестьдесят два) рубля 72 копейки за нарушение сроков выполнения работ  по договору от 18.09.2019 № ПКР-003125-19 на выполнение работ по разработке  проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение  работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  г. Москва, ТиНАО, Воскресенское пос. д. 16 незаконными и необоснованными;  

о признании уведомления № ФКР-ПИР-5753/21 от 08.11.2021 г. о расторжении  договора Договор № ПКР-003125-19 от 18.09.2019г. на выполнение работ по разработке  проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение  работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  г. Москва, ТиНАО, Воскресенское пос. д. 16. и решение об одностороннем отказе  Ответчика от исполнения Договора № ПКР-003125-19 от 18.09.2019г. незаконным и  необоснованным;  

о признании начисления и взыскания штрафа Ответчиком с Истца в размере 2  196 692,20 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто два) рубля 20  копеек на основании уведомления № ФКР-ПИР-5753/21 от 08.11.2021 г. и решения об  одностороннем отказе Ответчика от исполнения Договора № ПКР-003125-19 от  18.09.2019г. на выполнение работ по разработке проектной документации по  

капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ТиНАО,  Воскресенское пос. д. 16. незаконным и необоснованным;  

об обязании Ответчика отозвать требования № ФКР-ПИР-5753/21 от  10.12.2021г., выставленное АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) на основании уведомления №  ФКР-ПИР-5753/21 от 08.11.2021 г. и решения об одностороннем отказе Заказчика от  исполнения Договора, содержащее требование об уплате штрафа, об осуществлении  уплаты денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной АКБ "Абсолют  Банк" (ПАО) (Банком-Гарантом) в обеспечение исполнения обязательств Истца по  договору № ПКР-003125-19 от 18.09.2019г. в размере 1 348 876 (Один миллион триста  сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 97 копеек;  

об обязании Ответчика произвести возврат в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) суммы  неосновательного обогащения, средств незаконно полученных Ответчиком по  банковской гарантии в размере 1 348 876 (Один миллион триста сорок восемь тысяч  восемьсот семьдесят шесть) рублей 97 копеек, полученных Ответчиком на основании  требования № ФКР-ПИР-5753/21 от 10.12.2021г., выставленное на основании  уведомления № ФКР-ПИР-5753/21 от 08.11.2021 г. и решения об одностороннем отказе  Заказчика от исполнения Договора, содержащее требование об уплате штрафа об  осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной  АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (Банком-Гарантом) в обеспечение исполнения  обязательств Истца по договору № ПКР-003125-19 от 18.09.2019г.  

при участии: от истца: Брагин А.С. (не допущен); от ответчика: Черников А.В., по дов. от 16.02.2021г.; 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.А. Акименко