Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-165878/2018

21 августа 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  15 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  21 августа 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем П.Е. Голушко

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МИВАР" (адрес:  Россия 188680, д СТАРАЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, ул НИЖНЯЯ 1А, ОГРН:  1044700555844);

ответчик: администрация муниципального образования "ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН" Ленинградской области (адрес:  Россия 188800, г ВЫБОРГ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВЫБОРГСКИЙ р-н, ул СОВЕТОВ 12, ОГРН:  1054700191391);

о взыскании 1171546.86

при участии

-от истца: ФИО1 по доверенности от 27.09.18,

-от ответчика: ФИО2 по доверенности от 28.12.18,

установил:

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МИВАР" предъявило иск о взыскании с Администрации Муниципального Образования "Выборгский Район" Ленинградской Области 903 024 руб. 88 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 268 521 руб. 98 коп. неустойки за просрочку платежа на основании договора уступки прав требования №2 от 20.04.15.

Ответчик иск отклонил, ссылаясь на ненадлежащее выполнение работ.

Судом установлено:

Между Администрацией Муниципального Образования "Выборгский Район" Ленинградской Области – заказчиком и ЗАО "СК "Мишель" – подрядчиком был заключен муниципальный контракт №45-14 МК от 07.07.14 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по адресу: 

<

...> и дополнительное соглашение к нему. 

Цена контракта составляет 903 024 руб. 88 коп. 

Срок выполненных работ – 30 дней с даты заключения контракта.

Подрядчик выполнил работы в установленный срок, что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 05.08.14, подписанным технадзором.

Акт вместе с исполнительной документацией был направлен заказчику, однако заказчиком не подписан.

Мотивированного отказа от подписания акта заказчиком не направлено.

В соответствии со ст. 753 ГК РФ при указанных обстоятельствах работы считаются принятыми.

Оплата задолженности в размере 903 024 руб. 88 коп. ответчиком до настоящего времени не произведена.

Согласно экспертному заключению №12-10/15 от 29.10.15 физико-механические показатели асфальтного бетонного покрытия верхнего слоя соответствуют требованиям СП 78.13330.2012 по коэффициенту уплотнения и ГОСТ 9128-2013 по показателю водоснабжения. Сцепление между верхним и нижним слоем обеспечено. На основании исследования образцов сделан вывод о соответствии предъявляемой конструкции дорожной одежды требованиям данных НТД и муниципального контракта.

20.04.15 между ЗАО "СК "Мишель" и ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МИВАР" заключен договор уступки прав №2, в соответствии с которым право требования оплаты задолженности в размере 903 024 руб. 88 коп. передано ЗАО "СК "Мивар" – истцу по делу.

В соответствии с п. 7. 2. 2 контракта за несвоевременную оплату установлены пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. За период с 01.01.16 по 20.08.19 неустойка составляет 268 521 руб. 98 коп.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлины на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 382, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Администрации Муниципального Образования "Выборгский Район" Ленинградской Области в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МИВАР" 1 171 546 руб. 86 коп., из них: 903 024 руб. 88 коп. основного долга и 268 521 руб. 98 коп. неустойки, а с 21.08.18 неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки по день фактической его уплаты, а также 24 715 руб. 47 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.