ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-188457/21-68-1191

г. Москва

10 декабря 2021 г.

Резолютивная часть решения составлена 17 ноября 2021 г.

Решение в полном объеме изготовлено 10 декабря 2021 г.

Судья Абрамова Е.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ" (121351, МОСКВА ГОРОД, БОБРУЙСКАЯ УЛИЦА, 10, 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2007, ИНН: 

<

***>, КПП: 773101001) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (141400, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.06.2007, ИНН: 

<

***>, КПП: 504701001) о взыскании 18 326 037,80 рублей

при участии:

от истца: ФИО2, доверенность № 30-07/2021 от 30.07.2021, паспорт, диплом;

от ответчика: не явился, извещен.

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца неосновательного обогащения в размере 4 857 172,90 рублей, затрат по договору № 1902/Ус 10-ВнИнж в размере 534 647,20 рублей, штрафных санкций в размере 12 934 217,70 рублей.

В судебном заседании истец на доводах искового заявления настаивал, ссылался на представленные в материалы дела доказательства, просил суд удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный о месте и времени судебного заседания надлежащим образом согласно статье 123 АПК РФ, о чем свидетельствуют Отчет об отслеживании корреспонденции Почты России с приложением реестра корреспонденции суда, в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил, иск по существу не оспорил.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам.

Представитель истца не возражал, а ответчик не представил суду возражения против перехода в основное судебное заседание, в связи с чем, руководствуясь п. 27 постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 20.12.2006 г. № 65 и на основании ч. 4 ст. 137 АПК РФ, суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание для рассмотрения спора по существу.

Непосредственно исследовав и оценив все представленные по делу доказательства, заслушав доводы лиц, явившихся в судебное заседание, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, 19 февраля 2019 года между истцом и ответчиком был заключен договор № 1902/Ус 10-ВнИнж (далее по тексту - Договор), в соответствии с условиями которого, подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором выполнить комплекс работ по устройству внутренних инженерных систем на объекте: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: 

<

...>/Б, стр. 1,2», а генеральный подрядчик обязуется принять выполненные подрядчиком работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Договор был заключен сторонами во исполнение Договора № УС-КА-0182-10/2018 от 24 сентября 2018 г., заключенного между ООО «Усиевича 10» и ООО «КАПИТЕЛЬ» на выполнение строитель-монтажных работ по возведению объекта нового строительства: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: 

<

...>/Б, стр. 1,2».

Согласно п. 3.1. Договора договорная цена, подлежащая оплате подрядчику по договору, определена сторонами протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и составляет 145 050 210 рублей 70 копеек, в том числе НДС 20% 24 175 035 рублей 12 копеек и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

Цена работ определена на основании предварительных объемов и требований к работам, материалам и оборудованию, указанным в Проектной документации и настоящем Договоре, и подлежит уточнению в порядке, предусмотренном п. 3.6 Договора. Окончательная Цена Договора формируется после ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с утвержденными и принятыми объемами.

В соответствии с п. 3.2. Договора в договорную цену включено причитающееся подрядчику вознаграждение, с учётом стоимости всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 2.1 Договора, в том числе:

- стоимость приобретения, поставки необходимого для выполнения строительно-монтажных работ конструкций и материалов, предоставляемых подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением объекта рабочими, в том числе иностранными, а также специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;

- затраты на вывоз строительного мусора и ТБО;

- накладные расходы, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;

- стоимость понесённых подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, электроэнергия, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования до сдачи объекта;

- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;

- затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;

- затраты, связанные с оплатой коммунальных услуг и электроэнергии при строительстве объекта;

- другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств подрядчиком в соответствии с пунктом 2.1 Договора по согласованию с генеральный подрядчиком.

- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на Объекте «в холостую» и «под нагрузкой»;

- затраты, связанные с получением справок и актов о выполнении технических условий ресурсоснабжающих, а также актов и разрешений надзирающих организаций.

Подрядчик вправе по согласованию с генеральным подрядчиком при необходимости перераспределять расходы по статьям затрат в пределах договорной цены по объекту.

В соответствии с п. 4.3. Договора оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется генеральным подрядчиком с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписанных сторонами, в течение 22 рабочих дней, следующих за датой получения генеральным подрядчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учётной документации, указанной в статье 17 настоящего Договора, и при наличии счета-фактуры, который представляется подрядчиком в срок не позднее 5 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3).

В случае перечисления авансового платежа согласно условиям настоящего Договора, оплата выполненных работ производится с учетом удержания авансового платежа, перечисленного подрядчику.

Генеральный подрядчик производит оплату выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ с ежемесячным удержанием генеральный подрядчиком 5 %, в том числе НДС 20%, из денежных средств, подлежащих оплате подрядчику (гарантийная сумма), но не более 5 % от договорной цены, указанной в п. 3.1. Договора.

Удержанная генеральным подрядчиком гарантийная сумма является обеспечением исполнения подрядчиком обязательств по настоящему Договору перед Генеральным подрядчиком.

Удержанные генеральным подрядчиком в качестве гарантийной суммы денежные средства, подлежат возврату подрядчику за исключением сумм, использованных генеральным подрядчиком на устранение дефектов и недостатков в работе подрядчика по Договору.

Удержанные генеральный подрядчиком, в качестве обеспечения выполнения обязательств подрядчика в гарантийный период, денежные средства в размере 5 (Пяти) процентов от договорной цены, подлежат возврату подрядчику по окончании гарантийного срока.

В соответствии с разделом 5 Договора работы по Договору выполняются подрядчиком в следующие сроки: срок начала работ - 01 марта 2019 г.; дата окончания работ - 30 августа 2019 г.

Отдельные виды и этапы работ по настоящем Договору, выполняются Подрядчиком в сроки, согласованные Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору) (п. 5.2. Договора).

Согласно разделу 21 Договора сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленных за отчетный период на основании исполнительной документации и Протокола согласования договорной цены (Приложение №1).

Подрядчик представляет документы (в том числе первичные учетные документы) исполнительную документацию, оформленные в количестве и порядке, предусмотренном настоящим Договором, генеральному подрядчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс-почтой в срок не позднее 25 числа текущего (отчетного) месяца.

Генеральный подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их, подписывает либо направляет подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения.

Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов генеральному подрядчику.

Как усматривается из представленных в материалы дела платежных поручений, распорядительного письма генподрядчика, истец произвел авансирование ответчика в рамках Договора на сумму в размере 126 468 311,83 рублей.

Работы выполнены ответчиком на сумму 121 611 138,93 рублей, что подтверждается: справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 1 (форма КС-2) по Договору за период с 19.02.2019 г. по 30.06.2019 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 (форма КС-3) и акт о приемке выполненных работ № 2 (форма КС-2) по Договору за период с 01.07.2019 г. по 15.07.2019 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 3 (форма КС-2) по Договору за период с 16.07.2019 г. по 31.07.2019 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 4 (форма КС-2) по Договору за период с 01.08.2019 г. по 30.09.2019 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 5 (форма КС-2) по Договору за период с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 6 (форма КС-2) по Договору за период с 01.11.2019 г. по 29.11.2019 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 7 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 7 (форма КС-2) по Договору за период с 20.11.2019 г. по 28.02.2020 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 8 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 8 (форма КС-2) по Договору за период с 29.02.2020 г. по 31.03.2020 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 9 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 9 (форма КС-2) по Договору за период с 01.04.2020 г. по 30.06.2020 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 10 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 10 (форма КС-2) по Договору за период с 01.07.2020 г. по 24.07.2020 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 11 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 11 (форма КС-2) по Договору за период с 25.07.2020 г. по 26.10.2020 г.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 12 (форма КС-3) и актом о приемке выполненных работ № 12 (форма КС-2) по Договору за период с 27.10.2020 г. по 16.11.2020 г.

Доказательств выполнения работ на сумму аванса в размере 4 857 172,90 рублей материалы дела не содержат.

Согласно п.1. ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.2. ст.715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно положениям статьи 450.1 ГК РФ предоставленное правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно п. 36.1 Договора договор, может быть расторгнут (прекращён): по соглашению сторон; в одностороннем порядке при отказе от исполнения Договора одной из сторон в случаях, предусмотренных договором и законодательством Российской Федерации, по решению суда.

Основания для одностороннего расторжения договора генподрядчиком перечислены в п. 36.3 Договора.

05 апреля 2021 года истец ввиду неоднократного нарушения ответчиком условий Договора, в одностороннем порядке расторг Договор с 12 апреля 2021 года, о чем в адрес ответчика было направлено соответствующее уведомление.

Факт направления уведомления подтвержден представленными в материалы дела почтовыми документами.

Мотивированных возражений против расторжения Договора ответчик не заявил, иного из материалов дела не следует. В связи с изложенным, суд пришёл к выводу, что на дату вынесения судебного акта по настоящему делу спорный Договор расторгнут истцом путём одностороннего отказа от договора.

Статьей 1102 ГК РФ установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счет принятых сумм следует квалифицировать как неосновательное обогащение.

Таким образом, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца.

При этом правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» возможно истребование в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. Основания для удержания перечисленных истцом денежных средств в спорном размере отсутствуют.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (пункт 1 статьи 1107 ГК РФ).

Факт перечисления спорных денежных средств ответчику подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями. При этом, доказательств исполнения встречных обязательств по Договору ответчиком на спорную сумму, материалы дела не содержат.

В связи с изложенным, принимая во внимание непредставление сторонами доказательств возврата спорных денежных средств истцу, непредставление ответчиком доказательств выполнения работ по Договору на спорную сумму, суд находит основания для удовлетворения исковых требований в части взыскания неосновательного обогащения по договору 19 февраля 2019 г. № 1902/Ус 10-ВнИнж в заявленном размере.

В соответствии с п. 7.1.6. Договора подрядчик обязуется компенсировать затраты генерального подрядчика за пользование коммунальными услугам, электроэнергией, вывоз строительного мусора и ТБО в период производства работ на основании первичных документов, выставленных генеральным подрядчиком в адрес подрядчика.

Судом установлено, что в ходе исполнения Договора сторонами были подписаны следующие Акты на компенсацию затрат: акт № 243 от 01 июля 2019 года на сумму 40 962,85 рублей; акт № 265 от 01 июля 2019 года на сумму 27 899,51 рублей; акт № 359 от 31 июля 2019 года на сумму 32 331,75 рублей; акт № 468 от 01 октября 2019 года на сумму 32 653,64 рублей; акт № 493 от 01 октября 2019 года на сумму 33 521,64 рублей; акт № 594 от 30 ноября 2019 года на сумму 33 180,64 рублей; акт № 598 от 30 ноября 2019 года на сумму 28 717,85 рублей; акт № 88 от 09 января 2020 года на сумму 23 327,85 рублей; акт № 175 от 01 апреля 2020 года на сумму 23 162,85 рублей; акт № 182 от 01 июня 2020 года на сумму 56 945,98 рублей; акт № 485 от 01 июля 2020 года на сумму 29 108,33 рублей; акт № 492 от 01 сентября 2020 года на сумму 68 341 рублей; акт № 778 от 01 октября 2020 года на сумму 31 991 рублей; акт № 474 от 31 октября 2020 года на сумму 30 891,65 рублей; акт № 849 от 30 ноября 2020 года на сумму 41 610,66 рублей.

Сторонами не представлено доказательств компенсации затрат истца по Договору, в связи с чем исковые требования в части взыскания затрат по Договору также подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Частью 1 статьи 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 29.2.5. Договора в случае невыполнения подрядчиком предписаний представителей генерального подрядчика, технического заказчика соответствующих требованиям действующего законодательства и условиям настоящего Договора, генеральный подрядчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате неустойки в размере штрафа, а подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 100 000 за каждый случай выявленных нарушений, и компенсировать понесённые генеральным подрядчиком убытки по устранению указанных в предписании нарушений.

В соответствии с п. 29.2.17. Договора за нарушение сроков выполнения обязательств подрядчиком, установленных протоколом рабочего совещания, генеральный подрядчик оставляет за собой право выставить штрафные санкции в размере 10 000 тысяч рублей за каждое выявленное нарушение. За неоднократное нарушение (3-х и более раз) подрядчик уплачивает генеральному подрядчику штраф в размере 300 000 рублей.

В соответствии с п. 29.2.8. Договора подрядчик несет ответственность за нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, допущенные его работниками, за несчастные случаи, происшедшие с его работниками при выполнении работ согласно настоящему Договору и на строительной площадке.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком актов и предписаний генерального подрядчика и/или организации строительного контроля в части: невыполнения подрядчиком требований генерального подрядчика и/или организации строительного контроля по соблюдению требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации; невыполнения подрядчиком требований генерального подрядчика и/или организации по строительному контролю о приостановке производства работ на Объекте в связи с выявлением в процессе выполнения строительно-монтажных работ отступлений от требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации; отсутствия исполнительной документации на выполнение работ более трех календарных дней (после определенного генеральным подрядчиком и/или организацией по строительному контролю срока); не уведомления генерального подрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и (или) в связи с исполнением настоящего Договора в порядке и сроки, установленные Договором; не представления генеральному подрядчику необходимой информации, документов (паспортов, сертификатов, стандартов, актов испытаний и т.п.), удостоверяющих качество поставляемых и используемых подрядчиком материалов и оборудования, выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной технической документации в порядке и сроки, установленные Договором; не соблюдение на Объекте необходимых требований электробезопасности, промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии в течение всего срока действия настоящего Договора – подрядчик уплачивает генеральному подрядчику на основании акта и/или предписания генерального подрядчика и/или организации строительного контроля штраф в размере 200 000 рублей за каждый случай выявленного нарушения.

Согласно п. 29.2.10. Договора Подрядчик несёт ответственность за выполнение требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учет и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью Подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причинённый своими действиями или бездействием ущерб Генеральному подрядчику и третьим лицам, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства.

В соответствии с положениями Приложения № 5 к Договору «Ответственность Подрядчика за неисполнение (ненадлежащее исполнение обязательств) по Договору» взысканию с подрядчика подлежит штраф за вышеозначенное нарушение в размере 50 000 рублей.

В соответствии с п. 29.2.17. Договора за нарушение сроков выполнения обязательств подрядчиком, установленных протоколом рабочего совещания, генеральный подрядчик оставляет за собой право выставить штрафные санкции в размере 10 000 тысяч рублей за каждое выявленное нарушение. За неоднократное нарушение (3-х и более раз) подрядчик уплачивает генеральному подрядчику штраф в размере 300 000 рублей.

Согласно п. 29.2.3. Договора в случае нарушения подрядчиком согласованных с генеральным подрядчиком сроков устранения недостатков выполненных работ, генеральный подрядчик вправе предъявить подрядчику требование о выплате генеральному подрядчику неустойки в размере пеней, а подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 0,5 % от договорной цены работ по Договору, указанной в п. 3.1 Договора за каждый день просрочки.

Согласно приложенному расчету истцом начислены штрафные санкции в общем размере 12 934 217,70 рублей.

Ответчик контррасчет не представил, о применении ст. 333  ГК РФ не заявил.

Представленный истцом растёт судом проверен и признан верным. В связи с изложенным, требование истца о взыскании штрафных санкций подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ).

Согласно статье 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Из материалов дела не усматривается несогласия ответчика с заявленными требованиями. Доводов в обоснование своей правовой позиции о непризнании исковых требований ответчиком не представлено, равно как и не представлено доказательств опровергающих доводы истца.

В соответствии со статьями 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 6 марта 2012 г. № 12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Расходы истца по госпошлине взыскиваются с ответчика в соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 307-310, 330, 450.1, 453, 702, 715, 1102, 1107 ГК РФ, ст.ст. 8, 9, 71, 110, 156, 167-171, 180, 181АПК РФ, суд      

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" в пользу ООО "КАПИТЕЛЬ" неосновательное обогащение в сумме 4.857.172 руб. 90 коп., затраты по договору в сумме 534.647 руб. 20 коп., штрафные санкции в сумме 12.934.217 руб. 70 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 114.630 руб.

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

            Судья                                                                                   Е.А. Абрамова