АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 18411/2021

23 ноября 2022 года

г. Ижевск

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 23 ноября 2022 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Торжковой Н.Н., при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме помощником судьи ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Щит-Строй" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 76 403 460 руб. 31 коп. долга по договорам субподряда,   

и встречный иск Федерального  государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление № 4" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Щит-Строй" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 75 914 077 руб. 80 коп.  задолженности по договорам субподряда,  

при участии представителей:

от истца: Мастерских Т.Ф., представитель по доверенности от 02.06.2020;

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности, установил следующее.

Общества с ограниченной ответственностью "Щит-Строй" (далее – истец, ООО «ЩИТ-СТРОЙ») обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства» (далее – ответчик) о взыскании 76 403 460 руб. 31 коп. долга по договорам субподряда (с учетом заявления об уточнении размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятого судом).

Определением суда от 03.08.2022 принят к рассмотрению встречный иск Федерального  государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (прежнее наименование: Федеральное  государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 4») к Обществу с ограниченной ответственностью "Щит-Строй" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 75 914 077 руб. 80 коп.  задолженности по договорам субподряда, договорам поставки (с учетом заявления об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятого судом).

Истец настаивает на исковых требованиях по основаниям, изложенным в иске; заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать с ответчика 76 087 507 руб. 15 коп.; заявил о признании встречного иска.

На основании ст. 49 АПК РФ суд удовлетворил заявленное ходатайство.  

Ответчик возражений не заявил, поддерживает доводы встречного иска. 

Как следует из материалов дела, между ООО «ЩИТ-СТРОЙ» (далее - Субподрядчик) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление №8» (далее – подрядчик)  были заключены договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте, а именно:

 -договор 1820187376662554164000000/1087 от 07.12.2018;

-договор 1820187376662554164000000/1568 от 01.07.2019; 

-          договор 1820187376662554164000000/613 от 26.06.2018;

-договор 1820187376662554164000000/789 от 23.08.2018; 

-          договор 1820187376662554164000000/1311 от 25.03.2019.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №8» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 15.07.2020 прекратило свою деятельность в качестве юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление №4» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>). 

Приказом Директора департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации № 2433 от 27.07.2022г. наименование Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 4» изменено на Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»), запись в ЕГРЮЛ от 05.08.2022 №2227802502673.

Согласно п. 1.1. договора 1820187376662554164000000/1087 от 07.12.2018 Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить горнопроходческие работы на объекте, в объёмах, определённых Техническим заданием, имеющим пометку «для служебного пользования», в установленный Договором срок и в соответствии с условиями настоящего Договора. Исполнительная документация на выполненные работы входит в состав работ и передается Субподрядчиком с актами формы КС-2 и, справками формы КС-3. Отсутствие исполнительной документации, либо ее ненадлежащее оформление/ является самостоятельным основанием для отказа в приемке выполненных работ.

В соответствии с п. 1.2. договора 1820187376662554164000000/1087 от 07.12.2018Субподрядчик обязуется выполнить объем работ, указанный в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и привлеченными им организациями, качественно, в срок и в соответствии с утвержденной Государственным заказчиком (Министерство обороны РФ) или его уполномоченным лицом (Заказчиком) проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объемов работ.

Пунктом 2.6. договора 1820187376662554164000000/1087 от 07.12.2018 предусмотрено, что расчеты за выполненные субподрядчиком работы производится Подрядчиком в пределах выделенных лимитов финансирования на соответствующий год Государственным заказчиком денежными средствами. Подрядчик оплачивает Субподрядчику 95 % стоимости выполненных работ в течение 60 банковских дней, после получения от Субподрядчика оригиналов счетов-фактур, оформленных надлежащим образом и предоставленных с приложением к ним подписанных актов формы КС-2 и справками формы КС-3. бухгалтерских справок, подтверждающих прочие затраты, при условии сдачи всей исполнительной документации, подтвержденной Техническим заказчиком, и по мере поступления денежных средств от Государственного заказчика. Не предоставление исполнительной документации является основанием для отказа в оплате выполненных работ. В случае несвоевременной передачи Субподрядчиком исполнительной документации, срок оплаты, определенной договором, начинает исчисляться с момента ее фактической передачи.

Расчет с Субподрядчиком  производится в пределах 95% от стоимости выполненных работ, оставшиеся 5% резервируются и выплачиваются Субподрядчику в течение 30 банковских дней с момента, подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, оформленного в установленном; порядке, при условии подписания Гос.заказчиком актов формы КС-2 и формы КС-3, сдачи всей исполнительной документации и поступления денежных средств от Государственного заказчика.

Согласно п. 1.1. договора 1820187376662554164000000/1568 от 01.07.2019 Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить горнопроходческие работы на объекте, в объёмах, определённых Техническим заданием (Приложение № 8 к Договору), имеющим пометку «для служебного пользования», в установленный Договором срок и в соответствии с условиями настоящего Договора. Исполнительная документация на выполненные работы входит в состав работ и передается Субподрядчиком с актами формы КС-2 и справками формы КС-3. Отсутствие исполнительной документации, либо ее ненадлежащее оформление является самостоятельным основанием для отказа в приемке выполненных работ.

В соответствии с п. 1.2. договора 1820187376662554164000000/1568 от 01.07.2019 Субподрядчик обязуется выполнить объем работ, указанный в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и привлеченными им организациями, качественно, в срок и в соответствии с утвержденной Государственным заказчиком (Министерство обороны РФ) или его уполномоченным лицом (Заказчиком) проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объемов работ.

Пунктом 2.6. договора 1820187376662554164000000/1568 от 01.07.2019 предусмотрено, что расчеты за выполненные субподрядчиком работы производится Подрядчиком в пределах выделенных лимитов финансирования на соответствующий год Государственным заказчиком денежными средствами. Подрядчик оплачивает Субподрядчику 95 % стоимости выполненных работ в течение 60 банковских дней, после получения от Субподрядчика оригиналов счетов-фактур, оформленных надлежащим образом и предоставленных с приложением к ним подписанных актов формы КС-2 и справками формы КС-3, бухгалтерских справок, подтверждающих прочие затраты, при условии сдачи всей исполнительной документации, подтвержденной Техническим заказчиком, и по мере поступления денежных средств от Государственного заказчика. Не предоставление исполнительной документации является основанием для отказа в оплате выполненных работ. В случае несвоевременной передачи Субподрядчиком исполнительной документации, срок оплаты, определенной договором, начинает исчисляться с момента ее фактической передачи.

Согласно п. 1.1. договора 1820187376662554164000000/613 от 26.06.2018 Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить горнопроходческие работы на объекте, в объёмах, определённых Техническим заданием, имеющим пометку «для служебного пользования», в установленный Договором срок и в соответствии с условиями настоящего Договора. Исполнительная документация на выполненные работы входит в состав работ и передается Субподрядчиком с актами формы КС-2 и справками формы КС-3. Отсутствие исполнительной документации, либо ее ненадлежащее оформление является самостоятельным основанием для отказа в приемке выполненных работ.

В соответствии с п. 1.2. договора 1820187376662554164000000/613 от 26.06.2018 Субподрядчик обязуется выполнить объем работ, указанный в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и привлеченными им организациями, качественно, в срок и в соответствии с утвержденной Государственным заказчиком (Министерство обороны РФ) или его уполномоченным лицом (Заказчиком) проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объемов работ.

Пунктом 2.6. договора 1820187376662554164000000/613 от 26.06.2018, предусмотрено, что расчеты за выполненные субподрядчиком работы производится Подрядчиком в пределах выделенных лимитов финансирования на соответствующий год Государственным заказчиком денежными средствами. Подрядчик оплачивает Субподрядчику 95 % стоимости выполненных работ в течение 60 банковских дней, после получения от Субподрядчика оригиналов счетов-фактур, оформленных надлежащим образом и предоставленных с приложением к ним подписанных актов формы КС-2 и справками формы КС-3, бухгалтерских справок, подтверждающих прочие затраты, при условии сдачи всей исполнительной документации, подтвержденной Техническим заказчиком, и по мере поступления денежных средств от Государственного заказчика. Не предоставление исполнительной документации является основанием для отказа в оплате выполненных работ. В случае несвоевременной передачи Субподрядчиком исполнительной документации, срок оплаты, определенной договором, начинает исчисляться с момента ее фактической передачи.

Расчет с Субподрядчиком производится в пределах 95% от стоимости выполненных работ, оставшиеся 5 % резервируются и выплачиваются Субподрядчику в течение 30 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, оформленного в установленном порядке, при условии подписания Гос.заказчиком актов формы КС-2 и формы КС-3, сдачи всей исполнительной документации и поступления денежных средств от Государственного заказчика.

Согласно п. 1.1. договора 1820187376662554164000000/789 от 23.08.2018 Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить горнопроходческие работы на объекте (вторая очередь) в объёмах, определённых Техническим заданием (Приложение № 8 к договору), имеющим пометку «для служебного пользования», в установленный Договором срок и в соответствии с условиями настоящего Договора. Исполнительная документация на выполненные работы входит в состав работ и передается Субподрядчиком с актами формы КС-2 и справками формы КС-3. Отсутствие исполнительной документации, либо ее ненадлежащее оформление является самостоятельным основанием для отказа в приемке выполненных работ.

В соответствии с п. 1.2. договора 1820187376662554164000000/789 от 23.08.2018 Субподрядчик обязуется выполнить объем работ, указанный в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и привлеченными им организациями, качественно, в срок и в соответствии с утвержденной Государственным заказчиком (Министерство обороны РФ) или его уполномоченным лицом (Заказчиком) проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объемов работ.

Пунктом 2.6 договора 1820187376662554164000000/789 от 23.08.2018 предусмотрено, что расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производится Подрядчиком в пределах выделенных лимитов финансирования на соответствующий год Государственным заказчиком денежными средствами. Подрядчик оплачивает Субподрядчику 95 % стоимости выполненных работ в течение 60 банковских дней, после получения от Субподрядчика оригиналов счетов-фактур, оформленных надлежащим образом и предоставленных с приложением к ним подписанных актов формы КС-2 и справками формы КС-3, бухгалтерских справок, подтверждающих прочие затраты, при условии сдачи всей исполнительной документации, подтвержденной Техническим заказчиком, и по мере поступления денежных средств от Государственного заказчика. Не предоставление исполнительной документации является основанием для отказа в оплате выполненных работ. В случае несвоевременной передачи Субподрядчиком исполнительной документации, срок оплаты, определенной договором, начинает исчисляться с момента ее фактической передачи.

Расчет с Субподрядчиком производится в пределах 95% от стоимости выполненных работ, оставшиеся 5 % резервируются и выплачиваются Субподрядчику в течение 30 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, оформленного в установленном порядке, при условии подписания Государственным заказчиком актов формы КС-2 и формы КС-3, сдачи всей исполнительной документации и поступления денежных средств от Государственного заказчика.

Согласно п. 1.1. договора 1820187376662554164000000/1311 от 25.03.2019 Подрядчик  поручает,  а  Субподрядчик  обязуется  выполнить  горнопроходческие  работы вертикальных восстающих и обделку на сооружениях 0118,0119 (0118) на объекте, в объёмах, определённых Техническим заданием (Приложение № 8 к Договору), имеющим пометку «для служебного пользования», в установленный Договором срок и в соответствии с условиями настоящего Договора. Исполнительная документация на выполненные работы входит в состав работ и передается Субподрядчиком с актами формы КС-2 и справками формы КС-3. Отсутствие исполнительной документации, либо ее ненадлежащее оформление является самостоятельным основанием для отказа в приемке выполненных работ.

В соответствии с п. 1.2. договора 1820187376662554164000000/1311 от 25.03.2019 Субподрядчик обязуется выполнить объем работ, указанный в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и привлеченными им организациями, качественно, в срок и в соответствии с утвержденной Государственным заказчиком (Министерство обороны РФ) или его уполномоченным лицом (Заказчиком) проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объемов работ.

Пунктом 2.6. договора 1820187376662554164000000/1311 от 25.03.2019 предусмотрено, что расчеты за выполненные субподрядчиком работы производится Подрядчиком в пределах выделенных лимитов финансирования на соответствующий год Государственным заказчиком денежными средствами. Подрядчик оплачивает Субподрядчику 95 % стоимости выполненных работ в течение 60 банковских дней, после получения от Субподрядчика оригиналов счетов-фактур, оформленных надлежащим образом и предоставленных с приложением к ним подписанных актов формы КС-2 и справками формы КС-3, бухгалтерских справок, подтверждающих прочие затраты, при условии сдачи всей исполнительной документации, подтвержденной Техническим заказчиком, и по мере поступления денежных средств от Государственного заказчика. Не предоставление исполнительной документации является основанием для отказа в оплате выполненных работ. В случае несвоевременной передачи Субподрядчиком исполнительной документации, срок оплаты, определенной договором, начинает исчисляться с момента ее фактической передачи.

Расчет с Субподрядчиком производится в пределах 95% от стоимости выполненных работ, оставшиеся 5 % удерживаются Подрядчиком в счет гарантийной суммы.

В течение 2019-2020 гг. по указанным договорам были выполнены работы и сданы Заказчику, о чем составлены и подписаны Сторонами Акты о приемке выполненных работ (формы №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы №КС-3).

ООО «ЩИТ-СТРОЙ» 12.07.2021 направило в адрес ФГУП «ГВСУ №4» претензию о нарушении обязательств по оплате выполненных строительно-монтажных работ по заключенным договорам строительного подряда, с требованием погасить задолженность в сумме 79379928 руб. 71 коп. в течение 10 дней.

На момент рассмотрения заявления о взыскании задолженности по договорам субподряда на выполнение строительно-монтажных работ сумма долга ФГУП «ГУСС» составляет 76 087 507 руб. 15 коп., в том числе:

-договор 1820187376662554164000000/1087 от 07.12.2018 - 1 224 278,54 руб.,

-договор 1820187376662554164000000/1568 от 01.07.2019 - 18 195 618,04 руб.,

-договор 1820187376662554164000000/613 от 26.06.2018 - 10 501 627,54 руб.,

-договор 1820187376662554164000000/789 от 23.08.2018 - 32 498 897,17 руб., -         договор 1820187376662554164000000/1311 от 25.03.2019 - 13 667 085,86 руб.

Неисполнение требований претензии в добровольном порядке послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Исследовав и оценив представленные по делу доказательства в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Отношения сторон по исполнению вышеуказанных договоров подлежат регулированию нормами гражданского законодательства о подряде (глава 37 ГК РФ).

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку истец исполнил свои обязательства по выполнению работ, у ответчика возникла обязанность оплатить выполненные работы. 

Между тем, доказательств свидетельствующих об оплате задолженности на момент принятия судом решения по делу в полном объеме в материалы дела ответчиком не представлено, учитывая наличие задолженности, суд считает требования истца законными и обоснованными.

Довод ответчика о том, что распределение денежных средств в пределах цены контрактов осуществляется государственным заказчиком в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных главным распорядителем бюджетных средств, отклоняется судом, поскольку отсутствие надлежащего финансирования ответчика не является основанием освобождения ФГУП «ГУСС» как заказчика по договору от обязанности исполнить обязательства, оплатить выполненные истцом работы. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств, учитывая, что наличие задолженности подтверждено истцом надлежащими доказательствами (ст. 65 АПК РФ), суд признал исковые требования о взыскании 76 087 507 руб. 15 коп.  долга, подтвержденными материалами дела и в силу ст. 309, 310, 702, 711 ГК РФ подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Ответчиком предъявлено встречное исковое заявление о взыскании с истца 75 914 077 руб. 80 коп. долга по договорам № 1820187376662554164000000/1087 от 07.12.2018, № 1820187376662554164000000/1568 от 01.07.2019, №1820187376662554164000000/613 от 26.06.2018, №1820187376662554164000000/1311 от 25.03.2019, №1449 от 27.05.2019, №3140 от  30.12.2020.

В обоснование заявленных требований ответчик ссылается на то, что оказал истцу генподрядные услуги, предоставил истцу электроэнергия, которые истцом не оплачены по договорам №18201873 766625 54164000000/1087 на сумму 10 022 737,90 руб.; № 1820187376662554164000000/1568 на сумму 11 359 990,14 руб.; № 1820187376662554164000000/13111 на сумму 165 416,40 руб.; а также поставил товар, не оплаченный истцом по договорам №1449 от 27.05.2019 на сумму 5 340 425,02 руб.; №3140 от 30.12.2020 на сумму 48 052 508,34 руб.

Задолженность ответчика по оплате в сумме 75 914 077 руб. 80 коп. послужила ответчику основанием для обращения в суд с встречными исковыми требованиями

В силу ст. 747 ГК РФ заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

На основании пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заявлению заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

На основании пункта 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В силу части 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 указанной статьи).

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 части 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска истцом в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска истцом и принятие его судом.

Поскольку признание истцом встречных исковых требований о взыскании 75 914 077 руб. 80 коп. задолженности за генподрядные услуги, за поставленный товар не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, арбитражный суд принимает указанное признание и удовлетворяет заявленные требования о взыскании задолженности в заявленной сумме.

В силу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен момент востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Для зачета по одностороннему заявлению необходимо, чтобы встречные требования являлись однородными, срок их исполнения наступил (за исключением предусмотренных законом случаев, при которых допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил). При зачете нет принципиальных различий по правовым последствиям для лица, исполнившего обязательство по договору, и лица, обязательство которого прекращено зачетом в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом суд исходит из того, что в силу положений статей 154, 156, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации подача заявления о зачете является выражением воли стороны односторонней сделки на прекращение встречных обязательств и одновременно исполнением требования закона, установленного к процедуре зачета.

Учитывая разъяснения, содержащиеся в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 № 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом однородных требований" суд апелляционной инстанции указал, что дата такого заявления не влияет на момент прекращения обязательства, который определяется моментом наступления срока исполнения того обязательства, срок которого наступил позднее.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 25 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4(2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.12.2018, обязательства прекращаются зачетом в момент наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" (далее - постановление Пленума № 6) разъяснены нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, относящиеся к прекращению обязательства зачетом.

В соответствии с пунктом 10 постановления Пленума № 6 согласно статье 410 Гражданского кодекса Российской Федерации для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (далее - активное требование), наступил срок исполнения. Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете. Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачете встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа).

Согласно статье 410 Гражданского кодекса Российской Федерации для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны. Для прекращения обязательств заявление о зачете должно быть доставлено соответствующей стороне или считаться доставленным по правилам статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Наличие условий для зачета без заявления о зачете не прекращает и не изменяет обязательства сторон. До заявления о зачете стороны не вправе отказаться от принятия надлежащего исполнения по встречным требованиям, стороны также не вправе требовать возврата исполнения, предоставленного до заявления о зачете (пункт 14 постановления Пленума № 6).

В соответствии с пунктом 15 постановления Пленума № 6 обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а с момента, в который обязательства стали способными к зачету (статья 410 Гражданского кодекса Российской Федерации). Например, если срок исполнения активного и пассивного требований наступил до заявления о зачете, то обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения обязательства (или возможности досрочного исполнения пассивного обязательства), который наступил позднее, независимо от дня получения заявления о зачете.

Согласно пункту 19 постановления Пленума № 6 если обязательства были прекращены зачетом, однако одна из сторон обратилась в суд с иском об исполнении прекращенного обязательства либо о взыскании убытков или иных санкций в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательства, ответчик вправе заявить о состоявшемся зачете в возражении на иск.

Кроме того, обязательства могут быть прекращены зачетом после предъявления иска по одному из требований. В этом случае сторона по своему усмотрению вправе заявить о зачете как во встречном иске (статья 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так и в возражении на иск, юридические и фактические основания которых исследуются судом равным образом (часть 1 статьи 64, части 1 - 3.1 статьи 65, часть 7 статьи 71, часть 1 статьи 168, части 3, 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В частности, также после предъявления иска ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и указать в возражении на иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, зачетом.

Необходимость проверки расчета иска на предмет его соответствия нормам законодательства, регулирующего спорные отношения, как подлежащего оценке письменного доказательства по делу по смыслу статей 64, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации входит в стандарт всестороннего и полного исследования судом первой инстанции имеющихся в деле доказательств. 

Ссылка истца на то, что проведение зачета между различными государственными контрактами будет противоречить положениям Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", отклоняется судом, поскольку спорный зачет в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, не подпадает под запрет, установленный пунктом 13 статьи 8.4 Закона "О государственном оборонном заказе".

Следовательно, суд по результатам рассмотрения спора зачел сумму  долга по первоначальному иску и встречному иску.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со ст. 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда выполняется в форме электронного документа.

Согласно ч. 1 ст. 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики                                                    

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное управление специального строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общество с ограниченной ответственностью "Щит-Строй" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 76 087 507 руб. 15 коп. долга, 200 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью "Щит-Строй" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):

в пользу Федерального государственного унитарного предприятия "Главное управление специального строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 75 914 077 руб. 80 коп. долга;

в доход федерального бюджета 60 000 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

В результате проведенного судом зачета взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное управление специального строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общество с ограниченной ответственностью "Щит-Строй" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 173 429 руб. 35 коп. долга, 200 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение  может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный  суд г.Пермь через Арбитражный суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Судья Арбитражного суда

Удмуртской Республики     -                                                    Н.Н. Торжкова