АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул, д.  8,  Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,

E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

тел./факс (384-2) 58-37-05

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-21199/2017

город Кемерово

11 декабря  2017 года

Резолютивная часть решения  оглашена 05 декабря  2017 года

Текст решения изготовлен в полном объеме  11 декабря  2017 года 

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С.,    при ведении протокола и аудиозаписи  судебного заседания  секретарем  судебного заседания ФИО1,   

рассмотрев в судебном заседании  дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Промышленно – строительная Производственная компания»,  Новокузнецкий район (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к  Муниципальному предприятию  Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания», г. Новокузнецк (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о признании  действительными  дополнительных объемов работ, указанных в акте о приемке выполненных работ №32 от 01.04.2017года на сумму  121 471 руб. 12 коп. по договору №02-02-1481 от 22.07.2016года и акте о приемке выполненных работ №39 от 01.04.2017года на сумму 28 939 руб.  55 коп. по договору №02-02-1537 от 10.10.2016года

при участии:

от истца –ФИО2,  директор, решение  №1 от 16.02.2012года, паспорт,

от ответчика  – не явились

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская промышленно – строительная  производственная компания», Новокузнецкий район (истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области  с иском к Муниципальному  предприятию Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания»,              г. Новокузнецк  (ответчик) о признании  действительными  дополнительных объемов работ, указанных в акте о приемке выполненных работ №32 от 01.04.2017года на сумму  121 471 руб. 12 коп. по договору №02-02-1481 от 22.07.2016года и акте о приемке выполненных работ №39 от 01.04.2017года на сумму 28 939 руб.  55 коп. по договору №02-02-1537 от 10.10.2016года.

Определением от 26 сентября 2017года иск принят к производству, предварительное  судебное заседание по делу назначено на 26 октября 2017года.

Определением от 26 октября 2017 года подготовка дела к судебному разбирательству  завершена, дело назначено  к судебному разбирательству в судебном заседании в арбитражном суде первой инстанции на   05 декабря 2017года.

Представитель истца, принимавший участие в судебном заседании, заявленные исковые требования поддержал, представил дополнительные документы.

Ответчик копию определения суда от 26 октября 2017года по делу №А27-21199/2017 фактически получил, что подтверждается почтовым извещением  №650971 16  182567, явку представителя в судебное  заседание не обеспечил, в представленном в материалы дела отзыве на иск против удовлетворения заявленных требований возражает.

Исследовав обстоятельства и материалы дела, заслушав представителя истца, принимавшего участие в судебном заседании, в отсутствие представителя ответчика  в порядке ст. 156 АП РФ, судом установлено следующее.

Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания»  (заказчик) и  Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская промышленно-строительная производственная компания»  (подрядчик)  заключен договор подряда №02-02-1481 от 22.07.2016года, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию заказчика (Приложение №1) выполнить работы по капитальному ремонту основного и вспомогательного оборудования котельных, обслуживаемых МП «ССК» (работы второй очереди): капитальный ремонт  системы газоочистки  котла №5 Байдаевской центральной котельной;  капитальный ремонт водоподготовительной установки с заменой натрий - катионитного фильтра №1 в котельной поселка Притомский; капитальный ремонт экономайзера (ЭБ1-646 И) котла №5 Куйбышевской центральной котельной; капитальный ремонт резервуара подпиточной воды и трубопроводов в котельной №2 поселка Абагур Лесной; капитальный ремонт стыков на транспортерной ленте конвейера ЛК-800 в котельной поселка Листвяги; капитальный ремонт конвейера золоудаления котельной №32, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условиям для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. (раздел 1  - Предмет договора).

Сроки выполнения работ: начало – 25.07.2016, окончание – 01.11.2016. Срок выполнения отдельных этапов работ определяется линейным графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №2).

Цена договора включает компенсацию  издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение и составляет 9 000 000 руб. Стоимость работ устанавливается исходя из согласованной заказчиком дефектной ведомости (неотъемлемая часть технического задания) и составленного и подписанного сторонами на ее основании локального сметного расчета (Приложение №3). При этом, стоимость работ является фиксированной и не может быть изменена подрядчиком  или заказчиком в одностороннем порядке.  При существенном (не более 20% от цены договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицам услуг, которые нельзя   было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование – расторжения  договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ в судебном порядке. Увеличение цены согласуется сторонами путем подписания дополнительного соглашения. (раздел 3 договора – Цена договора и порядок оплаты работ).

Согласно п. 4.1.1. договора, объем работ, выполняемый подрядчиком, устанавливается заказчиком в дефектной ведомости, на основании которой составляется локальный сметный расчет. (Приложение №3). 

Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. Расходы стороны, связанные с исполнением таких  обязанностей, возмещению другой стороной не подлежат. (п.4.4. договора).

В соответствии с п.4.8.3. договора, при обнаружении в ходе выполнения не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, подрядчик должен немедленно сообщить об этом заказчику в письменной форме. В случае неполучения от заказчика ответа на свое сообщение в течении 15 календарных дней, подрядчик обязан приостановить соответствующие работ. Подрядчик, не выполнивший  вышеуказанной обязанности, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. При согласи заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик  вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят  сферу профессиональной деятельности подрядчика, либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Договор вступает в силу с момента его подписания, условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим  с 22.07.2016года, и действует до 31.12.2016года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств. (п.8.1. договора).

В рамках указанного договора сторонами была согласован и подписан локальный сметный  расчет  №5-32 на капитальный ремонт резервуаров подпиточной воды и трубопроводов котельной №2 п. Абагур  Лесной на сумму 2 226 464, 85 руб.

Также, Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания»  (заказчик) и  Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская промышленно-строительная производственная компания»  (подрядчик)  заключен договор подряда №02-02-1537 от 10.10.2016года, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию заказчика (Приложение №1) выполнить работы  по замене котлоячейки №1 на котельной станции Полосухинская, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условиям для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. (раздел 1  - Предмет договора).

Сроки выполнения работ: начало – 10.10.2016, окончание – 30.11.2016. Срок выполнения отдельных этапов работ определяется линейным графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №2).

Цена договора включает компенсацию  издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение и составляет 1 100 000 руб. Стоимость работ устанавливается исходя из согласованной заказчиком дефектной ведомости (неотъемлемая часть технического задания) и составленного и подписанного сторонами на ее основании локального сметного расчета (Приложение №3). При этом, стоимость работ является фиксированной и не может быть изменена подрядчиком  или заказчиком в одностороннем порядке.  При существенном (не более 20% от цены договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицам услуг, которые нельзя   было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование – расторжения  договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ в судебном порядке. Увеличение цены согласуется сторонами путем подписания дополнительного соглашения. (раздел 3 договора – Цена договора и порядок оплаты работ).

Согласно п. 4.1.1. договора, объем работ, выполняемый подрядчиком, устанавливается заказчиком в дефектной ведомости, на основании которой составляется локальный сметный расчет. (Приложение №3). 

Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. Расходы стороны, связанные с исполнением таких  обязанностей, возмещению другой стороной не подлежат. (п.4.4. договора).

В соответствии с п.4.8.3. договора, при обнаружении в ходе выполнения не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, подрядчик должен немедленно сообщить об этом заказчику в письменной форме. В случае неполучения от заказчика ответа на свое сообщение в течении 15 календарных дней, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. Подрядчик, не выполнивший  вышеуказанной обязанности, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик  вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят  сферу профессиональной деятельности подрядчика, либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Договор вступает в силу с момента его подписания, условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим  с 10.10.2016года, и действует до 31.12.2016года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств. (п.8.1. договора).

В рамках указанного договора сторонами был согласован и подписан локальный сметный расчет №3-16-37  на замену котлоячейки  №1 на котельной станции Полосухинская  комплекса  котельных №5 участка №14 на сумму 1 100 000 руб.

 Как указывает истец в обоснование заявленных исковых требований, впоследствии при исполнении обязательств по спорным договорам,  в связи с производственной необходимостью, истцом, как подрядчиком, были выполнены дополнительные объемы работ, которые не были согласованы сторонами договоров и представлены ответчику (заказчику) к приемке на основании акта о приемке выполненных работ №32 от 01.04.2017года на сумму  121 471 руб. 12 коп. по договору №02-02-1481 от 22.07.2016года и  акта  о приемке выполненных работ №39 от 01.04.2017года на сумму 28 939 руб.  55 коп. по договору №02-02-1537 от 10.10.2016года. 

Указанные акты  были  истцом вручены ответчику нарочно (вх.№3573 от 24.07.2017года)  с сопроводительным письмом (исх.№63 от 24.07.2017года).

Также, на суммы дополнительно выполненных объемов работ истцом  составлены справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Акты КС-2 и КС-3 подписаны со стороны подрядчика (истца) в одностороннем порядке.

На основании претензии  (исх.№70 от 17.08.2017) истец просил ответчика подписать вышеуказанные акты о приемке дополнительных объемов работ по акту  №32 от 01.04.2107года и акту  №39 от 01.04.2107года, в ответ на которую, ответчик (письмо №02-0/2194 от 05.09.2017) сообщил истцу, что указанные акты не могут быть подписаны, вследствие того, что дополнительные объемы работ не были своевременно согласованы с заказчиком, соответственно не были подписаны  сметы и не были заключены дополнительные соглашения к договорам.

 

Суд, оценив доводы стороны и исследовав представленные в материалы дела доказательства, не нашел оснований для удовлетворения заявленного иска.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

В силу ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

 

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 указанной  статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Таким образом, в случае, если подрядчик на свой страх и риск выполнил дополнительные работы, не известив об этом заказчика, он лишается права  как на получение их стоимости даже в виде неосновательного обогащения, так и на понуждение заказчика в их принятии.

Доказательства того, что необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства, в материалах дела отсутствуют.

О необходимости выполнения дополнительных объемов работ по спорным договорам  заказчик уведомлен не был, необходимость выполнения дополнительных объемов работ с заказчиком  не согласовывалась , о  выполнении дополнительных объемов работ (в процессе их выполнения) заказчик подрядчиком  не уведомлялся.

Дополнительных соглашений по вопросу увеличения цены договоров, либо увеличения объема работ по договорам  не  утверждалось и не заключалось, доказательств того, что  приостановление работ для согласования  с заказчиком дополнительных объемов работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (наличие немедленных действий в интересах заказчика), истцом не представлено.

Таким образом, доказательств выполнения подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 3 статьи 743  ГК РФ, в материалы дела не представлено.

С учетом вышеизложенного,  исковые требования удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы по госпошлине  относятся на истца и подлежат взысканию с него в доход федерального бюджета РФ.

Руководствуясь статьями  171, 176, 180, 181, 110    Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Сибирская Промышленно – строительная  производственная компания»  в доход Федерального  бюджета РФ 6 000 рублей госпошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                                     О. С. Андуганова