Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-3877/2020

«10»

сентября

2020 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«07»

сентября

2020 года

Решение изготовлено в полном объеме   

«10»

сентября

2020 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» к ООО «АСГАРД» о взыскании 104 098,22 рублей   

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности 

от ответчика:  ФИО3 по доверенности

установил.

Специализированная некоммерческая организация Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АСГАРД» о взыскании неустойки в  сумме 104 098,22 рублей.

Судом установлено.

Между сторонами был заключен договор от 15.03.2019 года № 27633000-06/ПДС-19/С. По условиям договора общество обязалось разработать проектно-сметную документацию на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества 25 многоквартирных домов.

В соответствии  с пунктом 4.1 договора общая стоимость работ согласована 4 070 000 рублей.

В соответствии с пунктом 1.6.2 срок окончания выполнения работ 04.05.2019 года.

В соответствии с пунктом 7.3 договора за нарушение сроков выполнения работ общество уплачивает неустойку в размере 1/130 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ России за каждый день просрочки.

Дополнительным соглашением от 30.04.2019 года к договору стороны уточнили адреса объектов проектирования и стоимость работ, которая составила 4 338 347 рублей.

04.05.2019 года стороны подписали акт препятствий к выполнению работ.

19.12.2019 года стороны подписали акт устранения препятствий к выполнению работ.

11.02.2020 года подписан акт выполненных работ по договору по согласованным объектам на общую сумму 4 100 838,68 рублей.

По настоящему делу истец просит взыскать неустойку по положениям пункта 7.3 договора за нарушение срока выполнения работ за период с 20.12.2019 года по 11.02.2020 года в сумме 104 098,22 рублей.

Ответчик требования не признал, заявил о применении положений о списании неустойки, о применении положений статьи 333 ГК РФ.

Суд не нашел правых основания для списания неустойки на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 года № 783  в редакции постановления от 26.4.2020 года № 591.

Судом проверен расчет неустойки. С учетом действия ключевой ставки Банка России 4,25% на день вынесения решения размер неустойки за период с 20.12.2019 года по 11.02.2020 года составляет 73 736,23 рублей (4 100 838,68 х 4,25% х 55 : 130).

Суд соглашается с доводами ответчика том, что после устранения препятствий к устранению работ 19.12.2019 года ответчику объективно требовалось время, чтобы внести корректировки в проектную и сметную документацию, распечатать и сброшюровать по 4 экземпляра документации по каждому из 27 объектов.

С учетом указанного, суд применяет положения статьи 333 ГК РФ и определяет размер неустойки 40 000 рублей.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АСГАРД» (ОГРН 

<

***>) в пользу Специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 40 000 рублей, расходы по госпошлине в сумме 2920,45 рублей.

Во взыскании остальной суммы отказать. 

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                    О.Н.Шкутко