48_15257740  

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-100827/23

13 февраля 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Фонда капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО  «ФИБРОБЕТОН» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить  недостатки работ, выполненных по договору № 1504-К от 03.08.2018, взыскании неустойки,  судебной неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать ООО «Фибробетон» безвозмездно устранить в месячный срок после  вступления в силу решения Арбитражного суда Московской области недостатки работ,  выполненные по Договору № 1504-К от 03.08.2018, указанные в Рекламационном акте от  03.04.2023, на объекте по адресу: 

<

...>, а  именно:  

- разгерметизация стыка настенного желоба (лист положен против потока воды),  расположенного в районе кв. № 13 подъезда № 1 (1 место);  

- ненадлежащее примыкание кровельного покрытия к фановым трубам в районе  подъездов № 1, 2, 3 (4 места);  

- ненадлежащее крепление профлиста саморезами к обрешетке (сквозные отверстия от  саморезов, не попали в обрешетку) между подъездами № 2 и № 3 (8 мест).  

Взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов неустойку за нарушение сроков устранения недостатков  работ в размере 740459 рублей 66 копеек, а также неустойку, начисленную на сумму  денежных средств 3897156 руб. 08 коп., исходя из 1/130 действующей на дату уплаты пени  ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, за период с 25 октября 2023  года по дату фактического исполнения обязательства по устранению недостатков.  

Взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый  день в случае просрочки исполнения решения Арбитражного суда Московской области;  

Взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины 23809 руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Е.В. Дубровская