Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-232319/22-51-1834

24 июля 2023 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 июля 2023 года

Определение в полном объеме изготовлено 24 июля 2023 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Васильевой В. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЬЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН 1137746190185)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ ГРУППЕ КОМПАНИЙ «315 УНР» (ОГРН 1097746691690)

о взыскании по договору субподряда № 423/Л-2 от 08 июня 2017 года долга в размере 369 644 руб. 87 коп., по договору субподряда № 424/Л-2 от 08 июня 2017 года долга в размере 874 006 руб. 40 коп., по договору субподряда № 62/Л от 11 мая 2018 года долга в размере 2 548 215 руб. 91 коп., по договору № 11-Д/19 от 24 апреля 2019 года долга в размере 720 283 руб. 20 коп., по договору субподряда № 184/Л от 26 сентября 2019 года долга в размере 895 312 руб. 96 коп.,

 

при участии:

от истца – Черниговская Н. С., по дов. № б/н от 01 августа 2022 года;

от ответчика – Рудик В. А., по дов. № б/н от 07 марта 2023 года; 

 

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЬЭНЕРГОСТРОЙ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уменьшения размера исковых требований, к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ ГРУППЕ КОМПАНИЙ «315 УНР» (далее – ответчик) о взыскании по договору субподряда № 423/Л-2 от 08 июня 2017 года долга в размере 369 644 руб. 87 коп., по договору субподряда № 424/Л-2 от 08 июня 2017 года долга в размере 874 006 руб. 40 коп., по договору субподряда № 62/Л от 11 мая 2018 года долга в размере 2 548 215 руб. 91 коп., по договору № 11-Д/19 от 24 апреля 2019 года долга в размере 720 283 руб. 20 коп., по договору субподряда № 184/Л от 26 сентября 2019 года долга в размере 895 312 руб. 96 коп.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 08 июня 2017 года между истцом (субподрядчиком) и ответчиком (генподрядчиком) был заключен договор субподряда № 423/Л-2.

В соответствии с пунктами 2.1., 2.3. договора генподрядчик поручил, а субподрядчик принял на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки собственными и/или силами привлеченных организаций и своими средствами, инструментами и к ним расходными материалами строительно-монтажные и пусконаладочные работы по перекладке наружной сети водопровода, а также работы по определению не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора на строительстве жилого дома в полном объеме проекта, расположенном по адресу: САО, район Левобережный, мкр. 2Г, корпуса 17, 18, 19. Генподрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить в соответствии с договором. Оплата будет производиться за фактически качественно выполненные субподрядчиком объемы работ на основании подписанных в установленном порядке форм КС-2 и КС-3.

В соответствии с пунктом 5.1. договора субподрядчик осуществляет порученные работы в сроки, установленные в соответствии с графиком производства работ (приложение 2 к договору), который является неотъемлемой частью договора.

Согласно протоколу договорной цены (приложение № 1 к договору), стоимость работ составила 16 400 000 руб.

20 июля 2017 года сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 2 679 037 руб. 04 коп. Срок выполнения – 15 дней с момента подписания соглашения.

01 августа 2017 года сторонами заключено дополнительное соглашение № 2 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 3 668 369 руб. 75 коп. Срок выполнения – 16 дней с момента перечисления генподрядчиком денежных средств согласно пункту 2.2. соглашения.

21 сентября 2017 года сторонами заключено дополнительное соглашение № 3 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 2 345 680 руб. 16 коп.

Факт выполнения истцом работ по договору подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 1 от 30.09.2017 на сумму 10 217 607 руб. 52 коп., № 1 от 30.09.2017 на сумму 2 679 037 руб. 04 коп., № 1 от 30.09.2017 на сумму 3 668 369 руб. 75 коп., № 2 от 31.07.2020 на сумму 6 182 392 руб. 48 коп., № 1 от 30.09.2020 на сумму 899 669 руб., № 2 от 30.09.2020 на сумму 1 446 011 руб. 16 коп.

В соответствии с пунктом 4.4. договора оплата работ, выполненных субподрядчиком, производится генподрядчиком в течение 20 рабочих дней после подписания сторонами актов и справок по формам №№ КС-2, КС-3 и предоставления исполнительной документации. В случае не предоставления исполнительной документации оплата за выполненные работы производиться не будет.

В соответствии с пунктом 4.5. договора окончательный расчет за выполненные работы по договору производится генподрядчиком после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов и передачу исполнительной документации в полном объеме, на основании акта сдачи-приемки результата выполненных субподрядчиком работ, оформленного в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 4.6. договора после принятия соответствующих работ генподрядчик перечисляет субподрядчику 100 % от стоимости выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.8. договора генподрядчик вправе удержать резерв в размере 5 % ежемесячно от стоимости выполненных работ по форме № КС-3. Сумму удержанных средств генподрядчик возвращает субподрядчику в течение 6 месяцев с момента окончания субподрядчиком всех работ по договору, подписания итогового акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, а также оформления акта технической приемки (акт рабочей комиссии) и сдачи работ субподрядчиком эксплуатирующей организации.

В соответствии с пунктом 2.3. дополнительного соглашения № 1 от 20 июля 2017 года к договору генподрядчик оплачивает за выполненные работы в течение 5 дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3.

В соответствии с пунктом 2.3. дополнительного соглашения № 2 от 01 августа 2017 года к договору окончательный расчет производится после полного их завершения субподрядчиком в полном объеме в размере 100 % от стоимости выполненных работ.

В обоснование исковых требований истец указал, что задолженность по оплате выполненных работ, с учетом частичной оплаты, составляет по договору субподряда № 423/Л-2 от 08 июня 2017 года 369 644 руб. 87 коп.

08 июня 2017 года между истцом (субподрядчиком) и ответчиком (генподрядчиком) был заключен договор субподряда № 424/Л-2.

В соответствии с пунктами 2.1., 2.3. договора генподрядчик поручил, а субподрядчик принял на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки собственными и/или силами привлеченных организаций и своими средствами, инструментами и к ним расходными материалами строительно-монтажные и пусконаладочные работы по перекладке наружной сети канализации, а также работы по определению не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора на строительстве жилого дома в полном объеме проекта, расположенном по адресу: САО, район Левобережный, мкр. 2Г, корпуса 17, 18, 19. Генподрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить в соответствии с договором. Оплата будет производиться за фактически качественно выполненные субподрядчиком объемы работ на основании подписанных в установленном порядке форм КС-2 и КС-3.

В соответствии с пунктом 5.1. договора субподрядчик осуществляет порученные работы в сроки, установленные в соответствии с графиком производства работ (приложение 2 к договору), который является неотъемлемой частью договора.

Согласно протоколу договорной цены (приложение № 1 к договору) (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26 мая 2020 года к договору), стоимость работ составила 10 105 834 руб. 72 коп.

Факт выполнения истцом работ по договору подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 1 от 30.09.2017 на сумму 5 874 006 руб. 40 коп.

В соответствии с пунктом 4.4. договора оплата работ, выполненных субподрядчиком, производится генподрядчиком в течение 20 рабочих дней после подписания сторонами актов и справок по формам № КС-2, № КС-3 и предоставления исполнительной документации. В случае не предоставления исполнительной документации оплата за выполненные работы производиться не будет.

В соответствии с пунктом 4.5. договора окончательный расчет за выполненные работы по договору производится генподрядчиком после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов и передачу исполнительной документации в полном объеме, на основании акта сдачи-приемки результата выполненных субподрядчиком работ, оформленного в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 4.6. договора после принятия соответствующих работ генподрядчик перечисляет субподрядчику 100 % от стоимости выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.8. договора генподрядчик вправе удержать резерв в размере 5 % ежемесячно от стоимости выполненных работ по форме № КС-3. Сумму удержанных средств генподрядчик возвращает субподрядчику в течение 6 месяцев с момента окончания субподрядчиком всех работ по договору, подписания итогового акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, а также оформления акта технической приемки (акт рабочей комиссии) и сдачи работ субподрядчиком эксплуатирующей организации.

В обоснование исковых требований истец указал, что задолженность по оплате выполненных работ, с учетом частичной оплаты, составляет по договору субподряда № 424/Л-2 от 08 июня 2017 года 874 006 руб. 40 коп.

11 мая 2018 года между истцом (субподрядчиком) и ответчиком (генподрядчиком) был заключен договор субподряда № 62/Л.

В соответствии с пунктами 2.1., 2.3. договора генподрядчик поручил, а субподрядчик принял на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки собственными и/или силами привлеченных организаций и своими средствами, инструментами и к ним расходными материалами строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству наружных инженерных сетей дождевой канализации, а также работы по определению не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора на строительстве жилого дома в полном объеме проекта, расположенном по адресу: САО, район Левобережный, мкр. 2Г, корпуса 17, 18, 19. Генподрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить в соответствии с договором. Оплата будет производиться за фактически качественно выполненные субподрядчиком объемы работ на основании подписанных в установленном порядке форм КС-2 и КС-3.

В соответствии с пунктом 5.1. договора субподрядчик осуществляет порученные работы в сроки, установленные в соответствии с графиком производства работ (приложение 2 к договору), который является неотъемлемой частью договора.

20 мая 2020 года сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 6 527 246 руб. 83 коп.

20 мая 2020 года сторонами заключено дополнительное соглашение № 3 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 132 453 руб. 61 коп.

Факт выполнения истцом работ по договору подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 1 от 31.05.2019 на сумму3 676 816 руб. 38коп., № 1 от 28.06.2019 на сумму 2 104 413 руб. 04 коп., № 1 от 31.07.2019 на сумму 6 931 849 руб. 87 коп., № 4 от 31.08.2019 на сумму 3 413 281 руб. 73 коп., № 5 от 30.09.2019 на сумму 4 064 017 руб. 61 коп., № 6 от 31.10.2019 на сумму 2 326 182 руб. 67 коп., № 7 от 30.11.2019 на сумму 4 831 029 руб. 29 коп., № 8 от 31.07.2020 на сумму 3 615 188 руб. 44 коп., № 9 от 31.07.2020 на сумму 132 453 руб. 61 коп., № 10 от 31.07.2020 на сумму 6 527 246 руб. 83 коп.

В соответствии с пунктом 4.4. договора оплата работ, выполненных субподрядчиком, производится генподрядчиком в течение 20 рабочих дней после подписания сторонами актов и справок по формам № КС-2, № КС-3 и предоставления исполнительной документации. В случае не предоставления исполнительной документации оплата за выполненные работы производиться не будет.

В соответствии с пунктом 4.5. договора окончательный расчет за выполненные работы по договору производится генподрядчиком после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов и передачу исполнительной документации в полном объеме, на основании акта сдачи-приемки результата выполненных субподрядчиком работ, оформленного в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 4.7. договора генподрядчик вправе удержать резерв в размере 5 % ежемесячно от стоимости выполненных работ по форме № КС-3. Сумму удержанных средств генподрядчик возвращает субподрядчику в течение 20 календарных дней с момента подписания генподрядчиком и субподрядчиком акта об окончании гарантийного срока на выполненные работы в соответствии с пунктом 9.2. договора.

В соответствии с пунктом 4 дополнительных соглашений №№ 1, 3 к договору оплата производится подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 4 договора.

В обоснование исковых требований истец указал, что задолженность по оплате выполненных работ, с учетом частичной оплаты, составляет по договору субподряда № 62/Л от 11 мая 2018 года 2 548 215 руб. 91 коп.

24 апреля 2019 года между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор № 11-Д/19.

В соответствии с пунктом 1.1. договора заказчик поручает и оплачивает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по вырубке деревьев с вывозом порубочных остатков на объекте «Жилой дом по адресу: г. Москва, САО, район Левобережный, мкр. 2Г, корпуса 17, 18, 19».

В соответствии с пунктом 2.1. договора общая стоимость работ составила 720 283 руб. 20 коп.

В соответствии с пунктом 3.1. договора сроки выполнения работ: начало работ – апрель 2019 года; окончание работ – май 2019 года.

Факт выполнения истцом работ по договору подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 1 от 30.06.2019 на сумму 720 283 руб. 20 коп.

В соответствии с пунктом 4.1. договора расчеты за выполненные работы производятся за фактически выполненные объемы работ, на основании подписанных сторонами форм КС-2, КС-3, счетов-фактур подрядчика.

В обоснование исковых требований истец указал, что задолженность по оплате выполненных работ составляет по договору № 11-Д/19 от 24 апреля 2019 года 720 283 руб. 20 коп.

26 сентября 2019 года между истцом (субподрядчиком) и ответчиком (подрядчиком) был заключен договор субподряда № 184/Л.

В соответствии с пунктами 2.1., 2.2. договора подрядчик поручил, а субподрядчик принял на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки собственными и/или привлеченными силами организаций и своими средствами комплекс работ по наружному вводу водопровода в полном объеме соответствующих данным работам разделов проекта со сдачей подрядчику, заказчику, техническому заказчику и эксплуатирующей организации на строительстве многофункционального жилого комплекса по адресу: г. Москва, САО, мкр. 2Г район Левобережный, корпуса 17, 18, 19, а также работы по определению не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора. Подрядчик обязался принять выполненные работы и оплатить в соответствии с договором. Оплата будет производиться за фактически качественно выполненные субподрядчиком объемы работ на основании подписанных в установленном порядке форм КС-2 и КС-3.

В соответствии с пунктом 5.1. договора субподрядчик осуществляет порученные работы в сроки, установленные в соответствии с графиком производства работ (приложение 2 к договору), который является неотъемлемой частью договора, с окончанием работ не позднее 20 октября 2019 года.

Согласно протоколу договорной цены (приложение № 1 к договору), стоимость работ составила 3 395 312 руб. 96 коп.

В подтверждение факта выполнения истцом работ по договору истец представил в материалы дела односторонние формы КС-2, КС-3 № 1 от 17.08.2020 на сумму 3 395 312 руб. 96 коп., которые были направлены в адрес ответчика средствами почтовой связи 24 августа 2020 года (т. 3 л.д. 5-8) и получены последним 31 августа 2020 года.

В соответствии с пунктом 4.2. договора субподрядчик ежемесячно до 25 числа отчетного месяца предоставляет в сметный отдел подрядчика комплект документов, оформленных в установленном порядке: акты выполненных работ (форма КС-2), подписанные технадзором заказчика и начальником участка подрядчика, справку по форме КС-3; исполнительную документацию (оригинал - 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (формат PDF), на фактически выполненные работы в отчетном периоде.

В соответствии с пунктом 4.3. договора подрядчик в течение 15 рабочих дней обязан принять и рассмотреть поступивший от субподрядчика комплект документов, поименованный в пункте 4.2. договора. Неполный комплект документации, предоставленный субподрядчиком, может быть причиной отказа от принятия и рассмотрения поступивших документов в текущем отчетном периоде.

В соответствии с пунктом 4.4. договора оплата работ, выполненных субподрядчиком, производится подрядчиком с учетом выплаченного аванса в течение 90 календарных дней после подписания сторонами актов и справок по формам № КС-2, № КС-3. Акты и справки по ф. КС-2 и ф. КС-3 принимаются к рассмотрению и подписываются только при предоставлении субподрядчиком полного комплекта исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.16. договора. Подрядчик оставляет за собой право удерживать причитающиеся субподрядчику суммы платежей по договору, пока не будет получена в полном объеме относящаяся к работам необходимая документация в том числе исполнительная, которая должна соответствовать условиям договора.

В соответствии с пунктом 4.6. договора окончательный расчет за выполненные работы по договору производится подрядчиком после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов и передачу исполнительной документации в полном объеме для комплектации папки Мосгосстройнадзора, на основании акта сдачи-приемки результата выполненных субподрядчиком работ, оформленного в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 4.9. договора подрядчик вправе удержать резерв в размере 5 % ежемесячно от стоимости выполненных работ по форме № КС-3, в качестве обеспечения выполнения субподрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания). Сумму удержанных средств подрядчик возвращает субподрядчику ,на основании письменного обращения субподрядчика, в течение 20 рабочих дней с момента подписания подрядчиком и субподрядчиком акта об окончании гарантийного срока на выполненные работы в соответствии с пунктом 9.2. договора. Проценты на удерживаемые денежные средства не начисляются.

В обоснование исковых требований истец указал, что задолженность по оплате выполненных работ, с учетом частичной оплаты, составляет по договору по договору субподряда № 184/Л от 26 сентября 2019 года 895 312 руб. 96 коп.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с положениями статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Как установлено судом, по всем вышеуказанным договорам акты выполненных работ были подписаны ответчиком, кроме договора субподряда № 184/Л от 26 сентября 2019 года.

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Таким образом, ст. 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (абзац 2 пункта 4 статьи 753 ГК РФ).

Доказательств направления ответчиком в адрес истца мотивированного отказа от приемки работ по формам КС-2, КС-3 № 1 от 17.08.2020 на сумму 3 395 312 руб. 96 коп. материалы дела не содержат, в связи с чем суд признает работы принятыми без претензий и замечаний.

Ответчик заявил довод о непередаче истцом исполнительной документации.

Согласно статье 726 ГК РФ, подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

По смыслу вышеуказанной нормы сам по себе факт непредставления исполнительной документации не может являться основанием для отказа от оплаты выполненных работ.

В данном случае подрядчик должен доказать, что отсутствие исполнительной документации, на передаче которой он настаивает, исключает возможность использования результата работ по назначению.

Однако документов, свидетельствующих о том, что выполненные истцом работы на заявленную сумму не представляют для ответчика интереса, не имеют потребительской ценности, фактически не использованы и не могут быть использованы, в материалы дела в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не представлено, как и не представлено доказательств, опровергающих объем и стоимость фактически выполненных истцом работ.

Требование о передаче исполнительной документации на основании ст. 726 ГК РФ может быть предметом самостоятельного требования.

Кроме того, как заявил сам ответчик, спорный жилой комплекс введен в эксплуатацию еще в 2021 году, а при приемке работ и подписании актов ответчик не заявлял об ее отсутствии, при этом акты были подписаны в период 2017-2020 гг.

Ответчик заявил довод о том, что стоимость выполненных истцом работ подлежит уменьшению на стоимость оказанных им истцу генподрядных услуг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 747 ГК РФ заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги.

Оплата таких услуг, согласно пункту 3 статьи 747 ГК РФ, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

В соответствии с пунктом 4.7. договора субподряда № 423/Л-2 от 08 июня 2017 года, пунктом 4.7. договора субподряда № 424/Л-2 от 08 июня 2017 года, пунктом 4.6. договора субподряда № 62/Л от 11 мая 2018 года в случае использования субподрядчиком энергоносителей (вода и электроэнергия) и услуг связи генподрядчика, стоимость потребленных энергоресурсов и услуг связи определяется на основании двухсторонних актов (по ценам Мосэнерго, Мосводоконала и МГТС). Оплата потребленных энергоносителей, воды, механизмов и услуг связи генподрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета субподрядчика ежемесячно на основании расчетов или подписанных двухсторонних актов, счетов.

В соответствии с пунктами 4.7., 4.8. договора субподряда № 184/Л от 26 сентября 2019 года в случае использования субподрядчиком энергоносителей (вода и электроэнергия) и услуг связи подрядчика, стоимость потребленных энергоресурсов и услуг связи определяется  двусторонними подтверждающими документами (актами об оказании услуг), которые должны быть оформлены сторонами одновременно с оформленными формами № КС-3, № КС-2. Оплата стоимости услуг подрядчика может осуществляется путем зачета встречных однородных требований. В случае отказа субподрядчика от подписания актов об оказании услуг, но при наличии подписанных подрядчиком и субподрядчиком форм № КС-3, № КС-2, услуги считаются потребленными субподрядчиком и могут быть удержаны из стоимости выполненных субподрядчиком работ путем направления субподрядчику уведомления о зачете встречных однородных денежных требований в одностороннем порядке. Подрядчик оказывает субподрядчику организационно-технические и другие услуги, связанные с исполнением настоящего договора, в целях качественного и своевременного выполнения условий настоящего договора обеими сторонами. Оплата данных услуг осуществляется путем перечисления с расчетного счета субподрядчика денежных средств в размере 5 процентов от ежемесячной стоимости выполненных работ по договору, что подтверждается актом выполненных работ и счетом-фактурой подрядчика. Стороны по обоюдному согласию могут произвести взаимозачет встречных требований по оплате услуг.

В нарушение ст. 65 АПК РФ ответчик не представил в материалы дела доказательств направления в соответствии с вышеуказанными пунктами договоров в адрес истца вышеуказанных актов оказанных услуг, соответственно, факт оказания данных услуг им не доказан.

При этом суд признает обоснованными доводы ответчика о том, что срок выплаты гарантийного удержания не наступил, данные суммы включены истцом в задолженность необоснованно.

Ответчик заявил, что письмами от 18.02.2021 исх. №№ 45-47, 49 уведомил истца о расторжении договоров субподряда от 08 июня 2017 года №№ 423/Л-2, 424/Л-2, № 62/Л от 11 мая 2018 года, № 184/Л от 26 сентября 2019 года (пункт 11.18. договоров) в порядке, предусмотренном ст. 450.1 ГК РФ. Данное обстоятельство истцом не оспорено.

Как указано в пункте 9.2. договоров субподряда от 08 июня 2017 года №№ 423/Л-2, 424/Л-2, № 62/Л от 11 мая 2018 года, № 184/Л от 26 сентября 2019 года срок гарантии субподрядчика на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Как указано выше, объект введен в эксплуатацию в 2021 году, соответственно, в настоящее время гарантийный срок не истек.

Гарантийное удержание представляет собой согласованный сторонами в соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ способ обеспечения исполнения подрядчиком всех обязательств, предусмотренных договором.

В соответствии с п. 1 ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом или договором подряда предусмотрен для результата работ гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

В соответствии с пунктом 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» условия договора о гарантии качества работ сохраняют свое действие и после расторжения договора.

Таким образом, отказ заказчика от исполнения договора подряда вследствие его расторжения не может быть признан основанием для возврата заказчиком подрядчику денежных средств, удержанных заказчиком из стоимости принятых работ в обеспечение гарантии их качества.

Довод истца о том, что по актам от 30.09.2017 гарантийный срок истек, отклоняется судом, поскольку по условиям договоров резерв возвращается по окончании гарантийного срока, который начинает течь с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (2021 год).

Учитывая изложенное, из суммы задолженности подлежит исключению пятипроцентное удержание.

При таких обстоятельствах суд пришел к следующим выводам.

По договору субподряда № 423/Л-2 от 08 июня 2017 года задолженность ответчика перед истцом отсутствует, поскольку стоимость выполненных истцом работ составила 25 093 086 руб. 50 коп., ответчик перечислил истцу оплату в размере 24 723 441 руб. 63 коп., разница составляет 368 644 руб. 87 коп. При этом гарантийное удержание составляет всего 1 640 000 руб. (25 093 086 руб. 50 коп. * 5 %), которое в настоящее время пока не подлежит возврату.

По договору субподряда № 424/Л-2 от 08 июня 2017 года задолженность ответчика перед истцом составляет 580 306 руб. 08 коп., поскольку стоимость выполненных истцом работ составила 5 874 006 руб. 40 коп., ответчик перечислил истцу оплату в размере 5 000 000 руб., разница составляет 874 006 руб. 40 коп. При этом гарантийное удержание составляет 293 700 руб. 32 коп. (5 874 006 руб. 40 коп. * 5 %), которое в настоящее время пока не подлежит возврату.

По договору субподряда № 62/Л от 11 мая 2018 года задолженность ответчика перед истцом составляет 667 091 руб. 80 коп., поскольку стоимость выполненных истцом работ составила 37 622 479 руб. 74 коп., ответчик перечислил истцу оплату в размере 32 294 905 руб. 52 коп., разница (с учетом зачета, на основании которого истец уменьшил цену иска (т. 4 л.д. 77-80)) составляет 2 548 215 руб. 91 коп. При этом гарантийное удержание составляет всего 1 881 124 руб. 11 коп. (37 622 479 руб. 74 коп. * 5 %), которое в настоящее время пока не подлежит возврату.

По договору № 11-Д/19 от 24 апреля 2019 года задолженность ответчика перед истцом составляет 720 283 руб. 20 коп. По данному договору гарантийное удержание на работы по вырубке деревьев очевидным образом сторонами не устанавливалось.

По договору субподряда № 184/Л от 26 сентября 2019 года задолженность ответчика перед истцом составляет 725 547 руб. 31 коп., поскольку стоимость выполненных истцом работ составила 3 395 312 руб. 96 коп., ответчик перечислил истцу оплату в размере 2 500 000 руб., разница составляет 895 312 руб. 96 коп. При этом гарантийное удержание составляет 169 765 руб. 65 коп. (3 395 312 руб. 96 коп. * 5 %), которое в настоящее время пока не подлежит возврату.

Учитывая изложенное, суд признает требования истца подлежащими частичному удовлетворению на указанные суммы.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167 - 170 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «315 УНР» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЬЭНЕРГОСТРОЙ» по договору субподряда № 424/Л-2 от 08 июня 2017 года долг в размере 580 306 руб. 08 коп., по договору субподряда № 62/Л от 11 мая 2018 года долг в размере 667 091 руб. 80 коп., по договору № 11-Д/19 от 24 апреля 2019 года долг в размере 720 283 руб. 20 коп., по договору субподряда № 184/Л от 26 сентября 2019 года долг в размере 725 547 руб. 31 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 928 руб. 81 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                   О. В. Козленкова