ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А40-149420/2022

27 июля 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 20 июля 2023 года

Полный текст постановления изготовлен 27 июля 2023 года

 

Арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Кочергиной Е.В.,

судей Аникиной Н.А., Колмаковой Н.Н., 

при участии в заседании:

от истца: общества с ограниченной ответственностью  «Адепт строй» - ФИО1, по доверенности от 17.01.2022г.,

от ответчика: общества с ограниченной ответственностью «Вито-строй» - ФИО2, по доверенности от 02.12.2021г.,

рассмотрев 20 июля 2023 года в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Вито-строй»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2022 года и  постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2023 года по делу №А40-149420/2022

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Адепт строй»

к обществу с ограниченной ответственностью «Вито-строй»

о взыскании денежных средств,

                                                УСТАНОВИЛ: 

 

общество с ограниченной ответственностью «Адепт строй» (далее - ООО «Адепт строй», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Витострой» (далее - обществу с ограниченной ответственностью «Витострой», ответчик) об обязании возвратить оборудование по договору N Х07/12/20 от 07.12.2020, по договору N Х-18/12/20 от 18.12.2020.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2023 исковые требования удовлетворены. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество с ограниченной ответственностью «Вито-строй» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит названные решение и постановление отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований, указывая на нарушение и неправильное применение судами норм права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

До рассмотрения жалобы по существу в Арбитражный суд Московского округа от общества с ограниченной ответственностью  «Адепт строй» поступил отзыв на кассационную жалобу, который приобщен к материалам дела в соответствии со статьей 279 АПК РФ.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал доводы и требования кассационной жалобы, представители истца возражали против доводов жалобы, указывая на законность и обоснованность принятых по делу судебных актов.

Обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены ввиду следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, между ООО «Адепт Строй» (истец) и ООО «Вито-Строй» (ответчик) заключен договор от 14.09.2020 N ДП-14/09/2020 на выполнение работ по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г., 1959-1961 гг.», расположенного по адресу: 

<

...>».

По условиям договора подрядчик должен приобрести, поставить и смонтировать необходимое оборудование, конструкции и материалы, стоимость включает в себя цену всех обязательств (п. 3.2 договора).

Подрядчиком было приобретено оборудование (ТМЦ) на общую сумму 165 905 832 рубля 53 копейки, которое было оплачено со стороны ООО «Адепт Строй» в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями.

Истец указал, что в связи с тем, что работы по сохранению культурного наследия не были завершены, приобретенное у ООО «Вито-Строй» оборудование было передано на ответственное хранение ООО «Вито-Строй» на основании договоров на ответственное хранение от 07.12.2020 N Х-07/12/20; от 18.12.2020 N Х-18/12/20.

Согласно п. 1.3 договора ответственного хранения от 07.12.2020 N X-07/12/20 срок хранения ТМЦ составляет с 07.12.2020 по 31.12.2021.

Согласно п. 1.3 договора ответственного хранения от 18.12.2020 N X-18/12/20 срок хранения ТМЦ составляет с 07.12.2020 по 31.12.2021.

Факт принятия ответчиком от истца оборудования на ответственное хранение подтверждается актами приема-передачи ТМЦ: N 1 от 07.12.2020 по договору N Х-07/12/20, N 1 от 18.12.2020 договору N Х-18/12/20.

Обращениями от 06.09.2021 N 0609/1; от 13.09.2021 N 1309/3 ООО «Адепт Строй» уведомляло ООО «Вито-Строй» о подготовке и передаче приобретенного оборудования (ТМЦ). Однако, в нарушение условий Договоров хранения, ТМЦ не были возвращены.

Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанции, исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, проанализировав условия договора оказания складских услуг в порядке статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 204, 359, 421, 886, 894, 896, 899 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора", постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.

При этом суды исходили из установленных обстоятельств того, что факт принятия имущества на хранение подтверждается актами приема-передачи ТМЦ: N 1 от 07.12.2020 по договору N Х-07/12/20, N 1 от 18.12.2020 договору N Х-18/12/20., которые подписаны сторонами и позволяют достоверно установить предмет, переданный на хранение, его характеристики и количество.

По двустороннему акту приема-передачи ТМЦ N 1 от 07.12.2020 по договору N Х-07/12/20 ответчику было передано следующее оборудование: штанкет декорационного подъема ДП-16,6 Стройцирк - 27 шт.; лебедка вертикальная штанкетная вертикальная 4-х тросовая, мощность 11, кВт, скорость 0,94 м/с, канатоемкость 27 м, грузоподъемность 650 кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛДП-В4/650/0.94 Дока Центр - 27 шт.; блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 27 шт.; блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 27 шт.; Блок канатный 3-ручьевой диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 27 шт.; Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 54 шт.; Штанкет декорационного подъема 0-плана ДПО-16,6 Стройцирк - 2 шт.; Лебедка вертикальная штанкетная вертикальная 4-х тросовая, мощность 11, кВт, скорость 0,94 м/с, канатоем кость 27 м, грузоподъемность 650 кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛДП-В4/650/0.94 Дока Центр - 2 шт.; блок канатный 1 -ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 2 шт.; Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 2 шт.; Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 2 шт.; Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 4 шт.; Штанкет с дорогой ШД-16,6 Стройцирк - 14 шт.; лебедка вертикальная штанкетная вертикальная 4-х тросовая, мощность 11, кВт, скорость 0,94 м/с, канатоемкость 27 м, грузоподъемность 650 кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛДП-В4/650/0.94 Дока Центр - 14 шт.; блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 14 шт.; Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 14 шт.; Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 14 шт. Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 28 шт.; Грузовой штанкет 180 кг Стройцирк - 1 шт.; блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 1 шт., Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 1 шт., Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 1 шт., Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 2 шт., ФИО3. В комплекте: дорога длиной 7,5 м, 2 трека; 2 ведущие каретки; 3 ведомые каретки/метр; поддерживающие ролики; отводные и концевой блоки; ограничители; фигурные шайбы; метизы, /м. ДТ-17,5 Стройцирк - 1 шт., Ферма подвеса дороги Стройцирк - 1 шт., Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 Стройцирк - 1 шт., Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 Стройцирк - 1 шт., Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 Стройцирк - 1 шт., Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 Стройцирк - 2 шт., Передвижной люк-провал ШхГхВ: 1,675 x 1,49 x 3,3 м Высота с выдвижной платформой 3530 мм Ход 3600 мм Размеры выдвижной платформы 10000 x 1000 Грузоподъемность полезная 250 кг. Общая 300 кг. Скорость 0,01 - 0,75 м/с. Мощность привода 4 кВт ПЛп-1х1 Дока Центр - 4 шт., механизм театрального полетного устройства, грузоподъемностью 200 кг, макс, скорость по горизонтали - 2,0 м/с макс. Скорость по вертикали - 1,0 м/с. В составе: 1. полотно дороги - 10 п. м, 2. комплект блоков, 3. каретка с траверсой, 4. комплект стальных канатов (тяговый и подъемный), 5. лебедка горизонтального перемещения, ручная безредукторная, с тормозом, 6. лебедка вертикального перемещения, ручная, безредукторная, с двойными тормозами, 7. метизы и комплектующие. Стройцирк - 2 шт., Тросик страховочный для прожекторов ТРС-70 Стройцирк - 600 шт., Шкаф ГРЩ габ. 3400x2035x735мм - 1 шт., Шкаф ППУ габ. 2675x2035x775мм - 1 шт., Шкаф насосной ШПН габ. 2675x2035x775мм - 1 шт., Щит ЩВ-01-1 шт., Щит ЩВ-05-1 шт., Щит ЩВ-06-1 шт., Щит ЩВ-16-1 шт., Щит ЩВ-18-1 шт., Щит вентиляции ЩВ-45-1 шт., Щит вентиляции ЩВ-46-1 шт., Щит силовой ЩС-1 - 1 шт., Щит силовой ЩС-2-1 шт., Щит силовой ЩС-3-1 шт., Щит силовой ЩС-4 - 1 шт., Щит распределительный ЩР-11-1 шт., Щит распределительный ЩР-12-1 шт., Щит распределительный ЩР-15-1 шт., Щит распределительный ЩР-16-1 шт., Щит распределительный ЩР-21-1 шт., Щит распределительный ЩР-22-1 шт., Щит распределительный ЩР-23-1 шт., Щит распределительный ЩР-25-1 шт., Щит распределительный ЩР-28-1 шт., Щит распределительный ЩР-31-1 шт., Щит распределительный ЩР-32-1 шт., Щит распределительный ЩР-35-1 шт., Щит распределительный ЩР-36-1 шт., Щит распределительный ЩР-41-1 шт., Щит распределительный ЩР-42-1 шт., Щит распределительный ЩР-45-1 шт., Щит распределительный ЩР-46-1 шт., Щиты освещения подвал ЩО01, ЩОА01, ЩО02, ЩОА02, ЩО04, ЩО05,ЩОА05, ЩО06, ЩОА06-9 шт., Щиты освещения 1 этаж ЩО11, Щ0А11, Щ012, ЩОА12, Щ013, Щ014, Щ015, Щ0А15, Щ016, ЩОА16.Щ018, Щ0А18, ЩНО - 13 шт., Щиты освещения 2 этаж Щ021, Щ0А21, Щ022.ЩОА22.Щ025, Щ026, ЩОА26 - 7 шт., Щиты освещения 3 этаж ЩО-31, ЩОА-31, ЩО-32,ЩОА-32,ЩО-35, ЩОА-35, ЩО-36, ЩОА-36 - 8 шт., Щиты освещения 4 этаж ЩО-41. ЩО-42, ЩО-45,ЩОА-45,ЩО-46, ЩОА-46, ЩО-48, ЩОА-48 - 8 шт., Сервер с ОС Windows 10 ПК DEXP Mars Е132 - 1 шт., Оперативная задача "Орион Про" исп.127 - 1 шт., Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма S22E391Н - 1 шт., Мышь S Geneva 735 Nano - 1 шт., Клавиатура Corded Keyboard К280е - 1 шт., цифровой модуль выходов DOM4-24 24V Honeywell - 1 шт., цифровая микрофонная консоль, 12 кнопок DCS15 Honeywell - 1 шт., универсальный интерфейсный модуль UIM Honeywell - 1 шт., усилитель мощности 4 x 300w 100v 4XD300 класс D 24V Honeywell - 1 шт., Сетевой видеорегистратор HEN 64304 - 1 шт., Элемент термостатический марки "Danfoss" - 351 шт., Воздушно-тепловая завеса водяная КЭВ-29П2121W - 4 шт., Смесительный узел КЭВ-УТМ4 - 4 шт., П1. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.CW.MN.T0.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 2000x1000 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-2000х1000 с электромеханическим приводом 2 x ф-МВ220 - 1 шт., Приточная установка П2 LV-ASU-HR1-ES-05R Lessar - 1 шт., П2. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.V.TO.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 500 x 400 с EI90 КПУ-1Н-0-Н500x400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Приточная установка П5 LV-DUCT-HR1-CR-250 Lessar - 1 шт., П5 резерв Вентагрегат + клапан Lessar - 1 шт., П5. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.V.TO.S - 1 шт., П6. Приточная установка LV-DUCT-HR1 -CR-250 Lessar - 1 шт., Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-CR-250 Lessar +клапан (резерв) - 1 шт., П6. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.V.TO.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н"0-Н-200x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., П7. Приточная установка LV-ASU-HR1-E5-03 R Lessar - 1 шт., П9. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-250 Lessar - 1 шт., П9. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.RHF.E1.HW.VTO.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200 x 150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 250 x 100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-250x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., П10. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-500x300 R Lessar - 1 шт. Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-500x300 R Lessar+клапан (резерв) - 1 шт., П10. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 300x200 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-300 x 200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт., П11. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar - 1 шт. Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-CR-160 R/ПИ+клапан резерв Lessar - 1 шт., П11-Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.V.TO.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый диам. 125мм с EI90 КПУ-1Н-0-Н-125 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт., П12. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar - 1 шт., П12. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.V.TO.S - 1 шт., П13 Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT~500x300 R Lessar - 1 шт., П13. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT500x300 R+клапан Lessar - 1 шт., П13. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200 x 200 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 300 x 250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300x250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., П15. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-500x250 R Lessar - 1 шт., П15. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-500x250 R + клапан Lessar - 1 шт., П15. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.V.TO.S - 1 шт. Клапан противопожарный нормально открытый 100 x 100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200 x 100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200 x 150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 4 шт., П16. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar - 1 шт., П16. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-CR-160 R + заслонка Lessar - 1 шт., П16. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD1.V.TO.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый диам.100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт., П17. Приточная установка LV-ACU-HR1-ES-03 R Lessar - 1 шт., П17. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200 x 150 с Е190 КПУ-1Н-0-Н-250х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200 x 150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-400х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., П18. Приточная установка LV-DUCT-HR1-CR-160 R Lessar - 1 шт., П18. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-CR-160 R +клапан Lessar - 1 шт., П18. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HD.VTO.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., П19. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-500x300 R Lessar - 1 шт., П19. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT500x300 R +клапан Lessar - 1 шт., П19. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S - 1 шт., П20. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-800x500 R Lessar - 1 шт., П20. рез. вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-800x500 R + клапан Lessar - 1 шт., П20. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.HW.V.TO.S - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 500 x 400 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-500х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт., П20. Приточная установка LV-DUCT-HR1-RT-700x400 R Lessar - 1 шт., П20. Комплект автоматики LV-CM-HR1/SSM-S-F.FD.E1.V.S-3T1/10/IT/10D10/A/2xS.05L/DP.R/DP.R - 1 шт., Вентилятор крышной LV-FRSV-45-4-3 Е15 - 1 шт., Вентилятор крышной (В5.В25) - 2 шт., Вентилятор крышной (В9.В27) - 2 шт., Вентилятор крышной (В14) - 2 шт., Вентилятор крышной (В19) - 1 шт., Вентилятор крышной (В34.В39.В18) - 5 шт., Вентилятор крышной (В35) - 2 шт., Вентилятор крышной (В41) - 1 шт., Вентилятор крышной (В13.В17) - 3 шт., Вентилятор крышной (В23.В24.В40) - 3 шт., Вентилятор крышной (В31) - 1 шт., Вентилятор крышной (ВЗЗ.В38) - 2 шт., Шумоглушитель (крышный короб) В1.В19.В13.В17-5 шт., Шумоглушитель (крышный короб) В5.В9.В25.В27.ВЗЗ.В38 - 6 шт., Шумоглушитель (крышный короб) В14.В18.В34.В39.В41 - 8 шт., Шумоглушитель (крышный короб) В35 - 2 шт., Шумоглушитель (крышный короб) В23.В24.В40 - 3 шт., Шумоглушитель (крышный короб) В31 - 1 шт., Преобразователь частоты 1,1 КВт (В1.В41) - 2 шт., Регулятор скорости симисторный (В5.В9.В19.В35.В23.В24.В27.В31.ВЗЗ.В38.В40) - 12 шт., Преобразователь частоты 0,75КВт (В14) - 2 шт., Преобразователь частоты 2,2КВт (В19) - 1 шт., Преобразователь частоты (В34.В39.В13.В17.В18) - 8 шт., Вентиляционный агрегат LV-DUCT-HR1-RT-600x300 L/В2.ВЗ-2 шт., Вентиляционный агрегат В6 - 2 шт., Вентиляционный агрегат В8 - 1 шт., Вентиляционный агрегат В11.В12.В15.В21.В22.В28.В30.В32.В36.В37.В42Б10 - 12 шт., Вентиляционный агрегат В26-1 шт., Комплект автоматики LV-CM-HR1/IF.015D-2 шт., Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В6) - 1 шт., Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В6 рез) - 1 шт., Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В8) - 1 шт., Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В11.В12.В15.В21.В22.В28.В30.В32.В36.В37.В42.В10) - 12 шт., Комплект автоматики LV-CM-HR1 (В26) - 1 шт., В5 Клапан противопожарный нормально открытый 250 x 250 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-250х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., В23.В24.В38 Клапан противопожарный нормально открытый 300 x 200 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-300х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-3 шт., В6.В34 Клапан противопожарный нормально открытый 200 x 200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт., В39 Клапан противопожарный нормально открытый 250x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-250 x 200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., В39 Клапан противопожарный нормально открытый 300x150 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт., B9,B13,B16,B18, В20, В25.В27.В34 Клапан противопожарный нормально открытый 200 x 150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-200х150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-16 шт., В20.В27.В34 Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-5 шт., В10,В14,В16,B22,B34,B35,B36,B37,B39 Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-25 шт., В34 Клапан противопожарный нормально открытый 150 x 150 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-150x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 4 шт., В12 В16.В17,В34,В40 Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 H-0-H-200x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 10 шт., В16. Клапан противопожарный нормально открытый 100x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., В16 Клапан противопожарный нормально открытый 100x150 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., В19 Клапан противопожарный нормально открытый 150x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт., В8 Клапан противопожарный нормально открытый 300 x 400 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., В31 Клапан противопожарный нормально открытый 400 x 200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-400x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., В31 Клапан противопожарный нормально открытый 300 x 300 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х300 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., 814 Клапан противопожарный нормально открытый 300x250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт., В19 Клапан противопожарный нормально открытый 600 x 500 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-600х500 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-3 шт., В41 Клапан противопожарный нормально открытый 400 x 400 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-400х400 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., В15.В28. В30.В32.В42 Клапан противопожарный нормально открытый д125мм с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-125 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-5 шт., 815 Клапан противопожарный нормально открытый д 100 мм с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200 x 100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 150 x 100 с EI90 КПУ-1Н-О-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 100 x 100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 150 x 100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 100 x 100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 100 x 100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 150 x 150 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 150 x 200 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 150x200 с Е190 КПУ-1 Н-О-Н-150x200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200 x 100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ22 0 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200x100 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 300 x 250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-300х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 400 x 250 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-400х250 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 150 x 100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-150x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-2 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 100x100 с EI90 КПУ-1 Н-О-Н-100x100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 200x200 с EI90 КПУ-1 Н-0-Н-200х200 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220-1 шт., Вентилятор подпора L-7710m3/4, Р-200Па ВКОП 0-045-Н-00110/2-У1-1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 600x/\00 КПУ-1 Н-3-Н-600х400-2*ф-МВ220 с приводом - 2 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x600 КПУ-1 Н-3-Н-1000x600 - 2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт., Вентилятор подпора L-12420мЗ/ч, Р-160Па ВКОП 0-063-Н-00300/2-У1 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x600 КПУ-1 Н-3-Н-1000х600-2*ф-МВ220 с приводом - 4 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x600 КПУ-1 Н-3-МС-1000х600-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт., Вентилятор подпора L-7100m3/4, Р-340Па ВКОП 0-050-Н-00110/2-У 1 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220 с приводом - 3 шт., Вентилятор подпора L-5940мЗ/ч, Р-500Па ОСА 501-050-Н-00150/2-У2 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000x300-2*ф-МВ220 с приводом - 3 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-МС-1000х300-2*ф-МВ22О с приводом - 1 шт., Вентилятор подпора L-50685M3/4, Р-200Па ВКОП 0-112-Н-00550/4-У1 - 2 шт., Вентилятор подпора L-640мЗ/ч, Р-150Па Канал-ВЕНТ-200-1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый диам.250мм КПУ-1 Н-3-МС-250-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт., Вентилятор подпора L-10800мЗ/ч, Р-275Па ОСА 201-080-Н-00150/4-У2 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1200x400 КПУ-1 Н-З-МС-1200х400-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт., Вентилятор канальный L-410M3/4, Р-300Па Канал-ВЕНТ-200 - 1 шт., Нагреватель электрический Q-6000 Вт Канал-ЭКВ-К-200-6-1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый диам.200мм КПУ-1 Н-3-МС-200-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт., Вентилятор канальный L-380мЗ/ч, Р-150Па Канал-ВЕНТ-160 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый диам. 200 мм КПУ-1 Н-3-МС-200-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт., Вентилятор крышный с выбросом вверх КРОВ61-080-ДУ400-Н-00400/06-У1 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 700x300 КПУ-1 Н-3-Н-700x300-2*ф-МВ220 с приводом - 2 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000 x 400 КПУ-1 Н-З-Н-1000x400-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт., Вентилятор крышный с выбросом вверх L-13530мЗ/ч, Р-1510Па КРОВ61-080-ДУ400-Н-01500/04-У1 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000 x 500 КПУ-1 Н-З-МС-1000x500-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000 x 300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220. с приводом - 3 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x500 КПУ-1 Н-З-Н-1000х500-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт., Вентилятор крышный с выбросом вверх КРОВ60-080-ДУ400-Н-01100/04-У1 - 1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 600 x 300 КПУ-1 Н-3-Н-600х300-2*ф-МВ220 с приводом - 4 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x300 КПУ-1 Н-З-Н-1000x300-2*ф-МВ220 с приводом - 1 шт., Вентилятор крышный с выбросом вверх L-13530мЗ/ч, Р-1510Па КРОВ61-080-ДУ400-Н-01500/04-У 1 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 600x300 КПУ-1 Н-3-Н-600х300-2*ф-МВ220 с приводом - 4 шт., Клапан противопожарный нормально закрытый 1000 x 300 КПУ-1 Н-З-Н-1000х300-2*ф-МВ220 с приводом - 6 шт., Вентилятор крышный с выбросом вверх L-40240m3/4, Р-675Па КРОВ91-100-ДУ400-Н-01850/06-У 1 - 4 шт., Вентилятор крышный с выбросом вверх КРОВ61-080-ДУ400-Н-00400/06-У1 - 2 шт., Автоматическая насосная установка с двумя пожарными насосами NB 125-315/277 марки АНПУ 2 NB 125-315/277-РКП-26 (CR 3-23)-02-22-31-37 - 1 шт., Узел управления спринклерный водозаполненный DN 100 УУ-С100/1,6В-ВФ.04 - 3 шт., Узел управления дренчерный с электроприводом DN 100 УУ-Д100/1,6(324)-ВФ.04-2 шт., Узел управления дренчерный с электроприводом DN 150 - 1 шт.

По двустороннему акту приема-передачи ТМЦ N 1 от 18.12.2020 по договору N Х-18/12/20 ответчику было передано следующее оборудование: Датчик-реле уровня РОС-301-1 шт., Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм-2 шт., Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 (МТ-63-10) -применит. - 5 шт., Установка повышения давления 5мЗ/ч, 35 м вод.ст., Hydro Multi-S G 2CR5-8 - 1 шт., Гидроаккумулятор мембранный 100 л Refix DC-100 - 1 шт., Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С) (ТБ-63-1) - применит. - 2 шт., Насос грязевый, тип: ГНОМ 10-1ОТ-2 шт., Канализационная насосная установка SOLOLIFT2 D-2-1 шт., Затворы канализационные HL710.2EPC с электроприводом диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ-5 шт., Мотопомпа преносная бензиновая 910 л/мин ФИО4 910 БХГ-2 шт., Тепловой пункт "Данфос" серии SUB-D. Тепловой пункт для системы ГВС двухступенчатой с моноблоком-1 шт., Тепловой пункт "Данфос" серии SUB-H. Тепловой пункт для системы отопления или вентиляции с теплообменом-1 шт., Тепловычислитель СПТ 941.20-1 шт., Электромагнитный преобразователь расхода Ду 100 "МастерФлоу" 5.2-Х-100 (кат. Б) -2 шт., Термометр сопротивления КТПТР-01-1 шт., Датчик давления СДВ "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0 - 2 шт., GSM-модем - 1 шт., Насос погружной дренажный "WILO" ТМ 32/8-10т - применит. (WILO Drain-TMV 32/11) - 1 шт., Смесительный узел КЭВ-УТМ4-3 шт., П1.Приточная установка LV-ASU-HR1-ES-60R Lessar-1 шт., Клапан противопожарный нормально открытый диам. 100 мм с EI90 КПУ-1Н-0-Н-100 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 2 шт., Клапан противопожарный нормально открытый 150 x 150 с EI90 КПУ-1Н-0-Н-150x150 с электромеханическим приводом 2*ф-МВ220 - 1 шт., Шинопровод ШП-3-1 шт., Шинопровод ШП-4-1 шт., Ящики управления, тип: Я 5411 1874-3074 УХЛ4 - применит. (РУСМ5411-2274-УХЛ4) - 1 шт., Ящики управления, тип: Я 5111 3174-3474 УХП4 (РУСМ5111-3174-УХЛ4) - 3 шт., Ящики управления, тип: Я 5111 3574, 3674 УХЛ4 (РУСМ5111-3574-УХЛ4) - 2 шт., Ящики управления, тип: Я 5111 3574, 3674 УХЛ4 (РУСМ5111-3674-УХЛ4) - 1 шт., Ящики управления, тип: Я 5111 3774, 3874 УХЛ4 (РУСМ5111-3774-УХЛ4) - 4 шт., Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-1874-УХЛ4) - 1 шт., Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-2874-УХЛ4) - 2 шт., Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-2974-УХЛ4) - 2 шт., Ящики управления, тип: Я 5141 1874-3074 УХЛ4 (РУСМ5141-3074-УХЛ4) - 1 шт., Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ - применит. (ЯОУ 9602-3474-У3.1 IP31) - 1 шт., Ящики управления, тип: Я 5141 3174-3474 УХЛ4 (РУСМ5141-3274-УХЛ4). - 3 шт., Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,: с кнопками управления ПМ12-010120 ЮА - 32 шт., Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,: с кнопками управления ПМ12-025120 25А - 4 шт., Ящики с понижающим трансформатором автомат, выключателем,: 36в ЯТП-0,25-2 - применит. (ЯТЛ-0,25-220/42) - 10 шт., Трансформатор силовой сухой с геафолевой литой изоляцией мощностью 1600 кВА, 6/0,4 кВ ТСДГЛ-1600/6/0,4 кВ. Система принудительного охлаждения трансформатора в комплекте со шкафом управления вентиляцией - 2 шт., ЩО70-2-48 ввода N 1, N 2 - 2 шт., ЩО70-2-44 линейная панель для подключения шинопровода1600А - 2 шт., ЩО70-2-73 секционная панель - 1 шт., ЩО70-2-09 линейная - 2 шт., ЩО70-3-95 - 4 шт., Шина сборная на ЩО70-1 шт. ЩСН - 1 шт. Конструкция ВВ - 2 шт., Шинный мост 0,4 1600 кВА L = 1.2 - 2 шт., Шинопровод 0,4 кВ - 1 шт., Блок канатный 1-ручьевой, диаметром 300 мм БК-1-300 - 12 шт., Блок канатный 2-ручьевой, диаметром 300 мм БК-2-300 - 12 шт., Блок канатный 3-ручьевой, диаметром 300 мм БК-3-300 - 24 шт., Лебедка вертикальная софитного подъема, мощность 1,1 кВт, скорость 0,24 м/с, канатоемкость 19 м, полезная грузоподъемность 150 кг, крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛСП-ВЗ/150/0,24 - 12 шт., Блок канатный 4-ручьевой, диаметром 300 мм БК-4-300 - 8 шт., Лебедка вертикальная софитного подъема, мощность 3,0 кВт, скорость 0,22 м/с, канатоемкость 19 м, полезная грузоподъемность 580 кг крепежные элементы к металлическим конструкциям сцены ЛСП-В3/580/0,22 - 4 шт.

При этом отклоняя довод ООО «Витострой» о том, что фактически оборудование ему не передавалось, суд апелляционной инстанции исходил из того что перечень товарно-материальных ценностей, передаваемых на хранение ответчику, содержится в приложениях к договорам и подписан со стороны генерального директора ООО «Витострой», скреплен печатью организации ответчика.

В материалах дела также имеются акты приема-передачи товарных ценностей от 07.12.2020 и от 18.12.2020. Заявляя в суде первой инстанции о фальсификации указанных актов, ответчик одновременно не ходатайствовал о назначении судебной экспертизы. Кроме того, как указал суд апелляционной инстанции, фактически проверка заявления о фальсификации доказательства сводится к оценке оспариваемых доказательств до принятия окончательного судебного акта по делу. Заявление о фальсификации может проверяться путем оценки совокупности имеющихся в материалах дела доказательств, что было сделано судом первой инстанции.

Кассационная коллегия, учитывая изложенное и действуя в пределах своих полномочий, из которых исключено установление иных обстоятельств, чем были установлены судами, не усматривает оснований не согласиться с выводами судов и признает, что судами установлены все существенные обстоятельства дела, правильно применены правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения, спор разрешен в соответствии с установленными обстоятельствами и представленными доказательствами при правильном применении норм процессуального права.

Приведенные в кассационной жалобе доводы проверены судом округа и отклонены, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм материального и процессуального права, а сводятся к несогласию с выводами судов и направлены на переоценку исследованных судами доказательств и установленных обстоятельств, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Доводы заявителя жалобы о том, что судами необоснованно отказано в удовлетворении ходатайств о назначении судебной экспертизы, не могут являться основанием для отмены судебных актов, поскольку вопрос о необходимости проведения экспертизы, согласно статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находится в компетенции суда, разрешающего дело по существу, при этом заключение эксперта на основании части 2 статьи 64 и части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследуется и оценивается наряду с другими доказательствами по делу, из чего следует, что правовой статус заключения судебной экспертизы определен законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы и не носит обязательного характера.

Суды не нашли оснований для назначения по делу судебной экспертизы в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что имеющиеся в деле доказательства позволяют рассмотреть спор по существу, необходимость и основания для проведения судебной экспертизы отсутствуют.

Нарушений судами норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебных актов, кассационной коллегией не установлено.

Таким образом, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены принятых по делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2022 года и  постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2023 года по делу №А40-149420/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Вито-строй» – без удовлетворения.

 

Председательствующий-судья                                              Е.В. Кочергина 

 

Судьи:                                                                                         Н.А. Аникина 

 

                                                                                                 Н.Н. Колмакова