АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-13617/2020

город Вологда

19 февраля 2021 года

 

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 февраля 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2021 года. 

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Колтаковой Н. А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Администрации сельского поселения Желябовское (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Пултэк» (ОГРН 

<

***>) об обязании устранения недостатков выполненных работ,

при участии: от истца – глава сельского поселения Желябовское ФИО2 на основании постановления от 02.04.2019, от ответчика – ФИО3 по доверенности от 20.08.2020, 

 

у с т а н о в и л:

Администрация сельского поселения Желябовское (ОГРН 

<

***>; далее - Администрация) обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Пултэк» (ОГРН 

<

***>; далее - Общество) об обязании устраненить недостатки выполненных работ по муниципальным контрактам:

По муниципальному контракту от 17.07.2017 № 0130300017017000009-0784775-01 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия с пешеходным переходом при ремонте моста через реку Ластовка в д. Слуды:

-  провести планировочные работы после восстановления насыпи на площади 240 кв.м.;

-  восстановить прослойку из нетканого синтетического материала по приготовленному основанию на площади 275 кв.м.;

-  восстановить подстилающие и выравнивающие слои оснований из щебня (гравия) для строительных работ марки Др.8. фракция 10-20 мм объемом 48 куб. м.;

-  восстановить подстилающие и выравнивающие слои оснований из песчано-гравийной смеси, объемом 58 куб. м.;

-  восстановить основание городских проездов, толщиной слоя 16 см из бетона класса В15 (М200) с укладкой сетки сварной из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150x150 мм на площади 100,5 кв.м.;

-  восстановить укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа «ПРУДОН-494», с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высотой ячеек: 10 см на площади 178 кв.м.;

-  восстановить трубопроводы диаметром 200 мм из безнапорных труб длиной 4 м.;

-  восстановить дождеприемники - 2 фасонных части;

-  восстановить металлическое ограждение и его окрасочное покрытие длиной 30 м.;

-  восстановить металлическое барьерное ограждение с шагом стоек 1 м длиной 63 м.;

По муниципальному контракту от 21.07.2017 № 0130300017017000008-0784775-02 на выполнение работ по ремонту водопропускного сооружения приремонте моста через реку Ластовка в д. Слуды:

-  выполнить восстановление дорожной насыпи из грунта 2 гр объемом 314 куб.м.;

-  выполнить восстановление дорожной насыпи из глины с ее доставкой объемом 800 куб. м.;

-  провести восстановление трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1000 мм с герметизацией стыков после восстановления основания длиной 30 м.;

-  восстановить дорожное покрытие из сборных шестигранных железобетонных плит после восстановления насыпи, объемом 3,36 куб.м. и в количестве 2 плит дорожных ПДН, ПДО/бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/(серия 3.503.1-91 вып. 1);

По муниципальному контракту от 02.10.2017 № 1 на выполнение работ по берегоукреплению водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды:

-  восстановить металлический каркас из швеллера № 16 весом 454 кг.;

-  восстановить окраску с огрунтовкой по металлу швеллеров эмалью ЭП-1236 на площади 24,05 кв.м.;

-  восстановить армирование грунтовых насыпей георешетками на площади 90 кв.м.;

По муниципальному контракту от 03.10.2017 № 2 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды:

-  установить на место упавшие дорожные плиты после восстановления основания, объемом 4 куб.м.;

-  восстановить укрепление дна и откосов монолитным железобетоном с армированием проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-01 объемом 4,8 куб.м.;

-  установить уголок металлический в тело железобетона при бетонировании весом 0,2 т.;

-  провести засыпку пазух песком природным для строительных работ повышенной крупности и крупным объемом 5,6 куб.м.;

По муниципальному контракту от 27.11.2017 № 1 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (крепление дна и откосов):

- восстановить укрепление дна и откосов монолитным железобетоном с армированием проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-01 объемом 2 куб.м.;

- установить уголок металлический в тело железобетона при бетонировании, весом 0.4 т.;

По муниципальному контракту от 30.11.2017 № 2 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д, Слуды (засыпка песком и монтаж металлоконструкций):

-  провести засыпку пазух песком природным для строительных работ повышенной крупности и крупным объемом 56 куб.м.;

-  восстановить металлический каркас из швеллера № 16 весом 0,2414 т.;

По муниципальному контракту от 01.12.2017 № 3 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (устройство дорожных покрытий и крепление дна и откосов):

-  установить на место упавшие дорожные плиты после восстановления основания объемом 5 куб.м.;

-  восстановить укрепление дна и откосов монолитным железобетоном с армированием проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-01 объемом 8 куб.м.;

По муниципальному контракту от 04.12.2017 № 4 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (засыпка песком и монтаж металлоконструкций):

-  провести засыпку пазух песком природным для строительных работ повышенной крупности и крупным объемом 5,6 куб.м.;

-  восстановить металлический каркас из швеллера № 16 весом 0,5304 т.;

-  восстановить окраску с огрунтовкой по металлу швеллеров эмалью ЭП-1236 на площади 40,885 кв.м.

Исковые требования указаны с учетом принятого к рассмотрению заявления об изменении иска от 08.02.2021, в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал.

Иск основан на статьях 702, 722, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик с иском не согласился по основаниям, изложенным в отзыве. Представитель ответчик в судебном заседании доводы отзыва поддержал. При этом представитель ответчика отказался от указанного в отзыве довода о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора.

Представитель истца ходатайствовала об отложении рассмотрения дела для предоставления ответчику возможности ознакомления с представленными истцом в заседании документами.

Ответчик против данного ходатайства возразил, указал, что считает дело подлежащим рассмотрению.

С учетом пояснения ответчика ходатайство истца судом отклонено.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

Материалами дела подтверждаются следующие обстоятельства.

Между Администрацией (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) были заключены муниципальные контракты:

-   17.07.2017 № 0130300017017000009-0784775-01 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия с пешеходным переходом при ремонте моста через реку Ластовка в д. Слуды,

-   21.07.2017 № 0130300017017000008-0784775-02 на выполнение работ по ремонту .водопропускного сооружения при ремонте моста через реку Ластовка в д. Слуды,

- 02.10.2017 № 1 на выполнение работ по берегоукреплению водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды,

-  03.10.2017 № 2 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды,

-   27.11.2017 № 1 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (крепление дна и откосов),

-  30.11.2017 № 2 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (засыпка песком и монтаж металлоконструкций),

-  01.12.2017 № 3 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускною сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (устройство дорожных покрытий и крепление дна и откосов),

- 04.12.2017 № 4 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (засыпка песком и монтаж металлоконструкций).

Результаты работ были сданы заказчику:

- по муниципальному контракту от 17.07.2017 № 0130300017017000009-0784775-01 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия с пешеходным переходом при ремонте моста через реку Ластовка в д. Слуды по акту выполненных работ № 1 от 30.09.2017,

- по муниципальному контракту от 21.07.2017 № 0130300017017000008-0784775-02  на выполнение работ по ремонту водопропускного сооружения при ремонте моста через реку Ластовка в д. Слуды по акту выполненных работ № 1 от 15.08.2017,

-  по муниципальному контракту от 02.10.2017 № 1 на выполнение работ по берегоукреплению водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды по акту выполненных работ № 1 от 16.11.2017,

-   по муниципальному контракту от 03.10.2017 № 2 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды по акту выполненных работ № 1 от 16.11.2017,

-   по муниципальному контракту от 27.11.2017 № 1 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (крепление дна и откосов) по акту выполненных работ № 1 от 11.12.2017,

-   по муниципальному контракту от 30.11.2017 № 2 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (засыпка песком и монтаж металлоконструкций) по акту выполненных работ № 1 от 11.12.2017,

-   по муниципальному контракту от 01.12.2017 № 3 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (устройство дорожных покрытий и крепление дна и откосов) по акту выполненных работ № 1 от 15.12.2017,

-   но муниципальному контракту от 04.12.2017 № 4 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (засыпка песком и монтаж металлоконструкций) по акту выполненных работ №1 от 18.12.2017.

Заказчиком произведена оплата выполненных работ.

В апреле 2018 года произошло обрушение моста через реку Ластовка в д. Слуды и разрушение водопропускного сооружения, являвшихся объектами выполнения работ по заключенным контрактам.

Заказчик извещением № 374 от 21.08.2019 вызвал представителя подрядчика для проведения осмотра моста через реку Ластовка в д. Слуды и составления акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка их устранения.

01 ноября 2019 года заказчиком и подрядчиком составлен акт первичного осмотра мостового перехода через реку Ластовка в д. Слуды, в котором зафиксировано обрушение мостового перехода.

В акте указано:

1. Мостовой переход через реку Ластовку в д. Слуды был обрушен в апреле 2018 года, по предположениям заказчика из-за некачественного выполнения работ. Восстановление мостового перехода через реку Ластовка в д. Слуды является гарантирующими обязательствами со стороны подрядчика;

2. По предположению подрядчика обрушение произошло, возможно, в связи с размытием основания, либо нарушением превышения допустимых эксплуатационных нагрузок на поверхность мостового перехода, в связи с некачественно проработанным техническим решением и отсутствием проекта.

Акт подписан директором Общества, главой сельского поселения Желябовское, заведующей сектором ЖКХ администрации Устюженского муниципального района.

Администрация претензией потребовала устранения установленных недостатков выполненных работ. 

В ответе на претензию Общество указало, что обрушение моста произошло ввиду отсутствия проекта.

Ссылаясь на необходимость исполнения Обществом гарантийных обязательств, истец обратился с рассматриваемым иском в суд.

Требование истца о безвозмездном устранении недостатков является самостоятельным способом защиты нарушенного права. 

Одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12 ГК РФ, является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Качество выполненной работы согласно статье 721 ГК РФ должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 

В силу статьи 756 ГК РФ при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1-5 статьи 724 ГК РФ. Согласно статье 724 ГК РФ сроки обнаружения недостатков составляют 5 лет.

Согласно пунктам 8.1, 8.2, 8.4 заключенных сторонами контрактов подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов в период гарантийного срока. Срок предоставления гарантии качества на выполняемые работы должен составлять не менее 60 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов (недостатков) выполненных работ, подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от заказчика.

Обрушение моста произошло в течение гарантийного срока.

Возражая против иска, ответчик ссылается на отсутствие проекта, указывает, что Администрации надлежало представить проектную и рабочую документацию, получит заключение государственной экспертизы, разработать технические решения, произвести расчеты строительства моста.

В соответствии со статьей 716 ГК РФ Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (пункт 2 статьи 716 ГК РФ).

Представитель ответчика в судебном заседании представил письмо от 14.08.2018. Данное письмо заявления о приостановлении работ не содержит. Кроме того, у ответчика отсутствует подтверждение направления письма истцу.

При этом ответчик, будучи подрядчиком, является профессиональным участником ранка подрядных работ и в силу этого мог и был обязан установить препятствия к выполнению работ, могущие привести к неблагоприятным для заказчика последствиям, заявить о приостановлении работ. Тем более, осознавая социальную значимость объекта работ.

Поскольку соответствующие доказательства в деле отсутствуют, ответчик не воспользовался правом, предоставленным статьей 716 ГК РФ, не предупредил заказчика о препятствиях к выполнению работ, не заявил о приостановлении работ, чем лишил себя права ссылаться на такие обстоятельства.

Как предусмотрено частью 1 статьи 65 АПК РФ, каждое лицо участвующее в деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательств довода о том, что обрушение произошло, возможно, в связи с размытием основания, либо нарушением превышения допустимых эксплуатационных нагрузок на поверхность мостового перехода, ответчиком не представлено. Также не представлено доказательств того, что при разрушении моста в результате размытия основания отсутствует вина ответчика.

Довод ответчика о нарушении истцом при заключении контрактов процедуры, предусмотренной Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ввиду «раздробления» (как именует представитель ответчика) работ в отношении одного объекта (моста) на несколько контрактов, судом не принимается, поскольку контракты никем не оспорены, недействительными не признаны, сторонами исполнялись, денежные средства ответчиком как подрядчиком получены, от исполнения контрактов ответчик не отказывался, работы не приостанавливал.

Кроме того, представитель истца в судебном заседании указал, что шесть контрактов (от 02.10.2017 №1, от 03.10.2017 №2, от 27.11.2017 №1, от 30.11.2017 №2, от 01.12.2017 №3, от 04.12.2017 №4), как и сметы к ним, были составлены именно ответчиком. 

В судебном заседании истцом представлены таблицы, содержащие сведения о выявленных дефектах и необходимых мерах по их устранению. Данные таблицы ответчиком не оспорены.

Представитель истца в судебном заседании заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела для предоставления ответчику возможности ознакомления с представленными ею документами.

Представитель ответчика возразил против данного ходатайства. В качестве причин указал следующее: удаленность местонахождения Арбитражного суда Вологодской области от местожительства представителя ответчика; необходимость продвинуться в рассмотрении дела, поскольку судебное заседание по делу не первое. Также указал, что для ответчика не имеется абсолютно никакой необходимости в ознакомлении с представленными истцом документами. И сообщил, что ответчику понятны требования истца.

В силу статей 65 и 9 АПК РФ к обязанности стороны по делу относится представление доводов и доказательств в обоснование своей позиции, сторона несет риск наступления последствий совершения или несовершения ею процессуальных действий.

С учетом того, что ответчик аргументировано возражал против отложения дела, настаивал на рассмотрении дела по существу, пояснил, что в ознакомлении с документами необходимости не имеется, при этом в судебном заседании представитель ответчика был ознакомлен с представленными истцом доказательствами, позицию ответчика выразил, ходатайство истца судом было отклонено, дело рассмотрено.

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ в связи с удовлетворением исковых требований государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика. При этом суд исходит из того, что требования истца основаны на восьми контрактах, с учетом этого каждое из требований является самостоятельны. Таким образом, общая сумма подлежащей взысканию с ответчика в федеральный бюджет государственной пошлины, составляет 48 000 рублей. 

  Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области 

 

р е ш и л :

обязать общество с ограниченной ответственностью «Пултэк» в срок до 31.08.2021 устранить недостатки выполненных работ по муниципальным контрактам:

По муниципальному контракту от 17.07.2017 № 0130300017017000009-0784775-01 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия с пешеходным переходом при ремонте моста через реку Ластовка в д. Слуды:

-  провести планировочные работы после восстановления насыпи на площади 240 кв.м.;

-  восстановить прослойку из нетканого синтетического материала по приготовленному основанию на площади 275 кв.м.;

-  восстановить подстилающие и выравнивающие слои оснований из щебня (гравия) для строительных работ марки Др.8. фракция 10-20 мм объемом 48 куб. м.;

-  восстановить подстилающие и выравнивающие слои оснований из песчано-гравийной смеси, объемом 58 куб. м.;

-  восстановить основание городских проездов, толщиной слоя 16 см из бетона класса В15 (М200) с укладкой сетки сварной из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150x150 мм на площади 100,5 кв.м.;

-  восстановить укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа «ПРУДОН-494», с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высотой ячеек: 10 см на площади 178 кв.м.;

-  восстановить трубопроводы диаметром 200 мм из безнапорных труб длиной 4 м.;

-  восстановить дождеприемники - 2 фасонных части;

-  восстановить металлическое ограждение и его окрасочное покрытие длиной 30 м.;

-  восстановить металлическое барьерное ограждение с шагом стоек 1 м длиной 63 м.;

По муниципальному контракту от 21.07.2017 № 0130300017017000008-0784775-02 на выполнение работ по ремонту водопропускного сооружения приремонте моста через реку Ластовка в д. Слуды:

-  выполнить восстановление дорожной насыпи из грунта 2 гр объемом 314 куб.м.;

-  выполнить восстановление дорожной насыпи из глины с ее доставкой объемом 800 куб. м.;

-  провести восстановление трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1000 мм с герметизацией стыков после восстановления основания длиной 30 м.;

-  восстановить дорожное покрытие из сборных шестигранных железобетонных плит после восстановления насыпи, объемом 3,36 куб.м. и в количестве 2 плит дорожных ПДН, ПДО/бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/(серия 3.503.1-91 вып. 1);

По муниципальному контракту от 02.10.2017 № 1 на выполнение работ по берегоукреплению водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды:

-  восстановить металлический каркас из швеллера № 16 весом 454 кг.;

-  восстановить окраску с огрунтовкой по металлу швеллеров эмалью ЭП-1236 на площади 24,05 кв.м.;

-  восстановить армирование грунтовых насыпей георешетками на площади 90 кв.м.;

По муниципальному контракту от 03.10.2017 № 2 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды:

-  установить на место упавшие дорожные плиты после восстановления основания, объемом 4 куб.м.;

-  восстановить укрепление дна и откосов монолитным железобетоном с армированием проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-01 объемом 4,8 куб.м.;

-  установить уголок металлический в тело железобетона при бетонировании весом 0,2 т.;

-  провести засыпку пазух песком природным для строительных работ повышенной крупности и крупным объемом 5,6 куб.м.;

По муниципальному контракту от 27.11.2017 № 1 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (крепление дна и откосов):

- восстановить укрепление дна и откосов монолитным железобетоном с армированием проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-01 объемом 2 куб.м.;

- установить уголок металлический в тело железобетона при бетонировании, весом 0.4 т.;

По муниципальному контракту от 30.11.2017 № 2 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д, Слуды (засыпка песком и монтаж металлоконструкций):

-  провести засыпку пазух песком природным для строительных работ повышенной крупности и крупным объемом 56 куб.м.;

-  восстановить металлический каркас из швеллера № 16 весом 0,2414 т.;

По муниципальному контракту от 01.12.2017 № 3 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (устройство дорожных покрытий и крепление дна и откосов):

-  установить на место упавшие дорожные плиты после восстановления основания объемом 5 куб.м.;

-  восстановить укрепление дна и откосов монолитным железобетоном с армированием проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-01 объемом 8 куб.м.;

По муниципальному контракту от 04.12.2017 № 4 на выполнение работ по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (засыпка песком и монтаж металлоконструкций):

-  провести засыпку пазух песком природным для строительных работ повышенной крупности и крупным объемом 5,6 куб.м.;

-  восстановить металлический каркас из швеллера № 16 весом 0,5304 т.;

-  восстановить окраску с огрунтовкой по металлу швеллеров эмалью ЭП-1236 на площади 40,885 кв.м.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пултэк» в федеральный бюджет 48 000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

 

Судья                                                                                                    Н.А. Колтакова