Арбитражный суд Московской области

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

гор. Москва

 

«14» ноября 2022 года                                    

Дело № А41-45106/22

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 ноября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 14 ноября 2022 года.     

  Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д,ФИО1,

рассмотрев в открытом  судебном заседании  дело по исковому заявлению 

АО "МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ  КОМПАНИЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО "ТПО "НОВЫЙ ВЕК"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 509650 руб. 61 коп., 

при участии в заседании: согласно протоколу 

У С Т А Н О В И Л:

АО "МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ  КОМПАНИЯ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском (уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, уточнения приняты судом) к ООО "ТПО "НОВЫЙ ВЕК" о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по Договору подряда от 14.07.2021 № 313/21-ДКС на выполнение комплекса работ в размере 509 650 руб. 61 коп., ссылаясь на нарушение ответчиком обязательств по выполнению работ в срок, установленный указанным договором. 

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом, возражений и отзыв на иск не представил. 

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, заслушав представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

По материалам дела судом установлено, что между АО «Мособлэнерго» (далее - истец, Заказчик) и ООО "ТПО Новый Век" далее - ответчик, Подрядчик) заключен договор подряда от 14.07.2021 № 313/21-ДКС (далее -Договор).

В соответствии с п. 1.1 Договора, ст. 702 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ на Объекте Заказчика, указанного в п. 1.1. Договора и сдать результат работ Заказчику.

Согласно п. 1.3. Договора Результатом работ является ввод Объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по типовой форме № КС-14.

Согласно п. 2.1. Договора Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, определенные в соответствии с графиком работ (приложение № 2 к Договору).

В силу абз. 2 п. 1 ст. 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.

В соответствии с ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с ст. 330 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения должник обязан оплатить кредитору неустойку (штраф, пени), определенную Договором.

В п. 10.3. Договора установлено, что за нарушение сроков выполнения и сдачи результата работ Подрядчик обязан заплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более цены Договора.

28.02.2022 № 10-1981/22 ответчику направлена претензия (далее - Претензия) об оплате неустойки (пени), которая оставлена без удовлетворения.

Поскольку ответчик в добровольном порядке требование истца не исполнил, нарушил срок выполнения и сдачи результата работ по Договору, в связи с чем, Заказчик начислил Подрядчику пени в соответствии с п. 10.3. Договора в размере 509 650 руб. 61 коп. за период с 09.02.2022 по 11.04.2022, истец обратился с настоящим иском в суд.

В соответствии с  п. 1 ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет проверен судом, признан   верным и подлежащим применению.

Оснований для снижения неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ у суда не имеется, ходатайств о применении ст. 333 ГК РФ ответчиком не заявлено. 

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11, от 08.10.2013 N 12857/12, от 13.05.14 N 1446/14, определениях Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.14 N 309-ЭС14-923, от 09.10.15 N 305-КГ15-5805, сторона процесса вправе представить в подтверждение своих требований или возражений определенные доказательства, которые могут быть признаны судом минимально достаточными для подтверждения обстоятельств, на которые ссылается такая сторона, при отсутствии их опровержения другой стороной спора (доказательства prima facie). При этом нежелание второй стороны представить доказательства, подтверждающие ее возражения и опровергающие доводы первой стороны, представившей доказательства, должно быть квалифицировано исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. 

Исходя из принципа состязательности, подразумевающего, в числе прочего, обязанность раскрывать доказательства, а также сообщать суду и другим сторонам информацию, имеющую значение для разрешения спора, нежелание стороны опровергать позицию процессуального оппонента должно быть истолковано против нее (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2018 N 308-ЭС17-6757(2,3)).

Ответчик не представил мотивированных возражений по существу иска и обосновывающих их доказательств, не опроверг доводов искового заявления, также не представил доказательств того, что действуя разумно и добросовестно, по уважительным причинам не смог представить такие доказательства суду, таким образом, признал обстоятельства, на которые сослался истец в обоснование иска (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, установленный судом факт просрочки выполнения ответчиком своих обязательств по спорному договору, при наличии документально подтвержденных требований истца, суд полагает, что исковые требования,   подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ООО "ТПО "НОВЫЙ ВЕК"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу АО "МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ  КОМПАНИЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 509 650 руб. 61 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 193 руб. 00 коп.

Возвратить АО "МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ  КОМПАНИЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из средств федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 016 руб. 00 коп., излишне уплаченную по платежному поручению № 4098 от 27.06.2022.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

 

Судья                                                         Е.А. Морозова