Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-13907/2018

24 мая 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  16 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  24 мая 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панюшкиным Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТАЙЛ" (адрес:  Россия 190000, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/6Н ОФ.1, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" (адрес:  Россия 195027, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/7-Н, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 177 375 руб. 00 коп.

 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 10.01.18

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом 

 

установил:

ООО "ЭКОСТАЙЛ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ООО "СТРОЙИНВЕСТ" о взыскании задолженности в размере 161 250 руб. 00 коп. и пеней в размере 16 125 руб. 00 коп. за период с 11.07.17 по 24.01.18 по договору подряда №005-290617 от 29.06.17.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его участия на основании ст.156 АПК РФ.

Определением от 02.04.18 года суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства на основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

07.05.18 распоряжением от заместителя председателя Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФИО2 дело передано в производство судьи Сергеевой О.Н.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор подряда №005-290617 от 29.06.17. по доставке и укладке универсального покрытия на основе резиновой и каучуковой крошки на объекте по адресу: 

<

...>. 

Стоимость работ составляет 322 500 руб. 00 коп.

Срок окончания выполнения работ: 5 дней.

Истец – исполнитель выполнил работы в полном объеме, что подтверждается актами формы КС-2, КС-3.

Ответчик произвел частичную оплату  в размере 161 250 руб. 00 коп. В настоящее время задолженность ответчика составляет 161 250 руб. 00 коп.

В соответствие с п. 2.5 договора за просрочку внесения платежей предусмотрены пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности. Расчет произведен истцом за период с 11.07.2017 по 24.01.2018, проверен судом и признан обоснованным.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАЙЛ" 177 375 руб. 00 коп., из них: 161 250 руб. 00 коп. основного долга и 16 125 руб. 00 коп. пеней за период с 11.07.17 по 24.01.18, а также 6 321 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.