927/2023-98736(2) 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А65-10122/2022

город Самара

5 мая 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 4 мая 2023 года.  Постановление в полном объеме изготовлено 5 мая 2023 года.  

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего судьи Кузнецова С.А., судей Буртасовой О.И., Котельникова  А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, с участием: от истца: представитель ФИО2 (доверенность  от 01.02.2023 № 1), от других лиц, участвующих в деле, представители не явились,  извещены надлежащим образом, рассмотрев в открытом судебном заседании  апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "КамЭнергоМаш"  на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.03.2023 (судья Харин Р.С.)  по делу № А65-10122/2022 по иску общества с ограниченной ответственностью  "Архитектурно-строительная компания" к обществу с ограниченной ответственностью  "КамЭнергоМаш" о взыскании долга и по встречному иску общества с ограниченной  ответственностью "КамЭнергоМаш" к обществу с ограниченной ответственностью  "Архитектурно-строительная компания" о взыскании убытков, третье лицо: публичное  акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительная  компания" (далее – ООО "АСК", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики  Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КамЭнергоМаш"  (далее – ООО "КамЭнергоМаш", ответчик) о взыскании 734 368, 80 руб. долга.  

ООО "КамЭнергоМаш" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с  встречным иском к ООО "Архитектурно-строительная компания" о взыскании  2 324 574 руб. расходов по устранению выявленных недостатков на основании  произведенного расчета исходя из ранее представленной первичной документации  (уточненные встречные исковые требования).  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное  общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина (далее – ПАО «Татнефть», третье лицо).  

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.03.2023  первоначальный иск удовлетворен, во встречном иске отказано.  

Ответчик обжаловал судебный акт суда первой инстанции в порядке,  предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ).  

В апелляционной жалобе и в дополнении к ней ответчик просит решение  Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.03.2023 в части отказа в  удовлетворении встречного иска отменить, принять новый судебный акт.  

Апелляционная жалоба и дополнение к ней мотивированы неполным выяснением  и недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, несоответствием  изложенных в обжалуемом судебном акте выводов обстоятельствам дела, нарушением  и неправильным применением норм материального и процессуального права.  

Истец в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить обжалуемый судебный  акт без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

В судебном заседании представитель истца возражал относительно  удовлетворения апелляционной жалобы.  

Суд апелляционной инстанции отказал в приобщении к материалам дела  дополнительных доказательств, приложенных к дополнению к апелляционной жалобе,  в связи с отсутствием предусмотренных частями 2, 3 статьи 268 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации оснований для принятия судом  апелляционной инстанции дополнительных доказательств, поскольку представившее  дополнительные доказательства лицо не обосновало невозможность их представления в  суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, а из буквального толкования  положений статьи 268 данного Кодекса следует, что в основу судебного акта суда  апелляционной инстанции могут быть положены доказательства, удостоверяющие  факты, которые имели место до вынесения решения суда первой инстанции  (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от  19.05.2009 № 17426/08 по делу № А40-69225/07-89-512).  

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется  Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, предусмотренном  главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в  обжалуемой части (ч. 5 ст. 268 АПК РФ).  

Исследовав материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционной  жалобе, объяснения лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной  инстанции считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по  следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,  20.08.2021 между ООО «КамЭнергоМаш» (заказчик) и ООО «Архитектурно-Строительная Компания» (исполнитель) заключен договор на выполнение работ № Ю- 143/21, по условиям которого исполнитель обязался в течение срока действия  настоящего договора на основании подписанных между сторонами дополнительных  соглашений выполнять работы: по изготовлению элементов воздуховодов (работа), а  заказчик обязался принять результат работ и оплатить в порядке и на условиях,  определенных настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему.  Наименование, вид, количество, объем работ, технические регламенты (технические  условия), требования регламентирующих документов, требования к качеству работ,  указание на чертежи, стоимость работ, порядок расчетов за выполненные работы, сроки  выполнения работ по каждому заданию заказчика согласовываются сторонами в  дополнительных соглашениях к настоящему договору. Дополнительные соглашения к  договору являются его неотъемлемой частью (раздел 1 договора).  

Цена будет определяться как общая сумма выполненных в период действия  настоящего договора работ, согласованных сторонами по дополнительным  соглашениям к настоящему договору. Стоимость определенной работы и сроки оплаты  определяются на основании дополнительных соглашений к настоящему договору.  Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств  

на расчетный счет исполнителя на основании счета на оплату и подписанных  сторонами первичных учетных документов, подтверждающих факт выполнения работ в  течение 15 календарных дней с момента подписания сторонами первичных учетных  документов, подтверждающих факт выполнения работ, если иной срок оплаты не  согласован сторонами в дополнительных соглашениях.  

В случае, если по условиям дополнительного соглашения предусмотрена  предварительная оплата, исполнитель обязан представить заказчику счет-фактуру на  предварительную оплату в соответствии требованиями Налогового кодекса Российской  Федерации. Работы выполняются по месту нахождения заказчика по адресу: г.  Нижнекамск Промзона, территория филиала АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК- 1). Иное место выполнения работ может быть указано в дополнительных соглашениях  к настоящем) договору (раздел 2 договора).  

Разделом 3 договора предусмотрены права и обязанности сторон. 

Исполнитель обязался выполнить работы в объеме (количестве),  предусмотренном дополнительными соглашениями к настоящему договору; выполнить  работу в соответствии с требованиями к результатам работ, предусмотренными  дополнительными соглашениями к настоящему договору; выполнить работу в сроки,  предусмотренные дополнительными соглашениями к настоящему договору; выполнить  работу собственными силами, инструментами, на оборудовании и из материалов  заказчика; с момента получения от заказчика давальческих материалов по накладной не  отпуск материалов на сторону № М-15, оформить приходный ордер по форме № М-4 с  указанием того, что материал поступил на давальческих условиях, приступить к  выполнению работ. Использовать давальческие материалы только для тех целей, для  которых они были получены. Вернуть остатки неизрасходованных материалов  заказчику. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждение  материалов, изготавливаемой продукции, оборудования до ее приемки заказчиком по  первичным учетным документам. Исполнитель обязан немедленно предупредить  заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:  возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о  способе исполнения работы; иных, не зависящих от исполнителя обстоятельств,  которые грозят годности иле прочности изготавливаемой продукции либо создают  невозможное завершения работы в срок.  

В свою очередь, заказчик обязался предоставлять материалы для выполнения  работ на давальческой основе. Право собственности на них остается у заказчика;  предоставить исполнителю техническую документацию, необходимую для выполнения  работ; принять результат работ по актам приемки выполненных работ; оплатить  стоимость работ в сроки и в размере, согласованные сторонами в дополнительных  соглашениях к настоящему договору.  

Согласно разделу 4 договора, исполнитель выполняет работы в сроки, указанные  в дополнительных соглашениях к настоящему договору. По завершению срока  выполнения работ исполнитель уведомляет заказчика о готовности передать результат  работ и согласовывает с ним дату приема-передачи результата работ. Подготавливает  следующие документы: акт выполненных работ, отчет об использовании давальческого  материала.  

Заказчик осуществляет приемку (входной контроль) результата работ в течение 3- х рабочих дней с момента уведомления от исполнителя о готовности передать  результат работ. В случае, если в момент приемки результата работ заказчик выявит  недостатки (дефекты) результата работ (в том числе по объему (количеству)  выполненных работ или качеству в части внешних недостатков) заказчик делает об  этом отметку в первичных учетных документах. Исполнитель обязан устранить  

выявленные недостатки в течение 15 рабочих дней. Заказчик, обнаруживший после  приемки результата работы отступления от требований настоящего договора  (дополнительных соглашений к настоящему договору) или иные недостатки, которые  не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том  числе такие, которые были умышленно скрыты исполнителем, извещает об этом  исполнителя в течение 2-х рабочих дней после их обнаружения. Требования заказчика  к качеству результата работ принимаются в течение действия гарантийного срока.  Гарантийный срок на результат работ составляет 12 месяцев. При возникновении  между заказчиком и исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы  или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.  Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. Если  экспертиза назначена по соглашению между сторонами расходы на экспертизу несут  обе стороны настоящего договора поровну. В последующем затраты на экспертизу  возмещаются виновной стороной. При выполнении работ исполнитель обязан  соблюдать все установленные действующим законодательством и/или  дополнительными соглашениями к настоящему договору требованиям к результатам  работ.  

Согласно разделу 5 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с  действующим законодательством. Стороны не несут ответственности за неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, если их  надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств  непреодолимой силы (то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях  обстоятельств), в том числе военных действий, гражданских волнений, эпидемии,  блокады, эмбарго, землетрясения, моратория, изменения действующего  законодательства и других стихийных бедствий, если они непосредственно повлияли  на исполнение договора.  

До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок  рассмотрения которой не может превышать 30 календарных дней со дня ее отправления  почтовой связью. Если сторона уклоняется от получения соответствующей претензии, в  том числе путем неполучения письма в почтовом отделении, такая претензия считается  полученной недобросовестной стороной по истечению 30 календарных дней с даты  направления соответствующего документа (п. 10.3 договора).  

Дополнительными соглашениями № 1 от 20.08.2021, № 2 от 01.10.2021 и № 2 А от  01.12.2021, № 3 от 01.12.2021 стороны определили срок выполнения работ (Трубы,  Блоки) до 30.09.2021, 15.12.2021, порядок расчетов: постоплата 100 % в течение  календарных дней с момента подписания акта выполненных работ, с указанием  наименования работ и их стоимости (3 283 860, 34 руб., 5 432 962, 56 руб., 434 368, 80  руб.).  

Истцом по первоначальному иску обязательства исполнены в полном объеме, что  подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ по  форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1  от 15.09.2021, № 2 от 01.10.2021, № 3 от 08.10.2021, № 4 от 15.10.2021, № 5, № 6, № 7  от 04.11.2021, № 8, № 9, № 10 от 05.11.2021, № 11 от 01.12.2021, № 12 от 10.12.2021, №  13 от 31.12.2021.  

Заказчик частично оплатил выполненные работы. С учетом установленной  задолженности, исполнитель обратился к заказчику с претензией № 6 от 08.02.2022, в  которой просил погасить оставшуюся задолженность и сумму неустойки, указав на  возможное обращение в суд. В ответе № 119 от 09.02.2022 заказчик просил направить  

уточненную сумму требований (расчет), сославшись на оставление претензии без  рассмотрения.  

Отсутствие оплаты послужило основанием для обращения истца в суд с иском к  ответчику.  

Суд первой инстанции, разрешая спор по первоначальному иску, исходил из  следующего.  

На основании п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по  заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат  заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить работы.  

В порядке ст. 711, 746 ГК РФ, п. 8 Информационного письма Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 основанием  для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ  является сдача подрядчиком результата работ заказчику.  

В силу ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе  ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем  приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего  предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором  подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на  недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки  (явные недостатки).  

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора  подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном  способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно  скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их  обнаружении.  

Из представленной первичной документации следует принятие работ заказчиком,  в связи с чем возникает обязательство по их оплате.  

В силу ст.ст. 307, 309 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано  совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет  право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны  исполняться надлежащим образом. По общему правилу только надлежащее исполнение  прекращает обязательство (ст. 408 ГК РФ). Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний  отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом  

На основании ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений. Обязанность по представлению в суд доказательств и доказыванию  обстоятельств, обосновывающих требования и возражения стороны, возлагаются на эту  сторону.  

В соответствии с ч. 3 ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на  которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает  другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Факт признания  сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного  заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной  форме, приобщается к материалам дела.  

ООО «КамЭнергоМаш» представлено письменное заявление о признании  первоначальных исковых требований, с указанием на разъяснение правовых  последствий. Данные руководителем ответчика по первоначальным требованиям  пояснения о признании уточненных требований зафиксированы в ходе проведения  судебного заседания, что соответствует нормам процессуального законодательства.  

В силу ч. 1 ст. 155 АПК РФ, в ходе каждого судебного заседания арбитражного  суда первой инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий  вне судебного заседания ведется протоколирование с использованием средств  аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме. Протоколирование  судебного заседания с использованием средств аудиозаписи ведется непрерывно в ходе  судебного заседания. Материальный носитель аудиозаписи приобщается к протоколу  (ч. 6 ст. 155 АПК РФ).  

Согласно ст. 71 АПК РФ, оценивая представленные в материалы дела  доказательства во взаимной связи и совокупности, суд первой инстанции пришел к  выводу об обоснованности требований истца по первоначальным требованиям о  взыскании с ответчика 734 368, 80 руб. задолженности.  

Суд первой инстанции, разрешая спор по встречному иску, исходил из  следующего.  

В представленном отзыве и встречном исковом заявлении ООО  «КамЭнергоМаш» указано на составленные третьим лицом (ПАО «Татнефть» имени  В.Д.Шашина) акты о выявленных дефектах от 26.01.2022, 28.01.2022, 03.02.2022,  16.02.2022.  

28.01.2022, со ссылкой на п. 4.5 договора, было направлено письменное  извещение № 79 от 28.01.2022 о выявленных недопустимых дефектах с требованием в  кратчайшие сроки устранить замечания. Данным извещением указывалось, что не  устранение замечаний вынудит приступить к устранению дефектов собственными  силами или привлечь стороннюю организацию для выполнения работ в  перевыставлением затрат в их адрес.  

03.02.2022 в адрес истца было направлено повторное письменное извещение № 97  от 03.02.2022 о выявленных новых дефектах.  

04.02.2022 было направлено письмо – уведомление № 103 от 04.02.2022 о  выявлении дефектов, дополнительных к ранее предъявленным замечаниям, с  предложением незамедлительно приступить к выполнению работ по их устранению. В  ответе на указанное письмо № 5 от 07.02.2022 было выражено несогласие с  выявленными недостатками, отражено о необходимости проведения экспертизы. При  этом указано, что в случае если экспертиза подтвердит заявленные требования об  устранении недостатков, компания своими силами в течение 15 дней, оговоренных  договором, готова устранить недостатки и замечания.  

04.02.2022 балы направлена претензия № 101 с требованием добровольно  компенсировать затраты по устранению дефектов в сумме 735 733 руб. в течение 15  дней с момента её получения. 07.02.2022 направлено дополнение к претензии № 107, с  предложением обратиться в экспертную организацию для проведения экспертизы, с  дальнейшим возмещением затрат на ее проведение виновной стороной.  

Как указано ООО «КамЭнергоМаш», исполнитель к работам по устранению  выявленных дефектов не приступил, гарантирующих писем по выполнению работ, с  указанием сроков их выполнения, не представил, в связи с чем они были выполнены  собственными силами и сотрудниками заказчика, в обоснование чего представлены:  табель учета рабочего времени 2022 года, калькуляция устранения дефектов на  оказание услуг.  

В письме № 137 от 15.02.2022 ООО «КамЭнергоМаш» указывало на возможность  обеспечения участия представителя ООО «АСК» для совместной приемки выявленных  скрытых дефектов, с указанием конкретной даты и времени, а также необходимости  оформления пропуска. Письмами № 143 от 17.02.2022, № 280 от 23.03.2022  представитель приглашался для участия в рабочих совещаниях, в том числе в целях  урегулирования выявленных разногласий. Представлены почтовые уведомления о  вручении отправлений.  

25.02.2022, 09.03.2022 15.03.2022 третьим лицом (ПАО «Татнефть» имени  В.Д.Шашина) были составлены акты об устранении выявленных недостатков.  

Письмом № 250 от 15.03.2022 ООО «КамЭнергоМаш» направило ООО «АСК»  договор о порядке возмещения расходов заказчика. Письмом № 311 от 31.03.2022 было  направлено дополнительное соглашение к ранее направленном договору.  

19.04.2022 в адрес ООО «АСК» направлена уточненная претензия с требованием  возмещения расходов на устранение недостатков выполненных работ в сумме 2 344 923  руб.  

При рассмотрении данного спора ООО «КамЭнергоМаш» был представлен свод  по срокам устранения выявленных третьим лицом дефектов, в том числе с учетом  изложенных письменных пояснений. Представлены доказательства направления писем  по выявленным недостаткам почтовой связью, а также по электронной почте.  

Третье лицо в представленном отзыве подтвердило факт обнаружения  недостатков, указанных во встречном иске, учитывая их последующее устранение ООО  «КамЭнергоМаш».  

В силу ч. 1 ст. 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с  отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными  недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре  использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия  непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не  установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения  установленной за работу цены, возмещения своих расходов на устранение недостатков,  когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. На основании  ст. 397 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать  вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо  передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него определенную  работу или оказать ему услугу кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение  обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами,  если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа  обязательства, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых  расходов и других убытков.  

С учетом заявленных доводов и возражений, в отсутствии возможности  урегулирования спора мирным путем, определением суда первой инстанции от  17.10.2022 назначена судебная экспертиза, производство которой поручено экспертам  ФИО3, ФИО4  

19.01.2023 в материалы дела представлено экспертное заключение № 6-23 от  18.01.2023, с учетом выставленного счета на оплату и сделанных выводов эксперта.  Экспертами даны пояснения при проведении судебного заседания 21.02.2023, которые  подробно отражены в протоколе, учитывая ведение аудиозаписи.  

Ходатайств о назначении по делу дополнительной или повторной судебной  экспертизы сторонами не представлено.  

Согласно п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации № 23 от 04.04.2014, если экспертиза в силу Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации могла быть назначена по ходатайству или с согласия  участвующих в деле лиц, однако такое ходатайство не поступило или согласие не было  получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом  положений ст. 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа  состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения  соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.  

Представленное экспертное заключение сторонами не оспорено, доказательств  его несоответствия ФЗ «Об оценочной деятельности» не представлено. Стороны  документально не опровергли выводы, изложенные в экспертном заключении.  

В материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства недостоверности  выводов экспертов, составивших экспертное заключение, а равно доказательства,  опровергающие выводы экспертов. Каких-либо неясностей и противоречий в выводах  экспертов не имелось.  

При рассмотрении ходатайства о назначении судебной экспертизы суд первой  инстанции предлагал сторонам обозначить экспертные учреждения, а также  представить вопросы для постановки перед экспертом. Компетентность и  квалификация экспертов сторонами не оспаривалась. Отводов экспертам до начала  проведения экспертизы не заявлено.  

Эксперты в рамках судебной экспертизы исследовали все материалы дела, в том  числе дополнительно представленные сторонами, произвели натурный осмотр объекта  экспертизы.  

Поскольку в ч. 5 ст. 71 АПК РФ презюмируется, что никакие доказательства не  имеют для суда заранее установленной силы, то заключение эксперта оценивается  судом наравне с другими доказательствами. Каждое доказательство подлежит оценке  арбитражным судом наряду с другими доказательствами (ч. 4 ст. 71 АПК РФ).  

По смыслу положений ст. 86 АПК РФ экспертное заключение является одним из  важных видов доказательств по делу, поскольку оно отличается использованием  специальных познаний и научными методами исследования, и суд не имеет  объективной возможности самостоятельно разрешить вопросы, требующие  специальных познаний в определенной области.  

Вместе с тем, принимая во внимание закрепленное законодателем в ст. 71 АПК  РФ правило о том, что ни одно доказательство не имеет для суда заранее  установленной силы, положения ч. 3 ст. 86 АПК РФ, согласно которым заключение  эксперта для суда не обязательно и оценивается наряду с другими доказательствами,  суд первой инстанции оценил экспертное заключение по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании каждого отдельно взятого доказательства, собранного по делу, и их  совокупности с характерными причинно-следственными связями между ними и их  системными свойствами.  

В соответствии со ст. 1 ГК РФ юридические лица приобретают и осуществляют  свои гражданские права своей волей и своем интересе. Они свободны в установлении  своих прав и обязанностей на основе договора.  

По общему правилу ст. 161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой и с  гражданами должны совершаться в простой письменной форме.  

В силу положений ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или  нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и  обязанностей. Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в  заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и  

не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора  определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание  соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422  ГК РФ).  

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между  сторонами в требуемой в подлежащей случаях форме, достигнуто соглашение по всем  существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете  договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как  существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,  относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто  соглашение.  

Из представленного в материалы дела договора на выполнение работ № Ю- 143/21, с учетом приложений и дополнительных соглашений к нему, следует, что он  подписан уполномоченными лицами, в них изложены все существенные условия  определенные сторонами при заключении. Указанный договор в установленном  порядке не расторгнут, не оспорен, недействительным не признан.  

При толковании условий договора в соответствии со ст. 431 ГК РФ судом  принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.  Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем  сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если эти правила не  позволяют определить содержание договора, суд выясняет действительную общую  волю сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все  соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и  переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи  делового оборота, последующее поведение сторон.  

При заключении договора, а также подписании дополнительных соглашений,  стороны, располагая на преддоговорных стадиях, предшествующих заключению  договора и на стадии его заключения полной информацией о предложенных условиях,  добровольно приняли на себя все права и обязанности, определенные письменной  сделкой, исполняемой сторонами, в том числе относительно порядка исполнения  гарантийных обязательств, выявления дефектов.  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений. Обязанность доказывания возложена на каждое лицо,  участвующее в деле (ч. 1 ст. 65 АПК РФ), при этом в соответствии со ст. 68 АПК РФ  обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены  определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде  иными доказательствами.  

В силу ч. 1 ст. 65 , 71 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств.  

На основании ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно  соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий  договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если  иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат  выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами,  указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и  в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором  

использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного  использования результата работы такого рода, при этом, п. 2 названной статьи  предусмотрено, что если законом, иными правовыми актами или в установленном ими  порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору  подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять  работу, соблюдая эти обязательные требования.  

Заключив договор, стороны совершили действия по его исполнению, что  подтверждается представленными в материалы дела документами и не оспаривалось  при рассмотрении дела. Следовательно, исходя из его условий ООО «АСК» считало  возможным рассчитывать на соблюдение согласованных условий по разделу 4, в случае  выявления недостатков, в том числе по порядку их установления и устранения.  

Исходя из положений договора срок устранения недостатков предусмотрен в  течение 15 рабочих дней, при наличии спора по выявленным недостаткам назначается  экспертиза.  

В письменных пояснениях ООО «КамЭнергоМаш» от 19.01.2023 подробно  отражены выявленные недостатки, установленные третьим лицом, даты доведения  информации ООО «АСК» и даты устранения собственными силами, при наличии дней  с момента уведомления до устранения от 9 до 40, при установленных 15 рабочих днях.  

Первичная документация по факту выполнения работ подписана без замечаний, в  отсутствии установления недостатков на момент приемки.  

Из представленной переписки по выявлению недостатков и необходимости их  устранения следует, что сроки предусмотренные договором не были выдержаны.  Кроме того, даты проведения осмотров по выявлению недостатков соответствуют  датам направления писем по электронной почте, в отсутствии информации по их  фактическому поручению. Суд первой инстанции также учёл режимность объекта и  необходимость получения пропуска для прибытия для проведения осмотра.  

На основании ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования  или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает  гражданскоправовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие  последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его  представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно  поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам,  зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Правила п.  1 настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено законом или условиями  сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во  взаимоотношениях сторон.  

Следовательно, ООО «АСК» формально было лишено возможности обеспечения  участия представителя при проведении осмотров, связанных с выявлением  недостатков.  

Исходя из сложившихся правоотношений, при составлении актов выявленных  недостатков, были привлечены только сотрудники ООО «КамЭнергоМаш» и третьего  лица, в отсутствии обеспеченного участия представителей ООО «АСК», привлечения  сторонних специалистов, в том числе экспертов. С учетом условий договора, ООО  «КамЭнергоМаш» не прибегло к проведению экспертизы по установлению  недостатков, учитывая последующее возложение затрат на виновную стороны.  

Суд первой инстанции пришёл к следующим выводам. Возможно возникшие  требования заказчика по взысканию убытков или неустойки, связанных с  некачественным выполнением работ, в случае подтверждения наличия вины ООО  «АСК», могли быть отнесены на эту сторону. Между тем, подписав договор на  конкретных условиях, а именно сроке устранения недостатков – 15 рабочих дней и  

необходимости проведения экспертизы при наличии спора, ООО «КамЭнергоМаш»  должно было соблюдать данные условия, учитывая риски предпринимательской  деятельности в отсутствии конкретно достигнутых согласий и договоренностей.  

Более того, у ООО «АСК» имелось право проверить относимость установленных  недостатков к выполненным им работам по договору, полноты и правильности их  определения. Между тем, в том числе в нарушение ст. 723 ГК РФ, ООО  «КамЭнергоМаш» указанная возможность не была предоставлена.  

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о наличии  нарушения порядка извещения о выявленных недостатках и необходимости их  устранения в рамках гарантийных обязательств. При этом, действия ООО «АСК»,  направленные на уклонение от совершения действий по установлению и устранению  недостатков, документально не подтверждены.  

В письме № 5 от 07.02.2022, с учетом выраженного несогласия, ООО «АСК»  указало на необходимость проведения экспертизы. Поскольку работы были приняты  без замечаний, последующее выявление недостатков приводит к инициативе  проведения экспертизы именно со стороны ООО «КамЭнергоМаш».  

Суд первой инстанции учёл, что с учетом фактического устранения недостатков,  исходя из сроков выполнения работ и рассмотрения данного спора, при проведении  судебной экспертизы не удалось установить объема выявленных недостатков и  фактически их осмотреть (синтезирующая часть экспертного заключения, пояснения  экспертов в судебном заседании суда первой инстанции).  

Суд первой инстанции отметил следующее. Возможно, такое осуществление  процессуальных прав является деловым просчетом стороны, однако, как следует из  Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2004 № 3-П,  судебный контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод участников  гражданского оборота, а не проверять экономическую целесообразность действий  субъектов предпринимательской деятельности, поскольку последние обладают  самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в сфере бизнеса.  Следовательно, суды не оценивают экономическую целесообразность подобных  решений, так как в силу рискового характера предпринимательской деятельности  существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней  деловых просчетов.  

Согласно положениям ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору  убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства,  которые определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15  названного Кодекса.  

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может  требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или  договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.  

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,  произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,  утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные  доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,  если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).  

Возмещение убытков - это мера гражданско-правовой ответственности, поэтому  ее применение возможно лишь при наличии условий ответственности,  предусмотренных законом. Исходя из положений ст. 15 ГК РФ лицо вправе требовать  возмещения убытков при наличии совокупности трех условий: наличие убытков;  противоправность действий лица, к которому требования о возмещении предъявлены;  причинная следственная связь между убытками и противоправными действиями.  

Недоказанность хотя бы одного из элементов состава правонарушения является  достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований о возмещении  убытков.  

В силу п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой  Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец  обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия)  которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения  вреда, наличие убытков (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Отсутствие вины доказывается лицом,  нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ). По общему правилу лицо,  причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред  причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).  

Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем  обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в  причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.  

С учетом предмета заявленных требований, обязанность доказывания возложена  на каждое лицо, участвующее в деле (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).  

Как следует из представленных документов, пояснений представителей ООО  «КамЭнергоМаш», общество является юридическим лицом, профессионально  занимающимся подрядной деятельностью, в связи с чем представленные  доказательства свидетельствуют об осуществлении им повседневной  профессиональной деятельности.  

Предпринимательская деятельность осуществляется под свою ответственность, а  следовательно, риски и убытки от осуществления такой деятельности юридическое  лицо несет самостоятельно. ООО «КамЭнергоМаш» не приведено доказательств  ненадлежащего исполнения договорных обязательств ООО «АСК», в том числе  относительно уклонения от установления и устранения выявленных недостатков в  соответствии с условиями договора и нормами действующего законодательства.  

Следовательно, ООО «КамЭнергоМаш» не доказана причинно-следственная  связь, необходимая для взыскания указанной суммы убытков, связанных с их  устранением выявленных недостатков. Указанный размер убытков, который положен в  основу расчета в встречных требований, суд первой инстанции признал недостаточным  доказательством подтверждения размера встречного иска.  

Согласно ст. 2 АПК РФ одной из задач судопроизводства в арбитражных судах  является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц,  осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.  

В порядке ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная,  осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое  получение прибыли. ООО «КамЭнергоМаш» несет самостоятельные риски  предпринимательской деятельности и должно прогнозировать последствия, в том числе  связанные с осуществлением определенных действий/бездействий, исполнения взятых  на себя обязательств по договору.  

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии  оснований для удовлетворения встречных заявленных требований в связи с  недоказанностью совокупности условий для применения гражданско-правовой  ответственности, а именно: недоказанностью причинно-следственной связи между  действиями ООО «АСК» и предъявляемыми убытками в виде стоимости выполненных  работ по устранению выявленных недостатков.  

Гражданское законодательство основывается на необходимости  беспрепятственного осуществления гражданских прав, а также добросовестности  

участников гражданских правоотношений при осуществлении гражданских прав и  исполнении гражданских обязанностей. Закон запрещает кому-либо извлечение  преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения (ст. 1 ГК РФ).  

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует  исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота,  учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей (по  крайней мере, не чинящего препятствий), в том числе в получении необходимой  информации.  

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 64 и ст. ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный  суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования  и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие  значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных  доказательств.  

Оценив по правилам ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела  доказательства в их совокупности и взаимной связи, арбитражный суд первой  инстанции пришел к выводу о том, что в материалы дела не представлено достаточных  и допустимых доказательств, позволяющих сделать вывод относительно  удовлетворения встречных заявленных требований.  

Принимая во внимание указанные обстоятельства, руководствуясь статьями 1, 2,  15, 161, 165.1, 307, 309, 310, 393, 397, 401, 408, 420, 421, 422, 431, 432, 702, 711, 720,  721, 723, 746, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 2, 64, 65,  70, 71, 86, 110, 112, 155, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров  по договору строительного подряда", пунктом 3 постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации № 23 от 04.04.2014 "О некоторых вопросах  практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", пунктом  12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №  25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского  кодекса Российской Федерации", пунктом 22 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения  законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», суд  первой инстанции правомерно и обоснованно удовлетворил первоначальный иск, а во  встречном иске отказал.  

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе и в дополнении к ней, являлись  предметом исследования суда первой инстанции, который дал им надлежащую  правовую оценку. Суд апелляционной инстанции не находит оснований для  переоценки выводов суда первой инстанции.  

В апелляционной жалобе и в дополнении к ней не приведено доводов,  опровергающих выводы суда первой инстанции.  

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для  изменения или отмены судебного акта суда первой инстанции.  

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в суде апелляционной  инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.  

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.03.2023 по делу № А6510122/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Арбитражный суд Поволжского  округа.  

Председательствующий судья С.А. Кузнецов 

Судьи   О.И. Буртасова 

 А.Г. Котельников 

Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России 

Дата 07.02.2023 7:06:00Кому выдана Кузнецов Сергей АнатольевичЭлектронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России 

Дата 21.04.2023 7:42:00Кому выдана Котельников Андрей ГеоргиевичЭлектронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России 

Дата 07.02.2023 3:21:00

Кому выдана Буртасова Оксана Ивановна