АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А84-2187/2022

20 сентября 2022 г.

г. Севастополь

 

  Резолютивная часть решения оглашена 13 сентября 2022 года.

        Решение изготовлено в полном объеме 20 сентября 2022 года.

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Таврида-Проект», ОГРН 

<

***>,

к Обществу с ограниченной ответственностью «Контактор», ОГРН 

<

***>,

о взыскании,

при участии в судебном заседании представителя от ответчика – ФИО2 по доверенности от 10.01.2022, в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «ТАВРИДА-ПРОЕКТ» обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «КОНТАКТОР» о взыскании 10 637 065,56 рублей задолженности по договору от 05.11.2020 № 10/11-СМР,  947 053,41 рублей неустойки, 778 400,06 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

 Определением от 31.05.2022 суд принял к рассмотрению уточненный иск о взыскании 10 637 065,56 рублей задолженности по договору от 05.11.2020 № 10/11-СМР, 1 226 453,67 рублей неустойки, а также неустойки, начисленной с 01.06.2022 по день фактической оплаты долга.

Ответчик в отзыве на иск оспорил обоснованность требований в части неустойки, указал на отсутствие задолженности в части основного долга.

Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле,  и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.

Как видно из материалов дела,  ООО «Контактор» (заказчик) и ООО «Таврида-проект» 05.11.2020. заключили договор №10/11-СМР, согласно которому ООО «Таврида-проект» обязуется по заданию Заказчика в установленный срок выполнить из материалов Заказчика автоматизированный технологический комплекс работ по устройству системы стабилизации корнеобразующего слоя вертикальным вживлением имплантов GRASS МАХ в основание рекбийного поля площадью 7 260,18 кв. м в соответствии со сметным расчетом (Приложение №1 к Договору) (далее — работы) на объекте: Реконструкция объектов ГБУ г. Севастополя «СОК имени 200-летия Севастополя», расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский р-н, ул. Стрелецкий спуск, 1-А (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

Работы производятся Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к Договору), руководствуясь действующими СНиП.

Пунктом 1.3. Договора определен срок выполнения комплекса работ, указанного в п. 1.1. Договора и составляет 21 (двадцать один день) календарный день с даты передачи Заказчиком Подрядчику строительной площадки для выполнения работ.

Работы по Договору выполняются Подрядчиком во исполнение обязательств Заказчика по Договору субподряда №66-КНТ/20 от 14.09.2020, заключенному с ООО «АСГАРД» (Генподрядчик).

Дополнительным соглашением №1 от 09.11.2020г., подписанным уполномоченными представителями Сторон, были внесены изменения в Договор №10/11- СМР от 05.11.2020г., так, стороны определили, что стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании Сметного расчета (Приложение №1 к Договору) и составляет 15 987 365,22 рублей (пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч триста шестьдесят пять рублей 22 копейки), в т.ч. НДС 20% - 2664 560,87 рублей (два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей 87 копеек).(п. 2.1 Договора).

Окончательный расчет за выполненные работы в сумме 10 637 065,56 рублей (десять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч шестьдесят пять рублей 56 копеек), включая НДС 20%, Заказчик производит по факту выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Изменения в сметный расчет были согласованы Сторонами.

Кроме того, Заказчиком, во исполнение п. 3.1.2, 3.1.3 Договора и в качестве подтверждения принятых на себя обязательств по договору произведено перечисление денежных средств в размере 5 350 299,66 рублей на основании платежного поручения № 746 от 05.11.2020г. Назначение - аванс по Договору №10/11-СМР от 05.11.2020г. на прошивку. В том числе НДС 20% - 891 716,61р.

В свою очередь, ООО «Таврида-проект» надлежащим образом выполнило все обязательства, принятые по договору подряда, что подтверждается Универсальным передаточным документом №12/1 от 31 мая 2021г. на сумму 15 987 365,22 руб. и подписанного уполномоченными представителями Сторон.

Возражений относительно количества и качества работ со стороны Заказчика не предъявлялось.

Договором также определено что стороны договорились, что в случае не поступления от Заказчика указанных выше обоснованных письменных возражений по направленному Подрядчиком Заказчику акту, работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний, и Заказчик становится обязанным произвести расчет за выполненные работы с Подрядчиком в течение срока, определенного настоящим Договором, с момента истечения срока на направление обоснованных письменных требований.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В статье 310 Кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

21.06.2021 г. между ООО «ТАВРИДА-ПРОЕКТ» и ООО «Контактор» было заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору (далее – Дополнительное соглашение № 2) согласно которому стороны внесли следующие изменения в условия Договора:

Изменен срок оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ до 31 декабря 2021 года, в соответствии с чем внесены изменения в пункт 2.4.2. Договора в следующей редакции: «2.4.2. Окончательный расчет за выполненные работы в сумме 10 63 7 063,56рублей (Десять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч шестьдесят пять рублей 56 копеек), включая НДС 20%, Заказчик производит в срок до 31 декабря 2021 года на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма №КС- 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), при условии получения ООО «Контактор» денежных средств для оплаты данных работ от Генподрядчика объекта», (пункт 1 Дополнительного соглашения №2);

Изменен размер договорной неустойки, подлежащей оплате Заказчиком при нарушении им срока оплаты на 0,01% за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, в соответствии с чем внесены изменения в пункт 6.2. Договора в следующей редакции: «6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, но не более 5%> от общей стоимости работ по Договору», (пункт 2 Дополнительного соглашения №2).

Платежным поручением от 15.06.2022 № 860 ответчик уплатил истцу 10 637 065,56 руб. задолженности.

Принимая во внимание измененные Сторонами условия оплаты окончательного расчета по п. 2.4.2. Договора и размер договорной неустойки по п. 6.2. Договора, пени за нарушение Заказчиком окончательного расчета за выполненные работы составляют сумму в размере 176 575,29 рублей (Сто семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 29 копеек), исходя из периода просрочки с 01.01.2022 г. (начиная со дня, следующего за последним днем исполнения обязательств по оплате) по 15.06.2022 г. (дата фактической уплаты долга).

С учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» сумма взыскиваемой неустойки за период по 31.03.2022 составляет 94 669,88 руб.

При таких обстоятельствах суд считает, что заявленные исковые требования надлежит удовлетворить в части.

Ввиду погашения основного долга после обращения истца с иском в суд расходы на уплату государственной пошлины по требованию о взыскании основного долга относятся на ответчика.

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Контактор», ОГРН 

<

***>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Таврида-Проект», ОГРН 

<

***>, 94 669,88 руб. неустойки за период по 31.03.2022 и 84 813 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Разъяснить истцу право на обращение с самостоятельным требованием о взыскании неустойки, насчитанной за период просрочки после завершения моратория, введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

 

Судья

А.Ю. Смоляков