АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

22 декабря 2023 года

Дело № А74-4658/2023

Резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2023 года.

Решение в полном объёме изготовлено 22 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Г.И. Субач при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Крылатые качели» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к «Управлению коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании в солидарном порядке 1 481 762 рублей 51 копейки, 

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора на стороне ответчика: администрации города Абакана, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия,

при участии в судебном заседании представителей сторон:

истца – руководителя ФИО2 (личность установлена по паспорту), ФИО3  по доверенности от 03.04.2023;

УКХТ администрации г.Абакана – Гасан О.А. по доверенности от 19.01.2023;

ООО «Гарант» - ФИО4 по доверенности от 01.09.2023;

Администрации г. Абакана – Гасан О.А. по доверенности от 06.12.2022;

Минстрой РХ – ФИО5 по доверенности от 20.01.2022.

Общество с ограниченной ответственностью «Крылатые качели» (далее – ООО «Крылатые качели») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (далее – ООО «Гарант») к Управлению коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана (далее – УКХТ) о взыскании в солидарном порядке 1 481 762 рублей 51 копейки, в том числе 1 468 894 рублей 99 копеек по договору от 01.12.2021 № 85 (1 368 836 рублей 83 копеек долга и 99 058 рублей 16 копеек неустойки, начисленной за период с 12.09.2022 по 27.06.2023; 13 867 рублей 52 копеек по договору от 01.12.2021 № 86 (12 954 рублей 25 копеек долга и 913 рублей 27 копеек неустойки, начисленной за период с 12.09.2022 по 27.06.2023).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора на стороне ответчика привлечены администрация города Абакана, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия (далее – Минстрой Хакасии).

В судебном заседании представители истца исковые требования поддержали, указали на выполнение работ в полном объеме, принятие работ и отсутствие оплаты в полном объеме. Согласно пояснениям истца, заключая договоры № 85 и 86, ООО «Крылатые качели» предполагало, что условия об участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов было соблюдено. Поскольку точный размер долей, в которых должна быть произведена оплата работ по договорам № 85 и № 86 из федерального, регионального и муниципального бюджета и из средств заинтересованных лиц (исходя из положений Программы и самого договора) установить не представляется возможным, истец предъявил требование об оплате задолженности солидарно к обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» к Управлению коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана.

Представитель ООО «Гарант» поддержал позицию, изложенную в отзыве, против иска в полном объеме возражал, не переданные предыдущей управляющей компанией и взысканные в рамках дела №А74-7054/2022. В отзыве ответчик указал, что условием софинансирования оплаты работ по договорам № 85 и № 86 являлось фактическое выполнение работ и перечисление собственниками денежных средств в определенных долях минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству. Решением общего собрания собственников дома № 4Б по ул. Торговая г. Абакана (протокол № 1 от 20.04.2021) собственники выразили желание на участие в программе, утвердили виды работ по минимальному перечню и финансирование собственниками 15 % их стоимости, утвердили виды дополнительных работ и размер финансирования 30 % от их стоимости. Часть средств предполагалось оплатить из накопленных ранее, а недостающую сумму – накопить в течение 6 месяцев 2022 года. Однако ранее накопленные денежные средства не были возвращены предыдущей управляющей компанией на момент выполнения работ по спорным договорам. Часть средств, накопленная собственниками, была перечислена истцу, при этом, по договору № 86 уплаченная часть суммы составляла весь объем финансирования собственников. Работы по договорам № 85 и № 86 были выполнены, о чем было сообщено УКХТ, однако финансирование со стороны УКХТ произведено не было. По требованию УКХТ ООО «Гарант» заключило соглашение о снижении суммы субсидирования. В правоотношениях по вопросу участия в муниципальной программе ООО «Гарант» выступало в качестве представителя собственников помещений, в связи с чем, по его мнению, нельзя возложить на управляющую организацию долги собственников, возникшие в связи с невыполнением ими принятых на себя обязательств по сбору денежных средств, поскольку ООО «Гарант» приняты все необходимые меры по истребования денежных средств у предыдущей управляющей организации.

Представитель УКХТ и администрации г. Абакана против иска возражал, не отрицал, что работы выполнены истцом, ссылался на подписание соглашения об уменьшении размера субсидии, исполнение соглашения со стороны ответчика, дал пояснения на вопросы суда.

Представитель Минстроя Хакасии поддержал позицию, изложенную в отзыве на иск, против иска не возразил. В своем отзыве Министерство пояснило, что между Минстроем Хакасии и администрацией города Абакана 28.01.2022 заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Абакан на реализацию программ формирования современной городской среды в размере 61 099 000 рублей, в том числе: 58 673 000 рублей – средства федерального бюджета; 593 000 рублей – средства республиканского бюджета; 1 833 000 рублей – средства местного бюджета. Согласно отчету от 01.01.2023, представленному УКХТ, денежные средства, предоставленные на основании субсидии израсходованы в 2022 году в полном объеме. Также Минстрой Хакасии в отзыве указал, что УКХТ не заключало договор с истцом, в связи с чем, оно не может отвечать по обязательствам договора стороной которого не является.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Между ООО «Гарант» (заказчик) и ООО «Крылатые качели» (подрядчик) 01.12.2021 заключены договоры подряда № 85 (далее – договор № 85)  и № 86 (далее – договор № 86). 

Согласно пункту 1.1 договора № 85 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство оказать услуги по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: 

<

...>, в рамках дополнительного перечня программы «Формирование современной городской среды в городе Абакане на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Абакана № 1936 от 21.11.2017, согласно локально-сметному расчету, являющемуся неотъемлемой частью данного договора.

В соответствии с пунктами 2.1 – 2.4 договора № 85 стоимость работ по нему составляет 1 418 318 рублей 33 копейки, цена договора является фиксированной, включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, доставку товара до места нахождения заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, установку (монтаж). Оплата производится безналичным расчетом после установки малых архитектурных форм (согласно локально-сметному расчету и акту выполненных работ), по мере поступления на расчетный счет управляющей компании денежных средств из федерального, регионального и муниципального бюджета в течение 10 дней с даты поступления. 

Согласно пункту 3.1 договора № 85 подрядчик должен выполнить все работы до 31.08.2022;  в случае досрочного выполнения работ, обязан по соглашению с заказчиком, сдать объект заказчику. По завершении выполнения работ подрядчик представляет заказчику акт выполненных работ, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (пункт 4.1 договора). Подрядчик, в соответствии с пунктом 3.2 договора обязан принять выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

Пунктами 5.1 - 5.4 договора № 85 установлена ответственность сторон за ненадлежащие исполнение обязанностей по договору: за просрочку исполнения обязательств подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства; за нарушение сроков оплаты выполненных работ подрядчик вправе требовать от заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования по курсу Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

При заключении договора сторонами согласован локальный сметный расчет № 07-01-01 к договору на сумму 1 418 318 рублей 33 копейки.

Сторонами договора 31.08.2023 составлены и подписаны: акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

В счет исполнения обязательств в части оплаты по договору № 85 заказчик платежным поручением № 316 от 28.09.2022 произвел частичную оплату задолженности в размере 49 481 рубль 50 копеек, таким образом, остаток задолженности по договору составил 1 368 836 рублей 83 копейки.

В связи с несвоевременной оплатой задолженности подрядчик начислил заказчику неустойку в размере 99 058 рублей 16 копеек, в соответствии с пунктом 5.3 договора.

Согласно пункту 1.1 договора № 86 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство оказать услуги по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: 

<

...>, в рамках минимального перечня программы «Формирование современной городской среды в городе Абакане на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Абакана № 1936 от 21.11.2017, согласно локально-сметному расчету, являющегося неотъемлемой частью данного договора.

В соответствии с пунктами 2.1 – 2.4 договора № 86 стоимость работ по нему составляет 15 240 рублей 30 копеек, цена договора является фиксированной, включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, доставку товара до места нахождения заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, установку (монтаж). Оплата производится безналичным расчетом после установки малых архитектурных форм (согласно локально-сметному расчету и акту выполненных работ), по мере поступления на расчетный счет управляющей компании денежных средств из федерального, регионального и муниципального бюджета в течение 10 дней с даты поступления.

Согласно пункту 3.1 договора № 86 подрядчик должен выполнить все работы до 31.08.2022;  в случае досрочного выполнения работ подрядчик обязан по соглашению с заказчиком, сдать объект заказчику. По завершении выполнения работ подрядчик представляет заказчику акт выполненных работ, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (пункт 4.1 договора). Подрядчик, в соответствии с пунктом 3.2 договора обязан принять выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

Пунктами 5.1 - 5.4 договора № 86 установлена ответственность сторон за ненадлежащие исполнение обязанностей по договору: за просрочку исполнения обязательств подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства; за нарушение сроков оплаты выполненных работ подрядчик вправе требовать от заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования по курсу Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

При заключении договора сторонами согласован локальный сметный расчет № 07-01-01 к договору на 15 240 рублей 30 копеек.

Сторонами договора 31.08.2023 составлены и подписаны: акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

В счет исполнения обязательств в части оплаты по договору № 86 заказчик платежным поручением № 315 от 28.09.2022 произвел частичную оплату задолженности в размере 2286 рублей 05 копеек, таким образом, остаток задолженности по договору составил 12 954 рубля 25 копеек.

В связи с несвоевременной оплатой задолженности подрядчик начислил заказчику неустойку в размере 913 рублей 27 копеек, в соответствии с пунктом 5.3 договора.

Судом установлено, что указанные выше договоры № 85 и № 86 заключены в рамках Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Абакане» (далее – программа), утвержденной 21.11.2017 Постановлением № 1936 администрации города Абакана. Срок действия программы: 2018 - 2024 годы.

Между Минстроем России и правительством Республики Хакасия в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды заключено соглашение от 27.12.2021 № 069-09-2022-615 (с учетом дополнительного соглашения от 13.12.2022) о предоставлении в 2022 – 2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия в размере 145 235 151 рубль 52 копейки в 2022 году; 145 236 000 в 2023 году; 161 373 000 рублей в 2024 году.

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», ответственным исполнителем которой определено Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия.

Постановлением администрации города Абакана от 21.11.2017 № 1936 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Абакане». Исполнителями программы являются УКХТ, ДГАЗ, муниципальное казенное учреждение города Абакана «Архитектура и градостроительство», управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает осуществление соответствующих мероприятий в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, адресный перечень которых определен в соответствии с пунктом 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия». Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении 3 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Абакане» (далее - Программа).

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка предоставления в 2022 году из бюджета города Абакана субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Абакана, утвержденного Постановлением Администрации города Абакана от 30.12.2021 № 2469, получателями субсидий являлись: общество с ограниченной ответственностью «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 2», общество с ограниченной ответственностью «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 5», общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МПС», общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Жилищная Компания», общество с ограниченной ответственностью «Гарант», общество с ограниченной ответственностью «УЖК Доверие».

В соответствии с пунктом 2.9 Порядка предоставления в 2022 году из бюджета города Абакана субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Абакана, утвержденного Постановлением Администрации города Абакана от 30.12.2021 № 2469, для перечисления субсидии (части субсидии) получатель субсидии предоставляет УКХТ следующие документы, подтверждающие фактически произведенные затраты:

1) отчет о произведенных затратах по выполнению работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

2) документы, подтверждающие объем выполненных работ по договору на выполнение подрядных работ по благоустройству дворовой территории (акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

3) документы, подтверждающие финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном Администрацией города Абакана либо копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

До выполнения всех трех условий принятие решения о предоставлении субсидии не может быть принято.

Между Минстроем Хакасии и администрацией города Абакана 28.01.2022 заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования г. Абакан на реализацию программ формирования современной городской среды в размере 61 099 000 рублей, в том числе 58 673 000 рублей – средства федерального бюджета, 593 000 рублей – средства республиканского бюджета, 1 833 000 рублей – средства местного бюджета.

В материалы дела представлено соглашение № 10-2022-007939 от 18.03.2022 о предоставлении из бюджета муниципального образования город Абакан субсидии ООО «Гарант» на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Абакана, утвержденным Постановлением Администрации города Абакана от 30.12.2021 года № 2486. Согласно пункту 2.1. соглашения, в 2022 году на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовой территории расположенной по адресу: 

<

...> предоставлена субсидия в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными до Предоставителя, в размере 1 320 856 рублей 16 копеек – по коду БК 942 0503 32 0 F2 55550 811.

При этом, в пункте 3.2.1 соглашения определено, что субсидия предоставляется при условии софинансирования (финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) затрат по работам минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории в размере 523 817 рублей 67 копеек.

В соответствии с пунктом 4.1.8 соглашения, в случае, если Получателем субсидии не достигнуты результаты и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, Предоставитель обязан определять суммы возврата субсидии. Предоставитель вправе принимать решение об изменении условий настоящего соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также ее увеличении (пункт 4.2.1).

В соответствии с дополнительным соглашением от 13.04.2022 в соглашение № 10-2022-007939 от 18.03.2022 внесены изменения, в соответствии с которыми размер субсидии в 2022 году увеличен на 75 049 рублей 01 копейку,  финансовое участие собственников помещений увеличено на 32 163 рубля 86 копеек.

В соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2022 в соглашение № 10-2022-007939 от 18.03.2022 внесены изменения, в соответствии с которыми размер субсидии в 2022 году уменьшен на 1 005 777 рублей 08 копеек,  финансовое участие собственников помещений уменьшено на 427 781 рубль 55 копеек.

Таким образом, субсидия для ООО «Гарант» в 2022 году составила, 390 128 рублей 09 копеек. Указанная сумма перечислена ООО «Гарант» на основании платежных поручений от 230.92022 №119786 (315 079,08), от 20.05.2022 №520922 (75 049,01).

Высвобожденная часть неиспользованной субсидии в размере 1 005 777 рублей 08 копеек увеличила размер субсидии для общества с ограниченной ответственностью «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 2» - получателя субсидии на основании соглашения от 28.02.2022 №10-2022-000396. Дополнительным соглашением от 21.11.2022 к соглашению от 28.02.2022 №10-2022-000396 внесены изменения, в соответствии с которыми размер субсидии в 2022 году увеличен на 1 005 777 рублей 08 копеек. Платежным поручением от 29.11.2022 №391598 указанные денежные средства перечислены ООО «ЖЭУ №2».

В соответствии с представленными Минстроем Хакасии доказательствами и пояснениями, средства субсидии, предусмотренные соглашением на 2022 год, освоены Управлением в полном объеме, возврат не осуществлялся.

Поскольку оплата задолженности по договорам в полном объеме произведена не была, истец обратился в суд с настоящим иском.

Оценив доводы сторон, а также представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таковых условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, в силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Поскольку истец документально обосновал наличие задолженности по оплате выполненных работ, доказательств оплаты долга в полном объеме не представлены, то суд, оценив с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные по делу доказательства, считает требование истца о взыскании задолженности обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Определяя надлежащего ответчика по делу, суд с учетом дополнительного соглашения от 21.11.2022 к соглашению № 10-2022-007939 от 18.03.2022 об уменьшении размера субсидии приходит к выводу, что договоры от 01.12.2021 № 85  и № 86 после 21.11.2022 (момента подписания ООО «Гарант» и Управлением соглашения об уменьшении размера субсидии) перестали являться частью обязательств Управления по софинансированию. Управление в 2022 году денежные средства освоило в рамках программы в полном объеме, возврат в бюджет не осуществлен, высвобожденные денежные средства перераспределены иным получателям субсидии. Указанное является основанием для отказа в удовлетворении иска к «Управлению коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана».

В свою очередь, ООО «Гарант», имея по состоянию на 31.08.2023 исполненные обязательства истца, заключило соглашение от 21.11.2022 об уменьшении субсидии.

В данном случае ООО «Гарант», понимая объем обязательств перед истцом, действовал на свой страх и риск и должен был предполагать возможные негативные последствия совершения подобных действий. В судебном заседании представитель ООО «Гарант» подтвердил отсутствие на специальном счета денежных средств собственников в достаточном объеме (средства в размере 376 014  рублей 09 копеек не собраны – не возвращены предыдущей управляющей компании).

Возможно, такое осуществление своей деятельности является деловым просчётом общества, однако, как следует из постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2004 № 3-П, судебный контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод участников гражданского оборота, а не проверять экономическую целесообразность действий субъектов предпринимательской деятельности, поскольку последние обладают самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в сфере бизнеса. Следовательно, суды не оценивают экономическую целесообразность подобных решений, так как в силу рискового характера предпринимательской деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчётов.

Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению за счет общества с ограниченной ответственностью «Гарант».

Проверив расчет долга, суд установил его обоснованность, требование подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Проверив расчет неустойки, суд признал его неверным. По расчету суда неустойка составляет 198 977 рублей 91 копейка, из расчета: (1 368 836,83 х 288 дней с 13.09.2022 по 27.06.2023 х 15% : 300 = 197 112,50) + (12 954,25 х 288 дней с 13.09.2022 по 27.06.2023х 15% : 300).

Однако поскольку с учетом перерасчета сумма неустойки получится больше, чем просит истец и суд не может выйти за пределы заявленных требований, требования о взыскании неустойки признаются обоснованными в заявленном размере.

По результатам рассмотрения дела иск подлежит удовлетворению за счет общества с ограниченной ответственностью «Гарант». В удовлетворении иска к «Управлению коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана» следует отказать.

Государственная пошлина по иску составила 27 818 рублей.  Истцом при подаче иска платежным поручением от 03.05.2023 №64 уплачена государственная пошлина в размере 28 202  рублей.

 В соответствии с частью 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 27 818 рублей.  

Государственная пошлина в размере 384 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 104, 110, 167 - 171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гарант» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Крылатые качели» 1 481 762 (один миллион четыреста восемьдесят одну тысячу семьсот шестьдесят два) рубля 51 копейку, в том числе 1 381 791 рубль 08 копеек долга и 99 971 рубль 43 копейки неустойки, а также           27 818 (двадцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей расходов по уплате государственной пошлины.

2. В удовлетворении иска к «Управлению коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана» отказать.

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Крылатые качели» из федерального бюджета 384 (триста восемьдесят четыре) рубля государственной пошлины, уплаченной платёжным поручением от 03.05.2023 № 64.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Жалоба  подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

 

Судья                Г.И. Субач