АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

04 октября 2018 года

 

Дело № А33-8319/2018

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 28 сентября 2018 года.

В полном объёме решение изготовлено 04 октября 2018 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Антроповой О.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная группа Ангара» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск),

к акционерному обществу «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск),

о взыскании неосновательного обогащения,

в присутствии:

от ответчика (в Арбитражном суде Красноярского края): ФИО1 - представителя по доверенности от 22.01.2018 (до перерыва),

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи, видеоконференц - связи и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Шапран Н.А.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Строительная группа Ангара» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (далее – ответчик) о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда № 3175714/1096Д на выполнение работ от 10.12.2014 в размере 560 244 руб. 80 коп., по договору подряда № 3175715/0142Д на выполнение работ от 23.01.2015 в размере 933 423 руб. 04 коп., по договору подряда № 3175715/0161Д на выполнение работ от 27.01.2015 в размере 57 795 руб. 16 коп., по договору подряда № 3175715/0162Д на выполнение работ от 27.01.2015 в размере 47 228 руб. 31 коп., по договору подряда № 3175715/0233Д на выполнение работ от 09.02.2015 в размере 2 173 730 руб. 61 коп., по договору подряда № 3175716/0258Д на выполнение работ от 19.02.2016 в размере 3 701 511 руб. 73 коп.

Определением арбитражного суда от 09.04.2018 исковое заявление оставлено без движения. Истцу предложено представить: документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны требования (акты о приемке выполненных работ).

26.04.2018 от истца в материалы дела поступило заявление о продлении срока оставления искового заявления без движения.

Определением от 26.04.2018 продлен срок оставления искового заявления без движения.

Определением от 07.05.2018 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу. 

29.06.2018, в связи с отсутствием возражений против завершения предварительного судебного заседания и перехода в судебное заседание от лиц, участвующих в деле, на основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 №65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», суд завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Рассмотрение дела откладывалось.

Ответчик в судебном заседании 27.09.2018 требования не признал, поддержал доводы, изложенные в письменном отзыве на иск, ответил на вопросы суда.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 12 час. 20 мин. 28 сентября 2018 года, о чем вынесено протокольное определение. После перерыва судебное заседание  продолжено в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Информация о перерыве в судебном заседании размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

10.12.2014 между ООО «Строительная группа Ангара» (далее - подрядчик) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (далее - заказчик) подписан договор подряда № 3175714/1096Д, согласно пункту 1.1 которого подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта  «Канализационные очистные сооружения», расположенного по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское участковое лесничество, квартал: 2838 (выд. 36.37), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 47 848 997 рублей 90 копеек в том числе:

-   стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой и составляет - 34 972 501 рубль 27 копеек;

-   стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 12 876 496 рублей 63 копейки.

Согласно п. 6.1 договора подряда Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет Подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ- 15.03.2015 г., окончание работ-27.06.2016. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (приложение № 4 к договору в редакции дополнительного соглашения от 05.08.2016 № 3175714/1096Д011)  и детализированным графиком производства работ по законченным этапам.

В соответствии с п. 6.3 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 15.07.2016 № 3175714/1096Д010) Заказчик резервирует 5% стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта. Зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий: наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11; предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта; сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 31.03.2015 на сумму 329 628 рублей 96 копеек, № 2 от 30.04.2015 на сумму 10 582 рубля 60 копеек, № 4 от 30.04.2015  на сумму 607 156 рублей 60 копеек, № 5 от 30.04.2015 на сумму 2 081 565 рублей 92 копейки, № 3 от 30.04.2015 на сумму 36 618 рублей, № 8 от 31.05.2015 на сумму 220 984 рубля 96 копеек, № 6 от 31.05.2015  на сумму 9 754 рубля 81 копейка, № 7 от 31.05.2015  на сумму 33 591 рубль 93 копейки, № 9 от 31.05.2015 на сумму 726 037 рублей 82 копейки, № 10 от 31.07.2015  на сумму 718 675 рублей 54 копейки, № 11 от 31.07.2015 на сумму 9 966 рублей 67 копеек, № 12 от 10.09.2015 на сумму 919 181 рубль 07 копеек, № 13 от 10.09.2015  на сумму 1 427 072 рубля 05 копеек, № 14 от 10.09.2015 на сумму 836 393 рубля 17 копеек, № 15 от 10.09.2015 на сумму 70 777 рублей 53 копейки, № 16 от 10.09.2015 на сумму 521 934 рубля 13 копеек, № 17 от 31.10.2015 на сумму 128 891 рубль, № 18 от 30.11.2015 на сумму 137 607 рублей 55 копеек, № 19 от 30.11.2015  на сумму 164 294 рублей 09 копеек, № 20 от 30.11.2015 на сумму 377 794 рубля 46 копеек, № 21 от 30.11.2015 на сумму 357 234 рубля 68 копеек, № 22 от 31.12.2015  154 831 рубль 32 копейки, № 23 от 31.12.2015 на сумму 574 792 рубля65 копеек, № 24 от 31.03.2016  на сумму 165 918 рублей 08 копеек, № 25 от 31.03.2016 на сумму 153 802 рубля 25 копеек, № 27 от 30.04.2016 г. на сумму 41 896 рублей 51 копейка, № 26 от 30.04.2016 г. на сумму 32 731 рубль 30 копеек, № 28 от 31.05.2016 г. на сумму 418 666 рублей 62 копейки, № 29 от 31.05.2016 г. на сумму 324 750 рублей 95 копеек, № 30 от 30.06.2016 г. на сумму 66 336 рублей 27 копеек, № 31 от 30.06.2016 г. на сумму 66 986 рублей 69 копеек, № 32 от 30.06.2016 г. на сумму 62 833 рубля 16 копеек, № 33 от 30.11.2016 г. на сумму 75 776 рублей 93 копейки, № 34 от 30.11.2016 г. на сумму 75 776 рублей 93 копейки, № 35 от 30.11.2016 г. на сумму 75 776 рублей 93 копейки, № 36 от 30.11.2016 г. на сумму 75 776 рублей 93 копейки, № 37 от 09.12.2016 г. на сумму 211 263 рубля 61 копейка, № 38 от 09.12.2016 г. на сумму 296 336 рублей 90 копеек, № 39 от 09.12.2016 г. на сумму 307 247 рублей 97 копеек, № 40 от 09.12.2016 г. на сумму 162 825 рублей 52 копейки, № 41 от 09.12.2016 г. на сумму 2 693 рубля 79 копеек, № 42 от 09.12.2016 г. на сумму 25 940 рублей 40 копеек, № 43 от 09.12.2016 г. на сумму 72 419 рублей 53 копейки, № 44 от 09.12.2016 г. на сумму 134 313 рублей 45 копеек, № 45 от 09.12.2016 г. на сумму 401 950 рублей 99 копеек, № 46 от 09.12.2016 г. на сумму 74 659 рублей 31 копейка, № 47 от 31.12.2016 г. на сумму 1 124 795 рублей 99 копеек и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 31.03.2015 г. на сумму 388 962 рубля 17 копеек, № 2 от 30.04.2015 г. на сумму 728 932 рубля 26 копеек, № 3 от 30.04.2015 г. на сумму 2 499 457 рублей 03 копейки, № 4 от 31.05.2015 г. на сумму 272 272 рубля 93 копейки, № 5 от 31.05.2015 г. на сумму 896 363 рубля 11 копеек, № 6 от 859 797 рублей 81 копейка, № 7 от 10.09.2015 г. на сумму 4 454 922 рублей 38 копеек, № 8 от 31.10.2015 г. на сумму 152 091 рубль 38 копеек, № 9 от 30.11.2015 г. на сумму 1 223 578 рублей 32 копейки, № 10 от 31.12.2015 г. на сумму 860 956 рублей 28 копеек, № И от 31.03.2016 г. на сумму 377 269 рублей 99 копеек, № 12 от 30.04.2016 г. на сумму 88 060 рублей 82 копейки, № 13 от 01.05.2016 г. на сумму 877 232 рубля 73 копейки, № 14 от 30.06.2016 г. на сумму 230 284 рубля 22 копейки, № 15 от 30.11.2016 г. на сумму 357 667 рублей 11 копеек, № 16 от 09.12.2016 г. на сумму 1 993 788 рублей 73 копейки, № 17 от 31.12.2016 г. на сумму 1 327 259 рублей 27 копеек.

Ответчиком направлено истцу уведомление от 09.06.2017 № 1-5/17-1039 об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке.

11.07.2017 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у Ответчика задолженность перед Истцом. Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017 между истцом и ответчиком подписан акт сверки взаимных расчетов, где Ответчиком была признана задолженность перед Истцом в размере 560 244 рубля 80 копеек.

Согласно расчету истца, размер неосновательного обогащения ответчика по договору подряда от 10.12.2014  № 3175714/1096Д составляет 560 244 руб. 80 коп.

23.01.2015 между ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» подписан договор подряда № 3175715/0142Д, согласно пункту 1.1 которого подрядчик обязуется выполнить работы по объекту  «Юрубчено-Тохомское мнр. Метрологический центр. Инженерная подготовка», расположенному по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское участковое лесничество, квартал: 2838 (выд. 19), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 38 063 315 рублей 47 копеек в том числе:

-   стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой и составляет - 26 869 642 рубля 84 копейки;

-   стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 11 193 672 рубля 63 копейки.

Согласно п. 6.1 договора подряда Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет Подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ-01.03.2015 г., окончание работ-25.12.2015. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (приложение № 4 к договору в редакции дополнительного соглашения от 25.07.2016 № 3175715/0142Д010)  и детализированным графиком производства работ по законченным этапам.

Согласно пункту 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 13.04.2015 № 3175715/0142Д001) стоимость работ, подлежащих выполнению по договору, составляет 26 869 642,84 руб.

В соответствии с п. 6.3 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 15.07.2016 № 3175715/0142Д009) Заказчик резервирует 5% стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта. Зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий: наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11; предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта; сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 31.08.2015 г. на сумму 237 245 рублей 80 копеек, № 2 от 31.08.2015 г. на сумму 208 474 рубля 03 копейки, № 2 от

30.11.2015   г. на сумму 1 163 344 рубля 66 копеек, № 4 от 29.02.2016 г. на сумму 153 143 рубля 94 копейки, № 5 от 29.02.2016 г. на сумму 2 749 021 рубль 73 копейки, № 6 от

г. на сумму 889 757 рублей 14 копеек, № 7 от 29.02.2016 г. на сумму 537 040 рублей 86 копеек, № 8 от 29.02.2016 г. на сумму 208 554 рубля 08 копеек, № 9 от 10.03.2016 г. на сумму 78 291 рубль 24 копейки, № 10 от 10.03.2016 г. на сумму 292 331 рубль 87 копеек, № 11 от 10.03.2016 г. на сумму 201 356 рублей 25 копеек, № 12 от 10.03.2016 г. на сумму 3 546 рублей 79 копеек, № 15 от 31.03.2016 г. на сумму 254 986 рублей 02 копейки, № 17 от 31.03.2016 г. на сумму 40 136 рублей 48 копеек, № 13 от 31.03.2016 г. на сумму 621 380 рублей 34 копейки, № 14 от 31.03.2016 г. на сумму 155 014 рублей 45 копеек, № 16 от 31.03.2016 г. на сумму 327 170 рублей 72 копейки, № 18 от 31.03.2016 г. на сумму 20 772 рубля 18 копеек, № 19 от 31.03.2016 г. на сумму 94 432 рубля 73 копейки, № 20 от 31.03.2016 г. 19 329 рублей 23 копейки, № 21 от 31.03.2016 г. на сумму 236 924 рубля 24 копейки, № 22 от 30.04.2016 г. на сумму 945 326 рублей 74 копейки, № 23 от 30.04.2016 г. на сумму 118 240 рублей 80 копеек, № 24 от 30.04.2016 г. на сумму 1 628 748 рублей 46 копеек, № 25 от 30.04.2016 г. на сумму 3 241 рубль 90 копеек, № 26 от 30.04.2016 г. на сумму 126 310 рублей, № 27 от 30.04.2016 г. на сумму 44 370 рублей 73 копейки, № 28 от 31.05.2016 г. на сумму 128 562 рубля 46 копеек, № 29 от 31.05.2016 г. на сумму 61 371 рубль 29 копеек, № 30 от 31.05.2016 г. на сумму 633 888 рублей 10 копеек, № 31 от 30.06.2016 г. на сумму 162 471 рубль 76 копеек, № 32 от 30.06.2016 г. на сумму 1 107 756 рублей 76 копеек, № 33 от 30.06.2016 г. на сумму 69 245 рублей 28 копеек, № 34 от 31.07.2016 г. на сумму 876 723 рубля 39 копеек, № 35 от 31.07.2016 г. на сумму 14 986 рублей 44 копейки, № 36 от 31.07.2016 г. на сумму 6 922 рубля 09 копеек, № 37 от 31.07.2016 г. на сумму 197 583 рубля 85 копеек, № 38 от 31.08.2016 г. на сумму 5 597 рублей 70 копеек, № 39 от 31.08.2016 г. на сумму 12 140 рублей 46 копеек, № 40 от 31.08.2016 г. на сумму 478 293 рубля 31 копейка, № 41 от 31.08.2016 г. на сумму 97 717 рублей 58 копеек, № 42 от 31.08.2016 г. на сумму 102 943 рубля 33 копейки, № 43 от 31.08.2016 г. на сумму 132 112 рублей 51 копейка, № 44 от 31.08.2016 г. на сумму 154 487 рублей 33 копейки и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 31.08.2015 г. на сумму 525 949 рублей 40 копеек, № 2 от 30.11.2015 г. на сумму 1 372 746 рублей 70 копеек, № 3 от 29.02.2016 г. на сумму 5 354 270 рублей 95 копеек, № 5 от 10.03.2016 г. на сумму 679 120 рублей 86 копеек, № 6 от 31.03.2016 г. на сумму 348 244 рубля 55 копеек, № 7 от 31.03.2016 г. на сумму 1 740 528 рублей 19 копеек, № 8 от 30.04.2016 г. на сумму 3382 161 рубль 58 копеек, № 9 от 31.05.2016 г. на сумму 1 231 040 рублей 33 копейки, № 10 от 30.06.2016 г. на сумму 1 580 579 рублей 08 копеек, № 11 от 31.07.2016 г. на сумму  1 293 534 рубля 61 копейка, № 12 от 31.08.2016 г. на сумму 1 160 284 рубля 82 копейки.

11.07.2017 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у ответчика задолженность перед истцом. Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017 между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где ответчиком была признана задолженность перед истцом в размере 933 423 руб. 04 коп.

Согласно расчету истца, размер неосновательного обогащения ответчика по договору подряда от 23.01.2015 № 3175715/0142Д составляет 933 423 руб. 04 коп.

27.01.2015 между ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» подписан договор подряда № 3175715/0161Д, согласно пункту 1.1 которого подрядчик обязуется выполнить работы по объекту  «Юрубчено-Тохомское мнр. Амбар для факела противовыбросового оборудования куста № 3», расположенному по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское участковое лесничество, квартал: 2872 (выд. 1,9,10,40), включая добычу грунта из карьера № 7а, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 25 136 806 рублей 70 копеек в том числе:

-   стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой и составляет - 17 660 699 рублей 93 копейки;

-   стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 7 476 106 рублей 77 копеек.

Согласно п. 6.1 договора подряда Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет Подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ- 15.03.2015, окончание работ - 26.09.2015.Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (приложение № 4 к договору в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 № 3175715/0161Д007)  и детализированным графиком производства работ по законченным этапам.

Согласно пункту 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 № 3175715/0161Д007) стоимость работ, подлежащих выполнению по договору, составляет 4 670 990,55 руб.

В соответствии с п. 6.3 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 № 3175715/0161Д001) Заказчик резервирует 10% стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта. Зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий: наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11; предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта; сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 30.04.2015 г. на сумму 259 957 рублей 29 копеек, № 2 от 30.06.2015 г. на сумму 302 109 рублей 16 копеек, № 3 от 30.06.2015 г. на сумму 295 920 рублей 53 копейки, № 4 от 30.06.2015 г. на сумму 2 405 986 рублей 56 копеек, № 5 от 16.11.2015 г. на сумму 419 400 рублей 13 копеек, № 6 от 30.11.2015, на сумму 160 рублей 33 копейки, № 7 от 30.06.2016 г. на сумму 31 968 рублей 34 копейки, № 8 от 30.06.2016 г. на сумму 200 127 рублей 93 копейки, № 9 от 30.06.2016 г. на сумму 42 836 рублей 30 копеек и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 30.04.2015 г. на сумму 306 749 рублей 60 копеек, № 3 от 30.06.2015 г. на сумму 356 488 рублей 81 копейка, № 3 от 30.06.2015 г. на суммуЗ 188 250 рублей 37 копеек, № 4 от16.11.2015 г. на сумму 494 892 рубля 15 копеек, № 5 от 30.11.2015 г. на сумму 189 рублей 19 копеек, № 6 от 30.06.2016 г на сумму 37 722 рубля 64 копейки, № 6 от 30.06.2015 на сумму 286 697 рублей 79 копеек.

15.01.2018 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у ответчика задолженность перед истцом. Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017 между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где Ответчиком была признана задолженность перед истцом в размере 57 795 рублей 16 копеек.

Согласно расчету истца, размер неосновательного обогащения ответчика по договору подряда от 27.01.2015 № 3175715/0161Д составляет 57 795 руб. 16 коп.

27.01.2015 между ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» подписан договор подряда № 3175715/0162Д, согласно пункту 1.1 которого подрядчик обязуется выполнить работы по объекту  «Юрубчено-Тохомское мнр. Амбар для факела противовыбросового оборудования куста № 4», расположенному по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское участковое лесничество, квартал: 2912 (выд. 8,11,30), включая добычу грунта из карьера № 7а, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 30 480 616 рублей 14 копеек в том числе:

-   стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой и составляет - 22 131 984 рубля 23 копейки;

-   стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 8 348 631 рубль 91 копейка.

Согласно п. 6.1 договора подряда Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет Подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ - 15.04.2015, окончание работ - 27.10.2015. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (приложение № 4 к договору в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 № 3175715/0162Д009)  и детализированным графиком производства работ по законченным этапам.

Согласно пункту 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 № 3175715/01612Д009) стоимость работ, подлежащих выполнению по договору, составляет 12 917 14,93 руб.

В соответствии с п. 6.3 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 10.04.2015 № 3175715/0162Д001) Заказчик резервирует 10% стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта. Зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий: наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11; предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта; сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 30.04.2015 г. на сумму 330 883 рубля 15 копеек, № 3 от 31.07.2015 г. на сумму 1 018 747 рублей 11 копеек, № 2 от 31.07.2015 г. на сумму 188 219 рублей 67 копеек, № 4 от 31.07.2015 г. на сумму 7 143 348 рублей 07 копеек, № 5 от 30.11.2015 г. на сумму 35 430 рублей 02 копейки, № 7 от 30.11.2015 г. на сумму 199 456 рублей 82 копейки, № 6 от 30.11.2015 г. на сумму 688 593 рубля 39 копеек, № 8 от 30.11.2015 г. на сумму 590 507 рублей 80 копеек, № 9 от 30.11.2015 г. на сумму 590 507 рублей 80 копеек, № 10 от 30.11.2015 г. на сумму 161 022 рубля 21 копейка и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 30.04.2015 г. на сумму 390 442 рубля 12 копеек, № 2 от 31.07.2015 г. на сумму 1 202 121 рубль 59 копеек, № 3 от 31.07.2015 г. на сумму 8 651 249 рублей 93 копейки, № 4 от 30.11.2015 г. на сумму 277 166 рублей 47 копеек, № 5 от 30.11.2015 г. на сумму 2 396 144 рубля 82 копейки.

15.01.2018 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у Ответчика задолженность перед Истцом. Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017 между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где ответчиком была признана задолженность перед истцом в размере 47 228 рублей 31 копейка.

Согласно расчету истца, размер неосновательного обогащения ответчика по договору подряда от 27.01.2015 № 3175715/0162Д составляет 47 228 руб. 31 коп.

09.02.2015 между ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» подписан договор подряда № 3175715/0233Д, согласно пункту 1.1 которого подрядчик обязуется выполнить работы по объекту  «Юрубчено-Тохомское мнр. Лабораторный комплекс. Инженерная подготовка», расположенному по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское участковое лесничество, квартал: 2838 (выд. 19,48), включая добычу грунта из карьера № 13, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 72 973 576 рублей 93 копейки в том числе:

-   стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой и составляет - 53 335 405 рублей 76 копеек;

-   стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 19 638 171 рубль 17 копеек.

Согласно п. 6.1 договора подряда Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет Подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ-01.03.2015, окончание работ-25.12.2015.Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (приложение № 4 к договору в редакции дополнительного соглашения от 15.08.2016 № 3175715/0233Д010)  и детализированным графиком производства работ по законченным этапам.

Согласно пункту 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 10.04.2015 № 3175715/0233Д001) стоимость работ, подлежащих выполнению по договору, составляет 53 335 405,76 руб.

В соответствии с п. 6.3 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 10.04.2015 № 3175715/0233Д009) Заказчик резервирует 5% стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта. Зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий: наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11; предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта; сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 31.03.2015 г. на сумму 84 613 рублей 43 копейки, № 2 от 31.03.2015 г. на сумму 99 349 рублей, № 3 от 31.03.2015 г. на сумму 18 261 рубль 61 копейка, № 4 от 15.05.2015 г. на сумму 242 883 рубля 96 копеек, № 5 от 15.05.2015 г. на сумму 383 050 рублей 13 копеек, № 6 от 15.05.2015 г. на сумму 1 214 960 рублей 43 копейки, № 7 от 15.05.2015 г. на сумму 1 003 084 рубля 56 копеек, № 8 от 31.05.2015 г. на сумму 115 690 рублей 89 копеек, № 9 от 31.05.2015 г. на сумму 2 225 512 рублей 78 копеек, № 12 от 31.05.2015 г. на сумму 509 531 рубль 47 копеек, № 10 от 31.05.2015 г. на сумму 420 078 рублей 76 копеек, № 11 от 31.05.2015 г. на сумму 8 031 504 рубля 80 копеек, № 13 от 31.05.2015 г. на сумму 67 471 рубль 48 копеек, № 14 от 30.06.2015, на сумму 1946 767 рублей 17 копеек, № 15 от 30.06.2015 г. на сумму 10 235 155 рублей 35 копеек, № 16 от 30.06.2015 г. на сумму 86 837 рублей 88 копеек, № 15 от 31.07.2015 г. на сумму 992 046 рублей 41 копейка, № 16 от 10.09.2015 г. на сумму 111 408 рублей 76 копеек, № 17 от 10.09.2015 г. на сумму 66 937 рублей 93 копейки, № 18 от 10.09.2015 г. на сумму 494 440 рубля 58 копеек, № 20 от 16.11.2015 г. на сумму 28 152 рубля 08 копеек, № 19 от 16.11.2015 г. на сумму 682 729 рублей 63 копейки, № 26 от 10.02.2015, на сумму 14 171 рубль 53 копейки, № 21 от 10.02.2016 г. на сумму 65 546 рублей 10 копеек, № 22 от 10.02.2016 г. на сумму 359 392 рубля 78 копеек, № 23 от 10.02.2016 г. на сумму 576 834 рубля 17 копеек, № 24 от 10.02.2016 г. на сумму 545 436 рублей 32 копейки, № 25 от 10.02.2016 г. на сумму 149 501 рубль 08 копеек, № 27 от 10.02.2016 г. на сумму 32 769 рублей 55 копеек, № 28 от 10.02.2016 г. на сумму 2 912 659 рублей 42 копейки, № 29 от 10.02.2016 г. на сумму 1 403 079 рублей 47 копеек, № 30 от 10.02.2016 г. на сумму 191 841 рубль 48 копеек, № 31 от 10.02.2016 г. на сумму 578 311 рублей 44 копейки, № 32 от 10.02.2016 г. на сумму 367 927 рублей 89 копеек, № 33 от 30.04.2016 г. на сумму 82 916 рублей 70 копеек, № 34 от 30.04.2016 г. на сумму 83 254 рубля 70 копеек, № 35 от 30.04.2016 г. на сумму 60 007 рублей 39 копеек, № 36 от 31.07.2016 г. на сумму 358 772 рубля 87 копеек и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 31.03.2015 г. на сумму 238 624 рубля 37 копеек, № 2 от 15.05.2015 г. на сумму 738 602 рубля 23 копейки, № 3 от 15.05.2015 г. на сумму 2 617 293 рубля 09 копеек, № 4 от 31.05.2015 г. на сумму 2 762 620 рублей 33 копейки, № 5 от 31.05.2015 г. на сумму 10 653 732 рубля 08 копеек, № 6 от 30.06.2015 г. на сумму 2 297 185 рублей 26 копеек, № 7 от 30.06.2015 г. на сумму 12 179 952 рубля 01 копейка, № 8 от 31.07.2015 г. на сумму 1 170 614 рублей 76 копеек, № 9 от 10.09.2015 г. на сумму 793 888 рублей 98 копеек, № 11 от 16.11.2015 г. на сумму 33 219 рублей 45 копеек, № 10 от 16.11.2015 г. на сумму 805 620 рублей 96 копеек, № 12 от 10.02.2016 г. на сумму 94 066 рублей 80 копеек, № 13 от 10.02.2016 г. на сумму 8 398 949 рублей 25 копеек, № 14 от 30.04.2016 г. на сумму 266 890 рублей 97 копеек, № 15 от 31.07.2016 г. на сумму 423 351 рубль 99 копеек.

11.07.2017 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у Ответчика задолженность перед Истцом. Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017. между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где ответчиком была признана задолженность перед Истцом в размере 2 173 730 рублей 61 копейка.

Согласно расчету истца, размер неосновательного обогащения ответчика по договору подряда от 09.02.2015 № 3175715/0233Д составляет 2 173 730 руб. 61 коп.

19.02.2016 между ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» подписан договор подряда № 3175716/0258Д, согласно пункту 2.1 которого подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта  «Юрубчено-Тохомское мнр. Подготовительные работы. Автомобильная дорога к кусту № 28», расположенного на территории Юрубчено-тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект,  а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 цена договора в соответствии с расчетом цены договора не превысит 92 843 210 рублей 91 копейка и включает:

- стоимость работ - 89 667 796 рублей 70 копеек;

- стоимость материально-технических ресурсов - 3 175 414 рублей 21 копейка.

Согласно п. 4.1 договора подряда Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленных Подрядчиком, надлежаще оформленных первичных документов и после подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ, в соответствии с процедурой приемки.

В соответствии с п. 5.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по договору: срок начала выполнения работ - 19.02.2016, срок окончания выполнения работ - 13.07.2016. Работы, предусмотренные Договором по объекту, выполняются подрядчиком согласно графику производства работ по законченным этапам (приложение № 4 к Договору в редакции дополнительного соглашения от 11.11.2016 № 3175716/0258Д007) и оперативному графику производства работ.

В соответствии с п. 23.2.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 15.07.2016 № 3175716/0258Д004) Заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ, включая стоимость материалов, до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ исключается стоимость материалов и оборудования, приобретаемых подрядчиком у заказчика по договорам купли-продажи.

Зарезервированная сумма, согласно п. 23.2.2 Договора, выплачивается подрядчику не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) при обязательном наличии полученного заказчиком в установленном порядке заключения органа государственного строительного надзора (за исключением случаев неполучения в указанный срок заключения по причинам, зависящим от заказчика) и предоставления гарантии в соответствии с условиями п. 23.1 Договора.

При этом, как указано в п. 23.2.3 Договора, в случае непредоставления подрядчиком гарантии, сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, продолжительность которого составляет 36 месяцев (п. 22.3 Договора).

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 2 от 31.03.2016 г. на сумму 158 407 рублей 56 копеек, № 3 от 31.03.2016 г. на сумму 998 249 рублей 62 копейки, № 1 от 31.03.2016 г. на сумму 230 820 рублей 61 копейка, № 4 от 11.04.2016 г. на сумму 282 891 рубль 81 копейка, № 5 от 11.04.2016 г. на сумму 1 118 300 рублей 17 копеек, № 6 от 13.05.2016 г. на сумму 482 818 рублей 22 копейки, № 7 от 13.05.2016 г. на сумму 3 374 229 рублей 79 копеек, № 9 от 31.05.2016 г. на сумму 48 523 рубля 04 копейки, № 10 от 31.05.2016,  на сумму 223 977 рублей 40 копеек, № 8 от 31.05.2016 г. на сумму 1 763 701 рубль 09 копеек, № 11 от 31.05.2016 г. на сумму 969 436 рублей 33 копейки, № 12 от 30.06.2016, на сумму 2 493 703 рубля 42 копейки, № 15 от 31.07.2016 г. на сумму 624 369 рублей 10 копеек, № 14 от 31.07.2016 г. на сумму 1 145 940 рублей 67 копеек, № 13 от 31.07.2016 г. на сумму 3 913 рублей 24 копейки, № 16 от 31.07.2016 г. на сумму 9 233 527 рублей 37 копеек, № 17 от 31.08.2016 г. 2 068 419 рублей 08 копеек, № 19 от 31.08.2016 г. на сумму 1 519 69 рублей 02 копейки, № 18 от 31.08.2016 г. на сумму 9 027 рублей 87 копеек, № 22 от 12.09.2016 г. на сумму 3 519 919 рублей 49 копеек, № 21 от 12.09.2016 г. на сумму 880 830 рублей 47 копеек, № 20 от 12.09.2016 г. на сумму 157 441 рублей 10 копеек, № 23 от 10.10.2016 г. на сумму 2 230 951 рубль 19 копеек, № 24 от 10.10.2016 г. 405 828 рублей 89 копеек, № 25 от 10.10.2016 г. на сумму 729 458 рублей 36 копеек, № 26 от 10.10.2016 г. на сумму 107 889 рублей 63 копейки, № 35 от 31.10.2016 г. на сумму 54 239 рублей 51 копейка, № 27 от 31.10.2016 г. на сумму 485 647 рублей 43 копейки, № 28 от 31.10.2016 г. на сумму 4 574 829 рублей 51 копеек, №29 от 31.10.2016 г. на сумму 150 368 рублей 01 копейка, № 30 от 31.10.2016 г. 330 037 рублей 43 копейки, № 31 от 31.10.2016 г. на сумму 3 840 рублей 92 копейки, № 32 от 31.10.2016 г. на сумму 68 599 рублей 03 копейки, № 33 от 31.10.2016 г. на сумму 3 608 098 рублей 92 копейки, № 34 от 31.10.2016 г. на сумму 1 667 854 рубля 49 копеек, № 36 от 30.11.2016 г. на сумму 4 074 182 рубля 96 копеек, № 37 от 30.11.2016 г. на сумму 262 405 рублей 74 копейки, № 38 от 03.11.2016 г. на сумму 221 123 рубля 24 копейки, № 39 от 30.11.2016 г. на сумму 538 069 рублей 11 копеек, № 40 от 31.12.2016 г. на сумму 987 963 рублей 81 копейки, № 41 от 31.12.2016 г. 510 894 рублей 38 копеек, № 42 от 31.12.2016 г. на сумму 596 755 рублей 93 копейки, № 43 копейки на сумму 31.12.2016 г. 201 666 рублей 74 копейки, № 44 от 111 568 рублей 50 копеек, № 45 от 31.12.2016 г. на сумму 101 546 рублей, № 46 от 31.12.2016 г. на сумму 280 402 рубля 06 копеек, № 47 от 31.12.2016 г. 3 744 912 рубля 77 копеек, № 48 от 31.12.2016 г. на сумму 2 688 404 рубля 82 копейки, № 49 от 31.12.2016 г. 2 691 851 рубль 50 копеек и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 31.03.2016 г. на сумму 186 920 рублей 92 копейки, № 1 от 31.03.2016 г. на сумму 1 450 302 рубля 87 копеек, № 2 от 11.04.2016 г. на сумму 1 653 406 рублей 54 копейки, № 2 от 13.05.2016 г. на сумму 569 725 рублей 50 копеек, № 3 от 13.05.2016 г. на сумму 3 981 591 рубль 15 копеек, № 3 от 13.05.2016 г. на сумму 321 550 рублей 52 копейки, №4 от 31.05.2016 г. на сумму 3 225 102 рубля 16 копеек, № 5 от 30.06.2016 г. на сумму 2 942 570 рублей 04 копейки, № 4 от 31.07.2016 г. на сумму 2 088 965 рублей 53 копейки, № 6 от 31.07.2016 г. на сумму 10 900 179 рублей 92 копейки, № 7 от 31.08.2016 г. на сумму 4 233 896 рублей 76 копеек, № 5 от 31.08.2016 г. на сумму 10 652 рублей 89 копеек, № 8 от 12.09.2016 г. на сумму 5 378 665 рублей 45 копеек, № 9 от 10.10.2016 г. на сумму 4 099 471 рубль 12 копеек, № 5 от 31.10.2016 г. на сумму 64 002 рублей 62 копейки, № 10 от 31.10.2016 г. 12 849 345 рублей 37 копеек, № 10 от 31.10.2016 г. на сумму 6 013 021 рубль 64 копейки, № 11 от 31.12.2016 г. на сумму 14 060 864 рубля 08 копеек.

11.07.2017 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у Ответчика задолженность перед Истцом. Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017 между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где Ответчиком была признана задолженность перед истцом в размере 3 701 511 рублей 73 копейки.

Согласно расчету истца, размер неосновательного обогащения ответчика по договору подряда от 19.02.2016 № 3175716/0258Д составляет 3 701 511 руб. 73 коп.

В материалы дела поступил отзыв ответчика, в котором с исковыми требованиям не согласен по следующим основаниям:

- в части требований о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда от 10.12.2014 № 3175714/1096Д в размере 560 244,8 руб. Вследствие того, что истец выполнял работу настолько медленно, что окончание ее к сроку стало невозможным, ответчик отказался от исполнения договора №3175714/1096Д в одностороннем порядке на основании ст. 715 ГК РФ, о чем истцу было направлено уведомление от 09.06.2017 № 1-5/17-1039 (приложение 01). Таким образом, к установленному договором сроку по вине истца работы не были завершены, а объект не был построен. Кроме того, истцом до настоящего времени не осуществлен возврат давальческих материалов ответчика на сумму 1 398 000 руб. В целях завершения строительства объекта ответчиком по итогам проведенных закупочных процедур был заключен договор подряда от 15.04.2018 № 3175718/0518Д с ООО «СК Бастион» (приложение 02), в рамках которого на данный момент ООО «СК Бастион» не выполнило все предусмотренные договором работы по строительству объекта. Срок действия разрешения на строительство объекта, выданного Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, продлен уполномоченным органом до 17.08.2018 (приложение 03). Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 36 месяцев от даты подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (п. 8.1.4 договора подряда от 10.12.2014 № 3175714/1096Д, заключенного между Ответчиком и Истцом). По договору подряда от 10.12.2014 № 3175714/1096Д по состоянию на текущую дату строительство объекта «Канализационные очистные сооружения» не завершено, акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 отсутствует.

После расторжения договора подряда, заключенного с истцом, работы по завершению строительства объекта, выполняет новый подрядчик на основании заключенного с ответчиком договора, условиями которого также предусмотрено гарантийное удержание в размере 10% стоимости фактически выполненных работ (п. 23.2.1  договора подряда №3175718/0518Д от 15.04.2018). Отражение сумм гарантийных удержаний в актах сверки взаимных расчетов, подписываемых сторонами, свидетельствует о сохранении действия условий договора в части гарантийных обязательств подрядчика, а не о наступлении срока выплаты соответствующих сумм.

Копия разрешения на строительство объекта, а также копия договора подряда от 15.04.2018 № 3175718/0518Д, заключенного ответчиком с ООО «СК Бастион» в целях завершения строительства объекта, приложены к отзыву на исковое заявление.

Календарный срок окончания выполнения работ согласно п. 5.1 указанного выше договора подряда - 30.06.2018.

На данный момент ООО «СК Бастион» не выполнило все предусмотренные договором работы по строительству объекта, в связи с чем объект не введен в эксплуатацию, срок действия разрешения на строительство объекта продлен до 17.08.2018. Строительство данного объекта после расторжения договора с истцом осуществляет ООО «СК Бастион», копия соответствующего договора подряда приложена к отзыву на исковое заявление, представленному в материалы дела. На основании изложенного, срок выплаты гарантийных удержаний по договору подряда от 10.12.2014 № 3175714/1096Д не наступил, в связи с чем ответчик просит суд отказать истцу в удовлетворении исковых требований в указанной части.

- В части требований Истца о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда от 23.01.2015 № 3175715/0142Д в размере 933.423,04 руб.

В соответствии с п. 6.3 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 15.07.2016 № 3175715/0142Д009) Заказчик резервирует 5% стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта. Зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий:

1.    Наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11;

2.    Предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта;

3.    Сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

По состоянию на настоящий момент договор подряда от 23.01.2015 № 3175715/0142Д сторонами не расторгнут, акт приемки законченного строительством объекта формы КС-11 истцом не предоставлен. Кроме того, Истцом до настоящего времени не осуществлен возврат давальческих материалов Ответчика на сумму 23200 руб.

Отражение сумм гарантийных удержании в актах сверки взаимных расчетов, подписываемых сторонами, свидетельствует о сохранении действия условий Договора в части гарантийных обязательств Подрядчика, а не о наступлении срока выплаты соответствующих сумм.

На основании изложенного, срок выплаты гарантийных удержаний по договору подряда от 23.01.2015 № 3175715/0142Д не наступил, в связи с чем ответчик просит суд отказать истцу в удовлетворении исковых требований в указанной части.

Копия разрешения на строительство объекта от 24.07.2015 № 24-650-1745-2015 прилагается к материалам дела (приложение 01).

На данный момент работы по строительству объекта не завершены, объект не введен в эксплуатацию, срок действия разрешения на строительство объекта продлен до 24.01.2019.

Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 24 месяца от даты подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (п. 8.1.4 договора подряда от 23.01.2015 № 3175715/0142Д, заключенного между ответчиком и Истцом).

Ответчиком завершена закупочная процедура в целях выбора нового подрядчика для завершения выполнения работ на объекте и выбран победитель закупки (приложение 01). В ближайшее время с победителем будет заключен договор подряда. Срок завершения работ согласно протокола заседания закупочной комиссии -30.11.2018.

- В части требований Истца о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда от 27.01.2015 № 3175715/0161Д в размере 57.795,16 руб.

Пунктом 4.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 № 3175715/0161Д007) предусмотрены календарные сроки выполнения работ по строительству объекта: начало работ 28.03.2015, окончание работ 30.11.2015. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (приложение № 4 к Договору в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 № 3175715/0161Д007) и детализированным графиком производства работ по законченным этапам.

Согласно п. 3.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 №3175715/0161Д007) стоимость работ, подлежащих выполнению по Договору, составляет 4 670990,55 руб.

В соответствии с п. 6.3 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 28.04.2015 № 3175715/0161Д001) Заказчик резервирует 10% стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта. Зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий:

1.    Наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11;

2.    Предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта;

3.    Сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

На данный момент работы по строительству объекта завершены, акт приемки законченного строительством объекта подписан 30.06.2016 (приложен к дополнениям к отзыву от 16.07.2018), гарантийный срок эксплуатации, составлявший 24 месяца с даты подписания акта КС-11 (п. 8.1.4 договора подряда от 27.01.2015 № 3175715/0161Д), истек 30.06.2018,  57795,16 руб. будут выплачены истцу в срок до конца августа 2018 года.

- В части требований истца о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда от 27.01.2015 № 3175715/0162Д в размере 47 228,31 руб.

Пунктом 4.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 № 3175715/0162Д009) предусмотрены календарные сроки выполнения работ по строительству объекта: начало работ 28.03.2015, окончание работ 29.02.2016. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (приложение № 4 к Договору в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 № 3175715/0162Д009) и детализированным графиком производства работ по законченным этапам.

Согласно п. 3.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 29.08.2016 № 3175715/0162Д009) стоимость работ, подлежащих выполнению по договору, составляет 12917124,93 руб.

С целью обеспечения исполнения истцом принятых по договору обязательств, в заключенном Договоре сторонами предусмотрено положение о гарантийном удержании части оплаты выполненных работ до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта.

В соответствии с п. 6.3 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 10.04.2015 № 3175715/0162Д001) заказчик резервирует 10% стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта. Зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий:

1.    Наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11;

2.    Предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта;

3.    Сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Истцом в рамках настоящего дела заявлено требование о взыскании неосновательного обогащения в размере 47 228,31 руб., составляющего сумму гарантийного удержания по договору подряда от 27.01.2015 № 3175715/0162Д. На данный момент работы по строительству объекта завершены, акт приемки законченного строительством объекта подписан 30.06.2016 (приложен к дополнениям к отзыву от 16.07.2018), гарантийный срок эксплуатации, составлявший 24 месяца с даты подписания акта КС-11 (п. 8.1.4 договора подряда от 27.01.2015 № 3175715/0162Д), истек 30.06.2018, т.е. после подачи Истцом искового заявления.

- В части требований истца о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда от 09.02.2015 № 3175715/0233Д в размере 2.173.730,61 руб.

В соответствии с пунктом 1.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 14.06.2016 № 3175715/0233Д008) Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта «Юрубчено-Тохомское нмр. Лабораторный комплекс. Инженерная подготовка», расположенного по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское лесничество, Байкитское участковое лесничество, квартал: 2872 (часть выд. 19, 48), включая добычу грунта из карьера № 13, 14, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Пунктом 4.1 Договора предусмотрены календарные сроки выполнения работ по строительству объекта: начало работ 01.03.2015, окончание работ 25.12.2015. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (приложение № 4 к Договору в редакции дополнительного соглашения от 15.08.2016 № 3175715/0233 ДО 10) и детализированным графиком производства работ по законченным этапам.

Согласно п. 3.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 10.04.2015 № 3175715/0233Д001) стоимость работ, подлежащих выполнению по Договору, составляет 53.335.405,76 руб.

С целью обеспечения исполнения истцом принятых по договору обязательств, в заключенном договоре сторонами предусмотрено положение о гарантийном удержании части оплаты выполненных работ до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта. В соответствии с п. 6.3 оговора (в редакции дополнительного соглашения от 10.04.2015 № 3175715/0162Д001) заказчик резервирует 5% стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта. Зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий:

1.    Наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11;

2.    Предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта;

3.    Сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

По состоянию на настоящий момент договор подряда от 09.02.2015 № 317571570233Д сторонами не расторгнут, акт приемки законченного строительством объекта формы КС-11 истцом не предоставлен.

Срок выплаты гарантийных удержаний по договору подряда от 09.02.2015 № 3175715/0233Д не наступил, в связи с чем, ответчик просит отказать истцу в удовлетворении исковых требований в указанной части.

Копия разрешения на строительство объекта от 01.06.2017 № 24-650-2277-2017 прилагается (приложение 04).

На данный момент работы по строительству объекта не завершены, объект не введен в эксплуатацию, срок действия разрешения на строительство объекта продлен до 06.01.2019.

Продолжительность гарантийного срока на объект составляет 36 месяцев от даты подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (п. 8.1.4 договора подряда от 09.02.2015 № 3175715/0233Д, заключенного между Ответчиком и Истцом).

Строительство данного объекта после расторжения договора с Истцом осуществляет ООО «СНЭМА-СЕРВИС», копия соответствующего договора подряда прилагается к настоящему дополнению (приложение 02). Календарный срок окончания выполнения работ согласно п. 5.1 указанного выше договора подряда - 31.08.2018.

На данный момент ООО «СНЭМА-СЕРВИС» не выполнило все предусмотренные договором работы по строительству объекта, в связи с чем, объект не введен в эксплуатацию.

- В части требований Истца о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда от 19.02.2016 № 3175716/0258Д в размере 3 701 511,73 руб.

Согласно п. 3.1 договора цена договора не превысит 92 843 210,91 руб.

С целью обеспечения исполнения истцом принятых по договору обязательств, в заключенном договоре сторонами предусмотрено положение о гарантийном удержании части оплаты выполненных работ до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта.

В соответствии с п. 23.2.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 15.07.2016 № 3175716/0258Д004) Заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ, включая стоимость материалов, до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ исключается стоимость материалов и оборудования, приобретаемых подрядчиком у заказчика по договорам купли-продажи.

Зарезервированная сумма, согласно п. 23.2.2 Договора, выплачивается подрядчику не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) при обязательном наличии полученного заказчиком в установленном порядке заключения органа государственного строительного надзора (за исключением случаев неполучения в указанный срок заключения по причинам, зависящим от заказчика) и предоставления гарантии в соответствии с условиями п. 23.1 Договора.

При этом, как указано в п. 23.2.3 Договора, в случае непредоставления подрядчиком гарантии, сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, продолжительность которого составляет 36 месяцев (п. 22.3 Договора).

По состоянию на настоящий момент договор подряда от 19.02.2016 № 3175716/0258Д сторонами не расторгнут, акт приемки законченного строительством объекта формы КС-11 Истцом не предоставлен. Кроме того, Истцом до настоящего времени не осуществлен возврат давальческих материалов ответчика на сумму 6 800 руб.

Срок выплаты гарантийных удержаний по договору подряда от 19.02.2016 № 3175716/0258Д не наступил, в связи с чем, ответчик просит суд отказать истцу в удовлетворении исковых требований в указанной части.

На данный момент работы по строительству объекта завершены, акт приемки законченного строительством объекта подписан 31.12.2016 (приложение 05) гарантийный срок эксплуатации, составляющий 36 месяцев с даты подписания акта КС-11 (п. 22.3 договора подряда от 19.02.2016 № 3175716/0258Д) истекает 31.12.2019.

- не может служить основанием для досрочной оплаты всего объема выполненных работ факт возбуждения дела о банкротства подрядчика. Абзацем вторым пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  предусмотрено, что со дня открытия конкурсного производства считается наступившим срок исполнения возникших до этого денежных обязательств должника. Такие последствия на обязательства контрагентов должника-подрядчика не распространяются. Это означает, что при наличии у должника контрагентов-заказчиков, срок исполнения обязательств которых не наступил, несостоятельный подрядчик имеет возможность реализовать дебиторскую задолженность, получив до ликвидации денежный эквивалент за свой актив...».

- На основании изложенного, срок выплаты гарантийных удержаний по договорам подряда от 10.12.2014 № 3175714/1096Д, от 23.01.2015 № 3175715/0142Д, от 27.01.2015 № 3175715/0161Д, от 27.01.2015 № 3175715/0162Д, от 09.02.2015 № 3175715/023ЗД, от 19.02.2016 № 3175716/0258Д в общем размере 7 473 933,65 руб. не наступил, в связи с чем истец просит суд отказать истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование доводов, изложенных в письменном отзыве на иск и дополнительных пояснениях к отзыву, ответчик представил в материалы дела: договор подряда от 05.02.2018 №3175718/0230Д заключенный между АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (заказчик) и ООО «СНЭМА-СЕРВИС» (подрядчик), Разрешение  на  строительство   объекта  «Метрологический   центр»  от 24.07.2015 № 24-650-1745-2015, акт приемки законченного строительством объекта от 30.06.2016 № 1/4-36-15, акт приемки законченного строительством объекта от 30.06.2016 № 1/4-21-15, разрешение на строительство объекта от 01.06.2017 № 24-650-2277-2017, акт приемки законченного строительством объекта от 31.12.2016 № 1/3-5-16, решение закупочной комиссии АО «Востсибнефтегаз» от 27.07.2018 №ЗК-1105-КС-18.

Возражая против доводов ответчика, истец представил в материалы дела письменные возражения, в которых считает, что при расторжении договора условия о его предмете полностью прекращают свое действие на будущее, так как стороны более в таком предмете не заинтересованы, считает, что если договор подряда расторгнут, то гарантийные обязательства подрядчика сохраняются (если иное не установлено соглашением сторон) в отношении уже выполненного объема работ при условии, что к этой части работ могут применяться понятия качества и гарантийного срока. В случае привязки выплаты гарантийного удержания к подписанию акта по форме КС-11 предполагается, что такое удержание не должно обеспечивать обязанности подрядчика в отношении качества результата работ после введения объекта в эксплуатацию (не обеспечивает именно гарантийные обязательства). Подразумевается, что с помощью гарантийного удержания подрядчик стимулируется только к своевременному выполнению и устранению возможных недостатков отдельных этапов или видов работ до подписания акта КС-11 (явных недостатков, которые выявляются в ходе оперативного контроля). Гарантийное удержание обеспечивает обязанности подрядчика только на период самих работ. Если выполнение работ прекращено на будущее и часть работ уже принята, то отпадает всякий смысл в гарантийном удержании, так как претензий к качеству уже исполненного пока не имеется, а подрядчик более не будет отвечать за недоделки и их устранение в последующих работах. Поэтому с отпадением самого объекта обеспечения (процесса выполнения работ) необходимо признать и отпадение обеспечительного механизма.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правоотношения истца и ответчика возникли из договоров № 3175714/1096Д от 10.12.2014, № 3175715/0142Д от 23.01.2015, № 3175715/0161Д от 27.01.2015, № 3175715/0162Д от 27.01.2015, № 3175715/0233Д от 09.02.2015, № 3175716/0258Д от 19.02.2016, являющихся по своей правовой природе договором строительного подряда, регламентированы положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Условия спорных договоров подпадают под определение статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно частям 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В статьях 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что основанием для возникновения у заказчика обязательств по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в установленном законом и договором порядке.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Истец просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение (гарантийные удержания) по договору подряда от 10.12.2014 № 3175714/1096Д в размере 560 244 руб. 80 коп., по договору подряда от 23.01.2015 № 3175715/0142Д в размере 933 423 руб. 04 коп., по договору подряда от 27.01.2015 № 3175715/0161Д в размере 57 795 руб. 16 коп., по договору подряда от 27.01.2015 № 3175715/0162Д в размере 47 228 руб. 31 коп., по договору подряда от 09.02.2015 № 3175715/0233Д в размере 2 173 730 руб. 61 коп., по договору подряда от 19.02.2016 № 3175716/0258Д в размере 3 701 511 руб. 73 коп.

В соответствии с п. 6.3 заказчик резервирует 5 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания) – договоры № 3175714/1096Д от 10.12.2014, № 3175715/0142Д от 23.01.2015, № 3175715/0233Д от 09.02.2015, № 3175716/0258Д от 19.02.2016 (в редакции дополнительных соглашений к договорам).

В соответствии с п. 6.3 договоров подряда  № 3175715/0161Д от 27.01.2015, № 3175715/0162Д от 27.01.2015, заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Согласно положениям статьи 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон. 

Из указанного принципа свободы договора следует, что стороны подрядной сделки вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности, отступить от общего правила статьи 711 ГК РФ об оплате работ после окончательной сдачи их результата, установив, что частичная оплата выполненных работ приостанавливается до истечения гарантийного срока. Согласно сложившейся практике предпринимательских отношений в сфере подряда такое условие именуется гарантийным удержанием.

С учетом положений статьи 327.1 ГК РФ исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.

Включение в текст договора соответствующего условия обеспечивает законный интерес кредитора на получение причитающегося ему возмещения в случае выявления факта ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязанностей по договору (например, работ ненадлежащего качества) и может рассматриваться как непоименованный способ обеспечения исполнения обязательств (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Гарантийное удержание в договоре является непоименованным в Гражданском кодексе Российской Федерации способом обеспечения исполнения подрядчиком определенных обязанностей (как денежных, так и неденежных).

Следовательно, стороны договора строительного подряда вправе установить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности, предусмотреть в нем оплату части стоимости выполненных работ по договору строительного подряда после выполнения всех работ подрядчиком и наступления поименованного в договоре обстоятельства (гарантийное удержание), что не противоречит положениям статьи 746 ГК РФ.

Так, в соответствии со статьей 740 ГК РФ денежное обязательство заказчика по оплате является встречным по отношению к обязательству подрядчика по выполнению в натуре работ надлежащего качества (статья 328 ГК РФ). Следовательно, неисправный подрядчик не вправе требовать выплаты полной договорной цены работ, если в гарантийный период выявлены неустраненные за его счет скрытые недостатки переданного объекта. Поэтому уменьшение договорной цены на стоимость устранения недостатков не является зачетом в том смысле, который придается данному понятию в статье 410 ГК РФ.

Принудительный и стимулирующий характер гарантийного удержания проявляется в том, что должник рискует потерять определенную денежную сумму при неисполнении таких обязанностей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 452 ГК РФ, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно пункту 2 статьи 453, пункту 3 статьи 450 ГК РФ при правомерном одностороннем отказе от исполнения договора обязательства сторон прекращаются.

Исходя из данной нормы права, односторонний отказ от договора влечет прекращение обязательств на будущее время (прекращается обязанность подрядчика выполнять работы в будущем). Однако при этом сохраняется его ответственность за качество уже выполненных работ (пункт 2 статьи 755 ГК РФ, абзац второй пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора"). Таким образом, сам по себе отказ заказчика от исполнения договора подряда из-за действий (бездействия) подрядчика не является основанием для досрочной выплаты гарантийного удержания.

При ином подходе подрядчик, допустивший существенные нарушения сроков выполнения работ, послужившие основанием для прекращения договорных отношений по инициативе заказчика, в части сроков оплаты фактически выполненных работ будет поставлен в лучшее положение по сравнению с подрядчиком, выполнившим работы вовремя, что недопустимо.

В рассматриваемом случае в материалы дела представлен отказ ответчика от исполнения договора подряда от 10.12.2014 № 3175714/1095Д в уведомлении от 09.06.2017 № 1-5/17-1039, на основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ, согласно которому заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. В этом случае подрядчик обязан возместить заказчику убытки.

В то же время прекращение договора подряда не должно приводить и к неосновательному обогащению заказчика - к освобождению его от обязанности по оплате выполненных до прекращения договора работ, принятых заказчиком и представляющих для него потребительскую ценность (статья 1102 ГК РФ).

Таким образом, прекращение договора подряда порождает необходимость соотнесения взаимных предоставлений сторон по этому договору и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой (с учетом согласованных сторонами сроков оплаты).

С момента прекращения спорного договора подряда сохраняющее силу условие этого договора о выплате гарантийного удержания начало полностью зависеть от воли одной из сторон (заказчика) - лица, ставшего ответственным за завершение строительства, в том числе посредством привлечения иной подрядной организации.

Если заказчик недобросовестно воспрепятствовал вводу объекта в эксплуатацию, то есть воспрепятствовал наступлению обстоятельства, с которым стороны связали начало течения срока исполнения обязательства по выплате гарантийного удержания, то по требованию другой стороны это обстоятельство могло быть признано наступившим (пункт 1 статьи 6, статья 157 ГК РФ, абзац третий пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении").

Применительно к спорным отношениям ответчик отказался от исполнения договора подряда письмом от 09.06.2017 № 1-5/17-1039, недобросовестность заказчика не установлена, отказ связан с ненадлежащим исполнением обязательств по договора подрядчиком.

Подобное удержание применено сторонами для покрытия возможных расходов заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств в отношении качества строительных работ.

Доказательства расторжения договоров № 3175715/0142Д от 23.01.2015, № 3175715/0161Д от 27.01.2015, № 3175715/0162Д от 27.01.2015, № 3175715/0233Д от 09.02.2015, № 3175716/0258Д от 19.02.2016 в материалы дела не представлены.

По условиям договоров подряда (п.6.3) № 3175714/1096Д от 10.12.2014, № 3175715/0142Д от 23.01.2015, № 3175715/0161Д от 27.01.2015, № 3175715/0162Д от 27.01.2015, № 3175715/0233Д от 09.02.2015, № 3175716/0258Д от 19.02.2016, выплата гарантийного удержания производится ответчиком при условии не только наличия акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11, но и также предоставления гарантии на исполнения обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта.

Между тем, из характера правоотношений, сложившихся между истцом и ответчиком, следует, что обязательства по оплате резервной суммы по договорам № 3175714/1096Д от 10.12.2014, № 3175715/0142Д от 23.01.2015, № 3175715/0233Д от 09.02.2015, № 3175716/0258Д от 19.02.2016 на момент принятия судом решения еще не наступили, поскольку, согласно условиям договора, указанная сумма подлежит выплате при наличии акта приемки законченного строительством объекта форма КС-11 (приложение к договору). Кроме того, выплата зарезервированной суммы производится при условии предоставления гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта (пункт 6.3 договора).

Таким образом, в договорах № 3175714/1096Д от 10.12.2014, № 3175715/0142Д от 23.01.2015, № 3175715/0233Д от 09.02.2015, № 3175716/0258Д от 19.02.2016 выплата гарантийного удержания обусловлена подписанием по окончании работ акта по форме КС-11.

Согласно материалам дела, фактически сторонами подписаны промежуточные акты приемки выполненных работ (КС-3) и справки о стоимости выполненных работ (КС-2), акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) сторонами не подписан, поскольку работы по договору в полном объеме не выполнены. Таким образом, заказчик не смог получить то, на что рассчитывал при заключении договора - оконченные строительством объекты. У заказчика отсутствует потребительская ценность принятых работ у подрядчика в части подписанных актов КС-2. Акт приема-передачи законченного строительством объекта (КС-11) подрядчиком не был представлен.

Кроме того, из материалов дела следует, что ответчик принимал все зависящие от него меры для скорейшего завершения строительства объектов.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса денежное обязательство заказчика по оплате является встречным по отношению к обязательству подрядчика по выполнению в натуре работ надлежащего качества (статья 328 Гражданского кодекса). Следовательно, неисправный подрядчик не вправе требовать выплаты полной договорной цены работ, если в гарантийный период выявлены неустраненные за его счет скрытые недостатки переданного объекта. Поэтому уменьшение договорной цены на стоимость устранения недостатков не является зачетом в том смысле, который придается данному понятию в статье 410 Гражданского кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 453, пункту 3 статьи 450 Гражданского кодекса при правомерном одностороннем отказе от исполнения договора обязательства сторон прекращаются.

Исходя из данной нормы права, односторонний отказ от договора влечет прекращение обязательств на будущее время (прекращается обязанность подрядчика выполнять работы в будущем). Однако при этом сохраняется его ответственность за качество уже выполненных работ (пункт 2 статьи 755 Гражданского кодекса, абзац второй пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора"). Таким образом, сам по себе отказ заказчика от исполнения договора подряда из-за действий (бездействия) подрядчика не является основанием для досрочной выплаты гарантийного удержания.

При ином подходе подрядчик, допустивший существенные нарушения сроков выполнения работ, послужившие основанием для прекращения договорных отношений по инициативе заказчика, в части сроков оплаты фактически выполненных работ будет поставлен в лучшее положение по сравнению с подрядчиком, выполнившим работы вовремя, что недопустимо.

Тем более не может служить основанием для досрочной оплаты всего объема выполненных работ факт возбуждения дела о банкротства подрядчика. Абзацем вторым пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) предусмотрено, что со дня открытия конкурсного производства считается наступившим срок исполнения возникших до этого денежных обязательств должника. Такие последствия на обязательства контрагентов должника-подрядчика не распространяются. Это означает, что при наличии у должника контрагентов-заказчиков, срок исполнения обязательств которых не наступил, несостоятельный подрядчик имеет возможность реализовать дебиторскую задолженность, получив до ликвидации денежный эквивалент за свой актив.

Аналогичная судебная практика содержится в определениях  ВС РФ от 12.03.2018                      № 305-ЭС17-17564,от 14.-3.2018 № 306-ЭС18-534.

На основании изложенного, срок выплаты гарантийных удержаний по договорам подряда № 3175714/1096Д от 10.12.2014, № 3175715/0142Д от 23.01.2015, № 3175715/0233Д от 09.02.2015, № 3175716/0258Д от 19.02.2016 в общем размере 7 368 910 руб. 18 коп. не наступил, в связи с чем основания для удовлетворении иска в указанной части отсутствуют.

Применительно к отношениям, сложившимся между сторонами по договорам подряда № 3175715/0161Д от 27.01.2015, № 3175715/0162Д от 27.01.2015 судом установлено, что работы по строительству объекта завершены, акт приемки законченного строительством объекта подписан 30.06.2016, гарантийный срок эксплуатации, составляющий 24 месяца с даты подписания акта КС-11 (пункт 8.1.4 договоров подряда № 3175715/0161Д от 27.01.2015, № 3175715/0162Д от 27.01.2015), истек 30.06.2018.

Оценив представленные сторонами в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что основания для удержания ответчиком гарантийного удержания по договору подряда от 27.01.2015 № 3175715/0161Д в размере 57 795 руб. 16 коп. и по договору подряда от 27.01.2015 № 3175715/0162Д в размере 47 228 руб. 31 коп. не имеется, в связи с чем, требование истца о взыскании 105 023 руб. 47 коп. неосновательного обогащения являются обоснованными. В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворённых требований.

Исходя из размера исковых требований, учитывая предоставленную истцу отсрочку уплаты государственной пошлины, государственная пошлина в сумме 60 370 руб., исчисленная в соответствии с положениями статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью «Строительная группа Ангара» в доход федерального бюджета, поскольку на момент подачи иска  в арбитражный суд (29.03.2018) срок возврата гарантийного обязательства по договорам подряда № 3175715/0161Д от 27.01.2015, № 3175715/0162Д от 27.01.2015 не наступил, у истца отсутствовали правовые основания для обращения с настоящим иском в суд, оснований для отнесения государственной пошлины на ответчика не имеется.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная группа Ангара» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 105 023 руб. 47 коп. долга.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать  с общества с ограниченной ответственностью «Строительная группа Ангара» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 60 370 руб. государственной пошлины.

 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

О.А. Антропова