Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-45047/2019  «3» февраля 2020 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л. В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета по обеспечению  жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский  Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "АС-Групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ. 

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, представителя по доверенности от 26.12.2019 г.;  от ответчика – ФИО2, представителя по доверенности 09.01.2010 г.;  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АС-Групп» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) безвозмездно в течение пятнадцати дней с момента  

вступления решения суда в законную силу устранить недостатки выполненных работ по  

комплексному благоустройству дворовой территории городского округа - город Волжский  

Волгоградской области по муниципального контракту от 09.07.2018 г. № 999613, а  

именно: 

1. Произвести замену битового дорожного бордюра БР 100.30.15;  

2. Устранить местное выкашивание зернового состава из асфальтобетонного  

покрытия с образованием на поверхности раковин; 

3. Устранить участки со следами от прохода катков, от выглаживающей плиты;  

4. Устранить некачественные «холодные» продольные и поперечные швы  

сопряжения полос (разность уровней или расслоение смеси в шве). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АС-Групп» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  

пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  

течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области. 

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья Л.В. Напалкова