Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

А26-1234/2023

г. Петрозаводск

06 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 06 апреля 2023 года.

 

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Таратунина Р.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Авксентьевой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием от истца: ФИО1 (доверенность от 15.02.2023) – дело по иску (в уточненной в порядке статьи 49 АПК РФ редакции от 29.03.2023) публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» о взыскании с Администрации Нововилговского сельского поселения 68531 руб. 68 коп., в том числе 35833 руб. 56 коп. задолженности и 32698 руб. 12 коп. неустойки, установил:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила).

В соответствии с указанными Правилами технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6).

В пункте 12(1) Правил указаны сведения о заявителе – юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, подавшем заявку в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

07.07.2021 через личный кабинет ответчика на портале ТП.РФ ПАО «Россети Северо-Запад» поступила заявка Администрации Нововилговского сельского поселения на технологическое присоединение (увеличение ранее присоединенной мощности) объекта – уличное освещение по улице Лесная в деревне Вилга по одному источнику электроснабжения максимальной мощностью 15 кВт при напряжении 0,4 кВ по 3 категории надежности.

Пунктом 103 Правил предусмотрено, что договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пункте 12(1) настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя. Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пункте 12(1) настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме. Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пункте 12(1) настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил.

Согласно пункту 105 Правил в отношении заявителя, указанного в пункте 12(1) настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно приложению № 17 и счет на оплату технологического присоединения по договору.

19.07.2021 во исполнение вышеуказанной заявки Администрации Нововилговского сельского поселения оформлен договор № СПБ80-16416П/21, по условиям которого истец обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, а ответчик – оплатить эти услуги.

19.07.2021 в личном кабинете Администрации Нововилговского сельского поселения ПАО «Россети Северо-Запад» разместило указанный договор и технические условия от 19.07.2021 № СПБ80-16416П/21-001 для присоединения к электрическим сетям.

22.07.2021 в личном кабинете Администрации Нововилговского сельского поселения ПАО «Россети Северо-Запад» разместило счет от 19.07.2021 № СПБ80-16416П/21-001 на оплату 30 % платы за технологическое присоединение (15357 руб. 24 коп.), 09.09.2021 – счет № СПБ80-16416П/21-002 на оплату 70 % платы (35833 руб. 56 коп.).

Счет № СПБ80-16416П/21-001 оплачен ответчиком полностью платежным поручением от 22.07.2021 № 271283.

04.03.2022 в личном кабинете Администрации Нововилговского сельского поселения на едином портале ТП.РФ была размещена информация об акте об осуществлении технологического присоединения по договору № СПБ80-16416П/21.

Предъявленный иск обоснован тем, что ответчик не оплатил счет № СПБ80-16416П/21-002.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Подпунктом «г» пункта 16(6) Правил предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем в случае ненадлежащего исполнения им обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

В подпункте «в» пункта 16 Правил указано, что к существенным условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям отнесена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Аналогичное условие указано в пункте 14 типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В пункте 4.3 договора № СПБ80-16416П/21 стороны оговорили, что при нарушении сроков оплаты любого платежа за технологическое присоединение (пункт 3.2 договора) заявитель обязан уплатить сетевой организации неустойку, равную 0,25 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

32698 руб. 12 коп. неустойки начислены истцом на сумму 35833 руб. 56 коп. за период 365 дней (с 29.03.2022 по 28.03.2023) с применением ставки 0,25 %.

В судебном заседании ФИО1 поддержала иск.

В отзыве ответчик иск не признал.

Оценив существо спора, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Пунктом 105 Правил определено, что размещенные в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия признаются офертой, а оплата заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору – акцептом договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий.

Наличие отношений с истцом, возникших в результате подачи заявки от 07.07.2021 об осуществлении технологического присоединения объекта, ответчик в отзыве подтвердил, а также признал получение счетов № СПБ80-16416П/21-001 и № СПБ80-16416П/21-002 и технических условий, и оплату счета № СПБ80-16416П/21-001.

К отзыву приложен договор № СПБ80-16416П/21, подписанный обеими сторонами.

Против факта осуществления ПАО «Россети Северо-Запад» технологического присоединения по заявке от 07.07.2021 Администрация Нововилговского сельского поселения не возразила.

В пунктах 3.1 и 3.2 договора № СПБ80-16416П/21 указано, что размер платы составляет 51190 руб. 80 коп. и подлежит оплате двумя платежами: 30 % в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета на аванс и 70 % в течение 10 дней с момента исполнения договора.

Следует отметить, что окончательный расчет между сторонами по названному договору не противоречит пункту 103 Правил, согласно которому плата за технологическое присоединение должна быть внесена в полном объеме не позднее 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения.

Таким образом, Администрация Нововилговского сельского поселения была обязана оплатить счет № СПБ80-16416П/21-002 в срок до 15.03.2022.

Между тем, доказательств оплаты ответчиком данного счета материалы дела не содержат.

Несогласие Администрации Нововилговского сельского поселения с иском заключается в том, что, во-первых, при выставлении счета № СПБ80-16416П/21-002 договор № СПБ80-16416П/21 представлен не был, во-вторых, полный пакет документов поступил только 03.12.2022.

Однако, для рассмотрения настоящего иска указанные обстоятельства не имеют значения, поскольку они не являются основанием для освобождения ответчика от оплаты оказанных истцом услуг.

Иных доводов против иска не приведено.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Представленный истцом расчет пени (в уточненной редакции) не противоречит условиям договора № СПБ80-16416П/21 и вышеназванным требованиям законодательства.

Исходя из изложенного и отсутствия доказательств уплаты основного долга и пени, суд считает, что иск подлежит удовлетворению, судебные расходы суд относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 и 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Взыскать с Администрации Нововилговского сельского поселения (ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ОГРН 

<

***>) 68531 руб. 68 коп., в том числе 35833 руб. 56 коп. задолженности и 32698 руб. 12 коп. неустойки, а также 2566 руб. расходов по уплате государственной пошлины, и в доход федерального бюджета 175 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>) в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья

Таратунин Р.Б.