АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-16166/2018

14 июня 2019 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения оглашена  06.06.2019.

Полный текст решения изготовлен 14.06.2019.

 

Арбитражный суд Республики Крым  в составе судьи  Гайворонского В.И.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» к обществу с ограниченной ответственностью «Технострой Крым», при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, относительно предмета спора Служба финансового надзора Республики Крым, Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия развития» о взыскании,

Участники процесса не явились,

Обстоятельства дела: Согласно искового заявления, а также уточнения к нему истец просит взыскать излишне полученную сумму в размере 212 061,53 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 35 189,14 руб., штрафа в размере 318 100,75 руб.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору.

Ответчик отзыва на иск не представил.

Рассмотрев материалы дела,  суд, -

УСТАНОВИЛ:

Крымфиннадзором, на основании обращения, поступившего из Комитета по противодействию коррупции Республики Крым 05.06.2018, в соответствии с удостоверениями установленного образца была проведена внеплановая проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, указанных в обращении в пределах компетенции, в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» (далее - ГБУЗ РК «КРКЦФиП») за период с 01.01.2015 по 31.05.2018.

Проверка целевого и эффективного использования средств, поступивших на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, стоящих на балансе ГБУЗ РК «КРКЦФиП» проведена выборочным способом - по отдельным контрактам, а внутри контрактов по отдельным видам работ (кроме труднодоступных и скрытых работ).

Так, 30.09.2016 между ГБУЗ РК «КРКЦФиП», «Заказчиком», в лице директора ФИО2 и ООО «Технострой Крым», «Подрядчиком», в лице директора ФИО3 заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Капитальный ремонт фасада и отмостки лечебного корпуса лит.А ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» ОСП «Противотуберкулезный диспансер» по адресу: 

<

...>» (далее - Государственный контракт).

Подпунктом 1.1 пункта 1 Государственного контракта определено, что ООО «Технострой Крым», как подрядчик, принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Капитальный ремонт фасада и отмостки лечебного корпуса лит.А ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» ОСП «Противотуберкулезный диспансер» по адресу: 

<

...>», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (Приложение №1 к Контракту), по цене в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение №2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Подпунктом 2.1 пунктом 2 определена цена 2.1. Государственного контракта установленная на основании результатов конкурса в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение №2 к Контракту) которая составляет 6 362 014,93 руб., в том числе НДС 18% - 970 476,85 рублей.

Пунктом 2.2 Государственного контракта определено, что общая стоимость контракта на период его действия является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных самим контрактом и законодательством Российской Федерации.

Пунктом 2.4 Государственного контракта предусмотрено, что расчет с ООО «Технострой Крым» за выполненные непредвиденные работы производится на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости. На основании документов подтверждающих их фактическую стоимость, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная с обоснованием транспортных расходов). Стоимость материалов не должна превышать цен, предусмотренных в согласованной локальной смете на непредвиденные работы. Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости строительства предусмотренной для этих целей (Приложение №2 к Контракту).

Пунктом 3.4 Государственного контракта предусмотрен расчет за выполненные и принятые ГБУЗ РК «КРКЦФиП» работы, который осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Технострой Крым», указанный в контракте, в течение 60 (шестидесяти) дней после предоставления ООО «Технострой Крым» необходимого исчерпывающего перечня документов. На основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

В обязанности подрядчика (п.5.4.2 Контракта), среди прочего, входило выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, утверждённой проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами. Также подрядчик обязан (п.5.4.21 Контракта) обеспечить качество выполненных работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами СНиПами, ГОСТами и другими нормативными, документами по качеству строительства

Пунктом 7.7 Государственного контракта предусмотрено, что результаты работы должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья. И иным требованиям безопасности, сертификации. Лицензирования, предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации.

Кроме того, подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объёме, предусмотренном проектно-сметной документацией (п. 11.1 Контракта). И в соответствии с п. 11.2 Контракта, на выполненные подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок на 5 лет. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, некачественные работы, подрядчик обязан устранить их за свой счёт (п.11.4 Контракта).

Сроки выполнения работ: - начало работ с момента подписания контракта; - окончание работ — 20 декабря 2016 года.

При проведении проверки были представлены акты выполненных работ формы              №КС-2, подписанные со стороны ГБУЗ РК «КРКЦФиП», как заказчиком, директором ФИО4, так и со стороны подрядчика ООО «Технострой Крым», как подрядчиком, директором ФИО3, на общую сумму 6 362 014,93 рублей, а именно:

акт №1-1 от 12.10.2016 на сумму 1638366,59 рублей; акт №2 от 17.11.2016 на сумму 523191,72 рублей; акт №3 от 08.12.2016 на сумму 1233487,21 рублей; акт №4 от 15.12.2016 на сумму 221183 8,52 рублей; акт №5 от 15.12.2016 на сумму 755130,89 рублей.

Оплата по данному Государственному контракту произведена ГБУЗ РК «КРКЦФиП» в полном объеме. Дебиторская и кредиторская задолженности по бухгалтерскому учету ГБУЗ РК «КРКЦФиП» отсутствуют.

Для подтверждения правильности подсчета объемов выполненных работ, при участии представителей ГБУЗ РК «КРКЦФиП» (как заказчика), в лице заместителя директора по техническим вопросам ФИО5 и инженера по ремонту ФИО6 в присутствии консультанта Крымфиннадзора проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ. Представитель ООО «Технострой Крым» (как подрядчик) на проведение контрольных обмеров не явился.

Контрольными обмерами по объекту «Капитальный ремонт Фасада и отмостки лечебного корпуса Лит. А ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» ОСП «Противотуберкулезный диспансер» по адресу: 

<

...>» установлено, что на момент проверки отдельные комплексы работ, а именно, работы по установке прожекторов в количестве 7 единиц, установке ламп накаливания в количестве 2 единиц и 2-х выключателей, включенные в акты Формы №КС-2, Фактически подрядчиком не выполнены, а некоторые виды работ, такие как, работы по отделке цоколя и работы по устройству отмостки и обшивки каркасных стен плитами OSB включены в Формы №КС-2 с завышенными объемами, что отражено в акте контрольного обмера.

В следствии завышения объема работ незаконно оплачена стоимость капитального ремонта на сумму 212 061,53 руб.

С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, Республики Крым и иных нормативных правовых актов, Службой в адрес ГБУЗ РК «КРКЦФиП» было направлено Предписание от 24.08.2018 № 07.2-14/5121 в соответствии с которым, ГБУЗ РК «КРКЦФиП» необходимо провести претензионно-исковую работу по возмещению средств в сумме 212 061,53 руб. с ООО «Технострой Крым».

Изложенные обстоятельства ответчиком не оспаривается.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

Так, ч. 4 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 13 Информационного письма от 24.01.2000 № 51 разъяснил, что Заказчик не лишен права представить суду свои возражения по качеству работ, принятых им по двустороннему акту.

Наличие акта приемки работ, подписанного Заказчиком, не препятствует ему заявить в суде возражения по качеству, объему и стоимости работ, одновременно представив доказательства обоснованности этих возражений (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011N13765/10 по делу № А63-17407/2009).

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

Оплата выполненных работ подтверждается платежными поручениями №№ 756484 от 05.04.2017, 642242 от 28.10.2016, 132564 от 19.12.2016, 756483 от 05.04.2017, 885319 от 30.11.2016, 799909 от 12.04.2017.

Проценты за пользование чужими денежными средствами предусмотрены ст. 395 ГК РФ.

Согласно п. 12.3.3. Контракта штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Согласно  постановлению Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11 оспаривая расчет стороны, другая сторона должна дать собственный контррасчет с обоснованием иного подхода.

Непредставление такого расчета расценивается как недобросовестность, в связи с чем нет оснований считать предоставленный истцом расчет неправильным. (Постановление Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от 24.04.2018 по делу № А83-5275/2017).

Ответчиком контррасчета взыскиваемых сумм не представлено.

Таким образом, ответчиком проявлена недобросовестность, и, соответственно, его возражения в части расчета суммы иска в дальнейшем, с учетом вышеприведенного постановления Президиума, во внимание приниматься не должны.

Таким образом, исковые требования законны и подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, недоплаченная госпошлина подлежит взысканию с ответчика в бюджет.

На основании изложенного, руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования  удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технострой Крым» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в сумме 212 061,53 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 35 189,14 руб., штраф в сумме 318 100,75 руб.,  расходы  с оплатой государственной пошлины в сумме 14 233,00  руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технострой Крым» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход Федерального бюджета госпошлину 74,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                                 В.И. Гайворонский