Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-27194/2018

25 мая 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.,

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

Истец: общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БУЛАТ" (адрес: Россия 191025, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/407, ОГРН: 

<

***>); 

Ответчик: общество с ограниченной ответственностью "НЕВАФУД" (адрес: Россия 195067, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...> ЛИТЕРА А/4Н, ОГРН: 

<

***>); 

о взыскании 298 998 руб. 92 коп.

установил:

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БУЛАТ" обратилась с иском к ООО "НЕВАФУД" о взыскании 298 998 руб. 92 коп. неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ на основании договора №5 от 09.11.17.

Ответчик заявил ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ и уменьшении неустойки до 53 328 руб. 30 коп.

Истец возражает против уменьшения неустойки.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании ст.ст. 226-229 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор подряда №5 от 09.11.17 на выполнение ремонтно-строительных работ.

В соответствии с условиями заключенного договора истец обязался выполнить ремонтно-строительные работы в помещении магазина «Щедрый», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, дом 20, а ответчик обязался принять, и оплатить выполненные работы.

Пунктом 1.3 договора предусмотрен срок окончания работ не позднее .08.12.17.

В соответствии с п. 2.1 договора стоимость работ определена в размере 2 989 989 руб. 20 коп.

Порядок оплаты выполненных работ установлен разделом 3 договора, а именно:

Пунктом 3.2.1. предусмотрено внесение предоплаты перед началом работ в размере 50% от суммы договора, что в денежном выражении составило 1 494 994 60 рублей.

Окончательный расчет, в соответствии с п.3.2.2. договора, производится на основании форм КС-2, КС-3, подписанных сторонами, в течение 5 рабочих дней

Ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ предусмотрена п. 5.1.1 договора и составляет 0,5 % от не перечисленной суммы, но не более 10% от стоимости строительных работ.

Истцом были своевременно исполнены обязательства по договору, КС-2 и КС -3 подписаны сторонами без замечаний 19.12.17 года.

Счет на оплату оставшейся суммы был выставлен Ответчику 19 декабря 2917 года

Таким образом, с учетом предоставленных на оплату пяти рабочих дней, срок исполнения ответчиком обязательств по оплате истек 26.12.17 года

Истец на протяжении 35 дней неоднократно просил Ответчика произвести оплату, но так как Ответчик игнорировал просьбы Истца, 31 января 2018 года Истец был вынужден направить ответчику официальную претензию.

06.02.18 ответчиком была произведена оплата оставшейся суммы договора в размере 1 494 994 руб. 60 коп. платежным поручением №2265 от 06.02.18.

В соответствии с п.5.1.1 договора ответчику начислена неустойка в размере 0.5% не перечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости строительных работ.

За период с 27.12.17 по 06.02.18 неустойка от суммы 1 494 994 руб. 60 коп. составляет 313 948 руб. 67 коп. С учетом 10% ограничения истец просит взыскать 298 998 руб. 92 коп., что составляет 10% от суммы договора.

Таким образом, размер неустойки уже уменьшен истом согласно условиям договора. Подлежащая взысканию сумма неустойки составляет пятую часть от несвоевременно оплаченной суммы основного долга, поэтому ее размер не является чрезмерным и явно несоразмерным последствиям нарушения обязательства.

Учитывая изложенное, суд не усматривает оснований для уменьшения неустойки по ходатайству ответчика на основании ст. 333 ГК РФ.

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НЕВАФУД" в пользу общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БУЛАТ" 298 998 руб. 92 коп. неустойки по договору №5 от 09.11.2017 года. и 8980 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.