РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-42230/24-80-315

г. Москва

04 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 08 апреля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 04 июня 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кочарской Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

истец ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (129090, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 

<

***>)

ответчик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" (129327, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.12.2013, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 1 784 422 руб. 57 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: ФИО1 по доверенности № 45-24 от 28.03.2024 г. 

 

УСТАНОВИЛ:

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" о взыскании неустойки по договору № ПЗЛ-000262-19 от 05.09.2019 в размере 510 721 руб. 69 коп., неустойки по договору № ПЗЛ-000231-19 от 05.09.2019 в размере 1 273 700 руб. 88 коп.

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явился. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между организацией "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ" (заказчик) и организацией "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"" (генподрядчик) был заключен договор от 05.09.2019 г. № ПЗЛ-000231-19 на выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтов и по замене лифтов в многоквартирных домах города Москвы ЗАО, ЦАО г. Москвы по адресу (-ам): пер. ФИО2, д. 10, пр-кт. Мичуринский, д. 25, корп. 1, пр-кт. Мичуринский, д. 25, корп. 3 (далее - Договор), согласно которому заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее -Работы), по адресу (-ам): пер. ФИО2, д. 10, пр-кт. Мичуринский, д. 25, корп. 1, пр-кт. Мичуринский, д. 25, корп. 3, включая выполнение строительных - монтажных работ на объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу объекта(-ов) по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, после приемки законченных работ на объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ.

Между организацией "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ" (заказчик) и организацией "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"" (генподрядчик) был заключен договор от 05.09.2019 № ПЗЛ-000262-19 на выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтов и по замене лифтов в многоквартирных домах города Москвы НАО г. Москвы по адресу (-ам): г. Московский, мкр. 1-й, д. 43, корп. 2, согласно которому заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по адресу (-ам): г. Московский, мкр. 1-й, д. 43, корп. 2, включая выполнение строительных - монтажных работ на объекте (-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу объекта(-ов) по акту приемки выполненных работ по объекту, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные генподрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, после приемки законченных работ на объекте (-ах) комиссией по приемке выполненных работ.

В нарушение принятых на себя обязательств, генподрядчик допустил просрочку при выполнении своих обязательств, в части нарушения сроков начала выполнения работ по замене лифтов.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу п. 12.4 договоров за невыполнение или ненадлежащее исполнение генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ в соответствии с календарным планом (приложение № 1 к настоящему договору), адресным перечнем (приложение № 2 к настоящему договору) и графиком продолжительности выполнения работ по замене лифтов (приложение № 3 к настоящему договору), генподрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере;

Пунктами 12.4.3 договоров предусмотрена ответственность генподрядчика за нарушение сроков выполнения работ в виде неустойки в размере 0,1 % от стоимости работ по объекту за каждый день просрочки в случае задержки срока начала выполнения работ по замене лифтов в и/или завершения работ (этапа работ) по договору, предусмотренного адресным перечнем и графиком продолжительности выполнения работ по замене лифтов (приложение № 2 и приложение № 3 к настоящему договору).

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма неустойки за просрочку выполнения работ по договорам составила 1 784 422 руб. 57 коп.

Ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности.

Суд, рассмотрев заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, полагает, что срок исковой давности истцом пропущен.

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Истец требует от ответчика оплаты неустойки за нарушение сроков начала работ по замене лифтового оборудования.

Работы по адресам, указанным в исковом заявлении, были начаты в нижеуказанные даты:

Адрес Объекта

Наименование элемента

Дата начала производства работ

Мичуринский проспект, 25 к. 1

Подъезд 1в, per. № 130758

13.01.2021

Мичуринский проспект, 25 к. 1

Подъезд 2в, per. № 130760

13.01.2021

Мичуринский проспект, 25 к. 1

Подъезд 3а, per. № 130762

13.01.2021

Мичуринский проспект, 25 к. 1

Подъезд 4а, per. № 130764

13.01.2021

Мичуринский проспект, 25 к. 3

Подъезд la, per. № 131416

13.01.2021

Мичуринский проспект, 25 к. 3

Подъезд 2а, per. № 131418

13.01.2021

Мичуринский проспект, 25 к. 3

Подъезд 3а, per. № 131420

13.01.2021

Мичуринский проспект, 25 к. 3

Подъезд 4а, per. № 131422

13.01.2021

Мичуринский проспект, 25 к. 3

Подъезд 5а, per. № 131424

13.01.2021

ФИО2 пер., 10

Подъезд 1, per. № 36153

-

Микрорайон 1 (Московский), 43 к. 2

Подъезд 2, per. № 100871

14.01.2021

Микрорайон 1 (Московский), 43 к. 2

Подъезд 1, per. № 100873

14.01.2021

Выполнение обязательств генподрядчиком в указанные сроки подтверждается подписанными актами о приемке выполненных работ.

Таким образом, срок исковой давности истек в 13-14.01.2024 г.

Исковое заявление было подано только 29.02.2024 г. за пределами срока исковой давности.

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Довод ответчика о пропуске срока исковой давности истец надлежащими доказательствами не опроверг.

В соответствии со статьями 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 195, 196, 200, 307, 309, 310, 330 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                                   Пронин А.П.