АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-19042/2018

24 декабря 2018 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П., при ведении  протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев материалы дела по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Консоль-Строй  ЛТД" (ОГРН 

<

***>)  

к ГБЦ РК «Белогорский психоневрологический интернат» (ОГРН 

<

***>) об изменении условий контракта, 

при участии:  

от истца – ФИО2 представитель по доверенности № 1072 от 19.12.2018 г., ФИО3 представитель по доверенности № 1071 от 19.12.2018 г., ФИО4 директор,  согласно приказу от 12.02.2018 г. № 24  

от ответчика – ФИО5 представитель по доверенности № 69 от 17.12.2018 г.,  ФИО6 представитель по доверенности № 67 от 17.12.2018 г., ФИО7  представитель по доверенности № 68 от 17.12.2018 г.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд    

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания Консоль-Строй ЛТД") к ГБЦ РК «Белогорский психоневрологический  интернат» об изменении условий контракта удовлетворить.  

Изменить пункт 4.1 Государственного Контракта от 24.10.2017 г. на выполнение  работ по объекту: «Капитальное строительство ГБУ РК «Белогорский  психоневрологический интернат» на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры,  необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством  Российской Федерации, по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г.  Белогорск» изложив в следующей редакции:  

«4.1. Сроки выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения Контракта; - окончание выполнения работ: 30 мая 2019 года. 

Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить  основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за  исключением случаев, оговоренных в статье 13 настоящего Контракта».  

Взыскать с ГБЦ РК «Белогорский психоневрологический интернат» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Консоль-Строй  ЛТД" расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 6000,00 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение  двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть  получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья М.П. Гаврилюк