Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-34004/23

05 октября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2023 года  Мотивированное решение изготовлено 05 октября 2023 года  

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Арешкиной И.Д.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леоновым С.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой-групп» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 984 722, 84 руб., при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ:

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (далее – ФГБУ  «Центральное жилищно-коммунальное управление», истец) обратилось в Арбитражный суд  Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «Инвестстрой-групп» (далее – ООО «ИНВЕСТСТРОЙ-ГРУПП», ответчик) о взыскании  855 165,30 руб. неотработанного аванса по контракту от 12.11.2020   № 0373400005320000128-0373400005320000128-1002-291, 129 557,54 руб. неустойки в виде  пеней и штрафов.  

Исковые требования мотивированны неисполнением ответчиком своих обязательств  по договору подряда в установленные сроки.  

В судебном заседании представитель истца требования искового заявления  поддержал в полном объеме, а представитель ответчика против удовлетворения иска  возражал, полагая доводы истца необоснованными.  

Рассмотрев материалы искового заявления ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах  дела доказательств, выслушав представителей сторон, суд полагает, что исковые  требования подлежат частичному удовлетворению в связи со следующим.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации  арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.  

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих  нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном  названным Кодексом.  

Пунктом 1 статьи 763 ГК РФ определено, что подрядные строительные работы  (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для  удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе  государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд.  

В соответствии с пунктом 2 указанной статьи по государственному или  муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или  муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик  обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и  ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать  их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату.  

Согласно пункту 1 статьи 766 ГК РФ государственный или муниципальный контракт  должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы,  сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах  обеспечения исполнения обязательств сторон.  

В силу статьи 768 ГК РФ к отношениям по государственным или муниципальным  контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных  нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для  государственных или муниципальных нужд.  

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.10.2011 № 9382/11, в регулировании  подрядных работ для государственных и муниципальных нужд приоритетное значение  остается за нормами Кодекса: в части, не урегулированной статьями 763 - 767 ГК РФ,  должны применяться в зависимости от вида подрядных работ положения параграфа 3 или 4  главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а затем - общие положения о  договоре подряда (параграф 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Как следует из материалов дела, 12.11.2020 по результатам проведенного закрытого  аукциона, объявленного извещением от 22.10.2020 № 0373400005320000128, на основании  протокола рассмотрения единственной заявки на участие в закрытом аукционе от  30.10.2020 № 0373400005320000128, между ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное  управление» Минобороны России (заказчик) и ООО «ИНВЕСТСТРОЙ-ГРУПП»  (подрядчик) заключен контракт от 12.11.2020 № 03734000053200001280373400005320000128-1002-291 (далее – контракт) на выполнение работ по капитальному  ремонту котельной инв. № 15 и ТС, расположенной по адресу 

<

...> военный городок № 12.  

Цена Контракта составляет 2 850 551 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч  пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, в т.ч. НДС по ставке 20 % - 475 091 (четыреста  семьдесят пять тысяч девяносто один) рубль 83 копейки (п. 3.1 контракта).  

Оплата фактически выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком  ежемесячно в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком Актов о  приемке выполненных работ по форме № КС-2, при условии предоставления Подрядчиком  Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания № КС-2, оформленных  должным образом документов:  

- Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2; - Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; - счета; 

- счета-фактуры; 

- Акта приема-передачи исполнительной документации с приложением реестра  на выполненный объем работ, указанный в КС-2 (п. 4.3 контракта).  

Заказчик производит авансирование Подрядчика в размере 855 165 (восемьсот  пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 30 копеек, что составляет 30% от цены  Контракта, установленной в пункте 3.1. Контракта, в течении 30 (тридцати) дней с даты  заключения Контракта (п. 4.9 контракта).  

Согласно п. 5.2. Контракта и дополнительному соглашению от 29.12.2020 ремонтные  работы должны быть завершены Ответчиком в течение 180 дней со дня подписания Акта  приема-передачи Объекта в производство работ по капитальному ремонту, то есть до  18.05.2021.  

Как указал истец, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» в счет  оплаты аванса за выполнение работы в будущем перечислило ООО «ИНВЕСТСТРОЙ- ГРУПП» денежные средства по контракту на общую сумму 855 165,30 руб., что  подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 849213 от  02.12.2020, что не оспаривается ответчиком по существу.  

Вместе с тем, как указал истец, в ходе проведения работ Подрядчиком неоднократно  нарушался график поставки материалов и оборудования, график производства работ по  капитальному ремонту. По состоянию на 18.02.2022 работы по капитальному ремонту  оговоренного Объекта Ответчиком должным образом не проведены, отчет о проделанной  работе в адрес Учреждения не представлен. Исполнительная документация на  выполненный объем работ также не предоставлена.  

Письмом от 09.12.2022 истец уведомил ответчика о расторжении контракта в  одностороннем порядке, в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств и  потребовал возвратить перечисленный по контракту аванс.  

Ответчик денежные средства не вернул, что послужило для истца основанием  обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением.  

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации,  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.  

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что  в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По  согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки  завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено  законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет  ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков  выполнения работы.  

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной  работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную  цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1  статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено  положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Пунктом 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено,  что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами  или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья  

310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой  стороны об отказе от договора (исполнения договора).  

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не  предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или  договором.  

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или  частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным  (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).  

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при  расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения  договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не  было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным  обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики  рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).  

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,  которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований  приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего),  обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное  имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных  статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,  обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные  обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из  представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений  (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации).  

Возражая против удовлетворения исковых требований, Ответчиком в материалы  дела представлены документы, свидетельствующие о выполнении работ на сумму  перечисленного аванса, а именно: акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от  06.09.2021 № 1, от 01.10.2021 № 2, справки по форме КС-3 от 06.09.2021 № 1, от 01.10.2021   № 2, на общую сумму 855 166,80 руб., а также Акт контрольного обмера объемов  выполненных работ от 07.09.2021 г.  

В рамках выполнения работ по Контракту Стороны подписали следующую  проектную документацию:  

- Реестр исполнительной документации от 06.09.2021; - Акт № 1 на дополнительные работы от 22.03.2021; - Решение об изменении материалов, видов и состава работ; 

- Протокол технического совещания по исполнению контракта от 17.03.2021;  

- Ведомость объемов работ № 2 к Акту № 1 на дополнительные работы от  22.03.2021;  

- Локально-сметный расчет (смета) № 02-01-01. 

Таким образом, подписанные без замечаний Акты о приемке выполненных работ  (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) подтверждают  исполнение Ответчиком своих обязательств по Контракту надлежащим образом и в полном  объеме на сумму 855 166, 80 руб.  

Указанные акты не оспорены истцом, о фальсификации представленных ответчиком  в материалы дела доказательств не заявлено.  

О назначении по делу судебной строительно-технической экспертизы с целью  установления объема и качества фактически выполненных работ, истцом не заявлено.  

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном  настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на  основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,  обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные  обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.  

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства,  объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.  

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к  рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации).  

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены  определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными  доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации).  

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая  представление ответчиком в материалы дела доказательств выполнения работ на сумму  перечисленного аванса, требования истца о взыскании 855 165,30 руб. неотработанного  аванса по контракту от 12.11.2020 № 0373400005320000128-0373400005320000128-1002-291  удовлетворению не подлежат.  

В соответствии со статьёй 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

В соответствии с п.17.2 Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату  неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения  Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в  размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически  исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской  Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

В связи с просрочкой выполнения ответчиком работ по договору, истец заявил  требования о взыскании 44 041,01 руб. неустойки, начисленной за период с 18.05.2021 по  10.12.2021.  

Кроме того, в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого  в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042, за каждый факт неисполнения  или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по контракту составляет 10 % от  суммы этапа контракта.  

В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту,  истцом начислен штраф в размере 85 516,53 руб. (10% от суммы этапа контракта).  

В связи с отказом в удовлетворении основного требования истца, требование о  взыскании штрафа в размере 85 516,53 руб. также не подлежит удовлетворению, поскольку  носит производный (акцессорный) характер.  

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию пени, а также период её  начисления и размер, проверен судом.  

Судом установлено, что указанный расчет составлен без учета представленных в  материалы дела доказательств выполнения работ на сумму перечисленного аванса, в связи с  чем не может быть принят в первоначальном виде.  

Ответчиком в материалы дела представлен контррасчет неустойки, в соответствии с  которым сумма неустойки, начисленной за нарушение сроков выполнения работ, составила  19 667,87 руб., начисленных за период с 18.05.2021 по 01.10.2021.  

Представленный ответчиком контррасчет подлежащей взысканию неустойки, а  также период её начисления, проверен судом, является правильным и не оспорен по  существу истцом.  

В рамках рассмотрения дела представитель ответчика заявил ходатайство об  уменьшении подлежащей взысканию неустойки согласно положениям статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации, считая заявленный истцом размер неустойки  чрезмерным, несоразмерным последствиям нарушения им своих обязательств по договору  подряда.  

Статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,  суд вправе уменьшить неустойку.  

Согласно пункту 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 17 «Обзор практики применения  арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»  основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения  обязательств.  

Согласно пункту 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств» при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного  поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не  должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования  (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).  

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности,  данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных  средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым  физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а  также о показателях инфляции за соответствующий период.  

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму  неустойки.  

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем  интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333  Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом  ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки  последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков  кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно  ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе  представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения  

обязательства. Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в  опровержение заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства,  свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства  для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при  сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку  (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды  товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и т.д.). Доводы ответчика  о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения;  о неисполнении обязательств контрагентами; о наличии задолженности перед другими  кредиторами; о наложении ареста на денежные средства или иное имущество ответчика; о  непоступлении денежных средств из бюджета; о добровольном погашении долга полностью  или в части на день рассмотрения спора; о выполнении ответчиком социально значимых  функций; о наличии у должника обязанности по уплате процентов за пользование  денежными средствами (например, процентов по договору займа) сами по себе не могут  служить основанием для снижения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.  

При этом суд обращает внимание, что в Определении Конституционного Суда  Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О указано на то, что гражданское  законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения  обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или  ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях  устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. В  соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации именно  законодатель устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод  гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц. Это касается и свободы  договора при определении на основе федерального закона таких его условий, как размеры  неустойки - они должны быть соразмерны указанным в этой конституционной норме целям.  

Также названным Судом разъяснено, что предоставленная суду возможность  снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями  нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе,  которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера  неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции  Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и  гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части  первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда,  а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю  мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба,  причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Принимая во внимание компенсационную природу неустойки как меры  ответственности за нарушение гражданско-правового обязательства и заявление ответчика в  судебном заседании о несоразмерности неустойки, суд приходит к выводу о возможности  применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и  уменьшения размера подлежащей взысканию с ответчика неустойки в связи с ее явной  несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, учитывая также размер  взыскиваемой неустойки в денежном выражении, сопоставляя её с ценой договора, и  учитывая отсутствие каких-либо доказательств, представленных истцом о размерах его  убытков в связи с несвоевременным исполнением ответчиком своих обязательств.  

С учётом изложенных обстоятельств, положений статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации, суд полагает необходимым снизить размер подлежащей взысканию  неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору до 19 667,87 руб.,  начисленных за период с 18.05.2021 по 01.10.2021 (в соответствии с контррасчетом  ответчика).  

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, отсутствие в материалах дела  доказательств выполнения ответчиком своих обязательств по спорному контракту в  установленный соглашением сторон срок, при наличии документально подтвержденных  требований истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в  указанном объеме.  

В силу положений части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в  пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Согласно разъяснениями, содержащимся в пункте 16 Постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 46 от 11.07.2014 «О применении  законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах»  в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была  уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки  по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в  арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет  государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если  суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой  стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи  110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой-групп» в  пользу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны Российской Федерации 19 667,87 руб.  неустойки.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой-групп» в  доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья И.Д. Арешкина