/

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

 

улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Ф03-5529/2017

02 февраля 2018 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 02 февраля 2018 года.

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:

Председательствующего судьи: Камалиевой Г.А.

Судей: Мельниковой Н.Ю., Тарасова И.А.

при участии:

от ООО «ТЭК»: представитель не явился

от ООО «Вертикаль»: Бондаренко А.В., представитель по доверенности                   от 08.06.2017 № 53

рассмотрев в проведенном с использованием систем видеоконференц-связи судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Территориальная энергосетевая компания»

на решение от 05.09.2017, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2017

по делу №  А51-10891/2017 Арбитражного суда Приморского края

дело рассматривали: в суде первой инстанции – судья Падин Э.Э.;                              в суде апелляционной инстанции - судьи Номоконова Е.Н., Ротко Л.Ю.,                             И.С. Чижиков

по иску общества с ограниченной ответственностью «Территориальная энергосетевая компания» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль»                           

о взыскании основного долга, неустойки и законных процентов

Общество с ограниченной ответственностью «Территориальная энергосетевая компания» (далее – ООО «ТЭСК», истец; ОГРН 1132508001097, ИНН 2508113752, место нахождения: 690003, Приморский край, город Владивосток, ул. Бестужева, д. 21а, пом. 6, 8 оф.205) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (далее – ООО «Вертикаль», ответчик; ОГРН 1132508004133, ИНН 2508116390, место нахождения: 692906, Приморский край, г. Находка, 2-я ул. Промышленная, д. 1) о взыскании 3 255 211 руб. 96 коп. основного долга, 2 531 577 руб. 12 коп. неустойки за период с 18.06.2016 по 19.04.2017, 270 996 руб. 40 коп. процентов по статье 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации за период с 19.06.2016 по 31.07.2017                         (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда от 05.09.2017, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2017,                в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Законность вынесенных по делу решения и постановления проверяется в порядке статьи 274 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ООО «ТЭСК», в обоснование которой общество указало на необоснованность выводов судов об отказе в удовлетворении иска. Указывает на то, что договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в одностороннем порядке расторгнуть невозможно, исков о расторжении договора ответчик не заявлял, следовательно, он является заключенным. Кроме того, считает противоречащим материалам дела вывод судов об отсутствии заинтересованности у ООО «Вертикаль» в исполнении договора. В этой связи податель кассационной жалобы просит обжалуемые по делу решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение.

В отзыве на кассационную жалобу ООО «Вертикаль» просит отказать в ее удовлетворении.

В судебном заседании кассационной инстанции, проведенном с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Приморского края, представитель ООО «Вертикаль» привел свои правовые позиции, дав по ним  соответствующие пояснения.

ООО «ТЭСК», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда в сети Интернет, своих представителей для участия в судебном заседании суда кассационной инстанции не направило.

 

Проверив законность обжалуемых судебных актов, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, Арбитражный суд Дальневосточного округа не усматривает оснований для их отмены.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 03.06.2016 между ООО «ТЭСК» (сетевая организация) и ООО «Вертикаль» (заявитель) заключён договор № 05-21-158/16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (многоэтажные жилые дома 4 и более этажей), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 350 кВт (в т.ч. 1-й этап 50 кВт, 2-ой этап 350 кВт);

- категория надежности: 1-й этап III категория; 2-ой этап II категория;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 380 В;

- год ввода объекта в эксплуатацию: 1-й этап - июнь 2016, 2-й этап - май 2017.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажных жилых домов 4 и более этажей, расположенных в г. Находка, ул. Сидоренко, д. 10 в 20 м на север (пункт 2 договора).

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 28.10.2015 № 45/20 и составляет 5 425 353 руб. 27 коп., в том числе НДС 18 % (пункт 10 договора).

Порядок внесения платы за технологическое присоединение согласован сторонами в пункте 11 договора:

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

ООО «ТЭСК» обратилось к ООО «Вертикаль» с претензией                              от 21.03.2017 (полученной адресатом по почте 23.03.2017), в которой просило внести плату за технологическое присоединение в сумме 3 255 211 руб. 96 коп. и оплатить проценты за период пользования денежными средствами согласно статье 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации в течение 10 дней с момента ее получения.

ООО «Вертикаль» в ответном письме от 24.03.2017 № 31  просило                  ООО «ТЭСК» назначить рабочую встречу для урегулирования спорной ситуации, отраженной в указанной выше претензии.

Оставление претензии без удовлетворения и неоплата задолженности явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

По правилам статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики определяются Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике).

Согласно пункту 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, а потребитель обязан помимо всего прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике).

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004                № 861 (далее – Правила № 861).

Пунктом 7 Правил № 861 предусмотрено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

При рассмотрении спора, суды первой и апелляционной инстанций оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, со ссылкой на статью 328 Гражданского кодекса Российской Федерации сделали вывод о том, что взыскание в принудительном порядке с должника предварительной оплаты (аванса) по спорному договору действующим законодательством не предусмотрено. Названный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.11.2010                         № 9217/10.

Кроме того, судами установлено, что технологическое подключение фактически не состоялось, в связи с чем на основании пункта 4 статьи 23.1, статьи 23.2 Закона об электроэнергетики, подпункта «ж» пункта 18, пункта 19 Правил № 861 пришли к верному выводу об отсутствии оснований для взыскания предварительной оплаты с ответчика до достижения предусмотренного договором результата, и как следствие этому  констатировали отсутствие оснований для взыскания с ответчика суммы неустойки и законных процентов.

Изложенные в кассационной жалобе доводы заявителя жалобы о фактических обстоятельствах рассматриваемого дела, о допущенных судами нарушениях норм материального и процессуального права, об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных истцом требований и доказательственной базе были подробно рассмотрены судами первой и апелляционной инстанций, и им дана надлежащая правовая оценка.

Нарушений норм материального либо процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции также не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

 

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 05.09.2017, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2017 по делу № А51-10891/2017 Арбитражного суда Приморского края оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья                                       Г.А. Камалиева

 

Судьи                                                                                Н.Ю. Мельникова

И.А. Тарасов