АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А10-1369/2018

24 декабря 2018 года

г. Улан-Удэ

Резолютивная часть решения объявлена 17 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2018 года.

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 670023, ул. Автотранспортная, д. 26А, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) в лице конкурсного управляющего ФИО2 к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 660021, ул. Бограда, д. 144А, г. Красноярск, Красноярский край) о взыскании 2 911 265 руб. 45 коп. – задолженности по соглашению №41.0300.1785.16 о переустройстве объектов при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц от 18.05.2016,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора: ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», 

при участии в заседании:

от истца: ФИО3, представитель по доверенности №3/2018 от 25.06.2018,

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности №241 от 02.07.2018, 

от третьего лица: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная строительная компания» в лице конкурсного управляющего ФИО2 обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о взыскании 2 911 265 руб. 45 коп. – задолженности по соглашению №41.0300.1785.16 о переустройстве объектов при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц от 18.05.2016.

В обоснование исковых требований истец указал, что в ходе проведения процедуры конкурсного производства истца установлена задолженность ответчика по соглашению №41.0300.1785.16 о переустройстве объектов при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц от 15.05.2016 в размере 2 911 265 руб. 45 коп.

Истец указал, что согласно соглашению на счет ответчика перечислены денежные средства в сумме 2 911 265 руб 46 коп. Данная задолженность подтверждена актом сверки взаимных расчетов.

В адрес ответчика направлена претензия об уплате задолженности. Ответчик на полученную претензию направил ответ о том, что ответчиком обязательства по договору №41.0300.1785.16 от 18.05.2016 исполнены в полном объеме и направил акт  выполненных  работ  для  подписания. .

Истец указал, что  поскольку  данный  акт  не  нашел  отражения в акте сверки на 31.10.2017г, а также в акте  сверки  на  31.12.2017г, ставит  под сомнение факт надлежащего и своевременного исполнения обязательств ответчиком на дату введения в отношении истца конкурсного производства. 

Также в связи с прекращением производственной деятельности истца в связи с началом ликвидационных мероприятий прием выполненных работ конкурсным управляющим является невозможным.

Истец пояснил, что денежные средства в сумму 2 911 265 руб 46 коп фактически являются неотработанным авансом, взыскиваются как неосновательное обогащение.

В качестве правового обоснования истец сослался на статьи 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ответчик иск не признал. В обоснование возражений указал, что обязательства по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ, строительно-монтажные работы исполнил в полном объеме. Отметил, что спорное соглашение заключено сторонами во исполнение государственного контракта №77-р от 26.10.2015  на  выполнение  работ  по  реконструкции автомобильной  дороги Шергино-Оймур-Заречье, км.53-км.68 в Кабанском  районе  Республики Бурятия.  При  этом  соприкосновение  интересов  ООО «ТСК»  и ПАО « МРСК Сибири»  заключалось в необходимости  реконструкции  воздушных линий  электропередачи  10кВ  от ПС «Оймыр» ОС-2; 0,4 кВ  с Сухая; 0,4кВ с.Заречье; 10кВ от  ПС  «Оймур» ОС-2. Согласно  ответу  ГКУ «Управление  региональных автомобильных  Республики Бурятия»  №  1/1314 от 29.05.2018г  участок  дороги введен в эксплуатацию  24.11.2017г. Следовательно, цель соглашения о переустройстве достигнута , государственный  контракт в рамках соприкосновения  интересов  ПАО «МРСК Сибири»  и  ООО «ТСК»  исполнен. 

Истец пояснил, что государственный контракт №77 от 26.10.2015, заключенный между истцом и ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», был расторгнут заказчиком 16.06.2017 в одностороннем порядке. Автомобильная дорога введена в эксплуатацию 24.11.2017. Считает, что фактически отношения сторон по соглашению прекратились в связи с расторжением государственного контракта, в целях исполнения которого было заключено соглашение между истцом и ответчиком.

Истец также указал, что ссылка ответчика на причастность к выполнению работ, указанному в акте выполненных работ №111 от 12.09.2016, подписанному  между ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» и ООО «ТСК» ,   не состоятельна. Работы выполнены истцом и приняты государственным заказчиком ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия». Представленные ответчиком проектная и сметная документация составлены позднее акта №111 от 12.09.2016 и не  соответствуют акту  №111 от 12.09.2016.  

Ответчик с доводами истца не согласился, Довод истца  о том, что  работы  по  реконструкции воздушных линий  электропередач выполнены  ООО «ТСК» . считает не состоятельным. ПАО «МРСК Сибири»  является  собственником  воздушных электропередач 10кВ  от ПС «Оймыр» ОС-2; 0,4 кВ  с Сухая; 0,4кВ с.Заречье; 10кВ от  ПС  «Оймур» ОС-2. Следовательно,  какие-либо  работы  по реконструкции  воздушных линий  должны  быть согласованы с  ПАО «МРСК Сибири». Такого  согласования  ООО «ТСК»  не  производилось.  В  соответствии с регламентом  реконструкцию сетей производит  собственник  сетей, в вязи с чем  и было  заключено  между  сторонами соглашение  от 18.05.2016г. Цель  соглашения  № 41.0300,1785.16  о  переустройстве  объектов  при  реализации  проектов  строительства (реконструкции)  третьих лиц от  18.05.2016г была  достигнута, что  позволило ООО «ТСК»  сдать  государственному  заказчику работы  по  государственному  контракту .

Определением от 21.08.2018 судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия».

Третье лицо в отзыве пояснило, что 26.10.2015 между ГКУ «Бурятрегионавтодор» и ООО «ТСК» заключен государственный контракт №77-р на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Шергино-Оймур-Заречье, км 53 – км 68 в Кабанском районе Республики Бурятия.

Проектно-сметной документацией были предусмотрены работы по переустройству линий электропередач 10кВ и 0,4кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири». На  основании акта о приемке выполненных работ №111 от 12.09.2016 работы по переустройству линий электропередач заказчиком приняты и оплачены.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено о времени и месте судебного заседания в порядке части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с  заявлением  сторон  об урегулировании  спора в судебном заседании от 10 декабря 2018 года судом объявлен перерыв до 11 часов 00 минут 17 декабря 2018 года.

Информация о времени и месте судебного заседания размещена судом на официальных сайтах Арбитражного суда Республики Бурятия и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации. 

В судебном заседании стороны пояснили, что стороны не пришли к мировому соглашению.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме. 

Ответчик иск не признал.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд установил следующее.

Судом установлено, что определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 08.11.2017 по делу №А10-6733/2017 в отношении ликвидируемого должника ООО «Транспортная строительная компания» возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве). 

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 29.12.2017 года (резолютивная часть решения оглашена 25.12.2017) по делу № А10-6733/2017 ликвидируемый должник - ООО «Транспортная строительная компания» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

Как следует из материалов дела, между ООО «Транспортная строительная компания» (далее – Компания, ООО ТСК) и ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – Собственник, ПАО МРСК) подписано соглашение №41.0300.1785.16 о переустройстве объектов при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц от 18.05.2016.

Согласно пунктам 1.1, 1.2 соглашения Компания осуществляет строительство (реконструкцию) объекта – «Автомобильная дорога Шергино – Оймур – Заречье, км 53 км 68 в Кабанском районе Республики Бурятия» (далее – Объект), и в интересах Компании в местах пересечений строящегося объекта необходимо провести реконструкцию (переустройство) существующих объектов, находящихся на балансе Собственника (воздушные линии электропередач) , а именно воздушных линий  электропередач 10кВ  от ПС «Оймыр» ОС-2, инв.№ В50007013; 0,4 кВ  с Сухая, инв.№ В50007040; 0,4кВ с.Заречье, инв.№ В50007039 ; 10кВ от  ПС  «Оймур» ОС-2, инв.№ В50006538. 

В соответствии с соглашением №41.0300.1785.16 от 18.05.2016 Собственник обязуется, в целях строительства Компанией объекта осуществить реконструкцию (переустройство) указанных в п.1.2 участков воздушных линий электропередачи в местах пересечений строящейся Компанией автомобильной дороги с участками  воздушных линий электропередач, принадлежащих Собственнику. Компания компенсирует Собственнику расходы на реконструкцию (переустройство) в полном объеме, в соответствии со сметой, дополнительно возмещает налог на прибыль Собственника. 

Согласно пункту 3.2 соглашения размер компенсации составляет 2 911 265 руб 45 коп, с учетом НДС (18%) 444 091 руб 34 коп. 

Согласно  пункту 1.4.  соглашения  реконструкция (переустройство)  включает в себя  разработку  и утверждение  проектной  (рабочей) документации на  реконструкцию  объектов; строительно-монтажные  работы согласно  технических условий; проведение  кадастровых  мероприятий  по установлению границ   охранных зон  под  объектами  после завершение  реконструкции;  обеспечение  кадастрового  учета  земельных участков под объектами  после  завершения  реконструкции с типом  разрешенного  использования – для  эксплуатации  ( только  для  воздушных линий электропередач 10кВ от  ПС «Оймур ОС-2, инв. № В50007013 и  воздушных линий электропередач 10кВ  от ПМ «Оймур» ОС-2 инв.№ В50006538); заключение (регистрация) измененных  и  новых  долгосрочных договоров  аренды  земельных участков под реконструированными объектами в управлении  Росреестра  Республики Бурятия ( только для  воздушных линий электропередач 10кВ от  ПС «Оймур ОС-2, инв. № В50007013 и  воздушных линий электропередач 10кВ  от ПМ «Оймур» ОС-2 инв.№ В50006538).

Собственник осуществляет реконструкцию (переустройство) объектов, в части выполнения работ по разработке проектной документации в течение 2 месяцев после поступления оплаты; выполнения строительно-монтажных работ в течение 18 месяцев после поступления оплаты; оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под реконструированными объектами, а также государственной регистрации соответствующих прав Собственника на земельные участки под реконструированными объектами в Управлении Росреестра по Республике Бурятия в течение 3 месяцев после завершения строительно-монтажных работ. (п.4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 соглашения).

Из материалов дела следует, что ООО ТСК перечислило в пользу ПАО МРСК Сибири сумму в размере 2 911 265 руб 46 коп , что подтверждено платежным поручением №4149 от 01.09.2016г с назначением платежа «оплата по договору доп. соглашение 41.0300.1785.16 от 18.05.2016 компенсация затрат по реконструкции участков воздушных линий» (л.д. 18 т.1).

В актах сверки за периоды 01.01.2016 - 31.10.2017, 01.01.2016 – 31.12.2017 отражена задолженность ПАО МРСК перед ООО ТСК на сумму 2 911 265 руб 46 коп.

Истец направил в адрес ответчика претензию №24 от 29.01.2018 об уплате суммы долга. 

Ответчик в ответе №12/16.3/617-исх от 08.02.2018 указал, что обязательства по договору №41.0300.1785.16 от 18.05.2016 ответчиком исполнены в полном объеме в установленные сроки, задолженность отсутствует, направил для подписания акт выполненных работ.

Соглашение №41.0300.1785.16 от  18.05.2016г  заключено  между  ООО «ТСК»  и ПАО «МРСК Сибири» в интересах  ООО «ТСК»  в целях выполнения   обязательств  последнего  по  государственному  контракту № 77-р от  26.10.2015г.

Согласно государственному контракту №77-р от 26.10.2015 ООО ТСК (генеральный подрядчик) принял на себя обязательства на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Шергино-Оймур-Заречье км 53 – км 68 в Кабанском районе Республики Бурятия с использованием своих материалов и в соответствии с проектной документацией на  сумму 480 793 615 руб 74 коп ( п.3.1. гос.контракта) в срок до 28.11.2017г ( 5.1. гос.контракта) .  

Согласно письмам ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» (государственный заказчик) 

Государственный  контракт № 77-р  от 26.10.2015г расторгнут заказчиком в соответствии с решением от  16.06.2017г  об одностороннем отказе от исполнения контракта №77-р от 26.10.2015 в  связи с тем, что  по  состоянию на  16.06.2017г  ООО «ТСК»  работы  остановлены, нарушается  календарный  график  производства  работ.

Согласно  письмам  ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» №1/1170 от 15.05.2018 (л.д.69 т.4), №1/1314 от 29.05.2018 (л.д.94 т.4) участок  автомобильной дороги Шергино-Оймур-Заречье км 53 – км 68 в Кабанском районе Республики Бурятия введен в  эксплуатацию  24.11.2017г.  Реконструкция  осуществлялась в рамках государственных контрактов №77-р от 26.10.2015 – генеральная подрядная организация ООО «ТСК» и №97-р от 27.07.2017 – генеральная подрядная организация ООО «Селенга».

Поскольку работы  по  переустройству  линий  электропередач 10кВ  и 0,4кВ , принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» ,  приняты государственным  заказчиком  по акту   выполненных  работ  № 111  от 12.09.2016г, следовательно,  данные  работы  выполнены в рамках  государственного  контракта №  77-р  от 26.10.2105г.

Государственным  заказчиком -  ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», привлеченным к участию в деле в качестве  третьего лица, не заявляющего  самостоятельных  требований, подтверждено, что  работы, предусмотренные  государственным  контрактом № 77-р  по переустройству  линий  электропередач 10кВ  и 0,4кВ , принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» , выполнены в  полном  объеме и приняты  от  генерального  подрядчика  по акту  выполненных  работ  № 111 от 12.09.2016г, претензий  к  генеральному  подрядчику  не  имелось, работы  оплачены полностью.

Согласно акту о приемке выполненных работ за сентябрь 2016 №111 от 12.09.2016 на  сумму 9 310 017  руб 10 коп  заказчиком приняты в том числе работы по переустройству ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (л.д. 70-84 т.4).

Работы по переустройству воздушных линий электропередач, государственным  заказчиком  оплачены  в полном объеме, что  следует из платежного поручения №272921 от 14.09.2016  на сумму 33 220 907 руб 93 коп по (л.д.85 т.4).

Таким  образом, работы  по переустройству  воздушных линий электропередач , находящихся в  местах  пересечений строящегося  объекта  – «Автомобильная дорога Шергино – Оймур – Заречье, км 53 км 68 в Кабанском районе Республики Бурятия», выполнены. 

Рассмотрев довод истца о  том, что данные  работы  выполнены  ООО «ТСК»  самостоятельно,  суд находит данный  довод не состоятельным.

Воздушные линии электропередачи являются собственностью ПАО МРСК,  что  отражено в  соглашении № 41.0300.1785.16  от  18.05.2016 и сторонами  не  оспаривается.

Истцом не представлено доказательств выполнения работ  самостоятельно. Доказательств расторжения  соглашения  № 41.0300.1785.16  от  18.05.2016 с  ПАО «МРСК Сибири»   истцом  не  представлено. Также  истцом не  представлено согласований с ПАО «МРСК Сибири» на выполнение  ООО «ТСК» работ по  переустройству  воздушных линий, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири», не  представлен договор  на  выполнение  работ ООО «ТСК» , заключенный с ПАО «МРСК Сибири», не  представлены допуски  к  выполнению опасных  работ и   какая-либо иная  исполнительная  документации по  выполнению работ  по  переустройству  воздушных линий.

Ответчиком выполнена проектно-сметная документация на  реконструкцию  воздушных линий  электропередач ( л.д.97-152 т.1,  л.д.1-165 т.2,  лд.1-164  т.3, л.д.1-49 т.4).

Довод истца  о  том, что сметная документация  составлена в ценах по состоянию на  4 квартал 2017г, исполнение  ответчиком обязательств  не  умаляет.

Переустройство воздушных линий электропередач  в местах пересечений с автомобильной  дорогой Шергино-Оймур – Заречье , км.53–км.68 выполнено. На  момент  расторжения  государственного  контракт № 77-р  от 26.10.2015г  16.06.2017г претензий  у государственного  заказчика по выполнению работ  по реконструкции воздушных линий электропередач  нет.

Поскольку доказательств  выполнения  работ  по  переустройству воздушных линий электропередач  иными лицами в материалы  дела  не  представлено, суд исходит из того, что   строительно-монтажные работы  выполнены  собственником  сетей.

На  проведение кадастровых мероприятий, предусмотренных пунктом 1.4.3.  соглашения от 18.05.2016г, ответчиком  заключен  договор  подряда  № 10.0300.4449.17  от  10.11.2017г с ООО «Техническая  инвентаризация» на  сумму  948 012 руб на  выполнение  работ  по установлению охранных зон в отношении  воздушных линий  электропередачи  ( л.д.83-96 т.1). 

Довод истца о  ненадлежащем  выполнении  ответчиком обязательств со ссылкой  на  акты  сверки  взаимных расчетов по состоянию на 31.10.2017г  и на  31.12.2017г , отражающим  задолженность  ПАО «МРСК Сибири» перед истцом  в сумме 2 911 265 руб 45 коп, суд отклоняет по следующим  основаниям.

 На  момент  составления  данных актов  сверки  оснований  для  отражения выполнения  работ  по  соглашению  от 18.05.2016г  не  имелось, поскольку  реконструкция в объеме , предусмотренном  пунктом 1.4. соглашения  от 18.05.2016г , не  была завершена.  Так  сроки  выполнения  кадастровых мероприятий  по установлению охранных зон предусмотрены  согласно  договору  подряда  от  10.11.2017г  до июня 2018г.

Соглашение  от  18.05.2016г  направлено  на  компенсацию затрат ПАО «МРСК Сибири» , связанных  с необходимостью переустройства воздушных линий  электропередач в  связи со строительством автомобильной  дороги. 

Поскольку в рамках государственного контракта  на  строительство автомобильной  дороги реконструкция (переустройство) воздушных линий  электропередач , принадлежащих ПАО «МРСК Сибири»  выполнено, затраты  ПАО МРСК Сибири» , связанные с данной  реконструкцией , подлежат  возмещению. 

Учитывая, что данная  реконструкция  повлечет заключение  (регистрацию) измененных  и  новых  долгосрочных договоров  аренды  земельных участков под реконструированными объектами, затраты на регистрацию  также  подлежат  возмещению, независимо  от  того, что  на  момент  рассмотрения  дела  указанные  затраты  ПАО «МРСК  Сибири»  не  понесены.

Оснований считать, что ответчиком обязательства по соглашению не исполнены не  имеется. Размер  компенсации  согласован в сумме 2 911 265 руб 45 коп.  Доводы  истца о  неосновательном  сбережении  ответчиком  денежных средств в сумме 2 911 265 руб 45 коп  не  обоснованы.

Требование истца не обоснованно, судом отклоняется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины суд относит на истца.

Согласно статье 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, при цене иска 2 911 265 руб. 45 коп государственная пошлина составляет 37 556 рублей. 

Рассмотрев ходатайство истца об уменьшении размера государственной пошлины, суд исходя из имущественного положения истца, признания его несостоятельным (банкротом), считает возможным уменьшить государственную пошлину, подлежащую взысканию до 2 000 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р  Е  Ш  И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета 2 000 руб 00 коп -  государственную пошлину.

Решение по настоящему  делу вступает в законную силу  по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

СудьяЛ.Ф. Салимзянова