АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2023 года

 

Дело № А33-28525/2022

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 сентября 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено 25 сентября 2023 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Даниловой Д.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к администрации Партизанского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 679 431 руб. 77 коп. субсидии,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 - представитель по доверенности от 23.03.2023 № 2, личность подтверждена паспортом, в подтверждение высшего юридического образования представлен диплом, ФИО2, действующая на основании доверенности от 29.08.2023 № 7, личность удостоверена паспортом, в подтверждение высшего юридического образования представлен диплом,

от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности от 30.05.2023 № 6, личность удостоверена паспортом, в подтверждение высшего юридического образования представлен диплом,

в качестве слушателя: ФИО4, личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО5, 

 

установил:

министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к администрации Партизанского района (далее - ответчик) о взыскании 1 679 431 руб. 77 коп. субсидии, предоставленной в рамках соглашения о предоставлении субсидий от 17.07.2020 № 26УПС21.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 08.11.2022  возбуждено производство по делу.

Представители истца в судебном заседании требования поддержали по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения требований по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление

 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п утверждены Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края (далее - Правила).

В соответствии с положениями Правил постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 816-п утвержден Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (далее - Порядок).

В рамках реализации Порядка между министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (Главный распорядитель) и администрацией Партизанского района (Получатель) заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета от 17.07.2020 № 26УПС21, предметом которого является предоставление из краевого бюджета в 2021 году бюджету представляемого Получателем муниципального образования субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств краевого бюджета (пункт 1.1 соглашения).

Согласно пункту 2.1 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 6 000 000 руб.

В соответствии с пунктом 2.2 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21 размер субсидии, предоставленной местному бюджету из краевого бюджета в 2021 году в соответствии с соглашением, составляет 5 585 100  руб.

Денежные средства субсидии в размере 5 585 100  руб. перечислены министерством на расчетный счет получателя на основании платежных поручений № 1272569 от 10.09.2021, № 1716335 от 24.11.2021.

Согласно пунктом 4.3.3 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21 получатель обязан обеспечивать достижение значений показателей результативности использования субсидии, установленных в приложении № 3 к соглашению от 17.07.2020 № 26УПС21.

В соответствии с п. 16 Порядка показателями результативности использования субсидии являются:

1) прирост доли граждан, проживающих в муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе Красноярского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района, муниципального округа, городского округа Красноярского края в году предоставления субсидии в сравнении с предшествующим годом;

2) прирост обеспеченности объектами спорта на территории муниципального района, муниципального округа, городского округа Красноярского края в году предоставления субсидии в сравнении с предшествующим годом.

В Приложении № 3 к соглашению от 17.07.2020 № 26УПС21 установлены следующие значения показателей результативности использования субсидии:

1) прирост доли граждан, проживающих в муниципальном районе, городском округе Красноярского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района, городского округа Красноярского края - 0,5 %;

2) прирост обеспеченности объектами спорта на территории муниципального района, городского округа Красноярского края - 5,01 %.

В соответствии с пунктом 4.3.4 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21 получатель обязан обеспечивать представление в министерство не позднее 20.02.2022 отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме согласно приложению № 5 к соглашению.

Согласно представленному получателем отчету о достижении значений показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01.01.2022, получателем в 2021 году были достигнуты следующие показатели результативности использования субсидии:

1)  прирост доли граждан, проживающих в муниципальном районе, городском округе Красноярского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района, городского округа Красноярского края - 0,95 %;

2) прирост обеспеченности объектами спорта на территории муниципального района, городского округа Красноярского края - (- 25,12 %).

Таким образом, по мнению истца, получателем в 2021 году не достигнут показатель результативности использования субсидии - прирост обеспеченности объектами спорта на территории муниципального района, городского округа Красноярского края.

В соответствии с пунктом 4.1.3 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21  министерство обязуется осуществлять оценку использования субсидии с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21, на основании данных отчетности, представленной получателем.

Согласно пункта 4.1.4 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21 министерство в случае если получателем по состоянию на 31.12.2021 допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.4 соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, установленной в соответствии с Порядком, указанные нарушения не устранены, обязуется рассчитать в соответствии с пунктами 12-14 Правил объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в краевой бюджет, и направить получателю требование о возврате средств субсидии в краевой бюджет в указанном объеме.

Формула расчета средств субсидии, подлежащих возврату в краевой бюджет при недостижении получателем значений показателей результативности использования субсидии, установленных в Соглашении, содержится в пункте 12 Правил.

Министерством в адрес администрации Партизанского района направлено письмо от 19.04.2022 № 81-805-и, содержащее требование об осуществлении возврата средств субсидии в краевой бюджет в размере 1 679 431,77 руб. с указанием расчета объема средств, подлежащих возврату.

Кроме того, министерством были дополнительно направлены письма от 03.06.2022 № 81-1144-и, от 27.06.2022 № 81-1332-и в адрес получателя с требованием в кратчайшие сроки произвести в краевой бюджет возврат средств субсидии в размере 1 679 431,77 руб.

В соответствии с пунктом 4.3.2 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21 получатель обязан обеспечивать исполнение требований министерства по возврату средств субсидии в краевой бюджет в соответствии с пунктом 12 Правил.

Вместе с тем, получатель возврат части субсидии, полученной в рамках соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21, не произвел.

Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения министерства в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о взыскании с администрации Партизанского района 1 679 431 руб. 77 коп. субсидии

 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В качестве оснований возникновения обязательств статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации называет договоры, причинение вреда и иные основания, указанные в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что обязательства должны исполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно пункту 1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования субъектом Российской Федерации (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (пункт 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» субсидии местным бюджетам предусматриваются в составе краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субсидии местным бюджетам формируются в составе краевого бюджета за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (пункт 2 статьи 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»).

Пунктом 3 статьи 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» предусмотрено, что Правительство Красноярского края устанавливает правила, определяющие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета.

Нормативные правовые акты Правительства Красноярского края, устанавливающие порядок предоставления и распределения каждой субсидии, принимаются в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

Цели и условия предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам предусматриваются нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, в том числе принимаемыми в соответствии с законами края, регулирующими отношения, связанные с предоставлением из краевого бюджета соответствующих субсидий.

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п (далее  – Правила).

Согласно пункту 3 Правил порядки предоставления и распределения каждой субсидии устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, принимаемыми в соответствии с Правилами.

На основании вышеуказанных положений постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 816-п утвержден Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (далее - Порядок).

Из материалов настоящего дела следует, что в рамках реализации Порядка между министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (Главный распорядитель) и администрацией Партизанского района (Получатель) заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета от 17.07.2020 № 26УПС21, предметом которого является предоставление из краевого бюджета в 2021 году бюджету представляемого Получателем муниципального образования субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств краевого бюджета (пункт 1.1 соглашения).

Согласно пункту 2.1 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 6 000 000 руб.

В соответствии с пунктом 2.2 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21 размер субсидии, предоставляемой местному бюджету из краевого бюджета в 2021 году в соответствии с соглашением, составляет 5 585 100  руб.

Денежные средства субсидии в размере 5 585 100  руб. перечислены министерством на расчетный счет получателя на основании платежных поручений № 1272569 от 10.09.2021, № 1716335 от 24.11.2021. Софинансирование из средств местного бюджета составило 414 900 руб.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что в целях использования выделенных денежных средств, указанных в соглашении, 05.05.2021 Агентством государственного заказа Красноярского края (уполномоченный орган на размещение заказа) размещено извещение о проведении электронного аукциона на «Устройство комплексной площадки для подвижных игр по адресу: Россия. Красноярский край. 

<

...>. 40», начальная  (максимальная)  цена контракта  3 000 000  руб.

01.06.2021 по итогам указанного аукциона заключен муниципальный контракт № 1/2021, предметом которого является устройство комплексной площадки для подвижных игр по адресу: Россия, 

<

...>, цена контракта составила 2 565 000 руб. Муниципальный контракт исполнен в полном объеме, 25.08.2021 сторонами по контракту подписан акт о приемке выполненных работ.

Кроме того, 05.05.2021 Агентством государственного заказа Красноярского края размещено извещение о проведении электронного аукциона на «Устройство хоккейной коробки по адресу: Россия, 

<

...>», начальная (максимальная) цена контракта 3 000 000 руб.

07.06.2021 по итогам указанного аукциона заключен муниципальный контракт № 2/2021, предметом которого является устройство хоккейной коробки по адресу: Россия, Красноярский край. 

<

...>», цена контракта составила 2 670 000 руб. Муниципальный контракт исполнен в полном объеме, 18.08.2021 сторонами по контракту подписан акт о приемке выполненных работ;

При этом, на денежные средства, сложившиеся в рамках экономии от проведенных выше электронных аукционов 22.09.2021 и 04.10.2021 Агентством государственного заказа Красноярского края размещены извещения о проведении электронных аукционов на «Устройство крытого бокса со скамейками для запасных игроков на плоскостном спортивном сооружении (хоккейная площадка) по адресу: Россия, Красноярский край. 

<

...>», цена контракта 330 000 руб. и на «Устройство крыши над трибунами на плоскостном спортивном сооружении (комплексная площадка для подвижных игр) по адресу : Россия, 

<

...>», цена контракта 435 000 руб.

По итогам указанных выше аукционов, заключены муниципальные контракты от 18.10.2021 № 3/2021, предметом которого является устройство крытого бокса со скамейками для запасных игроков на плоскостном спортивном сооружении (хоккейная площадка) по адресу: Россия, Красноярский край. 

<

...> и от 29.10.2021 № 4/2021, предметом которого является устройство крыши над трибунами на плоскостном спортивном сооружении (комплексная площадка для подвижных игр) по адресу: Россия, Красноярский край. 

<

...>. Муниципальные контракты исполнены в полном объеме, 10.11.2021 и 15.11.2021 сторонами по контрактам подписаны акты о приемке выполненных работ.

Заказчиком при проведении электронных процедур выступало муниципальное бюджетное учреждение спортивный комплекс «Партизанский», который находится в ведении отдела культуры.

Таким образом, 2 565 000 руб. (муниципальный контракт от 01.06.2021 № 1/2021) + 2 670 000 руб. (муниципальный контракт от 07.06.2021 № 2/2021) + 330 000 руб. (муниципальный контракт от 18.10.2021 № 3/2021) + 435 000 руб. (муниципальный контракт от 29.10.2021 № 4/2021) = 6 000 руб., что соответствует сумме субсидии, предоставленной получателю на основании соглашения  от 17.07.2020 № 26УПС21, с учетом суммы софинансирования.

Таким образом, материалами настоящего дела подтверждается, что предоставленные ответчику средства субсидии освоены в полном объеме с соблюдением установленных сроков. Истцом в ходе судебного разбирательства указанное обстоятельство не оспаривалось.

Согласно пункту 4.3.3 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21 получатель обязан обеспечивать достижение значений показателей результативности использования субсидии, установленных в приложении № 3 к соглашению от 17.07.2020 № 26УПС21.

В соответствии с пунктом 16 Порядка показателями результативности использования субсидии являются:

1) прирост доли граждан, проживающих в муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе Красноярского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района, муниципального округа, городского округа Красноярского края в году предоставления субсидии в сравнении с предшествующим годом;

2) прирост обеспеченности объектами спорта на территории муниципального района, муниципального округа, городского округа Красноярского края в году предоставления субсидии в сравнении с предшествующим годом.

В Приложении № 3 к соглашению от 17.07.2020 № 26УПС21 установлены следующие значения показателей результативности использования субсидии:

1) прирост доли граждан, проживающих в муниципальном районе, городском округе Красноярского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района, городского округа Красноярского края - 0,5 %;

2) прирост обеспеченности объектами спорта на территории муниципального района, городского округа Красноярского края - 5,01 %.

В соответствии с пунктом 4.3.4 соглашения от 17.07.2020 № 26УПС21 получатель обязан обеспечивать представление в министерство не позднее 20.02.2022 отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме согласно приложению № 5 к соглашению.

Судом установлено, что согласно представленному получателем отчету о достижении значений показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01.01.2022, получателем в 2021 году достигнуты следующие показатели результативности использования субсидии:

1)  прирост доли граждан, проживающих в муниципальном районе, городском округе Красноярского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района, городского округа Красноярского края - 0,95 %;

2) прирост обеспеченности объектами спорта на территории муниципального района, городского округа Красноярского края - (- 25,12 %).

Таким образом, заявленные исковые требования мотивированы тем, что получателем в 2021 году не достигнут показатель результативности использования субсидии - прирост обеспеченности объектами спорта на территории муниципального района, городского округа Красноярского края.

Судом установлено, что согласно представленному в материалы дела расчету показателя «Прирост обеспеченности объектами спорта», уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями рассчитывается исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (далее – ЕПС) и численности трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (кроме городов федерального значения) рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм) – 122 человека на 1000 населения.

Определяя процентное соотношение величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной способности, рекомендуется рассчитывать уровень обеспеченности населения региона спортивными сооружениями (далее - ОСС).

Таким образом, уровень ОСС = (ЕПСфакт./ЕПСнорм.) х 100%

ОСС = ЕПС/1000х100/(численность населения тыс. чел. х 0,122)

Согласно данным федерального статистического наблюдения раздела III «Спортивная инфраструктура» по форме № 1-ФК за 2020 год на территории Партизанского района количество спортивных сооружений составляет 33 единицы (из них: 14 плоскостных спортивных сооружения, 13 спортивных залов, 2 объекта городской и рекреационной инфраструктуры и 4 других спортивных сооружения), единовременная пропускная способность которых составляет 1047 человек. Численность населения в возрасте 3-79 лет составляет 8,50 тыс. человек.

Таким образом, обеспеченность спортивных сооружений (далее также - ОСС) в Партизанском районе за 2020 год составляет 100,96 % от нормативной потребности:

ОСС 2020 = 1047/1000х100 (8,50х0,122)=100,96 %

При этом, согласно данным отчета 1-ФК за 2021 год, представленного в адрес министерства ответчиком, на территории Партизанского района количество спортивных сооружений составляет 23 единицы (из них: 9 плоскостных спортивных сооружения, 11 спортивных залов, 1 объект городской и рекреационной инфраструктуры и 2 других спортивных сооружения), единовременная пропускная способность которых составляет 773 человека.  Численность  населения в возрасте 3-79 лет составляет 8,35 тыс. человек.

Обеспеченность спортивных сооружений в Партизанском районе за 2021 год составляет 75,84 % от нормативной потребности:

ОСС 2021 = 773/1000х100/(8,35х0,122) = 75,84 %

Таким образом, исходя из приведенных данных, снижение показателя ОСС в 2021 году по отношению к 2020 году составило:

ОСС2021 - ОСС 2020 = 75,84 % - 100,96 % = - 25,12 %.

Ответчик, не соглашаясь с заявленными исковыми требованиями, указывает, что отрицательный показатель обусловлен технической ошибкой, допущенной при заполнении формы раздела III «Спортивная инфраструктура» при предоставлении отчета 1-ФК за 2021 год в части обеспеченности спортивными сооружениями, где их количество уменьшено с 33 до 23 единиц по сравнению с данными за прошлый год, что не соответствует действительности.

В подтверждение указанных обстоятельств ответчиком в материалы настоящего дела представлены распоряжение главы Партизанского района от 14.12.2021 № 168А-Р, которым утвержден реестр спортивных сооружений, расположенных на территории Партизанского района по состоянию на 30.12.2021, а также распоряжение главы Партизанского района от 23.06.2022 № 74а-р, которым утвержден реестр спортивных сооружений, расположенных на территории Партизанского района по состоянию на 01.07.2022.

Из представленных документов судом установлено, что в указанные периоды на территории Партизанского района располагались следующие спортивные сооружения:

 

№

Наименование объекта

Тип сооружений, входящих в состав объекта

Единовременная пропускная способность

1

МБУ Спортивный комплекс Партизанский

Спортивный зал

50

Хоккейная коробка

64

Комплексная спортивная площадка для подвижных игр

20

Комплексная спортивная площадка для подвижных игр

20

Футбольное поле

28

Место для прыжков в длину

5

Круговая беговая дорожка 400 м. 2 дорожки

12

Сезонный каток

80

Волейбольная площадка

20

Хоккейная коробка с. Стойба

64

Лыжная трасса

40

2

МБОУ Партизанская средняя общеобразовательная школа им. П.П. Петрова

Борцовский зал 1 ковер.

16

Спортивный зал № 1

35

Спортивный зал № 2

25

3

Спортивный зал

-

30

4

Спортивный зал

-

30

5

Спортивный зал

-

30

6

Спортивный зал

-

20

7

Спортивный зал

-

30

8

МБОУ Манская средняя общеобразовательная школа

Спортивный зал

35

Круговая беговая дорожка 200 м (2 дорожки)

16

Волейбольная площадка

30

Площадка для игры в настольный теннис 2 стола

8

Площадка для игры в баскетбол

30

Футбольное поле

28

Место для прыжков в длину

5

Лыжная трасса 3 км

40

9

МКОУ Запасноимбежская средняя общеобразовательная школа им. С.В. Потапова

Спортивный зал

30

Футбольное поле

28

Борцовский зал 1 ковер

16

Сезонный каток

80

10

Спортивный зал

-

30

11

МКОУ Стойбинская средняя общеобразовательная школа

Хоккейная коробка

56

Спортивный зал

30

Лыжная трасса 5 км

40

 

Таким образом, фактически количество спортивных сооружений на территории Партизанского района по состоянию на 30.12.2021 и 01.07.2022 составило 35 (столбец «Тип сооружений, входящих в состав объекта»), общая единовременная пропускная способность спортивных сооружений по результатам сложения всех вышеприведенных значений - 1121 человек. Указанное обстоятельство подтверждается представленными ответчиком доказательствами и в ходе судебного разбирательства истцом не опровергнуто.

Следовательно, с учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, обеспеченность спортивных сооружений в Партизанском районе за 2021 год составляет:

ОСС 2021 = 1121/1000х100/(8,35х0,122) = 109,99 %

Показатель ОСС в 2021 году по отношению к 2020 году составил:

ОСС2021 - ОСС 2020 = 109,99 % - 100,96 % = 9,03 %

При этом, учитывая, что приложением № 3 к соглашению от 17.07.2020 № 26УПС21 значение показателя результативности использования субсидии «прирост обеспеченности объектами спорта на территории муниципального района, городского округа Красноярского края» установлен 5,01 %, фактическое значение указанного показателя в 2021 году 9,03 % свидетельствует о достижении установленного показателя результативности использования субсидии.

При изложенных обстоятельствах, основания для возврата из местного бюджета в краевой бюджет средств субсидии в рассматриваемом случае отсутствуют.

Таким образом, суд полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению.

На основании пункта 1.1 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации государственные органы, органы местного самоуправления освобождены от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами. Вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины не решается судом.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Д.А. Данилова