Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-21944/2024

02 сентября 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  07 августа 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  02 сентября 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Семиным Д.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :Общество с ограниченной ответственностью "СпецЭнергоСервис" (адрес:  Россия 188640, ВСЕВОЛОЖСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ПР-КТ ВСЕВОЛОЖСКИЙ Д. 41, ОФИС 2.3, ОГРН:  );

ответчик: :АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОЭСК-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (адрес:  Россия 187342, КИРОВСК, Ленинградская обл., УЛ. ЛАДОЖСКАЯ Д. 3/А, ОГРН:  );

о взысании,

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 28.02.2024), ФИО2 (доверенность от 28.02.2024); 

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 01.01.2024);

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС" (далее – Подрядчик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (далее – Заказчик) о взыскании по договорам № 00-0009/2022 РДПДР от 17.01.2022, 00-0657/2020 РДПДР от 10.11.2020, 00-0658/2020 РДПДР от 10.11.2020, 00-0659/2020 РДПДР от 10.11.2020, 00-0660/2020 РДПДР от 10.11.2020, 00-0661/2020 РДПДР от 10.11.2020, 00-0695/2020 РДПДР от 19.11.2020, 00-0696/2020 РДПДР от 19.11.2020, 00-0697/2020 РДПДР от 19.11.2020, 00-00698/2020 РДПДР от 19.11.2020, 00-0699/2020 РДПДР от 19.11.2020, 00-0775/2021 ПДР от 17.11.2021 75 541 823,72 рубля задолженности и 15 108 364,74 рубля неустойки.

В судебном заседании истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 75 541 823,72 рубля задолженности, 16 052 304,63 рубля неустойки по состоянию на 17.07.2024. Суд, в порядке ст. 49 АПК РФ принял уточнения иска.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве.

Представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить, заявил об уменьшении неустойки, начисленной ответчиком в порядке зачета.

Представитель ответчика представил свои возражения на заявления истца об уменьшении неустойки.

В судебном заседании от 17.07.2024 объявлен перерыв до 31.07.2024. После перерыва судебное заседание продолжено.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

По договору № 00-0009/2022 РДПДР от 17.01.2022.

Стороны заключили договор № 00-0009/2022 РДПДР от 17.01.2022 (далее – Договор-1) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в г. Ивангород, Сосновоборском, Ломоносовском, Кингесеппском, Волосовском и Сланцевском районах Ленинградской области, входящих в зону обслуживания филиала АО "ЛОЭСК" "Западные электрические сети", который может включать выполнение по объекту следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ оп объекту", Этап "Разработка Проектно-сметной документации", Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией". 

В силу п. 1.2 Договора-1 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-1 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-1 в обоснование чего представил акты № 1 от 17.06.2022, 2 от 22.06.2022, 4.2 от 11.10.2022, 5 от 11.10.2022, 4.1 от 11.10.2022, 3.1 от 28.10.2022, 3.2 от 28.10.2022, 15/1 от 22.11.2022, 14/1 от 29.11.2022, 14/2 от 29.11.2022, 5/5 от 11.01.2023, 17/3 от 12.01.2023, 13/1 от 12.01.2023,17/4 20.01.2023, 4.3 от 23.01.2023, 5 от 24.01.2023, 6 от 06.02.2023, 12/1 от 03.03.2023, 11/3 от 03.03.2023, 3/5 от 06.03.2023, 3/6 от 06.03.2023, 3/7 от 06.03.2023, 15/3 от 24.03.2023, 12/2 от 20.04.2023, 12/4 от 15.05.2023, 12/5 от 15.05.2023, 12/6 от 15.05.2023, 15/2 от 20.06.2023, 14/4 от 30.06.2023, 16/2 от 18.10.2023, 16/3 от 18.10.2023, 16/1 от 18.10.2023, подписанные со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 3 197 157,94 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-1, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 622 556,50 руб., которые начислены как на сумму спорных актов, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

По договору № 00-0657/2020 РДПДР от 10.11.2020.

Стороны заключили договор № 00-0657/2020 РДПДР от 10.11.2020 (далее – Договор-2) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в Кировском, Тосненском, в Рахьиском и Морозовском городских поселения Всеволожского района Ленинградской области, входящих в зону обслуживания филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети", который может включать выполнение по объекту следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту", ??Этап "Разработка Проектно-сметной документации, ??Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией".

В силу п. 1.2 Договора-2 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-2 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-2 в обоснование чего представил акты № 6.2 от 21.02.2022, 15/1 от 17.11.2022, 17/1 от 17.11.2022, 11 от 23.11.2022, 9 от 08.12.2022, 12 от 08.12.2022, 1/1 от 21.12.2022, 13 от 21.12.2022, 14 от 21.12.2022, 15 от 23.12.2022,  9/2 от 23.12.2022, 14/2 от 13.01.2023, 11/2 от 31.03.2023, 13/2 от 31.03.2023, подписанные со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 7 634 943,68 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-2, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 1 724 795,77 руб., которые начислены как на сумму спорных актов, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

По договору № 00-0658/2020 РДПДР от 10.11.2020.

Стороны заключили договор № 00-0658/2020 РДПДР от 10.11.2020 (далее – Договор-3) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в Лодейнопольском, Бокситогорском, Волховском, Киришском, Тихвинском, Подпорожском районах Ленинградской области., входящих в зону обслуживания филиала АО "ЛОЭСК" "Восточные электросети", который может включать выполнение по объекту следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту", ??Этап "Разработка Проектно-сметной документации, ??Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией".

В силу п. 1.2 Договора-3 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-3 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-3 в обоснование чего представил акты № 4/2 от 05.04.2023, 2/3 от 25.04.2023, 2/4 от 25.04.2023, 2/5 от 25.04.2023, 2/6 от 25.04.2023, 4/3 от 26.04.2023, 4/4 от 26.04.2023,  4/5 от 26.04.2023, 6/3 от 26.04.2023, 6/4 от 26.04.2023, 6/5 от 26.04.2023, 6/6 от 26.04.2023, 6/2 от 26.04.2023, 2/2 от 26.04.2023, 2/1 от 12.10.2023, подписанные со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 1 371 078,31 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-3, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 334 434,00 руб., которые начислены как на сумму спорных актов, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

По договору № 00-0659/2020 РДПДР от 10.11.2020.

Стороны заключили договор № 00-0659/2020 РДПДР от 10.11.2020 (далее – Договор-4) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в Всеволожском (за исключением Морозовского и Рахьинского городских поселений) и Приозерском районах Ленинградской области, входящих в зону обслуживания филиала АО "ЛОЭСК" "Пригородные электросети", которыи? может включать выполнение следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту", ??Этап "Разработка Проектно-сметной документации, ??Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией".

В силу п. 1.2 Договора-4 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-4 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-4 в обоснование чего представил акты №  2 от 31.10.2022, № 3 от 08.12.2022, 14/1 от 09.02.2023, 8/2 от 06.04.2023, 16/1 от 02.06.2023, 1 от 14.08.2023, 14/2 от 29.08.2023, 16/2 от 29.08.2023, 14/3 от 29.08.2023, 1 от 20.09.2023, 1 от 20.09.2023, 16/3 от 27.11.2023, 16/5 от 12.01.2024, 16/4 от 12.01.2024, 10/1 от 12.01.2024 ,

10/2 от 12.01.2024, подписанные со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 2 533 297,08 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-4, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 434 232,19 руб., которые начислены как на сумму спорных актов, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

 

По договору № 00-0660/2020 РДПДР от 10.11.2020.

Стороны заключили договор № 00-0660/2020 РДПДР от 10.11.2020 (далее – Договор-5) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства в г. Ивангород, Сосновоборском, Ломоносовском, Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах Ленинградской области, входящих в зону обслуживания филиала АО "ЛОЭСК" "Западные электросети", которыи? может включать выполнение по объекту следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту", ??Этап "Разработка Проектно-сметной документации, ??Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией".

В силу п. 1.2 Договора-5 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-5 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-5 в обоснование чего представил акт № 3/1 от 26.07.2023, подписанный со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 63 108,07 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-5, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 10 602,16 руб., которые начислены как на сумму спорного акта, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

По договору № 00-0661/2020 РДПДР от 10.11.2020.

Стороны заключили договор № 00-0661/2020 РДПДР от 10.11.2020 (далее – Договор-6) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства в Гатчинском и Лужском раи?онах Ленинградскои? области, входящих в зону обслуживания филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети», которыи? может включать выполнение по объекту следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту", ??Этап "Разработка Проектно-сметной документации, ??Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией".

В силу п. 1.2 Договора-6 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-6 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-6 в обоснование чего представил акт № № 12/1 от 11.12.2023, подписанный со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 38 760,00 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-6, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 5 995,05 руб., которые начислены как на сумму спорного акта, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

По договору № 00-0695/2020 РДПДР от 19.11.2020.

Стороны заключили договор № 00-0695/2020 РДПДР от 19.11.2020 (далее – Договор-7) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства во Всеволожском (за исключением Морозовского и Рахьинского городских поселении) и Приозерском районах Ленинградской области, входящих в зону АО "ЛОЭСК" "Пригородные электросети", которыи? может включать выполнение по объекту следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту", ??Этап "Разработка Проектно-сметной документации, ??Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией".

В силу п. 1.2 Договора-7 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-7 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-7 в обоснование чего представил акты № 2 от 29.04.2022, 3 от 31.05.2022, 4 от 29.07.2022, 5 от 29.07.2022, 8/8 от 31.10.2022, 16/1 от 30.11.2022, 19/1 от 30.11.2022, 20/1 от 30.11.2022, 21/1 от 30.11.2022, 6 от 08.12.2022, 6 от 16.12.2022, 2/2 от 01.01.2023, 16/5 от 12.01.2023, 16/6 от 12.01.2023, 9/5 от 08.02.2023, 9/6 от 08.02.2023, 14/2 от 24.04.2023, 12/5 от 10.05.2023, 7/1 от 17.07.2023, 7/2 от 17.07.2023, 1 от 18.07.2023, 7/3 от 21.07.2023, 7/5 от 04.08.2023, 7/6 от 04.08.2023, 14/1 от 04.08.2023, 14/3 от 04.08.2023, 14/4 от 04.08.2023, 20/4 от 15.08.2023, 20/2 от 30.08.2023, 20/3 от 30.08.2023, 16/7 от 12.09.2023, 1 от 20.09.2023, 12/4 от 02.10.2023,  20/5 от 01.11.2023, 20/6 от 01.11.2023, 20/7 от 01.11.2023, подписанные со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 6 226 586,87 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-7, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 1 137 690,30 руб., которые начислены как на сумму спорных актов, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

По договору № 00-0696/2020 РДПДР от 19.11.2020.

Стороны заключили договор № 00-0696/2020 РДПДР от 19.11.2020 (далее – Договор-8) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства в Гатчинском и Лужских раи?она Ленинградскои? области, входящих в зону обслуживания филиала АО "ЛОЭСК" "Южные электрические сети", которыи? может включать выполнение по объекту следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту", ??Этап "Разработка Проектно-сметной документации, ??Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией".

В силу п. 1.2 Договора-8 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-8 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-8 в обоснование чего представил акты № 2 от 29.10.2021, 6.1 от 28.12.2021, 6.2 от 21.02.2022, 7.1 от 09.08.2022, 7.2 от 09.08.2022, 10/1 от 21.06.2023, 10/3 от 06.09.2023, 10/2 от 06.09.2023, 10/4 от 12.09.2023, подписанные со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 3 175 420,97 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-8, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 618 162,41 руб., которые начислены как на сумму спорных актов, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

По договору № 00-0697/2020 РДПДР от 19.11.2020.

Стороны заключили договор № 00-0697/2020 РДПДР от 19.11.2020 (далее – Договор-9) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства в Кировском, Тосненском, в Рахьиском и Морозовском городских поселения Всеволожского района Ленинградскои? области, входящих в зону обслуживания филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные электрические сети", которыи? может включать выполнение по объекту следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту", ??Этап "Разработка Проектно-сметной документации, ??Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией".

В силу п. 1.2 Договора-9 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-9 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-9 в обоснование чего представил акты № 2 от 10.08.2021, 7 от 24.11.2021, 9.1. от 04.07.2022, 15/1 от 17.11.2022, 15/2 от 17.11.2022, 15/3 от 17.11.2022, 15/4 от 17.11.2022, 18/1 от 08.12.2022, 18/2 от 09.12.2022, 10 от 08.12.2022, 18/3 от 09.12.2022, 18/4 от 09.12.2022, 1/1 от 21.12.2022, 11 от 21.12.2022, 1/2 от 21.12.2022, 1/3 от 13.01.2023, 15/5 от 08.02.2023, 15/6 от 08.02.2023, 12.1 от 09.02.2023, 12.2 от 09.02.2023, 12.3 от 09.02.2023, 11/1 от 10.02.2023, 15/7 от 15.03.2023, 24/1 от 23.05.2023, 24/2 от 23.05.2023, 24/3 от 23.05.2023, 20/1 от 21.06.2023, 11/2 от 02.10.2023, 16/1 от 18.10.2023, 16/2 от 18.10.2023, 16/3 от 18.10.2023, 20/2 от 20.11.2023, подписанные со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 10 626 532,58 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-9, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 2 135 186,05 руб., которые начислены как на сумму спорных актов, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

По договору №  00-00698/2020 РДПДР от 19.11.2020.

Стороны заключили договор № 00-00698/2020 РДПДР от 19.11.2020. (далее – Договор-10) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства в г. Ивангород, Сосновоборском, Ломоносовском,  Кингесеппском, Волосовском и Сланцевском районах Ленинградскои? области, входящих в зону обслуживания филиала АО "ЛОЭСК" "Западные электрические сети", которыи? может включать выполнение по объекту следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту", ??Этап "Разработка Проектно-сметной документации, ??Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией".

В силу п. 1.2 Договора-10 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-10 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-10 в обоснование чего представил акты № 1 от 24.03.2021, 4.1 от 30.06.2021, 5.1 от 31.08.2021, 5.2 от 31.08.2021, 5.3 от 31.08.2021, 5.4 от 31.08.2021, 6.6 от 23.05.2022, 7/7 от 12.01.2023, 7.2 от 18.01.2023, подписанные со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 8 171 906,19 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-10, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 2 588 990,55 руб., которые начислены как на сумму спорных актов, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

По договору № 00-0699/2020 РДПДР от 19.11.2020.

Стороны заключили договор № 00-0699/2020 РДПДР от 19.11.2020. (далее – Договор-11) по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по объектам строительства для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в Лодейнопольском, Бокситогорском, Волховском, Киришском, Тихвинском, Подпорожском районах Ленинградскои? области, входящих в зону обслуживания филиала АО "ЛОЭСК" "Восточные электрические сети", которыи? может включать выполнение по объекту следующих этапов работ: Этап "Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту", ??Этап "Разработка Проектно-сметной документации, ??Этап "Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией".

В силу п. 1.2 Договора-11 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-11 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-11 в обоснование чего представил акты № 1 от 30.06.2021, 2 от 28.10.2022, 2/2 от 22.11.2022, 8/1 от 12.01.2023, 6/1 от 09.02.2023, 7/1 от 09.02.2023, 9/1 от 09.02.2023, 10/1 от 09.02.2023, 5/1 от 09.02.2023, 3/1 от 09.03.2023, 4/1 от 09.03.2023, 3/2 от 24.03.2023, 3/3 от 24.03.2023, 3/4 от 24.03.2023, 4/3 от 24.03.2023, 4/4 от 24.03.2023, 4/2 от 24.03.2023, 4/5 от 24.03.2023, 3/5 от 05.04.2023, 4/6 от 23.05.2023, 8/3 от 23.05.2023, 8/2 от 23.05.2023, 5/2 от 23.05.2023, 9/2 от 31.05.2023, 9/3 от 31.05.2023, 9/4 от 20.06.2023, 10/2 от 30.06.2023, 5/3 от 07.07.2023, 5/4 от 07.07.2023, 5/5 от 07.07.2023, 5/6 от 07.07.2023, 7/2 от 07.07.2023, 10/4 от 09.08.2023, 10/3 от 09.08.2023, 6/2 от 02.10.2023, 6/3 от 02.10.2023, 6/4 от 02.10.2023, подписанные со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 4 666 788,50 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-11, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 872 410,95 руб., которые начислены как на сумму спорных актов, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

По договору № 00-0775/2021 ПДР от 17.11.2021.

Стороны заключили договор № 00-0775/2021 ПДР от 17.11.2021 (далее – Договор-12) по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить по объектам строительства: "проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО", "2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО", "2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО", "2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 корп.2 жилого дома в г. Кудрово ЛО", "2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ паркинга корп.2 в г. Кудрово ЛО", "2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ встроенных помещений корп.2 в г. Кудрово ЛО", следующие этапы работ: Этап 1 – выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту, в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием; Этап 3 – выполнение строительно-монтажных раоот в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим договором сроки.

В силу п. 1.3 Договора-12 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям договора.

Разделом 7 Договора-12 сторонами установлен следующий порядок расчетов: 

7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу-1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанного в соответствии с п. 6.3,4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключение обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ но разработке проектно-сметной документации по Этану 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

• выставленного подрядчиком счета-фактуры.

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• ??подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Как следует из текста искового заявления, истец надлежащим образом исполнил обязательства по выполнению работ по Договору-12 в обоснование чего представил акты № 3 от 31.10.2022, 4 от 31.10.2022, 6 от 31.10.2022, 7 от 31.10.2022, 5 от 31.10.2022, 8 от 31.10.2022, 1.1 от 23.12.2022, 9 от 03.04.2023, 10 от 24.04.2023, 11 от 06.04.2023, 2 от 10.05.2023, 3 от 10.05.2023, 4 от 10.05.2023, 5 от 10.05.2023, 6 от 10.05.2023, 7 от 10.05.2023, подписанные со стороны ответчика без замечаний. 

Вместе с тем, ответчик свои встречные обязательства по плате выполненных работ исполнил ненадлежащим образом, с учетом частичных оплат на стороне ответчика образовалось 27 836 243,53 руб. задолженности.

Соглашение о неустойке предусмотрено пунктом 9.2. Договора-12, в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. Подрядчик начислил заказчику пени за нарушение срока оплаты работ в соответствии с представленным расчетом в общем размере 5 567 248,71 руб., которые начислены как на сумму спорных актов, так и на акты, по которым ответчик оплатил работы с просрочкой.

Общий размер задолженности Заказчика перед Подрядчиком за выполненные по указанным договорам работы составляет 75 541 823,72 руб.

Истец направил в адрес ответчика претензию № 42 от 31.01.2024 с требованием оплаты задолженности и договорной неустойки. Оставление данной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 

Ответчик, возражая против удовлетворении исковых требований, представил в материалы дела отзыв на иск в котором указал, что Подрядчик выполнил работы по договорам не в полном объеме – строительство и ввод в эксплуатацию объектов электроэнергетики не выполнено, а частичный результат работ не имеет для Заказчика потребительской ценности. До окончания всего объема работ основания для оплаты отсутствуют. Ответчик заявил о наличии у него встречного требования к истцу об уплате неустойки за просрочку выполнения работ на основании пункта 9.1 договоров. Заказчик начислил Подрядчику неустойку в общем размере 61 190 279,40 руб. (в редакции возражений на ходатайство истца об уточнении исковых требований от 12.07.2024 № 00/02/1608) и заявил о зачете встречных требований в порядке статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); заявил об уменьшении предъявленной в иске неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

Истец, возражая на доводы ответчика, представил в материалы дела заявление об уменьшении неустойки, в котором указал, что довод ответчика об отсутствии оснований для оплаты выполненных работ до выполнения Подрядчиком работ в объеме цены договоров противоречит условиям заключенных договоров, в связи с чем, полагает несостоятельным. Истец также произвел контррасчет заявленной ответчиком к зачету неустойки, указал, что имело место приостановление выполнения работ в порядке ст. 716 ГК РФ, нарушение срока выполнения работ Подрядчиком было вызвано просрочкой кредитора, заявил об уменьшении предъявленной к зачету неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

Ответчик предоставил свои возражения на заявление истца об уменьшении неустойки в которых выразил несогласие со способом подсчета неустойки, произведенного истцом в заявление об уменьшении неустойки и привел доводы об отсутствии оснований для применения правил ст. 333 ГК РФ к неустойке предъявляемой ответчиком к зачету.

Как установлено статьями 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

В силу статьи 720 ГК РФ основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Как следует из разъяснений, данных в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Исследовав и оценив в соответствии с требованиями статей 68, 71 АПК РФ на основании доводов, приведенных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи, принимая во внимание условия договоров, поэтапный порядок сдачи, ввод объекта работ в эксплуатацию для наступления срока исполнения обязанности по оплате не требуется, акты выполненных работ, подписанные со сторонами без замечаний, доказательств некачественного выполнения работ в материалы дела не представлено, довод ответчика об отсутствии потребительской ценности результата работ суд признает необоснованным, а также учитывая, что ответчик не представил доказательства исполнения своих обязательств по оплате выполненных работ, исковые требования о взыскании 75 541 823,72 руб. задолженности следует признать правомерными, обоснованными и подлежащим удовлетворению. 

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. 

Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Соглашение о неустойке предусмотрено пункте 9.2. договоров № 00-0009/2022 РДПДР от 17.01.2022, 00-0657/2020 РДПДР от 10.11.2020, 00-0658/2020 РДПДР от 10.11.2020, 00-0659/2020 РДПДР от 10.11.2020, 00-0660/2020 РДПДР от 10.11.2020, 00-0661/2020 РДПДР от 10.11.2020, 00-0695/2020 РДПДР от 19.11.2020, 00-0696/2020 РДПДР от 19.11.2020, 00-0697/2020 РДПДР от 19.11.2020, 00-00698/2020 РДПДР от 19.11.2020, 00-0699/2020 РДПДР от 19.11.2020, 00-0775/2021 ПДР от 17.11.2021 в соответствии с которым за нарушение заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по договору, подрядчик имеет право начислить заказчику пени в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 % от просроченной суммы платежа. 

Согласно расчету истца, размер неустойки по состоянию на 17.07.2024 составил 16 052 304,63 руб. При расчете неустойки учтены правила действующего в 2022 году моратория на начисление неустоки.

Поскольку просрочка ответчика по оплате подтверждается материалами дела, арбитражный суд считает требование о взыскании неустойки правомерным. 

Ответчик заявил об уменьшении неустойки на основании статьи 333 ГК РФ, в обоснование заявления сослалось на свою социальную значимость, тяжелое материальное положение. 

Согласно статье 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. 

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, выполнения ответчиком социально значимых функций, сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки (пункт 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"). 

Ответчик не представил в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации (далее – АПК РФ) доказательств несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора, поэтому суд отклонил заявление об уменьшении неустойки по этому основанию.

Ответчик, возражая против взыскания заявил о зачете встречных требований, указав, что обязательства могут быть прекращены полностью путем предъявления к зачету неустойки начисленной Заказчиком за нарушение срока выполнения работ Подрядчиком. 

Ознакомившись с представленным ответчиком расчетом неустойки, суд установил следующее.

По договору № 00-0009/2022 РДПДР от 17.01.2022.

По заявкам № 00-0009/2022 РДПДР-2, 00-0009/2022 РДПДР-3, 00-0009/2022 РДПДР-4, 00-0009/2022 РДПДР-5, 00-0009/2022 РДПДР-11, 00-0009/2022 РДПДР-14, 00-0009/2022 РДПДР-17 истец осуществляет расчет неустойки по дату фактического окончания работ по заявке – дата последнего подписанного сторонами акта о сдаче выполненных работ по заявке, поскольку именно их подписание обусловливает исполнение обязательств Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

Работы по заявкам № 00-0009/2022 РДПДР-12, 00-0009/2022 РДПДР-15, 00-0009/2022 РДПДР-16 приостановлены на основании письма истца № 826 от 15.11.2022. Период приостановки работ не засчитывается в общий срок производства работ, после приостановления работ неустойка не начисляется.

Истец пояснил, что имела место просрочка кредитора в виде долго согласования опросных листов на проектирование по заявке № 00-0009/2022 РДПДР-12. Ответчик изложенные истцом доводы и представленные доказательства не опроверг.

По договору № 00-0657/2020 РДПДР от 10.11.2020. 

По заявкам № 00-0657/2020 РДПДР-8, 00-0657/2020 РДПДР-9, 00-0657/2020 РДПДР-10, 00-0657/2020 РДПДР-11, 00-0657/2020 РДПДР-13, 00-0657/2020 РДПДР-14, 00-0657/2020 РДПДР-15 истец осуществляет расчет неустойки по дату фактического окончания работ по заявке – дата последнего подписанного сторонами акта о сдаче выполненных работ по заявке, поскольку именно их подписание обусловливает исполнение обязательств Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

 

Работы по заявке № 00-0657/2020 РДПДР-17 приостановлены на основании письма истца № 826 от 15.11.2022. Период приостановки работ не засчитывается в общий срок производства работ, после приостановления работ неустойка не начисляется.

По договору № 00-0658/2020 РДПДР от 10.11.2020. 

Работы по заявке 00-0658/2020 РДПДР-2 приостановлены на основании письма истца № 826 от 15.11.2022. Период приостановки работ не засчитывается в общий срок производства работ, после приостановления работ неустойка не начисляется.

По заявке № 00-0658/2020 РДПДР-4 стороны заключили дополнительное соглашение № 1/4, которым согласовали новый конечный срок выполнения работ по такой заявке. Просрочка Подрядчика отсутствует. 

По заявке № 00-0658/2020 РДПДР-6 стороны заключили дополнительное соглашение № 2/6, которым согласовали новый конечный срок выполнения работ по такой заявке. Просрочка Подрядчика отсутствует. 

По договору № 00-0659/2020 РДПДР от 10.11.2020. 

По заявкам № 00-0659/2020 РДПДР-5, 00-0659/2020 РДПДР-6, 00-0659/2020 РДПДР-7, 00-0659/2020 РДПДР-8, 00-0659/2020 РДПДР-12 истец осуществляет расчет неустойки по дату фактического окончания работ по заявке – дата последнего подписанного сторонами акта о сдаче выполненных работ по заявке, поскольку именно их подписание обусловливает исполнение обязательств Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

Работы по заявкам № 00-0659/2020 РДПДР-10, 00-0659/2020 РДПДР-14, 00-0659/2020 РДПДР-16 приостановлены на основании письма истца № 826 от 15.11.2022. Период приостановки работ не засчитывается в общий срок производства работ, после приостановления работ неустойка не начисляется.

Истец пояснил, что имела место просрочка кредитора в виде несвоевременного предоставления необходимых исходных данных по заявкам № 00-0659/2020 РДПДР-14 и № 00-0659/2020 РДПДР-16. Ответчик изложенные истцом доводы и представленные доказательства не опроверг.

По договору № 00-0660/2020 РДПДР от 10.11.2020. 

Работы по заявке 00-0660/2020 РДПДР-3 приостановлены на основании письма истца № 826 от 15.11.2022. Период приостановки работ не засчитывается в общий срок производства работ, после приостановления работ неустойка не начисляется.

По договору № 00-0661/2020 РДПДР от 10.11.2020. 

Работы по заявке 00-0661/2020 РДПДР-12 приостановлены на основании письма истца № 826 от 15.11.2022. Период приостановки работ не засчитывается в общий срок производства работ, после приостановления работ неустойка не начисляется.

По договору № 00-0695/2020 РДПДР от 19.11.2020.

По заявкам № 00-0695/2020 РДПДР-5, 00-0695/2020 РДПДР-6, 00-0695/2020 РДПДР-8, 00-0695/2020 РДПДР-9, 00-0695/2020 РДПДР-11, 00-0695/2020 РДПДР-12, 00-0695/2020 РДПДР-16, 00-0695/2020 РДПДР-18 истец осуществляет расчет неустойки по дату фактического окончания работ по заявке – дата последнего подписанного сторонами акта о сдаче выполненных работ по заявке, поскольку именно их подписание обусловливает исполнение обязательств Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

Работы по заявкам № 00-0695/2020 РДПДР-7, 00-0695/2020 РДПДР-14, 00-0695/2020 РДПДР-19, 00-0695/2020 РДПДР-20, 00-0695/2020 РДПДР-21 приостановлены на основании письма истца № 826 от 15.11.2022. Период приостановки работ не засчитывается в общий срок производства работ, после приостановления работ неустойка не начисляется.

Истец пояснил, что имела место просрочка кредитора в виде несвоевременного предоставления необходимых исходных данных по заявкам № 00-0695/2020 РДПДР-14, № 00-0695/2020 РДПДР-20, 00-0695/2020 РДПДР-21. Ответчик изложенные истцом доводы и представленные доказательства не опроверг.

По договору № 00-0696/2020 РДПДР от 19.11.2020. 

По заявкам № 00-0696/2020 РДПДР-3, 00-0696/2020 РДПДР-5, 00-0696/2020 РДПДР-6 истец осуществляет расчет неустойки по дату фактического окончания работ по заявке – дата последнего подписанного сторонами акта о сдаче выполненных работ по заявке, поскольку именно их подписание обусловливает исполнение обязательств Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

Работы по заявке № 00-0696/2020 РДПДР-10 приостановлены на основании письма истца № 826 от 15.11.2022. Период приостановки работ не засчитывается в общий срок производства работ, после приостановления работ неустойка не начисляется.

Истец пояснил, что имела место просрочка кредитора в виде несвоевременного предоставления необходимых исходных данных по заявкам № 00-0696/2020 РДПДР-10. Ответчик изложенные истцом доводы и представленные доказательства не опроверг.

По договору № 00-0697/2020 РДПДР от 19.11.2020.

По заявкам № 00-0697/2020 РДПДР-2, 00-0697/2020 РДПДР-4, 00-0697/2020 РДПДР-13, 00-0697/2020 РДПДР-14, 00-0697/2020 РДПДР-15, 00-0697/2020 РДПДР-18 истец осуществляет расчет неустойки по дату фактического окончания работ по заявке – дата последнего подписанного сторонами акта о сдаче выполненных работ по заявке, поскольку именно их подписание обусловливает исполнение обязательств Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

Работы по заявкам 00-0697/2020 РДПДР-11, 00-0697/2020 РДПДР-16, 00-0697/2020 РДПДР-20, 00-0697/2020 РДПДР-24 приостановлены на основании письма истца № 826 от 15.11.2022. Период приостановки работ не засчитывается в общий срок производства работ, после приостановления работ неустойка не начисляется.

По договору № 00-00698/2020 РДПДР от 19.11.2020.

Работы по заявкам № 00-0698/2020 РДПДР-3, 00-0698/2020 РДПДР-4, 00-0698/2020 РДПДР-5, 00-0698/2020 РДПДР-6, 00-0698/2020 РДПДР-7 истец осуществляет расчет неустойки по дату фактического окончания работ по заявке – дата последнего подписанного сторонами акта о сдаче выполненных работ по заявке, поскольку именно их подписание обусловливает исполнение обязательств Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

В техническое задание к заявке № 00-0698/2020 РДПДР-5 Заказчиком вносились изменения, что также повлияло но сроки выполнения работ.

По договору № 00-0699/2020 РДПДР от 19.11.2020.

Работы по заявкам № 00-0699/2020 РДПДР-1, 00-0699/2020 РДПДР-2 истец осуществляет расчет неустойки по дату фактического окончания работ по заявке – дата последнего подписанного сторонами акта о сдаче выполненных работ по заявке, поскольку именно их подписание обусловливает исполнение обязательств Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

Работы по заявкам № 00-0699/2020 РДПДР-5, 00-0699/2020 РДПДР-6, 00-0699/2020 РДПДР-7, 00-0699/2020 РДПДР-9, 00-0699/2020 РДПДР-10 приостановлены на основании письма истца № 826 от 15.11.2022. Период приостановки работ не засчитывается в общий срок производства работ, после приостановления работ неустойка не начисляется.

По заявке № 00-0699/2020 РДПДР-3 стороны заключили дополнительное соглашение № 1/3, которым согласовали новый конечный срок выполнения работ по такой заявке. Просрочка Подрядчика отсутствует. 

По заявке № 00-0699/2020 РДПДР-4 стороны заключили дополнительное соглашение № 2/4, которым согласовали новый конечный срок выполнения работ по такой заявке. Просрочка Подрядчика отсутствует. 

Истец пояснил, что имела место просрочка кредитора в виде несвоевременного предоставления необходимых исходных данных по заявкам № 00-0699/2020 РДПДР-6, 00-0699/2020 РДПДР-7, 00-0699/2020 РДПДР-9, 00-0699/2020 РДПДР-10. Ответчик изложенные истцом доводы и представленные доказательства не опроверг.

По договору № 00-0775/2021 ПДР от 17.11.2021.

По заявке 00-0775/2021 истец осуществляет расчет неустойки по дату фактического окончания работ по заявке – дата последнего подписанного сторонами акта о сдаче выполненных работ по заявке, поскольку именно их подписание обусловливает исполнение обязательств Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

Суд полагает, что приведенные истцом доводы могут свидетельствовать о наличии оснований для снижения неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ. 

К правоотношениям сторон могут быть применены условия о равноценном размере ответственности за нарушение обязательств по договору подряда. Исходя из стоимости работ (цена договора), на которую начислялась неустойка, периода начисления неустойки, факта выполнения работ, начисления неустойки на общую цену договора подряда без учета надлежащего исполнения части работ, учитывая период приемки работ, объективных причин просрочки, не симметричной ответственности Заказчика и Подрядчика по договорам подряда, суд полагает возможным снизить размер начисленной Заказчиком неустойки, до соразмерного допущенному Подрядчиком нарушению обязательства, что позволит сохранить баланс интересов сторон, платежеспособность Подрядчика (в интересах Заказчика, как кредитора) в целях завершения работ, производство по которым приостановлено.

Применение правил ст. 333 ГК РФ не затрагивает право должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьями 404-406 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. В силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Подрядчиком приведены доводы и расчет количества дней просрочки Заказчика, который не оспорен им.

Пунктом 1 статьи 719 ГК РФ установлено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ). 

По смыслу пункта 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик при обнаружении не зависящих от него обстоятельств, которые создают невозможность завершения работы в срок, обязан направить уведомление о приостановлении работ заказчику и до получения от него указаний приостановить их исполнение.

Подрядчиком представлены доказательства приостановления выполнения работ в порядке положений статьи 716 ГК РФ.

Суд установил, что Заказчиком неправильно определен период начисления неустойки, поскольку в период приостановления работ не неустойка за несоблюдение сроков выполнения работ не начисляется.

Принимая во внимание указанные факты, суд полагает возможным снизить размер ответственности Подрядчика на основании статей 333, 404-406 ГК РФ до 7 593 853,60 рублей.

Как установлено статьей 410 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. 

Согласно пункту 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" если срок исполнения активного и пассивного требований наступил до заявления о зачете, то обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения обязательства (или возможности досрочного исполнения пассивного обязательства), который наступил позднее, независимо от дня получения заявления о зачете. 

При этом в абзаце 2 пункта 19 названного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации разъяснено, что обязательства могут быть прекращены зачетом после предъявления иска по одному из требований. В этом случае сторона по своему усмотрению вправе заявить о зачете как во встречном иске (статья 132 АПК РФ), так и в возражении на иск, юридические и фактические основания которых исследуются судом равным образом (часть 1 статьи 64, части 1-3.1 статьи 65, часть 7 статьи 71, часть 1 статьи 168, части 3, 4 статьи 170 АПК РФ). В частности, также после предъявления иска ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и указать в возражении на иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, зачетом. 

Из приведенных норм права и разъяснений вытекает право ответчика на зачет своих встречных однородных требований к истцу непосредственно в ходе рассмотрения судом спора о взыскании задолженности ответчика путем заявления довода о зачете, который может содержаться в возражении на иск. 

Поскольку заявление о зачете встречных однородных требований соответствует требования действующего законодательства, условиям договоров, суд пришел к выводу о том, что денежное обязательства ответчика на сумму 7 593 853,60 руб. по оплате неустойки  прекращено путем зачета встречных однородных требований. 

Таким образом, поскольку ответчик допустил просрочку оплаты выполненных работ, принимая во внимание произведенный зачет встречных требований, арбитражный суд считает, что исковые требования в части взыскании неустойки подлежат удовлетворению в размере 8 458 451,03 руб. В остальной части следует отказать. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на сторон, пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с акционерного общества "ЛОЭСК-электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СпецЭнергоСервис" 75 541 823,72 руб., 8 458 451,03 руб. неустойки, 183 418 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сурков А. А.