АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600, г. Калуга, пл. Старый Торг, 4; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: arbitr@kaluga.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А23-8961/2019

05 июня 2020 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен 05 июня 2020 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Погонцева М.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», 249400, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к индивидуальному предпринимателю ФИО2,

об обязании устранить недостатки выполненных работ,

УСТАНОВИЛ:

Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» обратилась в Арбитражный суд Калужской области к ФИО2 с иском  об обязании устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту, в период гарантийного срока.

            Стороны  в судебное заседание не явились, с учетом положений ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. Согласно ст. 156 указанного кодекса дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

             Ответчик в отзыве на исковое заявление от 27.01.2020 указал, что готов устранить недостатки выполненных работ в срок до 30.05.2020.

Изучив материалы дела и дополнительно представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из имеющихся доказательств, между Администрацией муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (Заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 10.08.2017 № 0137300021217000081-0158692-01/157-17, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на проведение работ по благоустройству территории многоквартирных.

В соответствии со ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Применительно к норме ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в п. 3.1. контракта срок выполнения работ определен сторонами в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

В соответствии с условиями разделов 2, 6, контракта и порядком, установленным ч. 1 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, приемке и оплате подлежат полностью законченные работы, принятые по акту приемки выполненных работ.

Так, по актам приемки выполненных работ от 25.10.2017, от 05.12.2017 № 98 (л.д. 30-39) Подрядчиком сданы, а Заказчиком приняты выполненные в рамках муниципального контракта от 10.08.2017 № 0137300021217000081-0158692-01/157-17 работы по благоустройству дворовой территории ул. III Интернационала, д. 29, г. Людиново.

При этом в соответствии с условиями раздела 8 контракта Подрядчик гарантирует надлежащее качество  используемых новых материалов (с характеристиками согласно Приложению № 2), соответствие их государственным стандартам. Использование новых сертифицированных (имеющих декларацию в соответствии) (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ) материалов, имеющих документы, подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды.

 Ссылаясь на обнаружение недостатков выполненных работ по ремонту дворовой территории по ул. III Интернационала, д. 29, г. Людиново у подъезда № 4 и № 5, заключающихся в скапливание и удерживании воды, после выпадения осадков, препятствовавшая движению пешеходов,  оставление ответчиком без ответа претензии об устранении этих недостатков от 17.09.2019 № 901/п-19, истец обратился в суд с данным иском, в котором просит обязать ответчика устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту, в период гарантийного срока, обеспечить отведение дождевых и талых вод с территории проезда.

             Суд, оценивая заявленное требование в совокупности с обстоятельствами, нашедшими подтверждение в материалах дела, исходит из следующего.

На основании ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно ст. 310 указанного кодекса односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В силу ст. 722 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (п. 1 ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом на основании нормы ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

По условиям раздела 8 контракта, предусматривающего гарантированные Подрядчиком обязательства, связанные с качеством выполненных работ, гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет  с даты подписания окончательного акта приемки-передачи выполненных работ по форме кс-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

Если в период гарантийного срока будут обнаружены дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные сторонами сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от "муниципального заказчика" (п. 8.1.4. контракта). 

17.09.2019 в адрес ответчика было направлено уведомление о необходимости устранить выявленные нарушения.

Вместе с тем, до настоящего времени доказательств исправления выявленных в пределах гарантийного срока недостатков работ суду не представлено, претензия от 17.09.2019 № 901/п-19 оставлены ответчиком без ответа.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, принятые на себя ответчиком обязательства по выполнению работ, условия этих работ, отраженные в техническом задании, их соотносимость с выявленными истцом недостатками и дефектами, обращение истца с требованием об устранении выявленных недостатков в пределах установленного гарантийного срока, отсутствие доказательств устранения выявленных недостатков, суд находит заявленные требования об их устранении обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно положениям ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании ст. ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика ввиду удовлетворения иска и подлежат взысканию в доход федерального бюджета в связи с освобождением истца от её уплаты.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту, расположенного по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул.3-Интернационала, д. 29 между подъездами № 5 и № 4, обеспечить отведение дождевых и талых вод с территории проезда.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья

М.И. Погонцев