АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Барнаул                                                                                                Дело № А03-10813/2023

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 февраля 2024 года

Решение изготовлено в полном объеме 05 марта 2024 года

 

Арбитражный суд  Алтайского края в составе судьи Ланды О.В., 

при ведении протокола помощником судьи Фрис О.В. с использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению главы крестьянского  (фермерского) хозяйства ФИО1 (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) 

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 660021 

<

...>)

об обязании исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения №20.2200.2790.22 в срок не позднее 01.08.2023, возмещении убытков понесенных в соответствии с вынужденной арендой генератора,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Эльграна», г.Кемерово (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, доверенность от 30.05.2023, паспорт, диплом, 

от ответчика –  ФИО3 доверенность №00/113/22/101 от 28.04.2022, удостоверение №22062, диплом. 

 

УСТАНОВИЛ:

Глава крестьянского  (фермерского) хозяйства ФИО1 (далее - истец, предприниматель) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» (далее - ответчик, общество, сетевая организация) об обязании исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения №20.2200.2790.22 в срок не позднее 01.08.2023, о взыскании 834 166 руб. 67 коп. убытков с учетом уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), понесенных в соответствии с вынужденной арендой генератора в период с 04.06.2023 по 06.11.2023.

В обоснование исковых требований указано на нарушение сетевой организацией сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, что повлекло причинение убытков истцу в виде несения арендной платы за дизельный генератор ввиду невозможности использования электроэнергии.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме, вследствие технологического присоединения объекта отказался от требования в части обязания выполнения мероприятий.

Ответчик возражал относительно удовлетворения требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, ссылался на нарушение сроков выполнения мероприятий заявителем. По его мнению, обязательства заявителя являются встречными по отношению к обязанности сетевой организации выполнить технические условия, не являются взаимозависимыми. Точка присоединения указана в технических условиях. Полагает, что истец был осведомлен о сроках выполнения мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны, однако не принял соответствующих мер для исполнения обязательства. Соответственно, убытки у истца возникли независимо от выполнения мероприятий ответчиком по договору.

К участию в деле с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Эльграна», г.Кемерово (далее - ООО «Эльграна»).

Учитывая надлежащее извещение третьего лица о времени и месте проведения судебного заседания, дело рассматривается без участия его представителя.

Выслушав представителей сторон, участвующих в судебном заседании, изучив материалы дела, проанализировав обстоятельства спора и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

03.06.2022 между сетевой организацией и предпринимателем заключен договор  № 20.2200.2790.22 об осуществлении технологического присоединения, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств  заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт;

 категория надежности третья;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

 максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно пункту 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Объект крестьянского (фермерского) хозяйства», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, район Усть-Калманский, в 3,8 км на северо-запад от с. Огни, кадастровый номер земельного участка 22:54:040101:1441.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора, то есть до 03.06.2023.

По условиям договора сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанных в технических условиях;

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

- разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

-  в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем ФИО4 организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; 

- составить в электронной форме и разместить в личном кабинете Заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения;

-  уведомить Заявителя о составлении и размещении в личном кабинете Заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Заявитель по условиям договора обязуется:

-  надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе    по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по       технологическому присоединению до     точки            присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанных в технических условиях;

- своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до           точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена Заявителем в Сетевую организацию до направления Заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если            в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

Согласно пункту 16 договора каждая из сторон несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств.

В соответствии с пунктом 7 технических условиях № 8000501848 точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

1 точка присоединения: максимальная мощность 150 кВт.

Линия (0,4)    Проектируемая, ТП  Проектируемая, Линия (3/6/10) Проектируемая, Линия (3/6/10) Л-12-8 с. Ново-Калманка, Ячейка ПС Л-12-8 с. Ново-Калманка, ПС     ПС «Огневская» №12.  Основной источник питания: ПС «Огневская» №12

Согласно техническим условиям сетевая организация осуществляет:

10.1 Организационные мероприятия:

10.1.1  Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

10.1.2 Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

10. 2 Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

10.2.1 Запроектировать и построить ТП 10 кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом;

10.2.2 От точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение провода определить проектом:

10.2.3 От проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами Заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

10.2.4 Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре Л-12-8 с. Ново-Калманка. Тип и место установки разъединителя определить проектом;

10.2.5  Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

В соответствии с пунктом 11 технических условия заявитель осуществляет:

11.а. Ввод от РУ 0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП;

11б. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

11.1 Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети ПАО "Россети Сибирь": 

разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;

11.4 Требования по согласованию проектной документации с ФИО4 организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством;

11.5 Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок:

 после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю ФИО4 организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Ссылаясь на нарушение сроков выполнения мероприятий со стороны сетевой организации, начало уборочной кампании с 25.07.2023, истцом был заключен договор от 29.05.2023 аренды оборудования дизельного генератора с ООО «Эльграна» (арендная плата в сутки 7 000 руб.).

Наличие убытков в связи с оплатой арендных платежей, невыполнение обязательств по технологическому присоединению послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

При рассмотрении дела установлено, что во исполнение обязательств по договору сетевой организацией разработаны технические условия, являющиеся необъемлемой частью договора.

В октябре 2022 года сетевой организацией выполнен рабочий проект на строительство ВЛ-10кВ Л-12-8, строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроустановки объекта истца, в котором, в том числе имеется план трассы.

Работы по строительству ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ, КТП выполнены сетевой организацией в сентябре 2023 года, что подтверждается актами выполненных работ от 30.09.2023 хозяйственным способом.

26.10.2023 составлен акт допуска в эксплуатацию прибора учета (л.д. 50-53, том 2).

27.10.2023 сетевой организацией подготовлены и подписаны акты о выполнении технических условий, об осуществлении технологического присоединения (л.д. 54-58, том 2), размещены в личном кабинете заявителя. 

Ответчик, не оспаривая нарушение сроков выполнения мероприятий со своей стороны, сослался на нарушение сроков выполнения мероприятий заявителем.

Так, согласно пункту 11.1 технических условий заявитель обязан разработать  проектную документацию в границах земельного участка заявителя.

25.09.2023 предприниматель обратился к сетевой организации с заявкой на разработку проектной документации по строительству ВЛ-0,4 кВ, длиной 1 км по адресу: Алтайский край, Усть-Калманский район, в 3,8 км на северо-запад от с. Огни, кадастровый номер земельного участка 22:54:040101:1441, которая была исполнена 01.11.2023, что подтверждается актом приема-передачи работ №7800751650.

Уведомление о выполнении истцом мероприятий было направлено в адрес сетевой организации только 07.11.2023 (л.д. 68, том 2).

Дополнительно, из пояснений ответчика следовало, что в пункте 10.2.3. технических условий указано, что от проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами Заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Таким образом, ФИО1 для разработки проектной документации по строительству ВЛ-0,4 кВ достаточно было знать расположение границы своего земельного участка (з.у.) и к этой границе запроектировать ВЛ-0,4 кВ. Проектную документацию согласовать с ПАО «Россети» пункт 11.4 ТУ №8000501848. Более того, ФИО1 знала, где будут размещены проектируемые ВЛ-10 кВ, ВЛ- 0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ. Строительство проектируемых ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, размещение КТП-10/0,4 кВ согласовывалось с собственником земельного участка к.н. 22:54:040101:1121 ФИО5. Данный земельный участок арендует ФИО1, непосредственно с ней решались все вопросы о размещении проектируемых ВЛ-10кВ, ВЛ- 0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ. На ее электронную почту Agent2711 @mail.ru были направлены документы на подпись для ФИО5 Таким образом, у истца имелась возможность разработать проектную документацию по строительству ВЛ 0,4 кВ до момента выполнения мероприятий сетевой организацией, поскольку ни договор, ни технические условия не содержат положений, устанавливающих очередность осуществления сторонами предусмотренных мероприятий (как со стороны сетевой организации - пункт 10 технических условий, так и со стороны заявителя - пункт 11 технических условий). Кроме того, нормы действующего законодательства в сфере технологического присоединения к электрическим сетям не ставят возможность выполнения мероприятий заявителем (за исключением фактического присоединения к электрической сети) в зависимость от выполнения мероприятий сетевой организацией.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (части 1, 2, 4 статьи 71 АПК РФ).

Исследовав и оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом.

По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), подпункт «е» пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

В связи с этим договор технологического присоединения представляет собой двусторонний возмездный консенсуальный синаллагматический (взаимный) договор, регулирование отношений по которому производится как специальным энергетическим законодательством, так и нормами главы 39 ГК РФ, а также общими положениями об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. За технологическое присоединение к электрическим сетям плата взимается однократно и ее размер устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий (далее - ТУ), обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, пункты 16, 17 Правил № 861).

На основании статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами статьи 15 ГК РФ.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Поскольку возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, поэтому ее применение возможно лишь при доказанности совокупности условий: ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств ответчика (противоправность действий (бездействия) причинителя убытков); причинная связь между ненадлежащим исполнением или неисполнением ответчиком обязательств (противоправными действиями (бездействием) и убытками); наличие и размер понесенных убытков.

При отсутствии хотя бы одного из условий возмещение убытков исключается.

При этом вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

 В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В рассматриваемом случае основанием для обращения предпринимателя в арбитражный суд явилось нарушение сетевой организацией срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Из материалов дела следует, что при согласованном сторонами сроке выполнения сторонами мероприятий до 03.06.2023 заявитель свою часть мероприятий по технологическому присоединению выполнил 07.11.2023 (дата направления заявителем уведомления о выполнении технических условий сетевой организации и последующее их принятие последней).

Следовательно, заявителем также допущено нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленного в договоре.

Обязательства истца и ответчика по настоящему договору являются встречными по отношению к друг другу, что имеет существенное значение для разрешения настоящего спора, так как просрочка исполнения обязательств по договору, допущенная заявителем (статья 406 ГК РФ), устранена им только 07.11.2023, однако к указанному сроку сетевой организацией мероприятия со своей стороны выполнены в полном объеме.

Находясь в ситуации взаимной просрочки в рамках синаллагматической договорной связи у сторон не возникает право на привлечение друг друга к ответственности за допущенное встречное неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательства, поскольку требование об исполнении обязательства из договора возможно постольку, поскольку остается возможным исполнение взаимного обязательства, а потребовать взаимного исполнения можно, лишь приступив к собственному.

Взаимодействие сторон в рамках договора о технологическом присоединении, обеспеченное взаимной ответственностью, предполагает своевременное выполнение каждой стороной своей части мероприятий, а будучи неисправным контрагентом последний не может требовать с другого оплатить санкцию за его неисправность.

Приведенный подход согласуется с установленным пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» стандартом добросовестного поведения хозяйствующего субъекта в гражданском обороте, основанном на принципе ожидаемости, то есть предсказуемости действий субъекта, ведущего себя так же, как любое другое лицо, действующее сообразно доброй совести и разумной осмотрительности в делах.

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика (статья 759 ГК РФ).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 36 - 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств», обязанность стороны в этом случае прекращается в силу объективной невозможности исполнения, наступившей после возникновения обязательства и имеющей неустранимый (постоянный) характер, если эта сторона не несет риск наступления таких обстоятельств. По смыслу статьи 416 ГК РФ невозможность исполнения является объективной, когда по обстоятельствам, не зависящим от воли или действий должника, у него отсутствует возможность в соответствии с законом или договором исполнить обязательство как лично, так и с привлечением к исполнению третьих лиц.

Доказательств обращения за разработкой проектной документации в границах своего земельного участка в пределах сроков выполнения мероприятий истец не представил, как и не представил доказательств невозможности выполнения мероприятий в этой части.

В случае возникновения вопросов относительно точки присоединения истец имел возможность обратиться за разъяснениями к сетевой организации, запросить дополнительную информацию.

Доказательств невозможности выполнения истцом обязательств по исполнению мероприятий по технологическому присоединению до момента выполнения сетевой организацией суду не представлено.

 Исходя из буквального содержания пункта 16 Правил технологического присоединения, следует, что срок, установленный для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, носит императивный характер и изменению не подлежит. Данными Правилами не предусмотрена очередность выполнения мероприятий сторон договора, соответственно, все работы, как со стороны заявителя, так и сетевой организации должны вестись одновременно и должны быть закончены к установленному в договоре о технологическом присоединении сроку. Исполнение одной из сторон своих обязательств по договору не может зависеть от исполнения обязательств другой стороной, поскольку истец обязался выполнить работы в пределах границ своего, ответчик за пределами этого участка, соответственно, данные работы должны были выполняться независимо друг от друга.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела указанные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о недоказанности заявителем объективной невозможности выполнения в установленный срок мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны, приходит к выводу о недоказанности причинно-следственной связи между возникшими убытками и действиями сетевой организации.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения иска в части взыскания убытков суд не находит.

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Принимая во внимание, что отказ истца от иска в части обязания выполнить мероприятия, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд принимает отказ от заявленных требований и прекращает производство по делу по пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ в указанной части.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины в части требования о взыскании убытков суд относит на истца, в части требования об обязании выполнения мероприятий - на ответчика (добровольное удовлетворение требований после обращения с иском в суд).

Руководствуясь статьями 27, 49, 110, 150, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л

 

Производство по делу в части требования об обязании исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения № 20.2200.2790.22 прекратить в связи с отказом истца от иска.

В удовлетворении иска о взыскании убытков отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» в пользу главы крестьянского  (фермерского) хозяйства ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.

Взыскать с главы крестьянского  (фермерского) хозяйства ФИО1 в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в сумме 19 223 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                         О.В.Ланда