АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-14779/2024

26 декабря 2024 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2024 года

В полном объеме решение изготовлено 26 декабря 2024 года

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шмакова Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ребрий Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании исковым заявлением администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройбазис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Строительный контроль автомобильных дорог и искусственных сооружений» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 по доверенности от 13.05.2024 (паспорт);

УСТАНОВИЛ:

Администрация Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация, истец) обратилась в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Стройбазис»  (далее – ООО «Стройбазис», ответчик) о возложении обязанности по исполнению гарантийных обязательства в рамках муниципальных контрактов от 04.08.2023 № 1, от 25.09.2023 № 2, а именно: устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока на автомобильной дороге, расположенной по ул. Ленина в с. Пушкино Омского муниципального района Омской области, вблизи домов под номерами 2/8, 18/2, 20/2, 24, 99а, 116 в виде разрушения покрытия участками площадью 50 кв.м., продольных и поперечных трещин асфальтового покрытия, а также сетки трещин площадью 1,2 кв.м. в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Определением от 11.09.2024 исковое заявление принято к производству суда, назначено предварительное судебное заседание.

Протокольным определением суда от 10.10.2024 дело назначено к судебному разбирательству.

Определением Арбитражного суда Омской области от 25.11.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Строительный контроль автомобильных дорог и искусственных сооружений».

До судебного заседания от истца поступило уточнение исковых требований, в новой редакции Администрация просила устранить недостатки в срок до 30 мая 2025 года.

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные исковые требования в полном объеме. Представитель ответчика, третьего лица в судебное заседание не явились.

Руководствуясь статьями 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд рассмотрел дело по имеющимся доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

Между Администрацией (заказчик) и ООО «Стройбазис» (подрядчик) заключен муниципальный контракт от 25.09.2023 № 2 (далее – контракт).

В соответствии с пунктом 1.1-1.4 контракта подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по ремонту автомобильных дорог: по ул. Ленина (от д. 110 до д.124) в с. Пушкино Омского муниципального района Омской области; по ул. 40 лет Победы (от д.17 до д.28) с. Пушкино Омского муниципального района Омской области в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту (приложение № 2 к настоящему контракту) (далее соответственно - объект, работы) и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим контрактом.

Работы по настоящему контракту, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, выполняются подрядчиком, его иждивением - из его материалов (товаров), его силами и средствами, в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметные расчеты по ремонту), который является неотъемлемой частью контракта (приложение № 1 к настоящему контракту).

Место выполнения работ: 

<

...> (от д. 110 до д. 124) в с. Пушкино Омского муниципального района Омской области; по ул. 40 лет Победы (от д.17 до д.28).

Срок выполнения работ: начало срока выполнения работ - дата заключения настоящего контракта: окончание срока выполнения работ - в течение 30 дней с даты заключения муниципального контракта, в соответствии с графиком выполнения работ по ремонту (приложение № 2 к настоящему контракту). 

В силу пунктов 4.1, 4.2 контракта качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего контракта, в том числе требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем контракте и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим контрактом использования, в том числе для обычного использования результата работы такого рода.

Если законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по настоящему контракту, подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Гарантийные сроки на конструктивные элементы объекта, предусмотренные контрактом (далее - гарантийные сроки), устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным разделом 6 настоящего контракта. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), по форме согласно приложению настоящему контракту № 4, или № 5, или № 6 (далее - документ о приемке), а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Результат выполненных работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве.

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, распространяется на все составляющие результат работы.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата выполненной работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

В случае уклонения подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия подрядчика.

Если иной срок не будет определен сторонами в акте. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет (пункты 5.1-5.9, 5.12 контракта).

Согласно пунктам 6.1, 6.2 контракта гарантийный срок, принимаемый для слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте - 6 лет.

Гарантийные сроки для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги - 4 года.

Как указывает истец, работы сданы подрядчиком и приняты заказчиком согласно актам о приемке выполненных работ от 29.03.2023 № 22, от 11.10.2023 № 23, произведена оплата по платежным поручениям от 03.10.2023 № 455, от 12.10.2023 №№ 463, 464, от 24.10.2023 № 482.

Истцом после приемки работ в актах от 03.06.2024 №№ 1, 2 в с. Пушкино было произведено обследование участков отремонтированной автомобильной дороги. По результатам обследования были выявлены дефекты в виде разрушения покрытия участками площадью 50 кв.м, продольных и поперечных трещин асфальтового покрытия, а так же сетки трещин площадью 1,2 кв.м, что является гарантийным обязательством подрядчика в устранении данных нарушений (фото и акт прилагаются).

04.06.2024 ответчику была направлена претензия об устранении выявленных дефектов в срок до 20.07.2024, в ответ на которую ответчик направил письмо о том, что выявленные замечания являются результатом воздействия нанесенного неустановленными третьими лицами, в связи с чем гарантийные обязательства не применимы.

Таким образом, ответчик до настоящего времени никаких действий не предпринял, гарантийных обязательств не выполнил.

Оценив представленную совокупность доказательств в порядке статьи 71 АПК РФ, суд усматривает основания для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

По смыслу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) основанием возникновения гражданских прав и обязанностей является, в том числе, заключение договора.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно статьям 721, 722 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Как следует из статьи 755 ГК РФ, подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Как указывалось ранее, выполненные подрядчиком работы приняты заказчиком.

Наличие дефектов выполненных ответчиком работ подтверждено актами от 03.06.2024 №№ 1, 2.

При этом по смыслу вышеприведенных норм действует  презумпция ответственности подрядчика за выявленные заказчиком дефекты работ.

Доказательств, подтверждающих образование дефектов вследствие неправильного использования продукта работ истцом, а равно наличие иных освобождающих от гражданско-правовой ответственности обстоятельств судом не выявлено, презумпция вины подрядчика не опровергнута, возражения ответчиком не заявлены.

Требования об устранении дефектов заказчиком заявлены в пределах гарантийного срока, предписанного договором.

Процедура уведомления подрядчика соблюдена, претензии с требованием об устранении дефектов  направлены ответчику в разумный срок после приемки работ, требования истца не удовлетворены.

При таких обстоятельствах суд считает требование об обязании устранения недостатков работ правомерным.

Учитывая положения статьи 174 АПК РФ, суд полагает возможным установить срок для устранения недостатков до 30.05.2024 исходя из окончательной редакции исковых требований.

По правилам статьи 110 АПК РФ в связи с удовлетворением исковых требований и освобождением истца от уплаты государственной пошлины государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройбазис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам от 04.08.2023 № 1, от 25.09.2023 № 2 устранить в срок до 30 мая 2025 года выявленные недостатки, а именно: устранить дефекты на автомобильной дороге, расположеннойпо ул. Ленина в с. Пушкино Омского муниципального района Омской области вблизи домов под номерами 2/8, 18/2, 20/2, 24, 99а, 116 в виде разрушения покрытия участками площадью50 кв.м., продольных и поперечных трещин асфальтового покрытия, а также сетки трещин площадью 1,2 кв.м.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройбазис»(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня изготовления решения в полном объеме и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

Решение в полном объеме изготавливается в течение десяти дней, выполняется в соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в форме электронного документа путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьёй 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Судья                                                                                                         Г.В. Шмаков