именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-115205/24-53-1023

г. Москва

18 октября 2024 г.

Резолютивная часть объявлена 8 октября 2024 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Козлова В.Ф. единолично

протокол ведет секретарь судебного заседания Начвай И.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

федерального государственного бюджетного учреждения «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ БИОФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.И. БУРНАЗЯНА» (123098, Г.МОСКВА, УЛ. ЖИВОПИСНАЯ, Д. 46, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.03.2008, ИНН: 

<

***>)

к ответчику акционерному обществу «АВИАКОМПАНИЯ «УКТУС» (624003, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФИО1, ТЕР. АЭРОПОРТ УКТУС, ЗД. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2006, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 11 239 537 руб. 50 коп. по договору от 27.01.2020 №462/ФМБЦ/20

в заседании приняли участие представители:

от истца-  ФИО2 оп дов. от 21.08.2024 №7-С (диплом), ФИО3 по дов. от 29.12.2023 №1-С (диплом)

от ответчика-  ФИО4 оп дов. от 21.02.2024 (диплом), ФИО5 по дов. от 01.02.2024 №08 (диплом), ФИО6 по протоколу от 22.12.2023 (диплом)

установил:

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ФГБУ ГНЦ ФМБЦ ИМ. А.И. БУРНАЗЯНА ФМБА РОССИИ с иском к ответчику АО «АВИАКОМПАНИЯ «УКТУС» о взыскании 11 239 537 руб. 50 коп. неустойки за несвоевременное выполнения работ по капитальному ремонту воздушного судна и процентов.

Ответчик в отзыве против удовлетворения иска возражает по следующим основаниям: работы по замене регистратора выполнены и приняты по акту от 22.09.2020; ответчик обеспечил получение сертификата летной годности, и с 19.12.2022 истец имел возможность пользоваться судном; истец не учел действие мораториев в период с 01.04.2020 по 31.12.2020 и с 01.04.2022 по 01.10.2022; задержка ремонта двигателя вызвана отсутствием запасных частей.

Изучив доводы, исследовав доказательства, суд установил следующее.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) был заключен договор от 27.01.2020 №462/ФМБЦ/20, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту воздушного судна АН74ТК-100С.

В целях продления летной годности воздушного судна для его дальнейшей эксплуатации исполнитель обязуется в порядке и сроки, указанные в графике выполнения работ, предусмотренные контрактом, выполнить работы по капительному ремонту воздушного судна, в соответствии с техническим заданием, а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить выполненные работы. (п.1.1.)

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 12 месяцев. (п.1.3.)

По работе «замена регистратора «Марс-БМ» на регистратор с твердотельным накопителем» установлен срок выполнения работ: не позднее восьми месяцев с момента подписания контракта, то есть в срок до 27.09.2020.

Стоимость работ, превышающая авансовый платеж, оплачивается по факту выполнения каждого этапа работ, предусмотренных графиком в течение 30-ти дней, после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ  при условии предоставления оригиналов счета, счета-фактуры ,карт-нарядов, актов дефектов и иной документации, подтверждающей выполнение каждого заявленного вида работ согласно техническому заданию. (п.2.9)

Оплата по контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета заказчика на счет исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика. (п.2.10)

Работы по замене регистратора оплачены истцом по платежному поручению от 02.10.2020 № 671271 в размере 11 616 000 руб.

Исполнитель обязан выполнить работы надлежащего качества в объёме и в сроки, предусмотренные в техническом задании. (п.3.1.3.)

В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустойки (штрафов, пеней). (п.6.8.)

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем. (п.6.9)

Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств. (п.7.1.)

Согласно  техническому заданию объем работ включает в себя:

- Ремонт двигателей Д-36 № 708036423А001, № 708036233А003 – сроком выполнения не позднее шести месяцев с момента подписания контракта и стоимостью работ 17 000 000 руб. Работы выполнены и приняты в два этапа: акт приема-передачи от 22.09.2020 (работы на сумму 10 000 000 руб.) и от 05.12.2023 (работы на сумму  7 000 000 руб.)

- Замену основных аккумуляторных батарей (3шт) – сроком выполнения не позднее шести месяцев с момента подписания контракта и стоимостью работ 2 244 000 руб. Работы приняты по акту от 01.06.2023, из которого следует, что фактически работы выполнены 04.04.2023.

- Замену аккумуляторных батарей аварийного освещения (1шт)- сроком выполнения не позднее четырех месяцев с момента подписания контракта и стоимостью работ 696 000 руб. Работы приняты по акту от 05.12.2023

- Выполнение контрольно-восстановительных работ ВС согласно регламенту Ан-74ТК-100С №72.41.0000.000.000РО - сроком выполнения не позднее восьми месяцев с момента подписания контракта и стоимостью работ 54 634 800 руб. Работы приняты по акту приема-передачи от 20.08.2021 на сумму  8 915 005 руб.

Работы по замене регистратора стоимостью 11 616 000 руб. приняты по акту от 22.09.2020. В ходе проведения входного контроля выявлена неисправность блока вычисления, в связи с чем регистратор был демонтирован и возращен поставщику для устранения неисправности.

В письме от 28.01.2022 № 43 ответчик сообщил, что регистратор, после проверки исправности, будет доставлен к месту ремонта воздушного судна до 03.02.2022. В указанный срок и до дня судебного заседания регистратор не установлен.

Истец просит взыскать неустойку за просрочку выполнения работ и проценты за пользование денежными средствами, полученными за замену регистратора.

Суд признает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Отношения сторон урегулированы положениями общей части ГК РФ об обязательствах, главы 37 ГК РФ о подряде, условиями договора.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (ст. 309 ГК РФ). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, кредитор вправе требовать от должника уплаты неустойки (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65 АПК РФ).

Сроки выполнения работ указаны в договоре. Просрочка выполнения работ подтверждается актами.

Сумма неустойки за просрочку выполнения работ, с учетом моратория, объвленного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, составляет:

по работе ремонт двигателей - 4 185 066,67 руб. за период с 29.07.2020 по 05.12.2023;

по работе замена основных АКБ - 952 652,80 руб. за период с 29.07.2020 по 04.04.2023;

по работе замена АКБ аварийного освещения – 409 062,20 руб. за период с 29.05.2020 по 05.12.2023;

по работе выполнение контрольно-восстановительных работ подэтап «шасси» -  1 550 022,20 руб. за период с 29.09.2020 по 20.08.2021, всего 7 096 804,07 руб.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств (п. 2 ст. 1107 ГК РФ)

Сумма процентов за пользование денежными средствами, полученными за замену регистратора, составляет 2 446 741,17 руб. за период с 02.10.2020 по 15.12.2023 с учетом моратория.

Доказательства приостановки ответчиком работ по капитальному ремонту воздушного судна в период с 01.04.2020 по 31.12.2020 не представлены.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, требования о взыскании неустойки и процентов суд удовлетворяет в указанной части. Оснований для снижения неустойки суд не усматривает

Возражения ответчика суд отклонил: сертификатом летной годности подтверждается факт прохождения проверки соответствия ВС установленным требованиям, а не факт завершения капитального ремонта; установка подменного двигателя не равнозначна ремонту, так как передача права собственности на подменный двигатель при его установке не происходит.

Судебные расходы согласно ст. 110 АПК РФ относятся на стороны.

Руководствуясь ст. 9, 65, 71, 75, 102, 110, 167-171 АПК РФ, суд

решил:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «АВИАКОМПАНИЯ «УКТУС» в пользу федерального государственного бюджетного учреждения «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ БИОФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.И. БУРНАЗЯНА» 9 543 545 (девять миллионов пятьсот сорок три тысячи пятьсот сорок пять) руб. 24 коп., включая 2 446 741,17 руб. процентов, 7 096 804,07 руб. неустойки, а также взыскать 67 247 (шестьдесят семь тысяч двести сорок семь) руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                                       Козлов В.Ф.