112/2019-12018(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-13139/2018

г. Петрозаводск

26 февраля 2019 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. Обязать казенное учреждение Республики Карелия  «Управление капитального строительства Республики Карелия» подписать  Дополнительное соглашение № 3 к государственному контракту   № 2100104131518000100/2аэф-18 от 04.07.2018 на выполнение работ по  объекту: «Комплекс причальных и волнозащитных сооружений на  Онежском озере в Деревянской бухте» о приостановке работ до момента  прекращения действия обстоятельств, послуживших основанием для  приостановки работ по контракту в редакции Приложения № 1 к письму  общества с ограниченной ответственностью «Тандем проект» (. № 1111-ТП от  23.11.2018).  

 2. Продлить срок выполнения работ по государственному контракту  

 № 2100104131518000100/2аэф-18 от 04.07.2018 на выполнение работ по объекту  

«Комплекс причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в  

Деревянской бухте», установленный графиком производства работ (Приложение №  

2 к Контракту) и пунктом 9.1. Контракта, на срок не ранее 25 августа 2019 года.  

2. Взыскать с казенного учреждения Республики Карелия «Управление  капитального строительства Республики Карелия» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Тандем проект» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6000 руб.  расходов по оплате государственной пошлины.  

3. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

 Судья Колесова Н.С.