Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-3466/2019

27 августа 2019 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Артамоновой Л. И.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению Поселковой администрации Городского  поселения "Поселок Серебряный Бор" Нерюнгринского района (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Промышленно - строительная  компания "Вита" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить  гарантийные обязательства по муниципальным контрактам,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

иск Поселковой администрации Городского поселения "Поселок Серебряный Бор"  Нерюнгринского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с  ограниченной ответственностью Промышленно - строительная компания "Вита" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить гарантийные обязательства по  муниципальным контрактам удовлетворить.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Промышленно-строительная  компания «Вита» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) осуществить благоустройство  придомовой территории в соответствии с проектной документацией по муниципальным  контрактам: № 0116300037715000189 от 16.12.2015 года - многоквартирный дом № 14/1; №  0116300037715000190 от 16.12.2015 года - многоквартирный дом № 41/3; №  0116300037715000193 от 16.12.2015 года - многоквартирный дом № 15/1; №  0116300037715000194 от 16.12.2015 года - многоквартирный дом № 17/1; №  0116300037715000195 от 16.12.2015 года - многоквартирный дом № 16/1.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Промышленно-строительная  

компания «Вита» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), устранить выявленные  

замечания в соответствии с планами графиков устранения выявленных нарушений от  

17.05.2018 в месячный срок с момента вступления решения в силу: 

1. по муниципальному контракту № 0116300037715000195 от 16.12.2015 года -  

многоквартирный дом № 16/1 

- выполнить закрепление мягкой кровли в местах заведения на стены в области  

балконов, фонарей, парапетов; 

- заделать зазоры между вентиляционными шахтами и вентиляционными коробками  

на крыше многоквартирного дома; 

- выполнить косметический ремонт потолков во всех подъездах на третьих этажах  

многоквартирного дома; - сделать водосток с козырьков балконов, установить водоотливы; - очистить кровлю от строительного мусора; - выполнить отделку и остекление балконов; - окраска металлоконструкций пандусов; - выполнить оштукатуривание и отделку фасада. 

2. по муниципальному контракту № 0116300037715000194 от 16.12.2015 года -  

многоквартирный дом № 17/1 

- выполнить закрепление мягкой кровли в местах заведения на стены в области  

балконов, фонарей, парапетов; 

- заделать зазоры между вентиляционными шахтами и вентиляционными коробками  

на крыше многоквартирного дома; 

- выполнить косметический ремонт потолков во всех подъездах на третьих этажах  

многоквартирного дома; - делать водосток с козырьков балконов, установить водоотливы; - очистить кровлю от строительного мусора; - выполнить отделку и остекление балконов; - выполнить оштукатуривание и отделку фасада; - выполнить качественную установку розеток; - окраска металлоконструкций пандусов; 

- на всех этажах и всех подъездах заменить потресканные плитки пола на  

площадках. 

3. по муниципальному контракту № 0116300037715000193 от 16.12.2015 года -  

многоквартирный дом № 15/1 

- выполнить закрепление технопласта в местах заведения на стены в области  

балконов, фонарей, парапетов; 

- сделать водосток с козырьков балконов, установить водоотливы;  - очистить кровлю от строительного мусора;  

- выполнить отделку и остекление балконов; - окраска металлоконструкций пандусов; - выполнить оштукатуривание и отделку фасада; 

4. по муниципальному контракту № 0116300037715000189 от 16.12.2015 года -  

многоквартирный дом № 14/1 

- выполнить закрепление технопласта в местах заведения на стены в области  

балконов, фонарей, парапетов; 

- заделать зазоры между вентиляционными шахтами и вентиляционными коробками  

на крыше многоквартирного дома; 

- выполнить косметический ремонт потолков во всех подъездах на третьих этажах  

многоквартирного дома; 

- сделать водосток с козырьков балконов, установить водоотливы;  - очистить кровлю от строительного мусора;  

- выполнить отделку и остекление балконов; - выполнить оштукатуривание и отделку фасада; - выполнить качественную установку розеток; 

- выполнить отделочные работы квартиры № 9 дома 14/1, устранить причину  

намокания стен; 

- заменить оконный стеклопакет квартиры № 13 дома 14/1;  - привести систему вентиляции в рабочее состояние квартиры № 7 дома 14/1;  

- устранить причины протекания воды в ванной квартиры 18 дома 14/1 и выполнить  

косметический ремонт квартиры 18; - окраска металлоконструкций пандусов; 

- выполнить уклон крови к стоякам ливневой канализации.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Промышленно-строительная  

компания «Вита» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в месячный срок с момента  

вступления решения в силу устранить недостатки (дефекты) квартир в домах сданных  

ответчиком, обнаруженные в пределах гарантийного срока, согласно жалоб (заявлений)  жильцов:  

1. по муниципальному контракту № 0116300037715000189 от 16.12.2015 года -  многоквартирный дом № 14/1:  

- в квартире № 11 - устранить причину повышенной влажности в квартире и  намокания окон, отрегулировать систему отопления, отрегулировать дверь в ванной,  произвести косметический ремонт в связи с отслоением штукатурного слоя в коридоре,  заменить ванную;  

- в квартире № 13 - устранить причину намокания окон, заменить оконный блок в  спальне, заменить погнутый радиатор в спальне, отрегулировать систему отопления.  

- в квартире № 15 - устранить течь смесителя в ванной, отрегулировать балконную  дверь, отрегулировать систему отопления, провести проверку работоспособности проводки в  прихожей.  

- в квартире № 19 - отрегулировать оконные блоки, устранить причину промерзания.  

- в квартире № 23 - заменить входную дверь, заменить ванную, устранить причину  намокания стены в ванной комнате, отрегулировать работу вентиляционной системы,  отрегулировать работу сливного бочка в санузле, устранить причину появления наледи на  балконной двери, выполнить отливы окон с уклоном здания.  

- в квартирах № 16, 17 и 18: устранить причину промерзания окон, привести систему  вентиляции в рабочее состояние, устранить протечки из вентиляционных шахт, закрепить  ванну.  

2. по муниципальному контракту № 0116300037715000193 от 16.12.2015 года -  многоквартирный дом № 15/1:  

- в квартире № 13 - произвести монтаж электрических патронов в квартире,  закрепить ванну.  

- в квартире № 2 - заменить лопнувший стеклопакет на кухне, балконную дверь,  заменить обои, заменить двери в санузел, установить шпингалеты на межкомнатных дверях,  заменить линолеум и подвесные потолки, закрепить розетки, закрыть распределительные  коробки.  

3. по муниципальному контракту № 0116300037715000195 от 16.12.2015 года -  многоквартирный дом № 16/1:  

- в квартире № 35 - заменить водосчётчик ГВС. 

- в квартире № 2 - произвести косметический ремонт в ванной, выполнить ремонт  порога балконной двери.  

4. по муниципальному контракту № 0116300037715000194 от 16.12.2015 года -  многоквартирный дом № 17/1:  

- в квартире № 8 - заменить балконную дверь, отштукатурить откос окна, докрасить  трубы отопления, провести ревизию труб отопления.  

- в квартире № 18 - установить кабель для подключения электрической плиты,  зафиксировать ванну, устранить течь трубы КНС, закрепить линолеум.  

- в квартире № 35 - произвести косметический ремонт в ванной в связи с намоканием  стен от вентиляционных каналов.  

- в квартире № 23 - заменить стеклопакет на балкон двери, привести вентиляцию в  рабочее состояние, отрегулировать межкомнатные двери, установить профиль на стыках  линолеума, устранить складки на натяжном потолке, отрегулировать электрический звонок,  отрегулировать подачу горячей воды.  

- в квартире № 17 - в натяжных потолках выполнить эл проводку для подключения  люстры, отрегулировать балконную дверь, заменить линолеум в прихожей.  

- в квартире № 22 - привести систему вентиляции в работ, установить профиль на  стыках линолеума, устранить причину промерзания окон, установить в полном объёме  фурнитуру на окнах, дверях, закрепить ванну.  

- в квартире № 28 - установить кабель для подключения электрической печи,  зафиксировать ванну, устранить течь стояка, зафиксировать линолеум.  

- в квартире № 31 - заменить фурнитуру входной металлической двери. - в квартире № 32 - заменить бракованную входную металлическую дверь. 

- в квартире № 1 - заменить треснувший стеклопакет, заменить дверную коробку в  ванной в связи с непригодностью.  

- в квартире № 36 - заменить линолеум в квартире, переклеить обои, установить  оконную фурнитуру, заменить балконную дверь, устроить порог на балконе, зафиксировать  ванну.  

5. по муниципальному контракту № 0116300037715000190 от 16.12.2015 года -  многоквартирный дом № 41/3:  

- в квартире № 14 - отрегулировать балконную дверь и заменить ручку на ней,  отрегулировать межкомнатные двери, срезать монтажную пену на балконе, заштукатурить  балкон, застелить пол на балконе.  

- в квартире № 17 - отрегулировать межкомнатные двери и двери на балкон, заменить  стеклопакет в спальне, заштукатурить балкон, застелить пол на балконе, устранить причину  течи с потолка в ванной комнате, отрегулировать вентиляцию.  

- в квартире № 11 - отрегулировать или переустановить балконную дверь.  - в квартире № 7, № 9 - остеклить балкон.  

- в квартире № 13 - отрегулировать межкомнатные двери, устранить причину течи с  потолка балкона.  

- в квартире № 18 и № 23 - заменить стекла в спальне в связи с трещиной.  - в квартире № 3 - заменить стекла в балконной двери в связи с трещиной  

- в квартире № 6 - заменить треснутое окно в комнате, закончить работы на балконе  (подоконник, стена, полы).  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Промышленно -  строительная компания "Вита" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) государственную  пошлину в доход федерального бюджета в размере 6 000 рублей.  

Решение

 по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную  силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного  суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Артамонова Л. И.