РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-21658/20-110-153

г. Москва

24 июля 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 07.07.2020

        Решение в полном объеме изготовлено 24.07.2020

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску   общества с ограниченной ответственностью "ОЛИМПСИТИСТРОЙ" (115230, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НАГАТИНСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 4, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" (119021, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 3, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 53 156 244,69 рублей,  а также встречному иску о взыскании  73 906 358,55 руб.,

при участии:

от истца –  ФИО3 по дов.  от  25.12.2019, 

от ответчика – ФИО4 по дов.  от  07.11.2019,   

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМПСИТИСТРОЙ" обратилось с иском  к акционерному обществу "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" о взыскании (с учетом принятых изменения в порядке ст. 49 АПК РФ) 53 156 244,69 руб. задолженности по оплате за выполненные работы.

Ответчик факт выполнения работ,  их объем и стоимость не оспорил,  при этом  иск не признал  по основаниям,  изложенным в отзыве,  предъявил встречный иск о взыскании 41 977 804,99 руб. неотработанного аванса, 31 928 553,66 руб. задолженности по генподрядным услугам.

общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМПСИТИСТРОЙ" встречный иск в части  долга   в размере 31 928 553, 66 руб.  , 15 150 758,43 руб. неотработанного  аванса не оспорил,  в остальной части встречный иск не признал, по основаниям,  изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон,  исследовав и оценив доказательства,  суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между  обществом с ограниченной ответственностью "ОЛИМПСИТИСТРОЙ"  (Подрядчик) и  акционерным обществом "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" (Заказчик/Генподрядчик) по объекту: «Производственно-логистический комплекс «Нара», расположенный по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, в/г № 3 (II этап)» (шифр объекта 293/726) заключены следующие договоры подряда, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015г. №159-ФЗ определен идентификатор государственного контракта 1516187378982090942000000: Договор № 1516187378982090942000000/ПЛК-09/06-212 от 09.06.2017г. на выполнение проектных работ по электроснабжению; Договор № 1516187378982090942000000/2015/7-9 от 15.07.2015г. на выполнение строительно-монтажных работ; Договор №1516187378982090942000000/2015/10-2 от 15.09.2015г. на выполнение строительно-монтажных работ по демонтажу зданий и сооружений; Договор № 1516187378982090942000000/ПЛК-15/04-112 от 15.04.2016г. на выполнение работ по монтажу наружных систем хозяйственно-бытовой канализации К1, напорной канализации К11, хозяйственно-питьевого водопровода В1, противопожарного водопровода В2 в административно-хозяйственной и складской зоне; Договор № 1516187378982090942000000/ПЛК-16/05-118 от 16.05.2016г. на выполнение работ по монтажу наружных слаботочных сетей, наружного освещения и наружного энергоснабжения; Договор № 1516187378982090942000000/ПЛК-29/06-141 от 29.06.2016г. на выполнение работ по благоустройству территории в административно-хозяйственной зоне.

Генподрядчик является правопреемником АО «ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) , которое прекратило деятельность 17.01.2020 г. путем реорганизации в форме присоединения к АО «ГУОВ»). АО«ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ»являетсяправопреемником ООО «ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  которое 18.03.2016 г. прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования в АО «ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ». 

1. По Договору № 1516187378982090942000000/ПЛК-09/06-212 от 09.06.2017г. на выполнение проектных работ по электроснабжению стоимость работ составляет 3 112 419,73 руб. (п.3.1. Договора).

Со стороны Генподрядчика произведены платежи в общем размере 2 279 607, 84 руб.,  что подтверждается платежными поручениями № 10197 от 03.07.2018 г. и № 557 от 20.02.2018 г.

Генподрядные услуги на сумму 58 451,49 руб. зачтены в счет задолженности Генподрядчика за выполненные работы, что подтверждается актом зачета взаимных требований.

Подрядчиком выполнены в полном объеме, а Генподрядчиком приняты работы на сумму 2 922 574, 15 руб. , что подтверждается  Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 01.02.2018г. и Актом сдачи-приемки выполненных работ №1 от 01.02.2018г. 

В соответствии с п 3.10. Договора, оплата выполненных работ производится в размере 80 % от стоимости выполненных работ. 

В соответствии с пунктом 3.11. Договора окончательный расчет производится Заказчиком в течение 90 банковских дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы. 

Положительное заключение получено 21.06.2019 г. и, соответственно, окончательный расчет со стороны АО «ОСП» должен был быть произведен в срок до 25.10.2019 г.

Таким образом, на текущий момент за Генподрядчиком числится задолженность по данному Договору в размере 584 514, 82 руб.

2. По Договору № 1516187378982090942000000/2015/7-9 от 15.07.2015г. на выполнение строительно-монтажных работ стоимость работ составляет 879 024 239,00 руб. (п.3.1. Договора).

Со стороны Ответчика произведены платежи согласно платежным поручениям: № 000628 от 03.08.2015 г., №000796 от 18.08.2015г., № 000821 от 20.08.2015 г., № 000029 от 09.09.2015г., № 000062 от 11.09.2015 г., № 000192 от 23.09.2015 г., № 4393 от 08.10.2015 г., № 4845 от 11.11.2015 г., № 5265 от 10.12.2015 г., № 000002 от 13.01.2016 г., № 1136 от 26.04.2015г., № 1854 от 10.06.2016 г., № 5509 от 31.10.2016 г., №5629 от 30.12.2015г. в общем размере 448 100 000, 00 руб.

Генподрядные услуги на сумму 33 806 446,91 руб.  зачтены в счет задолженности Генподрядчика за выполненные работы.

Истцом выполнены в полном объеме, а Ответчиком приняты работы на сумм 482 949 241, 57 руб. согласно Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форм КС-3: №1 от 10.12.2015г, № 2 от 31.10.2016г., № 3 от 14.12.2016г., № 4 от 19.12.2016г., № от 26.02.2019г., Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2: № 1-АБК-1.2 о 10.12.2015г, № 2-АБК-1.2 от 10.12.2015г., № З-АБК-1.2 от 10.12.2015г., № 1-АБК-1.2-В1 от 10.12.2015г., № 1-АБК-1.2-ОВ от 10.12.2015г., № 1-АБК-1.2-ИТП от 10.12.2015г., № 1 АБК-1.2-СБ от 10.12.2015г., № 1-АБК-1.2-СЗ от 10.12.2015г., № 2-АБК-1.2-ВК о 10.12.2015г., № 1-ВС-2.14-КЖ от 10.12.2015г., № 1-ВС-2.14-КМ от 10.12.2015г., № 3-ВС 2.14-АР от 10.12.2015г., № 1-ПС-2.12-КЖ от 10.12.2015г., № 1-ПС-2.12-КМ от 10.12.2015г №№ 1-2 от 31.10.2016г., №№ 3-6 от 14.12.2016г., №№ 7-10 от 19.12.2016г., №№5, 11-20 о 26.02.2019г. 

В соответствии с п 4.6., 4.7. Договора, оплата выполненных работ производится в течение 180 (сто восемьдесят) банковских дней с момента подписания КС 2, КС-3 в размере 90 % от стоимости выполненных работ. 

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 180 (сто восемьдесят) банковских дней с дать подписания Итогового акта по Договору (п. 4.8 Договора).

В адрес Генподрядчика 14.03.2019 г. исходящим письмом № 363 Подрядчик направил КС-2, КС-3 на 26 827 046,46 руб. и итоговый акт, которые получены 14.03.2019г 

В соответствии с п. 12.1.3. Договора Генподрядчик осуществляет приемку работ в течение 30 рабочих дней с даты получения КС-2, КС-3, или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке работ.

 В указанный срок от Генподрядчик  мотивированный отказ в адрес Подрядчика не поступал, в связи с чем работы считаются принятыми 25.04.2019 г.  

В ходе судебного разбирательства  Подрядчик заявил о технической ошибке  и уменьшении размера требований,  сославшись на  то,  что в части взыскания задолженности по Договору № 1516187378982090942000000/2015/7-9 от 15.07.2015г. ошибочно указана сумма в размере 1 042 794, 66 руб. в связи с технической ошибкой, допущенной при формировании долга, а именно: не учтен платеж по платежному поручении: №675 от 23.03.2016г. на сумму 50 000 000,00 руб., а также ошибочно на сумму 33 806 446,91 руб. зачтены генподрядные услуги в счет задолженности Ответчика за выполненные работы, т.к. акты (№824 от 31.10.2016г., №810 от 14.12.2016г., №808 от 19.12.2016г., №38 от 31.12.2015  подписаны между сторонами на сумму 31 928 553,66 руб.

3. По Договору №1516187378982090942000000/2015/10-2 от 15.09.2015г. на выполнение строительно-монтажных работ по демонтажу зданий и сооружение стоимость работ составляет 13 367 159,79 руб. (п.3.1. Договора).

Со стороны Генподрядчика произведен платеж в размере 4 000 000, 00 руб., что подтверждается   платежным поручением № 4476 от 15.10.2015 г.

Генподрядные услуги на сумму 904 208,35 руб. зачтены в счет задолженности Генподрядчика за выполненные работы, что подтверждается актом зачета взаимных требование.

Истцом выполнены в полном объеме, а Ответчиком приняты работы на сумму 12 917 262,10 руб. , что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 28.11.2016г. и Актом о приемке выполненных работ по форме № КС-2 №1 от 28.11.2016г. 

В соответствии с п 4.6., 4.7. Договора, оплата выполненных работ производится в течение 180 (сто восемьдесят) банковских дней с момента подписания КС-2, КС-3 в размере 90 % от стоимости выполненных работ. 

Пунктом 4.8. Договора установлено, что окончательный расчет по Договору производится в течение 180 (сто восемьдесят) банковских дней с момента подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением №2 к Договору.

В адрес Генподрядчика 17.07.2017 г. исходящим письмом № 695 Подрядчик  направил  Итоговый акт, который получен   18.07.2017г., однако, до настоящего  времени Генподрядчик не подписал данный акт и не направил мотивированным отказ в течение 10 рабочих дней с момента его получения согласно п. 12.5. Договора,  в связи с чем  считаются принятыми 01.08.2017г. и окончательный расчет должен был быть произведен срок до 24.04.2018г.

Таким образом, на текущий момент за Ответчиком числится задолженность п данному Договору в размере 8 013 053,75 рублей.

4.По Договору № 1516187378982090942000000/ПЛК-15/04-112 от 15.04.2016г. на выполнение работ по монтажу наружных систем хозяйственно-бытовой канализации К1, напорной канализации К11, хозяйственно-питьевого водопровода В1 противопожарного водопровода В2 в административно-хозяйственной и складско1 зоне стоимость работ составляет 185 348 000,00 руб. (п.2.1. Договора).

Со стороны Ответчика произведены платежи в общем размер 151 778 400, 00 руб., что подтверждается   платежными поручениями N 1102 от 22.04.2016 г., № 3093 от 02.08.2016 г. и № 6089 от 24.11.2016 г.

Генподрядные услуги на сумму 12 180 476,97 руб. зачтены в счет задолженности Генподрядчика за выполненные работы, что подтверждается актом зачета взаимных требований .

Подрядчиком  выполнены в полном объеме, а Генподрядчиком приняты работы на сумму 182 042 436, 97 руб., что подтверждается Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форм» КС-3: №1 от 03.11.2016г., № 2 от 19.12.2016г. и №3 от 26.02.2019г., Актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2: №№ 1-4 от 03.11.2016г., №№ 2,5 от 19.12.2016г. , №№3,6,7 от 26.02.2019г. 

В соответствии с п 2.6., 2.7. Договора, оплата выполненных работ производится в течение 10 рабочих дней с момента подписания КС-2, КС-3 в размере 90 % от стоимости выполненных работ.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней с подписания Итогового акта по Договору (п. 2.8 Договора).

В адрес Генподрядчика 14.03.2019 г. исходящим письмом № 363 Подрядчик  направил КС-2 КС-3 на 8 035 623, 11 руб. и Итоговый акт, которые получены Ответчиком 14.03.2019г. 

В соответствии с п. 4.4. Договора Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотрел направленные документы, подписать их или возвратить с обоснованными исправлениями.

 В указанный срок от Заказчика мотивированный отказ в адрес Подрядчика не поступал, в связи с чем работы считаются принятыми 28.03.2019 г. и окончательный расчет с Подрядчиком должен был быть произведен в срок до 16.05.2019 г.

Таким образом, на текущий момент за Ответчиком числится задолженность пс данному Договору в размере 18 083 560, 00 руб.

5.По Договору № 1516187378982090942000000/ПЛК-16/05-118 от 16.05.2016г. на выполнение работ по монтажу наружных слаботочных сетей, наружного освещения и наружного энергоснабжения стоимость работ составляет 89 247 311,83 руб. (п.2.1. Договора).

Со стороны Ответчика произведены платежи согласно платежным поручениям № 1422 от 24.05.2016 г. и № 5439 от 28.10.2016 г. в общем размере 63 000 000, 00 руб.

Истцом выполнены в полном объеме, а Ответчиком приняты работы на сумму 76 129 748, 51 руб. , что подтверждается  Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3: №1 от 03.11.2016г., № 2 от 25.11.2016г. и №3 от 01.10.2019г., Актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2: №№ 1-3 от 03.11.2016г., №№ 2,4,5 от 25.11.2016г. и №3,6 от 01.10.2019г. 

В соответствии с п 2.6., 2.7. Договора, оплата  выполненных  работ производится в течение 10 рабочих дней с момента подписания КС-2, КС-3 в размере 90 % от стоимости выполненных работ.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней с подписания Итогового акта по Договору (п. 2.8. Договора).

В адрес Ответчика 02.10.2019 г. исходящим письмом № 1655 Истец направил КС-2, КС-3 на 15 608 501, 24 руб., которые получены 02.10.2019 г. Также 15.10.2019 г. исходящим письмом № 1714 в адрес Ответчика направлен Итоговый акт по Договору, который получен 16.10.2019г. 

В соответствии с п. 4.4. Договора Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть направленные документы, подписать их или возвратить с обоснованными исправлениями. В указанный срок от Заказчика мотивированный отказ в адрес Подрядчика не поступал, в связи с чем работы считаются принятыми - 16.10.2019 г., итоговый акт подписан - 30.10.2019 г. Соответственно окончательный расчет с Подрядчиком должен был быть произведен в срок до 12.12.2019 г.

Таким образом, по Договору № 1516187378982090942000000/ПЛК-16/05-118 от 16.05.2016г. сумма задолженности составляет 8 893 261,20 руб. с учётом генподрядных услуг в размере 4 236 487,31 руб., согласно подписанным актам: №809 от 03.11.2016г. и №807 от 25.11.2016г.

6.По Договору № 1516187378982090942000000/ПЛК-29/06-141 от 29.06.2016г. на выполнение работ по благоустройству территории в административно-хозяйственной зоне стоимость работ составляет 107 857 291,17 руб. (п.2.1. Договора).

Со стороны Ответчика произведены платежи в общем размере 70 000 000, 00 руб., что подтверждается   платежными поручениями № 2606 от 11.07.2016 г., №2803 от 20.07.2016г. и № 3340 от 11.08.2016 г.

Генподрядные услуги на сумму 5 361 037,89 руб. зачтены в счет задолженности Ответчика за выполненные работы, что подтверждается актом зачета взаимных требований.

Истцом выполнены в полном объеме, а Ответчиком приняты работы на сумму 92 942 892, 81 руб. согласно Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3: №1 от 26.10.2016г., № 2 от 31.10.2016г. и №3 от 26.02.2019г., Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2: № 1 от 26.10.2016г., № 2 от 31.10.2016г., №3 от 26.02.2019г. и №4 от 26.02.2019г. В соответствии с п 2.6., 2.7. Договора, оплата выполненных работ производится в течение 10 рабочих дней с момента подписания КС-2, КС-3 в размере 90 % от стоимости выполненных работ. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней с подписания Итогового акта по Договору (п. 2.8 Договора).

В адрес Генподрядчика 14.03.2019 г. исходящим письмом № 363   направлены КС-2, КС-3 на 16 356 637, 15 руб. и Итоговый акт, которые получены 14.03.2019 г. 

В соответствии с п. 4.4. Договора Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть направленные документы, подписать их или возвратить с обоснованными исправлениями. 

В указанный срок от Заказчика мотивированный отказ в адрес Подрядчика не поступал, в связи с чем работы считаются принятыми 28.03.2019 г. и окончательный расчет с Подрядчиком должен был быть произведен в срок до 16.05.2019 г.

Таким образом, на текущий момент за Ответчиком числится задолженность по данному Договору в размере 17 581 854, 92 руб.

Всего   задолженность Генподрядчика  перед Подрядчиком  составляет  53 156 244,69 руб.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдач; результата выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляете) актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Согласно разъяснениям, содержащихся в п. 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. N 51 "Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда", односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

По Договорам подряда от Генподрядчика мотивированных возражений, касающихся выполненных работ, в порядке ст. 753 ГК РФ в адрес Истца не поступало.

Истец направил в адрес Ответчика досудебные претензии исх.№№: 2072, 2073, 2074,2075, 2076 от 13.12.2019 г., 2121 от 18.12.2019г., с требованием оплатить задолженность, которые оставлены без удовлетворения.

 При указанных обстоятельствах первоначальный иск подлежит удовлетворению.

При этом суд считает доводы Генподрядчика несостоятельными,  а встречный иск  подлежащим удовлетворению частично, исходя из следующего.

По Договору № 1516187378982090942000000/ПЛК-16/05-118 от 16.05.2016г. Генподрядчик  ссылается на  отсутствие задолженности.

Однако, в адрес Генподрядчика  02.10.2019 г. исходящим письмом № 1655 Подрядчик  направил КС-2. КС-3 на 15 608 501, 24 руб., которые получены 02.10.2019   Также 15.10.2019 г. исходящим письмом № 1714   направлен Итоговый акт по Договору, который получен 16.10.2019г.

 В соответствии с п. 4.4. Договора Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть направленные документы, подписать их или возвратить с обоснованными исправлениями. 

В указанный срок от Заказчика мотивированный отказ в адрес Подрядчика не поступал, в связи с чем работы считаются принятыми - 16.10.2019 г., итоговый акт подписан -30.10.2019 г. 

Соответственно окончательный расчет с Подрядчиком должен был быть произведен в срок до 12.12.2019 г.

Таким образом, на текущий момент за Ответчиком числится задолженность по данному Договору в размере 8 893 261,20 руб. (с учётом генподрядных услуг в размере 4 236 487,31 руб. согласно подписанным актам: №809 от 03.11.2016г. и №807 от 25.11.2016г.)

 По Договору № 1516187378982090942000000/ПЛК-29/06-141 от 29.06.2016г. Ответчик указывает, что по данным его бухгалтерского учета перед Истцом числится задолженность в размере 1 225 217, 77 руб., в связи с тем, что не учтены КС-2, КС-3 на 16 356 637, 15 руб.

Однако, в адрес Генподрядчика 14.03.2019 г. исходящим письмом № 363 Подрядчик  направил КС-2. КС-3 на 16 356 637, 15 руб. и Итоговый акт, которые получены 14.03.2019 г. 

В соответствии с п. 4.4. Договора Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть направленные документы, подписать их или возвратить с обоснованными исправлениями. 

В указанный срок от Заказчика мотивированный отказ в адрес Подрядчика не поступал, в связи с чем работы считаются принятыми 28.03.2019 г. и окончательный расчет с Подрядчиком должен был быть произведен в срок до 16.05.2019 г.

Выполнение Подрядчиком своих обязательств по всем Договорам подтверждается также письмом Заказчика строительства - ФКП «УЗКС МО РФ» №55la oт 28.02.2019г.

Таким образом,  встречное  требование в части  неотработанного аванса необоснованно.

Вместе с тем  по договору  от 15.07.2015 № 1516187378982090942000000/2015/7-9,  который  был расторгнут в одностороннем порядке Генподрядчиком путем  направления  ООО «Олимпситистрой» 05.02.2020  уведомления о расторжении Договора № исх-1286 (уведомление получено ООО «Олимпситистрой» 07.02.2020 за вх. № 326), имеется задолженность  по оплате генподрядных услуг, что не оспорено Подрядчиком.

В соответствии с п. 4.19. Договора Подрядчик оплачивает услуги Генподрядчика, связанные с выполнением функции и обязанностей Генподрядчика по управлению ходом выполнения Работ и координации деятельности по выполнению Работ по Договору в размере 7 % от суммы выполненных Подрядчиком и приемки Генподрядчиком Работ по Договору.

В соответствии с п. 4.20. услуги, предусмотренные п. 4.19 Договора оплачиваются Подрядчиком ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным на основании актов приемки-передачи оказанных услуг.

Генподрядчик оказал Подрядчику услуги, связанные с координацией работ, выполненных Подрядчиком, на сумму 31 928 553, 66 руб., что подтверждается двусторонними  актами №38 от 31.12.2015 на 26 499 580,84 руб., № 824 от 31.10.2016 на 226 914,57 руб., № 810 от 14.12.2016 на 3 716 391,77 руб., акт № 808 от 19.12.2016 на 1 485 666,48 руб.

Сумма вознаграждения Генподрядчика за услуги, связанные с координацией работ, выполняемых Подрядчиком, и другие оказанные им услуги в размере 31 928 553, 66 руб. до настоящего времени не оплачена.

Учитывая наличие задолженности, как по оплате выполненных работ,  так и задолженности за оказанные услуги,  судом производится зачет взаимных требований.

На основании изложенного,  руководствуясь ст.ст. 110,123,132,167-171  АПК РФ,

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в полном объеме. Встречный иск  удовлетворить частично- в размере 31 928 553, 66 руб. задолженности, 15 150 758,43 руб. неотработанного  аванса. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет взаимных требований.

Взыскать c акционерного общества "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "ОЛИМПСИТИСТРОЙ" 6 076 932 руб.  60  коп. задолженности, 72 597 руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1