АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А11-3529/2017

г. Владимир

25 августа 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 24.08.2017.

Полный текст решения изготовлен 25.08.2017.

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Романовой В.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации Камешковского района (601300, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Дом" (601901, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании                42 864 руб. 92 коп.; при участии: от истца ФИО2- по доверенности от 29.05.2017 № 17 (сроком действия на 1 год), от ответчика не явились, установил.

Администрация Камешковского района обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Дом" о взыскании пеней в сумме 42 864 руб.92 коп. в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 17.06.2016                     № 0128200000116004348.

Ответчик, признанный в силу статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим образом извещенным о времени и месте проведения судебного заседания, не явился, отзыв не представил, исковые требования не оспорил.

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя ответчика по имеющимся в материалах дела документам.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

17.06.2016 между истцом (заказчик) и ответчиком (поставщик) заключен муниципальный контракт № 0128200000116004348 (далее – контракт), предметом которого является закупка жилого помещения в многоквартирном доме малоэтажной застройки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории город Камешково для нужд муниципального образования город Камешково (пункт 1.1 контракта).

Согласно пунктам 1.2, 1.3 контракта поставщик обязуется передать заказчику в собственность жилое помещение (квартиру), которая расположена в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., Камешковский р-н, МО город Камешково (городское поселение), 

<

...> состоящую из 1 жилой комнаты и балкона (лоджии), общей площадью – 33,8 кв.м, в том числе жилой площадью 20,09 кв.м (далее – квартира), а заказчик – принять квартиру и оплатить за неё цену в соответствии с контрактом. Качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) квартиры изложены в спецификации – приложение             № 1.

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 контракта передача квартиры заказчику осуществляется поставщиком в установленные сторонами сроки поставки в течение десяти рабочих с момента получения уведомления поставщика о готовности квартиры к передаче. Квартира передается поставщиком заказчику. Поставщик обязан в момент передачи квартиры передать заказчику ключи от квартиры и оригиналы следующих документов: кадастровый паспорт; свидетельство о государственной регистрации права собственности поставщика на передаваемую квартиру; документы, подтверждающие отсутствие какой-либо задолженности по передаваемой квартире. Квартира считается переданной поставщиком и принятой заказчиком с момента подписания акта приема-передачи, согласно приложению № 2 к контракту. Акт приема-передачи оформляется в течение 2 дней с момента передачи квартиры.

Согласно пункту 2.6 контракта оплата аванса в размере 30 % от цены контракта будет производится заказчиком на расчетный счет поставщика в течение 10  банковских дней с момента заключения контракта. Аванс погашается после осуществления государственной регистрации права собственности заказчика на квартиру и подписания акта приема-передачи. Окончательный расчет производится по безналичному расчету в течение 30 дней с момента государственной регистрации права собственности заказчика на квартиру и подписания акта приема-передачи квартиры путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Помещения переданы по передаточному акту от 10.10.2016.

Несвоевременное исполнение ответчиком обязательств по передаче жилых помещений, послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Проанализировав представленные в материалы дела документы, арбитражный суд пришел к выводу, что требования истца подлежат частичному удовлетворению, исходя из следующего.

В силу статьей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов обеспечения исполнения обязательства является неустойка, которой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063).

Согласно пункту 7.1 контракта в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств по контракту, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  поставщиком.

Судом установлено и ответчиком не оспаривается, что в установленные договором сроки жилые помещения не были переданы истцу, в связи, с чем истец воспользовалось правом на начисление пени. 

Истец направил ответчику претензию от 02.11.2016 № 01-20-6547 об уплате пени за просрочку исполнения обязательства в размере 42 864 руб. 92 коп. до 30.11.2016.

Проверив расчет пеней, представленный истцом, суд приходит к выводу, что он составлен верно, не противоречит условиям заключенного сторонами спора договора и нормам действующего законодательства.

Доказательства оплаты долга и пеней в добровольном порядке ответчиком суду не представлены. Учитывая, что ответчик нарушил обязательства по своевременной и полной оплате платежей за переданное помещение, он должен нести ответственность в виде уплаты пени. Оснований для уменьшения размера предъявленных к взысканию пеней судом в данном случае не установлено.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию пени в сумме 42 864 руб. 92 коп. за период от 01.09.2016 по 10.10.2016.  

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. взыскиваются с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных требований, поскольку истец в силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от ее уплаты при обращении в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 17, 110, 167-171, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд         

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дом" в пользу администрации Камешковского района пени в сумме 42 864 руб. 92 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Обществу с ограниченной ответственностью "Дом" в десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу уплатить в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 2 000 руб. в порядке, установленном статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации, и представить доказательства ее уплаты в арбитражный суд. 

Выдать исполнительный лист в случае непредставления доказательств уплаты.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                   В.В.Романова