АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-11354/2024  

от 10 декабря 2024 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ОтделТрест" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 14 календарных дней со дня вступления решения  

в законную силу устранить недостатки капитального ремонта кровли жилого дома по адресу:  

<

...>, выполненного на основании договора, а именно: - установить на вентиляционных шахтах по всей площади кровли защитные зонты; - устранить нарушения целостности фальцевого соединения конька в осях 2/А-Б,  

картин настенного желоба в осях 3-4/Г; 

 - выполнить соединение стальных оцинкованных листов, расположенных вдоль ската  

в осях 2-3/А-Б и 1 -2/А-Б в двойной фальц; 

 - надлежаще исполнить участки прохода стояков фановой канализации в осях 3-4/В-Г  

и 3- 4/Б-В, а также антенн через кровельное покрытие; 

 - обеспечить плотное натяжение проходок Master Flash;  

 - выполнить вытяжную часть канализационных стояков с соблюдением нормативных  

значений в части высоты; - установить объемно-диффузионную мембрану (ОДМ) в местах сплошного основания; 

 - устранить перекрытие лотка по ширине в осях 3-4/Б-В;  

 - в осях 3/Б (в месте установленного лотка, воронки) устранить недостаток участка с  

отсутствующим карнизным свесом, нарушением целостности соединения настенного желоба  

и картины карнизного свеса; - обеспечить надлежащее крепление водоприемных воронок к лоткам; 

 - обеспечить герметизацию в местах примыкания лотков и настенных желобов, а  

также в фальцах рядовой кровли. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ОтделТрест" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации "Фонд  

капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) на случай неисполнения решения суда по истечении  

установленного судом срока для добровольного исполнения судебного акта неустойку в  

размере 700 руб. за каждый день просрочки исполнения решения по день его фактического  

исполнения. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ОтделТрест" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья И.Н. Волков