110/2018-39761(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-862/2018

г. Хабаровск

27 марта 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Управления образования администрации Бикинского муниципального  района Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место  нахождения: 682970, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Исида» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 680051, 

<

...>)  

о понуждении устранить недостатки выполненных работ 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать с Общество с ограниченной ответственностью «Исида» в срок  60 календарных дней безвозмездно устранить следующие недостатки  выполненных работ по муниципальному контракту № 0122300021412000040- 0172652-03 от 28.05.2012 на оказание услуг по выполнению в 2012-2013  

годах функций заказчика-застройщика по строительству объекта «Детский  

сад на 80 мест по ул. Октябрьской в г. Бикине»: 

1. На лестничной площадке (пом. 4), в углу стен между первым и  

вторым этажом наблюдается биологическое повреждение, отставание краски.  2. Группа № 3, 1 этаж, санузел девочек (пом. 13):  

2.1. отклонение перегородки от вертикали, примерно на 1 см.  

2.2. отклонение от вертикальной поверхности керамической плитки  

(0,3*0,15*36), где 0,3 и 0,15 размер плитки, 36 - количество плиток.  

2.3. отслоение плитки от стены (0,3*0,15*10) где 0,3 и 0,15 размер  

плитки, 10 - количество плиток. 3. Группа № 4, 2 этаж: 3.1. умывальня (пом. 30): 

- отслоение плитки от стены (0,3*0,15*20), где 0,3 и 0,15 размер  

плитки, 16+4 - количество плиток. 

4. На противопожарном выходе из группы (помещ. 36), трещина на  

армированном стеклопакете (1,3*0,8). 

5. В буфетной отошла коробка от горизонтальной поверхности  

примерно на 20-40 мм. 

6. В коридоре второго этажа между помещениями 15 и 21, 21 и 26  

наблюдаются нитевидные трещины (потолок, стены пол). 

7. На 2 этаже в музыкальном зале (помещ. 24), костюмерная (помещ.  

23) видны потеки па потолке. На 2 этаже, кабинет завхоза (помещ. 2)  

отслоение краски и шпатлевки под окном. 8. Группа № 2, 2 этаж, умывальня (помещ. 9): 

8.1. отслоение плитки от стены (0,3*0,15*250) где 0,3 и 0,15 размер  

плитки, (8*10)+(15*8)+ (4*8)+(9*2) =250- количество плиток.  

9. На втором этаже, в кладовой уборочного инвентаря (помещ. 38)  

вертикальная трещина на плитке по всей высоте стены (3 м).  

10. В хозяйственной кладовой (помещ. 40) сплошное выпучивание  

листов ГВЛ перегородки, отслоение покраски. На 1 этаже в горячем цехе с  

раздаточной (помещ. 20). Отслоение плитки от стены (0,3*0,15*53) где 0,3 и  

0,15 размер плитки, (5*3)+(2*7)+ (3*8) = 53 - количество плиток. 

11. На первом этаже в мясорыбном цехе (помещ. 25), овощном цехе  (помещ. 26) повсеместное выпучивание плитки, отклонение от вертикальной  поверхности.  

12. На первом этаже коридорах (помещ. 24,29,30) нитевидные  трещины, сколы керамогранитной плитки на полу.  

На первом этаже, склад (помещ. 18): горизонтальные трещины на  плитке, отклонение от вертикальной поверхности перегородок, примерно 3-5  мм.  

13.  На первом этаже в стиральной (помещ. 50, гладильня (помещ. 51)  горизонтальные трещины на плитке. На первом этаже, в медицинском блоке  лопнул стеклопакет (2*0,7). В коридоре (помещ. 41) лопнул стеклопакет  (1,5*2,0).  

14.  Крыльцо на выходе из детского сада (помещ. 41) со стороны ул.  Бонивура:  

- Трещины и сколы керамогранитной плитки на крыльце. 

- Возле здания, со стороны ул. Бонивура, отмостка в виде тротуарной  плитки имеет неровности, что позволяет осадкам попадать в фундамент  (14,6+6,4+2,92+2,35+4,4+2,35+2,77+6,40+14,7) * 1 = 56,89 м * 1 м, где 56,89 м  длинна отмостки, 1 м ширина отмостки.  

- При входе в подвал разрушен штукатурный слой. 

- В помещении 6 подвала повсеместное разрушение штукатурного слоя  стен (13,42*2+6,07*2)*2,65- 1,9*1*2=99,5 м2.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Исида» в  пользу Управления образования администрации Бикинского муниципального  района Хабаровского края судебные расходы в виде уплаченной  государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин