АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина д.74, 

<

...>,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А70-27665/2024

г. Тюмень

12 марта 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 февраля 2025 года. Решение в полном объёме изготовлено 12 марта 2025 года.  

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Коряковцевой О.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Смоляк О.А., рассмотрев в судебном заседании заявление  

АО «Россети Тюмень» ИНН 

<

***> к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области 

о признании незаконным и отмене постановления от 11.12.2024 № 072/04/9.21-830/2024 о привлечении к административной ответственности,  

третье лицо – ФИО1, при участии: 

представитель заявителя – ФИО2 по доверенности от 01.12.2024 № 103/901 (посредством онлайн- заседания),  

установил:

АО «Россети Тюмень» (далее – Общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (далее - ответчик, Управление) от 11.12.2024 № 072/04/9.21-830/2024 о привлечении к административной ответственности.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен потерпевший ФИО1.  

Управление и третье лицо своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.  

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении.  

Заслушав его объяснения, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.  

Между ФИО1 и Обществом 29.12.2023 заключен Договор технологического присоединения № Т13/23/9934-ДТП-1, предметом которого является подключение малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом, садовый, дачный дом), расположенной по адресу: Тюменская область, Тюменский р-н, с.п. Мальковское, тер. ТСН Пятница, ул. Душевная, з/у 11 с кадастровым номером 72:17:1206002:3143.  

14.02.2024 ФИО1 оплачен выставленный ему счет за подключение.  

Согласно подп. «б» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.  

Пунктом 104 тех же Правил определено, что наличие заключенного договора подтверждается документом об оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.  

Такими образом, вышеуказанный договор считается заключенным 14.02.2024, следовательно, мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены в срок до 14.08.2024.  

В установленный срок фактическое присоединение к электрическим сетям по вышеуказанному договору Обществом не осуществлено.  

В этой связи ФИО1 04.10.2024 подано в Управление обращение по данному факту.  

По результатам рассмотрения обращения, уполномоченным должностным лицом Управления в отношении АО «Россети Тюмень» составлен протокол об административном правонарушении от 25.11.2024 № 072/04/9.21830/2024 по признакам ч.2 ст.9.21 КоАП РФ.  

На основании данного протокола и материалов проверки Управлением вынесено оспариваемое постановление от 11.12.2024 № 072/04/9.21-830/2024, которым Общество привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ в виде штрафа в размере 700 000 руб.  

Частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям.  

Согласно части 2 статьи 9.21 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.  

При этом квалификация деяния Общества по ч. 2 с.9.21 КоАП РФ обусловлена наличием постановления от 15.01.2024 № 072/04/9.21-680/2023.  

Вина Общества выразилась в непринятии всех зависящих мер по недопущению правонарушения. 

В целях недопущения нарушения положений Правил подключения Общество должно было принять все зависящие от него меры, для обеспечения выполнения предусмотренных законом требований, а именно заранее начать совершать действия по проведению закупки и строительству объекта электрической сети. Доказательств невозможности принятия всех соответствующих необходимых и исчерпывающих мер Общество в ходе административного производства не представило. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения заявителем действующих норм и правил, нарушение которых послужило основанием для привлечения к административной ответственности, в материалах дела не имеется.  

Факт правонарушения сам по себе свидетельствует о том, что предпринятые Обществом меры оказались недостаточными для своевременного осуществления технологического присоединения.  

Вместе с тем, арбитражный суд считает возможным в порядке ст.4.1 КоАП РФ снизить назначенный Обществу штраф до 350 000 руб., поскольку до вынесения оспариваемого постановления, а именно, 27.11.2024 Общество осуществило технологическое присоединение.  

С учетом незначительного периода просрочки с 15.08.2024 по 27.11.2024 и состоявшегося технологического присоединения размер штрафа 350 000 руб., по мнению суда, является соразмерным совершенному правонарушению, отвечает целям административного наказания и является достаточным в данном конкретном случае. Назначенный штраф является справедливым и соразмерным административным наказанием с учетом объекта посягательства, характера и последствий правонарушения, а также степени вины правонарушителя.  

При таких обстоятельствах, арбитражный суд полагает необходимым требования заявителя удовлетворить частично.  

Руководствуясь ст.ст.167 и 211 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Заявленные требования удовлетворить частично.  

Постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области от 11.12.2024  

 № 072/04/9.21-830/2024 о привлечении к административной ответственности изменить в части назначения  

наказания, снизив размер назначенного АО «Россети Тюмень» административного штрафа до размера 350 000  

рублей. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Восьмой арбитражный  

апелляционный суд. 

 Судья Коряковцева О.В.