Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-8833/2017

г. Хабаровск

28 августа 2017 года

Резолютивная  часть  решения  объявлена 21 августа 2017  

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Росстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680052, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 634009, 

<

...>) 

о взыскании 16 732 370 руб. 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, действующего по ордеру от 21.08.2017 б/н, 

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.

 

     Общество с ограниченной ответственностью «Росстрой» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз Сибирь» о взыскании 16 732 370 руб., составляющих основной долг 16 150 970 руб., неустойку в размере 581 400 руб. за периоды с 01.03.2016 по 01.07.2017, просило начислять неустойку с 02.07.2017 по день фактической оплаты основного долга.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ  истец заявил отказ от искового требования о взыскании основного долга в размере 16 150 970 руб., заявил об уменьшении неустойки до 571 744 руб. за периоды с 01.03.2017 по 28.06.2017.

Частичный отказ от иска, уменьшение размера неустойки судом приняты, так как данные распорядительные действия закону не противоречат, прав других лиц не нарушают. 

В соответствии со статьей 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Производство по требованию о взыскании основного долга в размере 16 150 970 руб.  подлежит прекращению.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить,  в качестве обстоятельств, на которых основаны исковые требования, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из   договора подряда от 15.08.2016 № СТГС-ПДР-370, выполнение субподрядчиком работ на сумму 16 150 970 руб., ненадлежащее исполнение заказчиком обязанности по оплате выполненных работ, возникновение права на взыскание неустойки в размере 571 744 руб.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что  исковое требование о взыскании неустойки не подлежит удовлетворению, поскольку в отсутствие подписанного акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 обязанность по оплате выполненных работ не наступила.

Дело подлежит рассмотрению в порядке ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд 

УСТАНОВИЛ:

15.08.2016 между  обществом с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз Сибирь» (далее – подрядчик, ООО «Стройтрансгаз Сибирь») и обществом с ограниченной ответственностью «Росстрой» (далее – субподрядчик, ООО «Росстрой») заключен договор подряда № СТГС-ПДР-370, в соответствии с которым субподрядчик обязуется выполнить своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиком субподрядных организаций по заданию подрядчика, качественно, в установленный настоящим договором срок, в соответствии с проектной документацией выполнить Работы на объекте: «Газопровод-отвод и ГРС Вяземский Хабаровского края» (далее - объект) в соответствии с Приложением № 1 «Ведомость объемов работ», Приложением № 2 «Расчет договорной цены строительства», Приложением № 4 «График производства Работ» (далее - работы), а подрядчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

В соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2016 № 1 к договору подряда от 15.08.2016 № СТГС-ПДР-370 цена работ определена в Расчете договорной цены строительства (Приложение № 2 к договору) и составляет 16 150 970 руб. 02 коп.,  в том числе НДС 18% - 2 463 707 руб. 29 коп.

Пунктом 4.4. договора подряда предусмотрено, что оплата выполненных субподрядчиком работ производится подрядчиком в течение шестидесяти календарных дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ формы № КС-2, № КС-3.

В силу пункта 4.5. договора подряда окончательный расчет за выполненные субподрядчиком работы по настоящему договору с учетом возможных изменений производится подрядчиком в течение  шестидесяти календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

Пунктом 5.1. договора подряда предусмотрено, что работы, указанные в пункте в п.2.1. договора, должны быть выполнены субподрядчиком в сроки, определенные в Графике производства Работ (Приложение № 4).

Дополнительным соглашением от  15.08.2016 к договору подряда от 15.08.2016 № СТГС-ПДР-370 предусмотрено, что в случае не достижения соглашения путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора, в том числе касающиеся его исполнения нарушения, прекращения или недействительности, подлежит разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края.

Субподрядчиком выполнены работы на сумму 16 150 970 руб. 02 коп.,  что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 28.12.2016 № 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 28.12.2016 № 1.

ООО «Росстрой» выставило ООО «Стройтрансгаз Сибирь» счет-фактуру от 28.12.2016 № 87 на сумму 16 150 970 руб. 02 коп.

Субподрядчиком  подрядчику направлена претензия от 07.03.2017 б/н с требованием оплатить основной долг в размере 16 150 970 руб. 02 коп. до 20.03.2017.

Подрядчиком произведена оплата выполненных работ на сумму 16 150 970 руб. 02 коп., что подтверждается платежным поручением   от 28.06.2017 № 4819.

Рассматриваемые отношения основаны на обязательствах строительного подряда.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

В силу статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 14.12. договора подряда предусмотрено, что в случае нарушения подрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых подрядчиком по договору работ, с подрядчика может быть взыскана пеня в размере 0,03% за каждый день просрочки от стоимости несвоевременно оплаченных работ, но не более 10 % от стоимости несвоевременно оплаченных работ.

Расчет неустойки произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (начисление за периоды с 01.03.2017 по 28.06.2017), в размере 0,03% от стоимости несвоевременно оплаченных работ за каждый день просрочки,  что составляет 571 744 руб. 

Довод ответчика о том, что обязанность по оплате выполненных работ не наступила, судом не принимается, поскольку неустойка начислена за периоды с 01.03.2017 по 28.06.2017, по истечении шестидесяти календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, что не противоречит пункту 4.4. договора подряда от 15.08.2016 № СТГС-ПДР-370.

Исковое требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в размере 571 744 руб. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 14 435 руб.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  арбитражный суд 

Р Е Ш И Л

     Иск удовлетворить.

     Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 634009, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Росстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680052, 

<

...>) неустойку в размере 571  744 руб.

     Производство по требованию о взыскании основного долга в размере 16 150 970 руб. прекратить. 

     Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 634009, 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 435 руб. 

     Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

     Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                           Л.А. Збарацкая